АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-27404/2025

г. Новосибирск

17 сентября 2025 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой О.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Савченко А.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Муниципального казенного учреждения города Новосибирска "Управление дорожного строительства" (ИНН 

<

***>), г. Новосибирск  

к обществу с ограниченной ответственностью "Перлит-Строй" (ИНН 

<

***>), г. Новосибирск  

об обязании устранить гарантийные обязательства, при участии представителей: 

от истца – ФИО1, доверенность № 41 от 22.05.2025, служебное удостоверение, диплом;  

от ответчика – не явился, извещен, 

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Перлит-Строй" (ИНН 

<

***>) в течение 1 месяца с момента вступления решения суда в законную силу, при наступлении климатических условий (в сухую погоду весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5°С, осенью - не ниже 10°С), устранить следующие недостатки (дефекты) в выполненных  

работах но муниципальному контракту от 25.02.2020 № 17/20, в части дефектов:  

1) по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Большевистской в Октябрьском районе г.Новосибирска»:  

- колейность на асфальтобетонном покрытии по направлению в город: левая полоса от ул. Большевитская, 131 к3 до пешеходного моста (начало пешеходного ограждения) 26-32 мм 100м; средняя полоса от пешеходного моста до светофора Большевистская, 113 26-30мм 600м и 50м до светофора две средних; средняя полоса перед ФИО2 28-32мм 30м; от ФИО2 в сторону Выборной: перед светофором Большевистская, 14/1 средняя полоса 26-34 мм 30 м; левая полоса от начала тросового ограждения и до его конца 26-32мм 250м; средняя полоса от Большевистская, 26в до пешеходного моста 26-32 мм 40м; от Большевистская, 34 до границы участка Большевистская, 48 две средние полосы 28-32мм 150м - 3900 кв.м.;  

2) по объекту «Капитальный ремонт на перекрестке Бердское шоссе - проспект Строителей в Советском районе г. Новосибирска»:  

- колейность на асфальтобетонном покрытии по направлению в сторону города Бердска: средняя полоса вторая от обочины до опоры ЛЭП за перекрестком 200м 27-33мм; на повороте после путепровода в сторону в сторону города перед знаком уступи дорогу и пешеходным переходом 60м; после путепровода в сторону ул. Балтийской от начала треугольника безопасности до островка безопасности посередине перекрестка 27-32мм 45м; возле островка безопасности посередине перекрестка по направлению от ул. Балтийской в сторону Академгородска 15м; перед перекрестком светофором вдоль островка безопасности по направлению из Бердска в Новосибирск две полосы правая и средняя 27-33 мм 80 м - 1 725 кв.м.;  

- разрушение примыканий к колодцам и просадка колодцев перед путепроводом в сторону Бердского шоссе - 1 шт.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Перлит-Строй" (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 15 000 рублей.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья О.В. Суворова