Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-64264/2018

19 ноября 2018 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  13 ноября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  19 ноября 2018 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: акционерное общество "ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АЭС" (адрес:  Россия 119180, г МОСКВА, г МОСКВА, ул ПОЛЯНКА Б. 25/СТР.1, ОГРН:  1097746833282);

ответчик: акционерное общество "КУЗНЕЧНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "ИЖОРА-МЕТАЛЛ" (адрес:  Россия 190103, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул 13-Я КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 22/ЛИТ. А/ПОМ. 1Н, ОГРН:  1027808752333);

о взыскании 1339523.64

при участии

- от истца: ФИО2. по доверенности от 04.06.18.

- от ответчика: Ровинских С.А.К. по доверенности от 02.11.18,

установил:

АО "ДЭЗ" обратилось в суд с иском о взыскании с АО "КМЗ "ИЖОРА-МЕТАЛЛ" 1 339 523 руб. 00 коп. неустойки за нарушение сроков поставки оборудования по договору №2011-Р04-92 от 29.12.11.

Ответчик просит уменьшить неустойку на основании ст. 333 ГК РФ до 257 960 руб. 30 коп.

Судом установлено:

Между сторонами был заключен договор №2011-Р04-92 от 29.12.11.

Согласно п.2.1 договора поставщик – ответчик обязался изготовить и поставить оборудование для Ростовской АЭС в сроки, указанные в Спецификации в редакции дополнительного соглашения №3 от 10.07.15.

Оборудование было поставлено с нарушением установленного срока.

Неустойка за нарушение срока поставки составила 1 339 523 руб. 00 коп.

Суд учитывает доводы ответчика, изложенные в отзыве о том, что подписанные дополнительным соглашением №3 от 10.07.15 о проведении гидравлических испытаний привело к изменению сроков выполнения обязательств, однако срок поставки оборудования не был изменен.

Суд полагает возможным уменьшить подлежащую взысканию неустойку на основании ст. 333 ГК РФ до 650 000 руб. 00 коп.

Руководствуясь статьями 309, 310, 330, 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с Акционерного общества "КУЗНЕЧНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "ИЖОРА-МЕТАЛЛ" в пользу Акционерного общества "ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АЭС" 650 000 руб. 00 коп. неустойки и 26 395 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.