31/2023-423656(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД CАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443001, г. Самара, ул. Самарская, 203 «Б», тел. (846)207-55-15 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ  (Резолютивная часть) 

12 декабря 2023 года Дело № А55-28859/2022 Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Лигерман А.Ф., 

при ведении протокола судебного заседания 07.12.2023 помощником судьи Ширкуновой  С.А., 12.12.2023 секретарем ФИО1  

рассмотрев в судебном заседании 07.12.2023 – 12.12.2023 (в судебном заседании был  объявлен перерыв в порядке ст. 163 АПК РФ) дело по иску  

Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Провинция"  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к Некоммерческой организации "Региональный оператор Самарской области "Фонд  Капитального Ремонта" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

об обязании 

третье лицо - Общество с ограниченной ответственностью "Высота"  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО2 по доверенности от 09.01.2023, от ответчика – не явился, извещен надлежащим образом от третьих лиц - не явились, извещены надлежащим образом 

Руководствуясь ч. 1 ст. 110, ст.ст. 167-171, 176, 180-182 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации  

Р Е Ш И Л:

Обязать Некоммерческую организацию "Региональный оператор Самарской области  "Фонд капитального ремонта" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) безвозмездно  устранить недостатки работ по капитальному ремонту общедомового имущества (кровля) в  МКД по адресу 

<

...>, а именно:  

1. произвести демонтаж ограждения кровли многоквартирного дома № 4 по пр.  Королёва г. Сызрани в объёме 100% с последующим выполнением работ по установке  ограждений, соответствующих требованиям ГОСТ Р 53254-2009 «Лестницы пожарные  наружные стационарные. Ограждения кровли».  

2. произвести ремонт кровли многоквартирного дома № 4 по пр. Королёва г.  Сызрани в местах выполнения крепления стоек существующих ограждений.  

3. произвести демонтаж желобов наружного водостока многоквартирного дома № 4  по пр. Королева г. Сызрани в объёме 100% с последующим выполнением работ по их  устройству.  

4. произвести устройство системы обогрева карниза кровли и водосточной системы  многоквартирного дома № 4 по пр. Королева г. Сызрани.  

5. произвести замену противопожарных люков выхода на крышу многоквартирного  дома № 4 по пр. Королева г. Сызрани.  

6. произвести устройство узлов примыкания к фановым трубам и вентиляционным  шахтам многоквартирного дома № 4 по пр. Королева г. Сызрани в соответствии с  проектной документацией.  

Установить срок устранения недостатков в течение трех месяцев с момента  вступления решения суда в законную силу.  

Взыскать с Некоммерческой организации "Региональный оператор Самарской  области "Фонд капитального ремонта" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу  Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Провинция"  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) расходы по оплате государственной пошлины в  размере 6 000 руб., расходы по оплате судебной строительной-технической экспертизы в  размере 80 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный  суд, г. Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской  области в установленные законом сроки.  

Судья / А.Ф. Лигерман