АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А03-4101/2023

22 апреля 2024 г.

г. Барнаул

 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Сосина Е.А., при ведении  протокола секретарем судебного заседания Мутылиной О.В., рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 

<

***> ИНН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «Северное агроразвитие» (ОГРН 

<

***> ИНН  

<

***>), место нахождения: 630102, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск,  

<

...>, этаж 2, помещ. 4,5,11,12,13) о взыскании  3 182 769 руб.  

и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Северное  агроразвитие» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), место нахождения: 630102,  Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, 

<

...>, этаж 2, помещ. 4,5,11,12,13) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП 

<

***> ИНН 

<

***>) об обязании устранить  недостатки в выполненных работах,  

при участии:  

от истца (ответчика по встречному иску): ФИО2 - представителя по  

доверенности; 

от ответчика (истца по встречному иску): ФИО3 - представителя по  

доверенности, ФИО4 - представителя по доверенности 

Руководствуясь статьями 49, 70, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

иск общества с ограниченной ответственностью «Северное агроразвитие»  удовлетворить.  

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 в  течение 30 дней с даты вступления настоящего решения суда в законную силу устранить  недостатки, допущенные при выполнении работ договору подряда по капитальному  ремонту и реконструкции ЗАВ № 21-11/2022 от 27.06.2022, на объекте  Зерноочистительный комплекс ЗАВ-60, расположенном по адресу: Алтайский край,  Бурлинский район, с. Бурла, путем выполнения следующих работ:  

- демонтаж профилированного листа с поверхности кровли с охранением. Объем  работ 177,8 кв.м.;  

- монтаж профилированного листа по металлическим балкам, с добавлением  материала. Объект работ 177,8 кв.м.;  

- окраска металлических поверхностей грунт-эмалью по ржавчине в два слоя.  Объем работ 346,5 кв.м.;  

- демонтаж трех пролетов лестницы. Объем работ 0,618 тонн.; - изготовление и монтаж трех пролетов лестницы. Объем работ 0,618 тонн.; 

- оштукатуривание бетонных оснований песчано-цементным раствором. Объем  работ 2 кв.м.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Северное агроразвитие» 1 800 руб. в  счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины и 85 000 руб. в счет  возмещения судебных издержек по экспертизе.  

Иск индивидуального предпринимателя ФИО1  удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Северное агроразвитие» в  пользу индивидуального предпринимателя ФИО1  

2 327 978 руб. долга, 854 791 руб. пени за период с 06.12.2022 по 22.04.2024, пени с  23.04.2021 по день фактической оплаты долга, исходя из ставки 0,1% от суммы  

1 920 879 руб., а при достижении фактического остатка задолженности суммы менее  1 920 879 руб. - исходя из фактического остатка долга, за каждый день просрочки, а также  23 000 руб. в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины и 85 000  руб. в счет возмещения судебных издержек по экспертизе.  

В результате судебного зачета взыскать с общества с ограниченной  ответственностью «Северное агроразвитие» в пользу индивидуального предпринимателя  ФИО1 2 327 978 руб. долга, 854 791 руб. пени за период с  06.12.2022 по 22.04.2024, пени с 23.04.2021 по день фактической оплаты долга, исходя из  ставки 0,1% от суммы 1 920 879 руб., а при достижении фактического остатка  задолженности суммы менее 1 920 879 руб. - исходя из фактического остатка долга, за  каждый день просрочки, а также 21 200 руб. в счет возмещения расходов по уплате  государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Северное агроразвитие» в  доход федерального бюджета РФ 11 714 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск, в течение месяца со дня принятия  решения, либо в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со  дня вступления решения в законную силу, если такое решение было предметом  рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья Е.А. Сосин