Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А42-10653/2023

город Мурманск

25 июня 2024 года

Руководствуясь статьями 110, 112, 167, 174 и 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Мурманской области  

решил:

иск удовлетворить. 

Обязать ООО «Стройтрест № 6» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение месяца  со дня вступления настоящего решения суда в законную силу устранить и сдать МКУ «УКГХ»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) по акту приема-передачи выполненных работ  недостатки выполненных работ по капитальному ремонту здания МАУ «СШ города Кировска»,  расположенного в городе Кировске Мурманской области по адресу улица 50 лет Октября, дом 31, а  именно:  

- выполнить замену ступеней в количестве 34 штук (по факту), выполненных из двух частей  просечно-вытяжного листа, в соответствии с проектной документацией (шифр 1-МК/УКГХ2021- АС, л. 19) - цельными сплошными листами ПВ 506x1200x250, без стыковочных соединений, (по  проекту количество ступеней - 42 шт. (8+13) х 2),  

- выполнить сварные соединения просечно-вытяжного листа на выходных площадках  эвакуационных лестниц в количестве 12,12 (2,02х3)х2) п.м. и переходных площадках  эвакуационных лестниц в кол-ве 10,55 (2,637х2)х2) п.м. в надлежащем качестве в соответствии с  рекомендациями ООО «АрхСтиль и Дизайн» (исх. МКУ «УКГХ» от 14.11.2022 № 2496),  

- выполнить надлежащим качеством сварные соединения в количестве 72,24 п.м. (суммарный  объём всех сварных соединений), согласно «ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Соединения  сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры» и в соответствии с «ГОСТ 231182019. Межгосударственный стандарт. Конструкции стальные строительные. Общие технические  условия»,  

- выполнить зачистку сварочных соединений в количестве 72,24 п.м., а также участков  металлоконструкций, подверженных коррозии,  

- выполнить 100% зачистку ранее нанесённого окрасочного слоя металлических конструкций  эвакуационных лестниц, с последующей окраской эмалью ПФ 115 ГОСТ 6465-76 в два этапа в  объеме 150 (75,0х2) м2, в соответствии с проектной документацией (шифр 1-МК/УКГХ2021-АС, л.  6),  

- установить заглушки в верхней части металлических колонн в количестве 12 штук. 

Взыскать с ООО «Стройтрест № 6» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход  федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6 000 рублей.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в месячный срок со дня  принятия.  

Судья А.Е.Тарасов