1219/2023-164375(1) 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А47-6186/2023

г. Оренбург

15 августа 2023 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Лебедянцевой  Анны Александровны, при ведении протокола секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания  Грачевское жилищно-коммунальное хозяйство», ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>, Оренбургская область, Грачевский р-н, с. Грачевка,  

к Администрации муниципального образования Грачевский сельсовет  Грачевского Оренбургской области, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>,  Оренбургская область, Грачевский р-н, с. Грачевка,  

о внесении изменений в концессионное соглашение № 2 от 10.01.2020 

Руководствуясь статьями 101, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить. 

Изменить заключенное между ООО «Управляющая компания Грачевское  жилищно-коммунальное хозяйство» и муниципальным образованием  Грачевский сельсовет Грачевского района Оренбургской области, в лице  администрации муниципального образования Грачевский сельсовет  Грачевского района Оренбургской области Концессионное соглашение № 2 от  10.01.2020, в отношении объектов теплоснабжения муниципального  образования Грачевский сельсовет Грачевского района Оренбургской области.  

Внести в Концессионное соглашение № 2 от 10.01.2020, заключенное  между ООО «Управляющая компания Грачевское жилищно-коммунальное  хозяйство» и муниципальным образованием Грачевский сельсовет Грачевского  района Оренбургской области, от имени которого выступает администрация  муниципального образования Грачевский сельсовет Грачевского района  

Оренбургской области в отношении объектов теплоснабжения муниципального  образования Грачевский сельсовет Грачевского района Оренбургской области  следующие изменения:  

1) в пункте 9.16 Концессионного соглашения сумму расходов «...486686.00  рублей...» заменить на «...603839,00 рублей...»;  

2) в пункте 13.2 Концессионного соглашения сумму расходов «...486686.00  рублей...» заменить на «...603839,00 рублей...»;  

3) Приложение № 3 к концессионному соглашению в отношении объектов  теплоснабжения муниципального образования Грачевский сельсовет  Грачевского района Оренбургской области читать в новой редакции:  

Задание и основные мероприятия по Реконструкции путем модернизации  Объектов соглашения  

Цели Концессионного соглашения: 

- повышение качества и надёжности теплоснабжения Потребителей в  границах муниципального образования Грачевский сельсовет Грачевского  района Оренбургской области;  

- снижение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой  энергии;  

- повышение эффективности производства тепловой энергии и поставки её  Потребителям;  

- снижение себестоимости поставляемой Потребителям тепловой энергии.  Концессионер обязан осуществить следующие основные мероприятия  

по реконструкции путем модернизации Объекта соглашения: 

Л1" п/п 

Наименование объекта 

Адрес 

Описание мероприятия 

Предельные расходы  

на техническое 

перевооружение и  реконструк-цию  

(тыс.руб., с НДС)  

Концессионер/кон  цедент  

Сроки ввода объекта в эксплуатацию 

1. 

Инфекционное отделение 

с. Грачевка ул. ФИО2 1 а 

2020г. Поверка и ремонт корректора 

TC-220. 

Замена котла ЯИК -80. 

2021г. 

Замена запорной арматуры. 

52.552/78.183 

2020г. 

2021г. 

2 

Терапевтический  корт с  

<

...>  

2020г.  

Замена запорной арматуры.  Замена котла Хопер-100. 2021г.  

Замена СЛОГ  Замена котла Хопер-100  

2023г. 

Замена оборудования котельной с  целью обеспечения бесперебойного  и надежного теплоснабжения  

потребителей  

189.013 / 513.368 

2020 г. 

2021 г. 

-> j 

Хирургический корпус 

<

...>  

2020г.  

Замена электромагнитного  

клапана КГ-70 . Замена котла  Хопер-100 2021г.  

Замена запорной арматуры. Замена  котла Хопер-100 2023 г.  

Замена оборудования котельной с  целью обеспечения бесперебойного  

и надежного теплоснабжения  потребителей  

190,446/416.403 

2020 г. 

2022023 г. 1 1. 

4 

Поликлиника и 

родильный корпус  

<

...>  

2020г.  Замена запорной арматуры Замена  

котла КОВУ-100 

2021г.  Замена электромагнитного  

клапана КГ-70 

Замена котла КОВУ-100  

2023 г.  Замена оборудования  

котельной с целью 

обеспечения бесперебойного  и надежного теплоснабжения  потребителей  

171.828 /462.219 

2021 г. 

2023 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения  муниципального образования Грачевский сельсовет Грачевского района  Оренбургской области  

Предельный размер расходов Концедента на реконструкцию путем  модернизации _ объекта соглашения (тыс. руб).___  

Год действия концессионного соглашения 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

Всего 

Котельная, Инфекционное отделение 

78,183 

0 

0 

0 

0 

78.183 

Котельная, 

Терапевтический корпус  

82,719 

82.719 

0 

347,930 

0 

513,368 

Котельная. 

Хирургический корпус  

82.719 

82.719 

0 

250,965 

0 

416.403 

Котельная, Поликлиника и  родильный корпус  

79,500 

82,719 

0 

300.000 

0 

462,219 

ИТОГО 

323,121 

248,157 

0 

898.895 

0 

1470,173 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения  муниципального образования Грачевский сельсовет Грачевского района  Оренбургской области  

Предельный размер расходов Концессионера на реконструкцию путем  модернизации  

объекта соглашения (тыс. руб). 

Год действия концессионного соглашения 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

Всего 

Котельная, Инфекционное отделение 

38.883 

13,669 

0 

0 

0 

52,552 

Котельная, 

Терапевтический корпус  

52,045 

80,224 

0 

56,744 

0 

189,013 

Котельная, 

Хирургический корпус  

378.076 

53.038 

0 

100,332 

0 

190,446 

Котельная, Поликлиника и  родильный корпус  

56,632 

62.369 

0 

52.827 

0 

171,828 

ИТОГО 

184,636 

209,30 

0 

209,903 

0 

603,839 

Взыскать с муниципального образования Грачевский сельсовет  Грачевского района Оренбургской области в лице Администрации  муниципального образования Грачевский сельсовет Грачевского района  Оренбургской области за счет средств бюджета муниципального образования  Грачевский сельсовет Грачевского района Оренбургской области в пользу  общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания  Грачевское жилищно - коммунальное хозяйство" расходы по оплате  государственной пошлины в размере 1 800 руб. 00 коп.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая  компания Грачевское жилищно - коммунальное хозяйство" из федерального  

бюджета государственную пошлину в размере 4 200 руб. 00 коп., как излишне  уплаченную, выдав справку.  

Исполнительный лист и справку на возврат выдать истцу в порядке  статей 319, 320 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации после вступления решения в законную силу.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  арбитражный суд апелляционной инстанции в течении месяца со дня его  принятия (изготовления в полном объеме), жалоба может быть подана через  Арбитражный суд Оренбургской области.  

В соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации решение направляется путем его размещения в виде  электронного документа на официальном сайте арбитражного суда в  информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

 Судья А.А. Лебедянцева 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 09.03.2023 8:36:00

 Кому выдана Лебедянцева Анна Александровна