Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город  Волгоград

« 19 » января 2024 г.

Дело № А12-25972/2023

Резолютивная часть решения объявлена 18 января 2024 года. 

Полный текст решения изготовлен 19 января 2024 года.  

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Стрельниковой Н.В. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Николенко И.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Стартен» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к Унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании денежных средств 

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, по доверенности; ФИО2, по доверенности;

от ответчика – ФИО3, по доверенности 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Стартен» (далее-истец) обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к Унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее - ответчик) о признании незаконным одностороннего отказа Унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» от исполнения обязательств по оплате работ, выполненных по договору от 11.02.2021г. № 1513443-В-ПСД-СМР-2021-2022, в соответствии с ценами, согласованными в дополнительном соглашении от 26.12.2022 г. № 16; о взыскании задолженности по договору от 11.02.2021 г. № 1513443-В-ПСДСМР-2021-2022 в размере 476 177 655 руб. 09 коп.

18.01.2024г. до рассмотрения спора по существу истец в порядке ст. 49 АПК РФ заявил об уточнении размера исковых требований  в котором  заявил о частичном отказе от исковых требований в части признании незаконным одностороннего отказа Унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» от исполнения обязательств по оплате работ, выполненных по договору от 11.02.2021 г. № 1513443-В-ПСД-СМР-2021-2022, в соответствии с ценами, согласованными в дополнительном соглашении от 26.12.2022 г. № 16 и просит взыскать с ответчика в пользу истца задолженность по договору № 1513443-В-ПСД-СМР-2О21-2О22 от 11.02.2021 г. в сумме 476 177 665,09 руб.

Частью 2 статьи 49 АПК РФ истцу предоставлено право до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Отказ от части исковых требований судом принимается, поскольку это не противоречит действующему законодательству и не нарушает прав и законных интересов третьих лиц.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования.

Ответчик возражает против удовлетворения исковых требований. В предоставленном отзыве указал, что в рамках исполнения договора подрядной организацией разработана и региональным оператором принята проектно-сметная документация на замену лифтов, в составе которой подрядной организацией разработаны локальные сметные расчеты на выполнение работ по замене лифтов. Расценки, предусмотренные в дополнительном соглашением №16 от 26.12.2022 соответствовали предельной стоимости, утвержденной приказом комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской обл. от 01.10.2021 N 131-ОД. В период 2023 года подрядчик предъявил к приемке акты выполненных работ по замене лифтов 6-8 этапов согласно расценкам, утвержденным Дополнительным соглашением №16 от 26.12.2022г.  в соответствии с действующим законодательством.

Изучив материалы дела, выслушав стороны, оценив фактические обстоятельства, суд приходит к следующему.

Как следует из материалов дела между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) 11.02.2021 заключен договор № 1513443-В-ПСД-СМР-2О21-2О22 (далее  Договор подряда), по условиям п. 2.1 которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по оказанию услуг и (или) выполнению работ по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества (замена лифта (лифтов), а также проведению работ по замене лифта (лифтов) в многоквартирных домах г. Волгограда Волгоградской области, выполняемых и оплачиваемых в соответствии с условиями настоящего Договора.

Оказание услуг и (или) выполнение работ, указанных в настоящем пункте, осуществляются по Объектам, согласно адресному перечню.

Согласно п.2.2. Договора подряда Услуги и (или) работы, являющиеся предметом настоящего Договора, должны соответствовать техническим, экономическим и другим требованиям технического задания, ТУ, СНиП, Приказу комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области от 22.06.2020 N І22-ОД «Об утверждении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории Волгоградской области, оказание и (или) выполнение которых финансируется региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, с учетом средств государственной поддержки, муниципальной поддержки», локальным сметным расчетам, разработанным в составе ПСД, Техническому регламенту, ГОСТам, Постановлению Правительства РФ от 24.06.2017 № 743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», иным нормативным правовым актам Российской Федерации, действующим межгосударственным и национальным стандартам, а также указаниям Заказчика, условиям настоящего Договора в части состава, содержания и оформления ПСД.

В соответствии с п. 3.1. Договора подряда, цена Договора составляет 2 448 576 912,43 рублей, включая налог на добавленную стоимость (20 %): 408 096 152,07 рублей, согласно Приложению N 12 к Договору подряда.

Согласно ч. 4 ст. 190 ЖК РФ, размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, определяется нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Превышение этой предельной стоимости, а также оплата услуг и (или) работ, не указанных в части 1 статьи 166 настоящего Кодекса и нормативном правовом акте субъекта Российской Федерации, принятом в соответствии с частью 2 статьи 166 настоящего Кодекса, осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на капитальный ремонт.

Согласно п. 2  Постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 N 1667 (ред. от 05.05.2022) «Об особенностях применения Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме», со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 января 2023 г. в договор об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее - договор), заключенный в соответствии с Положением, в том числе до дня вступления в силу настоящего постановления, в связи с увеличением стоимости строительных ресурсов по соглашению сторон в ходе его исполнения может быть внесено изменение в части увеличения цены договора не более чем на 30 процентов. Это допускается при условии не превышения стоимостью услуг и (или) работ по договору после указанного увеличения его цены предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определенной нормативным правовым актом соответствующего субъекта Российской Федерации, в соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации.

С 01.10.2021 приказ Комитета ЖКХ ВО № 122-ОД утратил силу, в связи с изданием приказа комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской обл. от 01.10.2021 N 131-ОД «Об утверждении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории Волгоградской области, оказание и (или) выполнение которых финансируется региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, с учетом средств государственной поддержки, муниципальной поддержки», которым предельная стоимость работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт была увеличена.

26.12.2022 в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1667 и приказом комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской обл. от 01.10.2021 N 131-ОД, между ответчиком и истцом было подписано дополнительное соглашение № 16 к договору № 1513443-В-ПСД-СМР-2021-2022 от 11.02.2021, которым внесены изменения в  пункты 2.2 и 3.1. Договора подряда.

Расценки, предусмотренные в дополнительном соглашении №16 от 26.12.2022 к договору № 1513443-В-ПСДСМР-2021-2022 соответствуют предельной стоимости, утвержденной приказом комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской обл. от 01.10.2021 N 131-ОД, что подтверждается ответчиком.

Согласно п. 2.2. Договора подряда (в редакции Дополнительного соглашения №16 от 26.12.2022г.), услуги и (или) работы, являющиеся предметом настоящего Договора, должны соответствовать техническим, экономическим и другим требованиям технического задания, ТУ, СНиП, размеру предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определённому нормативным правовым актом Волгоградской области в соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации, Техническому регламенту, ГОСТам, Постановлению Правительства РФ от 24.06.2017 № 743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», иным нормативны правовым актам Российской Федерации, действующим межгосударственным и национальным стандартам, а также указаниям Заказчика, условиям настоящего Договора в части состава, содержания и оформление ПСД.

Согласно п. 3.1. Договора подряда (в редакции Дополнительного соглашения №16 от 26.12.2022г.), цена Договора составила 2 837 967 720,59 рублей, включая налог на добавленную стоимость (20 %): 472 994 620,10 руб. 

Выполнение работ по Договору подряда осуществлялось в восемь этапов.  Исковые требования о взыскании задолженности в сумме 476 177 665,09 руб. заявлены по работам 6, 7, 8 этапа, стоимость которых составила: 6 Этап - 421 493 258,56 рублей, 7 Этап - 451 250 142,81 руб., 8 этап - 485 332 782,92 руб. Итого по 6, 7, 8 этапам 1 358 076 184,29 рублей.

Оплата по этапам производства работ произведена ответчиком частично: 6 Этап - 243 812 025,15 рублей, 7 Этап - 259 360 015,99 рублей, 8 этап - 280 170 690,69 рублей. Итого по 6, 7, 8 этапам - 783 342 731,83 рублей.

С учетом произведенных платежей остаток задолженности ответчика составил: 6 Этап -  146 973 849,36 рублей, 7 Этап - 159 218 800,41 рублей, 8 этап -169 985 015,32 рублей. Итого по 6, 7, 8 этапам - 476 177 665,09 рублей. 

Данные расчеты ответчиком не оспариваются.

Статья 307 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе. 

На основании статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (ст. 711 ГК РФ). 

В силу п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Согласно пункту 2.3 Договора подряда надлежащее выполнение работ по замене лифта на объекте подтверждается подписанным заказчиком актом приемки выполненных работ по форме КС-2 согласованным с организацией, осуществляющей строительный контроль, представителем органов местного самоуправления, а также с представителями собственников помещений в многоквартирных домах (в случаях если такие представители были выбраны собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании).

Проанализировав условия договора, а также материалы дела, суд установил, что работы выполнены истцом и согласованы с ответчиком, что подтверждается представленными в материалы дела актами о приемке выполненных работ КС-2 и справками о стоимости работ КС-3 и не оспаривается ответчиком.

Расчет задолженности судом проверен и признан верным.

Доказательств погашения взыскиваемой задолженности, ответчик в материалы дела не представил.

При таких обстоятельствах заявленные исковые требования являются обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме. 

Поскольку требования истца удовлетворены в полном объеме, его расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за подачу иска подлежат возмещению за счет ответчика в соответствии с правилами статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 150, ст.ст. 49, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд  

Р  Е  Ш  И  Л:

Принять отказ от иска в части признании незаконным одностороннего отказа Унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» от исполнения обязательств по оплате работ, выполненных по договору от 11.02.2021г. № 1513443-В-ПСД-СМР-2021-2022. Производство по делу № А12-25972/2023 в данной части прекратить.

Взыскать с Унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Стартен» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженность в размере 476 177 665 руб. 09 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000 руб. 

Возвратить из федерального бюджета плательщику – обществу с ограниченной ответственностью «Стартен» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6 000 руб. уплаченной государственной пошлины, выдав справку.              

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области.

Судья                                                                                     Стрельникова Н.В.