АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-39497/22

г. Уфа

14 июля 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 07.07.2023

Полный текст решения изготовлен 14.07.2023

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе: судьи Хазиахметовой З.Р., при ведении протокола  судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление-2» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Фирма СУ-10" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 3 017 273 руб. 79 коп. долга по договору от 11.02.2021 №53/21-01

 

при участии в судебном заседании 05.07.2023: от истца – ФИО2 представитель по доверенности от 01.10.2022; от ответчика – ФИО3 по доверенности от 09.01.2023.

В судебном заседании объявлен перерыв до 07.07.2023 до 11 ч 10 мин. После перерыва судебное заседание продолжено 07.07.2023 в 11 ч 10 мин. в том же составе суда, при отсутствии лиц, извещенных надлежащим образом.

 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление-2»  обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан  с иском  к обществу с ограниченной ответственностью "Фирма СУ-10" о взыскании 3 017 273 руб. 79 коп. долга по договору от 11.02.2021 №53/21-01.

Определением от 21.12.2022 исковое заявление принято к производству суда.

От ответчика поступил отзыв на иск, от истца – письменные пояснения.

По ходатайству истца и ответчика к материалам дела приобщены дополнительные доказательства.

От истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований. Уточнение принято судом в порядке ст. 49 АПК РФ.

Дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика в соответствии со статьей 156 АПК РФ.

Рассмотрев заявленные требования, арбитражный суд 

 

УСТАНОВИЛ:

Между обществом «СУ-2» (субподрядчик) и обществом «Фирма СУ-10» (генподрядчик) заключен договор от 26.11.2020 №362/20-01, согласно которому генподрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить строительные и отделочные работы указанные в п. 2.1 на объекте: «Реконструкция существующих зданий ГБУЗ РКЦ МЗ РБ со строительством хирургического корпуса».

Согласно пункту 2.1 договора стоимость работ, в том числе НДС, по настоящему договору составляет:

1.                   Устройство каркасов в коридорах под панели - 300 рублей за 1 м2;

2.                   Установка панелей в коридорах по металлическому каркасу- 300 рублей за 1 м2;

3.                   Зашивка ГКЛ по металлическому каркасу верха дверных проемов- 350 рублей за 1 дверь.

4.                   Устройство оконных откосов - 2 000 рублей за 1 окно;

5.                   Устройство дверных откосов -1500 рублей за 1 дверь;

6.                   Перезаливка ступней и площадок по лестничной клетке - 650 рублей за 1 м2;

7.                   Устройство стен венткамер из ГКЛ по металлическому каркасу и минваты -385 рублей за 1 м2;

8.                   Устройство стен потолков из ГКЛ по металлическому каркасу и минваты -395 рублей за 1 м2;

9.                   Штукатурка колонн - 350 рублей за 1 м2;

10.               Заделка отверстий со штукатуркой -100 рублей за 1 место;

11.               Подготовка потолков под окраску - 230 рублей за 1 м2;

12.               Окраска потолков 2 раза - 150 рублей за 1 м2;

13.               Подготовка стен под окраска - 230 рублей за 1 м2;

14.               Окраска стен 2 раза - 120 рублей за 1 м2;

15.               Наклейка с/обоев -150 за 1 м2;

16.               Устройство коробов из ГКЛ по металлическому каркасу - 380 рублей за 1 м2;

17.               Штукатурка стен вручную (кирпич )с материалом - 280 рублей за1 м2;

18.               Устройство гидроизоляции - 60 рублей за! м2;

19.               Устройство потолков Армстронг -250 рублей за 1м2;

20.               Устройство Реечных потолков-350 рублей за 1 м2;

21.               У кладка напольной плитки - 470 рублей за 1 м2;

22.Облицовка стен - 505 рублей за 1м2;

23.               Устройство ступеней на л\кл- 600 рублей за 1м2;

24.               Устройство керамических сапожков - 100 рублей за 1 п.м;

25.Окраска труб - 50 рублей за 1 п.м;

26.3ашивка стен по металлическому каркасу- 230 рублей за 1 м2;

27.Армирование стен под облицовку плиткой - 150 рублей за 1 м2.

В соответствии с пунктом 2.2 договора Оплата выполненных Субподрядчиком работ осуществляется на основании следующих оформленных документов:

- акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

-справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

-журнала учета выполненных работ (форма КС-ба);

-исполнительной документации;

-акта списания материалов (М-29).

Оплата производиться в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания и утверждения указанных документов.

В пункте 3.1 договора (в редакции дополнительного соглашения от 30.11.2021) определены сроки выполнения работ: с момента подписания договора до 30.09.2022.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены  акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ и затрат от 31.03.2022, подписанный сторонами без возражений и скрепленные их печатями.

По данным истца задолженность ответчика по оплате работ составляет 12 414 519 руб. 26 коп.

Между обществом «СУ-2» (субподрядчик) и обществом «Фирма СУ-10» (генподрядчик) заключен договор от 11.02.2021 №53/21-01, согласно которому генподрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить строительные и отделочные работы указанные в п. 2.1 на объекте: «Общеобразовательный центр в составе: средняя' общеобразовательная школа, детский сад, спортивный блок в микрорайоне "Инорс-4" в Калининском районе городского округа г. Уфа Республики Башкортостан (корректировка). II очередь - школа». Начальный блок (1 этаж).

Согласно пункту 2.1 договора стоимость работ, в том числе НДС, по настоящему договору составляет:

1.     Подготовка потолков под покраску с нанесением шпаклевки в 2 (два) слоя и грунтовки в 2 (два) слоя - 230 рублей за 1 м2;

2.      Покраска потолков с нанесением краски в 2 (два) слоя - 150 рублей за I м2;

3.      Подготовка стен под покраску с нанесением шпаклевки в 2 (два) слоя и грунтовки в 2 (два) слоя - 230 рублей за 1 м2;

4.      Покраска стен с нанесением краски в 2 (два) слоя -120 рублей за 1 м2;

5.      Наклейка обоев-150 рублей за 1 м2;

6.      Устройство коробов из ГКЛ но металлическому каркасу с его устройством - 380 рублей за 1 м2;

7.      Штукатурка кирпичных стен вручную - 240 рублей за! м2;

В.Устройство гидроизоляции-60 рублей за! м2;

9.      Устройство потолков «Армстронг» -250 рублей за 1м2;

10.     Устройство реечных потолков - 350 рублей за 1 м2;

11 .Укладка напольной плитки - 500 рублей за 1 м2;

12.0блицовка стен - 500 рублей за 1м2;

13.     Устройство ступеней на лестничной клетке - 600 рублей за 1м2;

14.     Устройство керамических «сапожков» -100 рублей за 1 п.м;

15.     Покраска труб - 50 рублей за 1 п. м;

16.3ашивка стен по металлическому каркасу с его устройством - 230 рублей за 1 м2;

17.Армирование стен под облицовку плиткой (монолитный участок)-150 рублей за 1 м2;

18.3аделка отверстий в стенах и потолках- 90 рублей за 1 шт;

19.3ашивка потолков из ГКЛ но металлическому каркасу с его устройством - 300 рублей за 1 м2;

20.      Покраска пола масляной краской -150 рублей за 1 м2;

21.      Устройство металлокаркасных потолков в - 350 рублей за 1 м2;

22.      Перезаливка ступеней и площадок на лестничной клетке - 500 рублей за 1 м2;

23.      Устройство дверных откосов (штукатурка+ шпаклевка +покраска)-1 000 рублей за 1 шт;

Цена, предусмотренная договором, за единицу (штук, погонный метр, квадратный метр и т.д ) окончательная, изменению не подлежит.

Ориентировочная сумма договора 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в том числе НДС.

Окончательная сумма договора определяется по фактическому объему работ, принятому Генподрядчиком.

В соответствии с пунктом 2.2 договора Оплата выполненных Субподрядчиком работ осуществляется на основании следующих оформленных документов:

- акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

-справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

-журнала учета выполненных работ (форма КС-ба);

-исполнительной документации;

-акта списания материалов (М-29).

Оплата производиться в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания и утверждения указанных документов.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены  акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, подписанные сторонами без возражений и скрепленные их печатями.

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение обществом "Фирма-СУ-10" обязанности по оплате выполненных работ, общество "СУ-2" направило в его адрес претензию с требованием уплаты долга, а впоследствии обратилось в суд с рассматриваемым иском.

Проанализировав условия договоров, суд квалифицирует их как договоры подряда и приходит к выводу, что правоотношения сторон подлежат регулированию нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Статьей 702 ГК РФ установлено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить ее.

В силу положений статей 702, 711 ГК РФ сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работы в установленном порядке является основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ.

Согласно статьям 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, законами или иными правовыми актами. 

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, в том числе договор от 26.11.2020 №362/20-01, от 11.02.2021 №53/21-01, акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, досудебную претензию, суд установил факт заключения сторонами договоров подряда на выполнение работ, факт выполнения обществом "СУ-2" в рамках данных договоров работ, факт принятия указанных работ обществом "Фирма СУ-10", возникновения у последнего обязанности по оплате работ и ее ненадлежащего исполнения.

По данным истца, задолженность общества "Фирма СУ-10" по оплате работ составляет 2 929 671 руб. 81 коп.(с учетом уточнений).

В силу части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Факт выполнения работ ответчиком не опровергнут, возражений относительно качества и стоимости выполненных работ не заявлено, доказательств оплаты работ в порядке статьи 65 АПК РФ не представлено.

С учетом изложенного требования общества "СУ-2" о взыскании 2 929 671 руб. 81 коп. долга подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицом, участвующим в деле, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются со стороны. С учетом удовлетворения исковых требований в полном объеме понесенные истцом расходы по уплате государственной пошлины в сумме 37 372 руб. подлежат возмещению за счет ответчика. 

С учетом оплаты государственной пошлины в меньшем размере она подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета в сумме 276 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

 

РЕШИЛ:

Уточненные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Фирма СУ-10" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление-2» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 2 929 671 руб. 81 коп. долга по договору от 11.02.2021 №53/21-01, а также 37 372 руб. в возмещение расходов на уплату государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление-2» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 276 руб. государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

 

 

Судья                                                                                   З.Р. Хазиахметова