1210/2021-166525(1) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 10 июня 2021 года 

по делу А33-29035/2019 Красноярск 

10 июня 2021 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «МЕГАПОЛИС ГРУПП»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Красноярск, в течение 30 календарных дней с  момента вступления решения по настоящему делу в законную силу устранить следующие  недостатки в выполненных работах в помещении Управления Роспотребнадзора по  Красноярскому краю в Мотыгинском района, расположенном по адресу: 

<

...>:  

Крыльцо: 

- устройство крыльца из бетона: марка бетона на устройство крыльца не отвечает марке  бетона, заложенной в локальном сметном расчете контракта; фактически марка бетона  состаавляет М100, в смете заложен бетон марки М250; имеются отклонения площадки  крыльца в горизонтальной плоскости, прогиб до 2 см.; наблюдается оголение и ржавчина  уголка обрамлений ступеней;  

- входная наружная дверь: отделочный слой растрескался и разрушается; полотно  входной двери имеет неплотное примыкание к коробке в притворе, имеется промерзание  (наличие наледи и куржака в нижней части двери - «мостики холода»);  

- пандус: в смете заложена установка пандуса прямогор-компакт заводского  изготовления; фактически установлен пандус из двух направляющих, выполненных из  швеллера; габаритные размеры швеллера не соответствуют требуемой рабочей ширине  полозьев;  

Тамбур: - стены: в угловых сопряжениях имеются вертикальные трещины; 

- дверной блок из ПВХ профиля: имеет отклонения в вертикальной плоскости до 8 мм на  2 м;  

Коридор: 

- полы (покрытие линолеум): имеется коробление, волны линолеума, следы потертости  на линолеуме от открывания/закрывания дверей вследствие некачественной установки  дверного блока;  

- дверные блоки внутренние (в кабинеты): обналичка дверных блоков в угловых  сопряжениях выполнена с уступом в плоскости сопряжения, имеется неплотный притвор  дверных полотен с коробками;  

Наружная отделка:  

- стены облицованы из сайдинга; крепление сайдинга выполнено некачественно: в  

верхней части недостаточное крепление, наблюдается провис, отклонение в плоскости; при  

устройстве наружной отделки не были выполнены отверстия под существующие продухи в  фундаменте здания, что влечет нарушение вентиляции здания.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МЕГАПОЛИС ГРУПП»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Красноярск, в доход федерального бюджета  6 000 руб. государственной пошлины и в пользу Управления Федеральной службы по  надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), 

<

...> 000 руб. судебных расходов по  оплате судебной экспертизы.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья И.С. Нечаева