Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040

http://kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Калининград

Дело №

А21-5042/2023

«23»

мая

2024 года

 

Резолютивная часть решения объявлена  

«13» 

мая

2024 года

 

Решение изготовлено в полном объеме   

 «23»

     мая

2024 года

 

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.

при ведении протокола судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску муниципального бюджетного учреждения «ЧИСТОТА» городского округа «город Калининград» к ООО  «АТЛАНТСТРОЙИНВЕСТ» о взыскании 262 102,75 рублей 

третье лицо: Комитет муниципального контроля городского округа «Город Калининград»

при участии в заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности

от ответчика: ФИО3 по доверенности

от третьего лица: ФИО4, ФИО5

установил. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  «ЧИСТОТА» городского округа «Город Калининград» обратилось  в суд с иском  к обществу с ограниченной  ответственностью «АТЛАНТСТРОЙИНВЕСТ» о взыскании неосновательного обогащения сумме 262 102,75 рублей.

            Судом установлено. 

Между МКУ «ЧИСТОТА» городского округа «Город Калининград» (заказчик) и ООО «АТЛАНТСТРОЙИНВЕСТ» (подрядчик)  был заключен контракт от 14.06.2022 года № 0335300000222000284. 

В соответствии с условиями контракта подрядчик обязался  выполнить капитальный ремонт кровли  производственного здания авторемонтных мастерских  (1 и 3 этапы),  а заказчик обязался работы принять и оплатить.

Работы были выполнены, приняты заказчиком по актам от 12.08.2022 года № 1-5 на сумму 4 998 392,02 рублей.

Заказчик оплатил работы в сумме 4 998 392,02 рублей по платежному поручению от 09.09.2022 года № 161556.  

В ходе плановой проверки комитетом муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград» были проведены контрольные мероприятия и  проведен контрольный осмотр и  обмер работ, выполненных подрядчиком по контракту от  14.06.2022 года № 0335300000222000284. 

В ходе проверки комитетом было установлено завышение стоимости оплаченных работ по 1 этапу в сумме 222 247 рублей, по 3 этапу  в сумме 526 917 рублей.

23.01.2023 года заказчик направил подрядчику  претензию о возврате денежных средств.

Письмами от 02.02.2023 года, от 02.03.2023 года подрядчик признал требования в части возврата денежных средств в сумме 487 061,25 рублей. На согласованную  сумму подписано соглашение о рассрочке платежа.

В связи с  возражениями подрядчика на сумму 262 102,75 рублей,  заказчик обратился в суд с настоящим иском. 

Спор сторон возник по поводу применения  подрядчиком в актах  коэффициентов расхода 4,72, 2,66 на 100 метров погонных монтируемых конструкции из лесоматериалов.

По 1 этапу.

Пунктом 4 локальной сметы без даты № 1 к контракту были предусмотрены работы согласно ГЭСНр 58-5-5 «Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертыванием рулонными материалами». В ресурсной части указанной расценки предусмотрены «Лесоматериалы круглые» с расходом, предусмотренным проектными решениями».

Пунктом 5 сметы  предусмотрены лесоматериалы 11.1.03.01-0085 «Бруски обрезные, хвойных пород длина 4-6,5м, ширина 75-100 мм, толщина 150 мм и более, сорт 1), объем которых рассчитывается по формуле:

0,37 х 4,72, где 

0,37 – длина мауэрлата, который подлежит замене и исчисляется в единицах изменения 100 м.п., фактически 37 метров погонных;

4,72 – коэффициент расхода лесоматериалов круглых на 100 м.п., рассчитанный для монтажа лесоматериала круглого диаметром 24 см.  

По акту от 12.08.2022 года № 1 принято и оплачено 0,1982 куб.м. лесоматериалов (0,042 х 4,72),  где

0,042 - длина мауэрлата (4,2 метров погонных)

4,72 - коэффициент расхода материала.

Фактически по согласованию с заказчиком мауэрлат был  смонтирован из бруса прямоугольного сечения 0,15 х 0,15 метров.

Согласно позиции заказчика расход древесины для монтажа должен быть рассчитан следующим образом: 

0,15 х 0,15 х 4,2 х 1,04 = 0,1 куб.м., где

0,15 х 0,15 – площадь сечения бруса

4,2 длина бруса

1,04 – коэффициент расхода.

Разница между фактическим объемом использованных материалов при выполнении работ и объемом оплаченного лесоматериала составляет 0,1982 – 0,1 = 0,0992 куб.м.   

Пунктом 10 локальной сметы  без даты № 1 были предусмотрены работы согласно ГЭСНр 58-5-3 «Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев». В ресурсной части указанной расценки предусмотрены «Лесоматериалы круглые» с расходом, предусмотренным проектными решениями».

Пунктом 11 сметы  предусмотрены лесоматериалы 11.1.03.01-0086 «Бруски обрезные, хвойных пород длина 4-6,5м, ширина 75-100 мм, толщина 150 мм и более, сорт 2), объем которых рассчитывается по формуле:

3,318 х 2,66, где 

8,318 – длина стропильных ног, которые подлежит замене и исчисляется в единицах изменения 100 м.п., фактически 331,8 метров погонных;

2,66 – коэффициент расхода лесоматериалов на 100 м.п., рассчитанный для монтажа лесоматериала квадратного сечения  размером 0,15 х 0,15 метров.  

По актам от 12.08.2022 года №№ 3,4 принято и оплачено 9,2116 куб.м. с применением при расчете  коэффициента расхода материала 2,66.

Фактически по согласованию с заказчиком мауэрлат был  смонтирован из бруса прямоугольного сечения 0,1 х 0,1 метров.

Согласно позиции заказчика расход древесины для монтажа 346,3 п.м. стропильных ног с учетом коэффициента расхода 1,18 на подрезку составляет 4,086 куб.м. 

Разница между фактическим объемом использованных материалов при выполнении работ и объемом оплаченного лесоматериала составляет 9,2166 – 4,086 = 5,12 куб.м. Сумма завышения 141 060,85 рублей.

По 3 этапу.

Пунктом 4 локальной сметы без даты № 3 к контракту были предусмотрены работы согласно ГЭСНр 58-5-5 «Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертыванием рулонными материалами». В ресурсной части указанной расценки предусмотрены «Лесоматериалы круглые» с расходом, предусмотренным проектными решениями».

Пунктом 5 сметы  предусмотрены лесоматериалы 11.1.03.01-0085 «Бруски обрезные, хвойных пород длина 4-6,5м, ширина 75-100 мм, толщина 150 мм и более, сорт 1), объем которых рассчитывается по формуле:

0,2712х 4,72, где 

0,2712 – длина мауэрлата, который подлежит замене и исчисляется в единицах изменения 100 м.п., фактически 27,12 метров погонных;

4,72 – коэффициент расхода лесоматериалов круглых на 100 м.п., рассчитанный для монтажа лесоматериала круглого диаметром 24 см.  

По акту от 12.08.2022 года № 2 принято и оплачено 0,2579 куб.м. лесоматериалов (0,2665 х 4,72),  где

0,2665 - длина мауэрлата (26,65 метров погонных)

4,72 - коэффициент расхода материала.

Фактически по согласованию с заказчиком мауэрлат был  смонтирован из бруса прямоугольного сечения 0,1 х 0,15 метров.

Согласно позиции заказчика расход древесины для монтажа должен быть рассчитан следующим образом: 

0,1 х 0,15 х 26,65 х 1,04 = 0,4157 куб.м., где

0,1 х 0,15 – площадь сечения бруса

26,65 длина бруса

1,04 – коэффициент расхода.

Разница между фактическим объемом использованных материалов при выполнении работ и объемом оплаченного лесоматериала составляет 1,2579 – 0,4157 = 0,8422 куб.м.   

Пунктом 10 локальной сметы  без даты № 3 были предусмотрены работы согласно ГЭСНр 58-5-3 «Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев». В ресурсной части указанной расценки предусмотрены «Лесоматериалы круглые» с расходом, предусмотренным проектными решениями».

Пунктом 11 сметы  предусмотрены лесоматериалы 11.1.03.01-0086 «Бруски обрезные, хвойных пород длина 4-6,5м, ширина 75-100 мм, толщина 150 мм и более, сорт 2), объем которых рассчитывается по формуле:

2,3684 х 2,66, где 

2,3684 – длина стропильных ног, которые подлежит замене и исчисляется в единицах изменения 100 м.п., фактически 236,84 метров погонных;

2,66 – коэффициент расхода лесоматериалов на 100 м.п., рассчитанный для монтажа лесоматериала квадратного сечения  размером 0,15 х 0,15 метров.  

По актам от 12.08.2022 года №№ 2, 5 принято и оплачено 413 пог.м. с применением при расчете  коэффициента расхода материала 2,66 общим объемом 10,986 куб.м.

Фактически по согласованию с заказчиком мауэрлат был  смонтирован из бруса прямоугольного сечения 0,1 х 0,1 метров.

Средства за невыполненные работы по установке 188 погонных метров (413-225) возвращены заказчику.

Согласно позиции заказчика объем древесины на 225 пог. м. стропильных ног, принятый и оплаченный по актам составил 5,98 куб.м. (2,25 х 0,15 х 0,15) х 1,18.

Фактический объем использованного материала для устройства 225 пог.м составил 2,655 куб.м (225 х 0,1 х 0,1) х 1,18.

Разница составляет 3,32 куб.м. Сумма завышения 121 041,9 рублей.

Представитель подрядчика  требования не признала, пояснив, что локальная смета с указанными коэффициентами расхода лесоматериалов является неотъемлемой частью контракта; подрядчик принял участие в аукционе, полагаясь на возможность применения указанных в смете коэффициентов; смета предусматривала использование в расчетах стоимости работ коэффициента 2,66 при использовании лесоматериала квадратного сечения  размером: ширина 75-150 мм, толщина 150 мм.

Оценив доводы сторон, суд полагает, что требования заказчика подлежат удовлетворению с учетом фактически использованного подрядчиком при производстве работ объема лесоматериала.

Решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

Руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, суд 

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АТЛАНТСТРОЙИНВЕСТ»  (ОГРН  

<

***>) в пользу муниципального бюджетного учреждения «ЧИСТОТА» городского округа «Город Калининград» (ОГРН 

<

***>) неосновательное обогащение в сумме 262 102,75 рублей, расходы по госпошлине в сумме 8242 рублей.

Решение может быть обжаловано в  месячный срок в арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                                               О.Н.Шкутко