ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело № А40-245389/23

г. Москва

14 марта 2024 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

Председательствующего судьи: Кузнецовой Е.Е. 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Истца  

на Решение Арбитражного суда г.Москвы от 01.02.2024 по делу №А40-245389/23 

принятого в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 АПК РФ 

по иску ООО "Строительная компания "Империя" (ОГРН: 

<

***>) 

к ООО "Инженер" (ОГРН: 

<

***>) о взыскании, 

без вызова сторон

У С Т А Н О В И Л:

ООО "Строительная компания "Империя" (заказчик) предъявило ООО "Инженер" (подрядчик) иск о взыскании неустойки по Договорам подряда № 4237/ПИР-22 от 18.10.2022, № 4226/ПИР-22 от 18.10.2022 в размере 589 876,33 рублей.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 01.02.2024 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с решением, Истец подал апелляционную жалобу.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, без вызова сторон на основании статьи 272.1 Арбитражного процессуального кодекса РФ, проверив законность обжалуемого судебного акта в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд установил следующие обстоятельства. 

Судом установлено, что 18 октября 2022 между ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ИМПЕРИЯ» (далее – подрядчик) и ООО «ИНЖЕНЕР» (далее – субподрядчик) был заключен Договор № 4237/ПИР (далее - Договор), в соответствии с которым, подрядчик поручает, а субподрядчик обязуется выполнить работы по разработке проектной и рабочей документации для объекта: Вынос сетей водопровода: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территорий» (со сносом жилых зданий по адресам: Зеленый проспект, д. 101 и Зеленый проспект, д. 103) по адресу: г. Москва, район Ивановское, Зеленый проспект, 101 (Восточный административный округ)» (далее – объект). 

Согласно пункту 1.3. Договора, срок выполнения работ по 01.02.2023. До настоящего времени работы ответчиком не выполнены, не сдана надлежащим образом оформленная проектная и рабочая документация. 

Согласно пункту 1.5 Договора, результатом работ по Договору является проектная документация, включающая результаты обследования и инженерных изысканий, сводный сметный расчёт, локальные сметы, рабочая документация, в объёме, необходимом и достаточном для производства строительно-монтажных работ и сдачи объекта в эксплуатацию. 

Согласно пункту 3.1.2 Договора, субподрядчик обязан согласовать проектную и рабочую документацию с подрядчиком, а при необходимости с соответствующими государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления, чего по настоящее время ответчиком сделано не было. 

Стоимость работ согласно п. 2.1 Договора составляет 4 004 258,89 рублей, в т.ч. НДС 20 % - 667 376,48 рублей. 

Согласно пункту 2.3 Договора, оплата выполненных работ производится путём перечисления Подрядчиком денежных средств на расчётный счёт субподрядчика на основании акта сдачи-приёмки выполненных работ (Приложение № 3 к Договору), согласно пунктов 2.3.1; 2.3.2; 2.4, а также в соответствии с календарным планом работ. 

Также между ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ИМПЕРИЯ» (далее – подрядчик) и ООО «ИНЖЕНЕР» (далее – субподрядчик) был заключен Договор № 4226/ПИР-22 от 18.10.2022 (далее – Договор) в рамках которого подрядчик поручает, а субподрядчик обязуется выполнить работы по разработке проектной и рабочей документации для объекта: «Вынос сетей канализации по объекту: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории»(со сносом жилых зданий по адресам: Зеленый проспект, д. 101 и зеленый проспект, д. 103) по адресу: г. Москва, район Ивановское, зеленый проспект, 101 (Восточный административный округ)» (далее – объект). 

Согласно пункту 1.3 Договора, срок выполнения работ по 01.02.2023. До настоящего времени работы ответчиком не выполнены, не сдана надлежащим образом оформленная проектная и рабочая документация. 

Согласно пункту 1.5 Договора, результатом работ является проектная документация, включающая результаты обследования и инженерных изысканий, сводный сметный расчёт, локальные сметы, рабочая документация, в объёме, необходимом и достаточном для производства строительно-монтажных работ и сдачи объекта в эксплуатацию. 

Согласно пункту 3.1.2 Договора субподрядчик обязан согласовать проектную и рабочую документацию с подрядчиком, а при необходимости с соответствующими государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления, чего по настоящее время ответчиком сделано не было. 

Стоимость работ согласно п. 2.1 Договора составляет 10 471 233,89 рубля, в том числе НДС 20 % - 1 745 205,65 рублей. 

Согласно пункту 2.3 Договора, оплата выполненных работ производится путём перечисления подрядчиком денежных средств на расчётный счёт субподрядчика на основании акта сдачи-приёмки выполненных работ (Приложение № 3 к Договору), пунктов 2.3.1; 2.3.2; 2.4, в соответствии с календарным планом работ (Приложение № 2 к Договору).

Согласно пункта 7.10 Договоров, в случае просрочки исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, подрядчик вправе направить субподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Согласно пункта 7.11 Договоров, в материалы дела истцом представлены расчёты неустоек в табличной форме, из которых по Договору № 4237/ПИР-22 размер неустойки за период с 01.02.2023 по 13.07.2023 (163 дня) составил 163 173,55 руб. из расчёта: 4 004 258,89 * 163 * 1/300 х 7,5 % = 163 173,55 руб.; по Договору № 4226/ПИР-22 размер неустойки за период с 01.02.2023 по 13.07.2023 (63 дня) составил 426 702,78 руб. из расчета 10 471 233,89 х 163 х 1/300 х 7,5 % = 426 702,78 руб.

Общая сумма подлежащей взысканию неустойки за просрочку в работе по расчету истца составляет 589 876,33 рублей.

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в адрес ответчика была направлена досудебная претензия с требованием об уплате неустойки, однако требование истца было оставлено ответчиком без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции пришел к выводу о необоснованности требований заказчика.

Суд апелляционной инстанции поддерживает выводы суда первой инстанции. 

В соответствии с пунктом 1.5 Договора № 4226/ПИР-22 от 18.10.2022, результатом работ по Договору является проектная документация, включающая результаты обследования и инженерных изысканий, сводный сметный расчёт, локальные сметы, рабочая документация в объёме, необходимом и достаточном для производства строительно-монтажных работ и сдачи объекта в эксплуатацию. 

Согласно Календарному плану работ в состав первого этапа работ входит выполнение инженерных изысканий. Разработка проектной документации в объёме, необходимом для передачи документации на рассмотрение в экспертизу. Согласование документации с Подрядчиком. Корректировка проектной документации по замечаниям экспертизы. Получение положительного заключения экспертизы. 

04.07.2023 ответчик направил заказным письмом с уведомлением отчётные документы по 1 этапу, акт сдачи-приёмки выполненных работ по первому этапу, заключение экспертизы, накладную № 1 от 27.06.2023, что подтверждается письмом от 03.07.2023 № 548-4226ИМР/23, описью вложения от 04.07.2023 АО «Почта России» и отчётом об отслеживании отправления.

14.07.2023 подрядчик получил документацию по первому этапу (согласно отчёту об отслеживании отправлений). 

Согласно Календарному плану работ в состав 2 этапа работ входит разработка рабочей документации. Согласование документации со всеми заинтересованными организациями. Получение технического заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве. 

19.07.2023 ответчик направил заказным письмом с уведомлением отчётные документы по 2 этапу, акт сдачи-приёмки выполненных работ по 2 этапу, накладную №2 от 18.07.2023, что подтверждается письмом от 18.07.2023 № 594-4226ИМП/23, описью вложения от 19.07.2023 АО «Почта России» и отчётом об отслеживании отправления. 26.07.2023 истец получил документацию по 2 этапу (согласно отчёту об отслеживании отправлений). 

Таким образом, ответчик исполнил своё обязательство по разработке и передачи в адрес Истца полностью согласованную документацию в объёме, необходимом и достаточным для производства строительно-монтажных работ и сдачи объекта в эксплуатацию. 

Согласно пункту 5.3 Договора, истец в течение 15 дней со дня получения акта сдачи-приёмки выполненных работ обязан направить ответчику подписанный акт или мотивированный отказ от приёмки работ. В случае мотивированного отказа подрядчика от приёмки работ сторонами в течение 5 рабочих дней с момента получения субподрядчиком отказа составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков выполнения (пункт 5.4 Договора № 4226/ПИР-22 от 18.10.2022). 

От истца не поступило ни мотивированного отказа, ни подписанного акта сдачи-приёмки выполненных работ по первому и второму этапу в адрес ответчика, что свидетельствует об отсутствии замечаний со стороны истца и приёмке им работ. 

В соответствии с пунктом 1.5 Договора, результатом работ по договору является проектная документация, включающая результаты обследования и инженерных изысканий, сводный сметный расчёт, локальные сметы, рабочая документация в объёме, необходимом и достаточном для производства строительно-монтажных работ и сдачи объекта в эксплуатацию. 

Согласно календарному плану работ в состав первого этапа работ входит выполнение инженерных изысканий. Разработка проектной документации в объёме, необходимом для передачи документации на рассмотрение в экспертизу. Согласование документации с подрядчиком. Корректировка проектной документации по замечаниям экспертизы. Получение положительного заключения экспертизы. 

Согласно календарному плану работ в состав второго этапа работ входит разработка рабочей документации. Согласование документации со всеми заинтересованными организациями. Получение технического заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве. 

14.07.2023 субподрядчик направил заказным письмом с уведомлением отчётные документы по первому и второму этапам, акт сдачи-приёмки выполненных работ по первому и второму этапам, накладную от 12.07.2023 № 1, накладную от 13.07.2023 № 2, что подтверждается письмом от 13.07.2023 № 576-4237ИМП/23, описью вложения от 14.07.2023 Почты России и отчётом об отслеживании отправления. 

26.07.2023 подрядчик получил документацию по первому и второму этапам (согласно отчёту об отслеживании почтовых отправлений).

Таким образом, ответчик исполнил своё обязательство по разработке и передачи в адрес Истца полностью согласованную документацию в объёме, необходимом для и достаточном для производства строительно-монтажных работ и сдачи объекта в эксплуатацию. 

Согласно пункта 5.3. Договора № 4237/ПИР-22 от 18.10.2022 подрядчик в течение 15 дней со дня получения акта сдачи-приёмки выполненных работ обязан направить субподрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приёмки работ. В случае мотивированного отказа подрядчика от приёмки работ сторонами в течение 5 рабочих дней с момента получения субподрядчиком отказа составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков выполнения (п. 5.4 Договора № 4237/ПИР-22 от 18.10.2022). 

От истца не поступило ни мотивированного отказа, ни подписанного акта сдачи-приёмки выполненных работ по первому и второму этапу в адрес ответчика, что свидетельствует об отсутствии замечаний со стороны истца и приёмке им работ. 

В связи с предоставлением в материалы дела доказательств надлежащего и своевременного выполнения встречных обязательств со стороны ответчика по спорным Договорам, оснований для взыскания неустойки не имеется.

Учитывая совокупность установленных по делу обстоятельств, суд апелляционной инстанции согласен с выводами суда первой инстанции о неправомерности заявленных исковых требований.

Довод жалобы о том, что ответчиком до настоящего времени не выполнены работы по договорам, подлежит отклонению судом апелляционной инстанции, поскольку опровергается материалами дела.

Учитывая изложенное, Девятый арбитражный апелляционный суд считает, что при принятии обжалуемого решения правильно применены нормы процессуального и материального права, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, в связи с чем апелляционная жалоба является необоснованной и удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 229, п. 1 ст. 269, ст. 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 01.02.2024 по делу №А40-245389/23 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Судья:      Е.Е. Кузнецова 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.