ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-206504/23-67-1719

г. Москва

07 декабря 2023 г.

Резолютивная часть решения оглашена 28 ноября 2023 года

Полный текст решения изготовлен 07 декабря 2023 года

 

Арбитражный суд в составе:                                                                                                                                                    

Судья В.Г. Джиоев (единолично)

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 10011

дело по исковому заявлению АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВНЕШСТРОЙИМПОРТ" (105066, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, НИЖНЯЯ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ УЛ., Д. 40/12, К. 2, ЭТАЖ/ОФИС 4/421/17, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 22.03.2011, ИНН: 

<

***>) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ" (140203, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОСКРЕСЕНСК ГОРОД, ГАРАЖНАЯ УЛИЦА, ДОМ 1Д, ЭТАЖ 2, КАБИНЕТ 3, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 09.11.2016, ИНН: 

<

***>) 

о взыскании 15 381 278,80 руб.

при участии:

от истца: ФИО2, дов. от 29.05.2023

от ответчика: неявка, извещен

УСТАНОВИЛ:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВНЕШСТРОЙИМПОРТ" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ" (далее – ответчик) о взыскании неотработанного аванса по договору № Авр 24-06/2021 от 24.06.2021 г. в размере 15 381 278 руб. 80 коп.

Исковые требования мотивированы неисполнением ответчиком своих обязательств по договору строительного подряда в установленные сроки.

Истец заявленные требования поддержал в полном объеме. 

Ответчик, извещенный надлежащим образом, в судебное заседание не явился, отзыв не представил.

Исследовав и оценив, имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме, исходя из следующего.

Как усматривается из материалов дела, между Акционерным обществом «Внешстройимпорт» (Истец; АО «ВСИ») и Обществом с ограниченной ответственностью «Воскресенский Завод Металлоконструкций» (Ответчик; ООО «ВЗМК») заключен договор № Авр 24-06/2021 от 24.06.2021 г. на выполнение подрядных работ по реконструкции объекта: Многофункциональный общественный центр шаговой доступности «Аврора», по адресу: г. Москва,  ул. Профсоюзная, д.154 (далее – Договор).  

Согласно п. 1.1. Договора строительного подряда № Авр 24-06/2021 от 24.06.2021 г. и Приложения № 1 к нему «Разбивка стоимости строительных работ» ООО «ВЗМК» приняло на себя обязательства по изготовлению и монтажу металлических конструкций кровли, выполнению других сопутствующих работ, соблюдая промежуточные сроки и общий срок выполнения работ, установленные Графиком производства работ (Приложение № 2 к Договору), используя материалы Ответчика, а Истец обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и сроки, установленные Договором. 

Вышеназванный договор, по правовым признакам, является договором строительного подряда и регулируется нормами материального права, содержащимися в параграфах 1, 3 главы 37 ГК РФ (ст. ст. 702 - 729, 740 - 757).

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно п. 1 Дополнительного соглашения № 1 от 01.11.2021 к Договору № Авр 24-06/2021 и Приложения № 1 к нему «Разбивка стоимости строительных работ» ООО «ВЗМК» приняло на себя обязательства по изготовлению и монтажу металлических конструкций наружных фахверков КМ-7, выполнению других сопутствующих работ. 

Согласно п. 1 Дополнительного соглашения № 2 от 05.11.2021 к Договору № Авр 24-06/2021 и Приложения № 1 к нему «Разбивка стоимости строительных работ» ООО «ВЗМК» приняло на себя обязательства по изготовлению металлических конструкций под инженерное оборудование. 

Общая стоимость Договора составила 43 607 129,84 рублей.

На основании п. 4.1. Договора, Сроки выполнения Работ 

Согласно п 4.1.1. Договора дата начала выполнения Работ – с даты осуществления Истцом первой оплаты по Договору, предусмотренной  в п. 3.2.1. Договора.

Согласно п 4.1.2. Срок разработки чертежей КМД – 30 рабочих дней.

Согласно п 4.1.3. Срок изготовления металлоконструкций - 60 рабочих дней.

Согласно п 4.1.4.  Срок выполнения монтажных работ - 90 рабочих дней.

На основании п. 7.2. Договора Ответчик обязан выполнить Работы в соответствии с Проектной документацией стадии «РД», требованиями законодательства, региональными нормативными актами, действующими нормами и правилами, и сдать выполненные Работы Истцу в срок, определенный Договором.

АО «ВСИ» произвело оплату Работ и Металла в соответствии с пп. 3.2.1., 3.2.2. и 3.2.3. Договора в размере 40 691 789 (Сорок миллионов шестьсот девяносто одна тысяча семьсот восемьдесят девять рублей) 97 копеек, в том числе НДС-20%, из которых :

перечислением аванса по Договору № Авр 24-06/2021 от 24.06.2021 г на общую сумму 29 104 289,00 рублей, что подтверждается платежными поручениями:

№ 5068 от 13.08.2021 г. на сумму 13 035 729,00 рублей;

№ 8056 от 29.11.2021 г. на сумму 14 068 560,00 рублей; 

№ 1697 от 15.03.2022  на сумму 2 000 000,00 рублей;

 зачетом в качестве аванса задолженности ООО «ВЗМК» за поставленную продукцию по Договору поставки №ПМ 14-03/2022 от 14.03.2022 г. в размере  11 587 500,97 рублей, что подтверждается товарными накладными № 161 от 22.03.2022 г., № 162 от 22.03.2022 г., № 163 от 22.03.2022 г., № 164 от 22.03.2022 г., № 166 от 22.03.2022 г., № 169 от 24.03.2022 г., № 170 от 24.03.2022 г., № 188 от 01.04.2022 г., дополнительным соглашением от 01.04.2022 г. к Договору и актом сверки взаимных расчетов за период: 01.01.2021 – 22.06.2022 по Договору. 

Согласно п. 4.1.1. Договора дата начала выполнения работ по Договору с даты осуществления Истцом первой оплаты, состоявшейся 13.08.2022 г., что подтверждает платежное поручение № 5068 от 13.08.2021 г на сумму 13 035 729,00 рублей.

Соответственно:

- первый этап - срок разработки чертежей КМД истек 20.09.2021 г., чертежи КМД Ответчиком АО «ВСИ» не предоставлены. 

- второй этап выполнения работ истек срок изготовления металлоконструкций 18.10.2021 г. Металлоконструкции Ответчиком  не изготовлены. 

- Ответчик должен был перейти с 19.10.2021 г.  к выполнению третьего этапа работ – монтаж металлоконструкций и окончить выполнение монтажных работ 29.11.2021, чего Ответчик так и не сделал.

Согласно Дополнительному соглашению № 1 к Договору сроки проведения дополнительных работ истекли 30.12.2021.

Ответчиком исполнено обязательств по договору  на сумму  25 310  511,17 рублей, в т.ч. НДС 20 % из которых : 

- 24 783 481,86 рублей, в т.ч. НДС 20 %. Согласно Справке о стоимости выполненных работ и затрат  по форме КС-3 №1  от 22.12.2022 г.  за период  с 24.06.2021 г. по 23.05.2023 г., Актам о приемке выполненных работ  по форме КС-2 № 1.1 за период  с 24.06.2021 г. по  23.05.2022 г.№ 1.2. от  22.12.2022 г. за период  с 24.06.2022 г. по 23.05.2022 г.

- 527 029,31   рублей, в т.ч. НДС 20 % Согласно Акту зачета взаимных требований от 25.01.2023 г.,

Остальную часть работ Ответчик не выполнил и не сдал Истцу,  в порядке предусмотренном разделом 5 Договора,  а также не  возвратил неосвоенный аванс  в размере  15 381 278,80 рублей (пятнадцать миллионов триста восемьдесят одна тысяча  двести семьдесят восемь) рублей 80 копеек.

Металлоконструкции Ответчиком не были  изготовлены, чертежи КМД Ответчиком непосредственно АО «ВСИ» не предоставлены, монтаж металлоконструкций Ответчиком не выполнен. 

По фактическому обстоятельству дел Ответчик подрядные работы по Договору  № Авр 24-06/2021 от 24.06.2021 г. не  выполнил и не сдал Истцу  в порядке, предусмотренном разделом 5 Договора, а также не возвратил неосвоенный аванс в размере 15 381 278,80 рублей (пятнадцать миллионов триста восемьдесят одна тысяча  двести семьдесят восемь) рублей 80 копеек.

В соответствии п.п. 11.3 и 11.3.1.Договра, Истец имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке без возмещения убытков за нарушение Ответчиком сроков выполнения работ.

АО «ВСИ»  31.05.2023 г. направило в адрес ООО «ВЗМК» (уведомление о расторжении - претензию №50/08/2174  от 31.05.2023 г. (РПО №10506484003973) об отказе Истца от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке без возмещения убытков Ответчику на основании пункта 11.3.1. Договора,  в связи  с нарушением  Ответчиком сроков выполнения Работ указанных в п. 4.1. Договора. 

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 165.1 ГК РФ, сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

 В соответствии с почтовым отчетом  06.07.2023 г. истек срок хранения  уведомления-претензии, после чего она была выслана обратно отправителю. Соответственно эта дата является датой расторжения договора. 

С момента расторжения Договора 06.07.2023 г., сумма неотработанного ООО «ВЗМК» аванса по Договору  в размере 15 381 278,80 (пятнадцать миллионов триста восемьдесят одна тысяча  двести семьдесят восемь) рублей 80 копеек, в том числе НДС 20%, является неосновательным обогащением ООО «ВЗМК» и подлежит возврату АО «ВСИ» в соответствии с п. 1 ст. 1102 ГК РФ. 

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В пункте 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Право заказчика на отказ от исполнения договора подряда предусмотрено положениями статей 715, 717 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным (пункт 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 2 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации при расторжении договора обязательства сторон прекращаются. Полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала, являются неосновательным обогащением получателя (пункт 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 №49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении»).

В соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание совокупность изложенных обстоятельств дела, учитывая отсутствие в материалах дела доказательств выполнения ответчиком работ в установленный договором срок на сумму перечисленных денежных средств, установленный факт расторжения договора подряда и отсутствие правовых оснований для удержания ответчиком денежных средств, требования истца о взыскании неотработанного аванса по договору № Авр 24-06/2021 от 24.06.2021 г. в размере 15 381 278 руб. 80 коп. подлежит удовлетворению в полном объеме.

В силу ч. 4 ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу положений ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ" (ИНН: 

<

***>) в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВНЕШСТРОЙИМПОРТ" (ИНН: 

<

***>) сумму неотработанного аванса по договору № Авр 24-06/2021 от 24.06.2021 г. в размере 15 381 278 (пятнадцать миллионов триста восемьдесят одна тысяча двести семьдесят восемь) руб. 80 коп., а так же расходы по уплате госпошлины в размере 99 906 (девяносто девять тысяч девятьсот шесть) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                            В.Г. Джиоев