АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-12346/2022

г. Уфа

01 августа 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 25.07.2022

Полный текст решения изготовлен 01.08.2022

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе

судьи Кузнецова Д.П., 

при ведении протокола судебного заседания

секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью "Фирма комплексного строительства" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к Публичному акционерному обществу "Акционерная компания "Востокнефтезаводмонтаж" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о взыскании 19 537 902 руб. 96 коп

при участии в судебном заседании:

От истца – ФИО2 по доверенности № 6 от 29.03.2022, представлен диплом № 108 от 30.05.2002, паспорт;

От ответчика – явки нет, извещены надлежащим образом.

Общество с ограниченной ответственностью "Фирма комплексного строительства" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к Публичному акционерному обществу "Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании задолженности по договору № 044/01ОС-20 от 01.06.2020 года в сумме 19 537 902 руб. 96 коп., расходов по оплате государственной пошлины в размере 200 000 руб.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 29.04.2022 исковое заявление было принято к производству.

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые требования, просил удовлетворить. 

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв, возражения по существу иска не представил, об уважительных причинах неявки не сообщил. 

Копии судебных актов были направлены судом ответчику по юридическому адресу: 450064, 

<

...>.

Согласно ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

Суд учитывает, что информация о времени и месте судебного разбирательства дополнительно размещена на интернет-сайте Арбитражного суда Республики Башкортостан и является общедоступной.

Дело рассмотрено в порядке ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителя истца, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, между истцом (Субподрядчик) и ответчиком (Подрядчик) заключен договор субподряда № 044/01ОС-20 от 01.06.2020 года (далее по тексту - Договор), согласно которого (п.1.1. договора), истец (субподрядчик) обязался выполнить работы по проекту: «Реконструкция производства изопропилбензола (кумола) с узлом получения изопропанола» на ПАО «Омский каучук», в соответствии с техническими заданиями, являющимися неотьемлемой частью настоящего договора, с рабочей документацией, иными условиями договора, а также требованиями действующего законодательства РФ. 

Наименование работ, объем и стоимость, номер сметы определены Сторонами в Приложении №1, 1/1, 1/1/1  к договору. Работы включают в  себя обеспыливание поверхности металлоконст- рукций, обезжиривание поверхностей металлоконструкций, огрунтовку, окраску металлических поверхностей, опознавательную покраску трубопроводов.

Согласно п.1.2. договора, стоимость работ, указанных в приложениях, определена в локально-сметном расчете, либо коммерческом предложении, составляемом к каждому техническому заданию в порядке, установленном разделом 2 настоящего договора. Подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

Согласно п.2.1. и 6.1. договора, стоимость работ ориентировочно составляет 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, в том числе НДС 20 %, и определяется по локальным сметным расчетам (далее - ЛСР). В указанную стоимость входят вспомогательные материалы, не входит стоимость основных материалов и оборудования.

Согласно п. 1.5. договора договор является рамочным, технические задания, сметы и иная рабочая документация подписывается по мере появления объемов работ в том же порядке, что и Договор.

22 декабря 2020 года сторонами было заключено дополнительное соглашение № 3 к договору субподряда № 044/01ОС-20 от 01.06.2020 года, распространяющее свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01 июня 2020 года.  Согласно Дополнительного соглашения №3 от 22.12.2020 г., истец (субподрядчик) дополнительно выполняет работы по антикоррозионной защите, сборке и обшивке контейнеров в количестве 8 штук для транспортировки трубных узлов, а также работы по упаковке трубных узлов в количестве 230 тонн после выполнения заводской антикоррозионной защиты по проекту: «Реконструкция производства изопропилбензола (кумола) с узлом получения изопропанола» на ПАО «Омский каучук».

В соответствии с пунктами 2-3 указанного соглашения, стоимость затрат составляет:

- по антикоррозионной защите, сборке и обшивке 1 контейнера - 26 708,76 (двадцать шесть тысяч семьсот восемь) рублей 76 копеек без НДС, согласно утвержденному Сторонами Расчету, являющемуся Приложением № 1 к Соглашению.  

-на упаковку трубных узлов за 1 тонну - 1 742,87 руб. (одна тысяча семьсот сорок два рубля 87 копеек) без НДС, согласно утвержденному Сторонами Расчету, являющемуся Приложением № 2 к  Соглашению.  

Оплата Субподрядчику понесенных затрат по настоящему Дополнительному соглашению осуществляется Подрядчиком в порядке и на условиях, предусмотренных договором субподряда № 044/01ОС-20 от 01.06.2020 года.   

В соответствии с п.4.7. договора, выполненные субподрядчиком работы и их стоимость оформляются актом о приемке выполненных работ (форма КС-2 по форме Приложения № 6), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 по форме Приложения № 7), актом о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (ОС-3) по форме Приложения № 8, подписанными обеими сторонами.

Согласно пунктов 6.3., 6.5. договора, оплата выполненных работ производится Подрядчиком на основании Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Оплата выполненных работ производится Подрядчиком денежными средствами в течение 40 (сорока) календарных дней с даты подписания актов по форме КС-2, КС-З.

Согласно п. 7.9. договора, при нарушении сроков оплаты, указанных в п. 6.5 договора, свыше 7 календарных дней  ответчик (подрядчик) уплачивает субподрядчику неустойку 0,02 % от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, но не более 7,5 % от несвоевременно оплаченной суммы.

В рамках исполнения договора субподряда № 044/01ОС-20 от 01.06.2020 года и дополнительных соглашений к нему, истец выполнил работы  на сумму 28 445 283, 58 рублей  (двадцать восемь миллионов четыреста сорок пять тысяч двести восемьдесят три рубля 58 копеек).

Выполнение работ истцом (Субподрядчиком) на сумму 28 445 283, 58 руб. и их приемка ответчиком (Заказчиком) подтверждается следующими документами:

1. Счет-фактура № 306 от 25.08.2020 на сумму 1 306 489,20 руб., в том числе НДС. 

1.1 Справка о стоимости выполненных работ КС-3 № 1 от 25.08.2020 на  сумму 1306489,20 руб., в том числе НДС;

1.2.Акты о приемке выполненных работ за август  2020 года, подписанные обеими сторонами (Примечание: стоимость  выполненных работ в актах указана без учета НДС):

1.2.1.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 2-АКЗ-1 от 25.08.2020 на сумму 66658,00 руб.;

1.2.2.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 2-АКЗ-2 от 25.08.2020 на сумму 47294,00 руб.;

1.2.3.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 2-АКЗ-3 от 25.08.2020 на сумму 11434,00 руб.;

1.2.4.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 2-АКЗ-4 от 25.08.2020 на сумму 141593,00 руб.;

1.2.5.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 2-АКЗ-5 от 25.08.2020 на сумму 37479,00 руб.;

1.2.6.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 2-АКЗ-6 от 25.08.2020 на сумму 175800,00 руб.;

1.2.7.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 2-АКЗ-7 от 25.08.2020 на сумму 175800,00 руб.;

1.2.8.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 2-АКЗ-8 от 25.08.2020 на сумму 97781,00 руб.;

1.2.9.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 2-АКЗ-9 от 25.08.2020 на сумму 230529,00 руб.;

1.2.10.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 2-АКЗ-10 от 25.08.2020 на сумму 104373,00 руб.;

2. Счет-фактура № 422 от 22.10.2020 на сумму 2 131 819,92 рубля, в том числе НДС;

2.1. Справка о стоимости выполненных работ КС-3 № 2 от 22.10.2020 на  сумму 2131819,92 руб., в том числе НДС;

2.2.Акты о приемке выполненных работ за октябрь  2020 года, подписанные обеими сторонами (Примечание: стоимость  выполненных работ в актах указана без учета НДС):

2.2.1. Акт о приемке выполненных работ КС-2  № 1 от 22.10.2020 на сумму 12045,29 руб.;

2.2.2. Акт о приемке выполненных работ КС-2  № 2 от 22.10.2020 на сумму 197518,73 руб.;

2.2.3. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85120доп1-1 от 22.10.2020 на сумму 66645,26 руб.;

2.2.4. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85120доп1-2 от 22.10.2020 на сумму 118147,62 руб.;

2.2.5. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85120доп1-3 от 22.10.2020 на сумму 118147,62 руб.;

2.2.6. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-1 от 22.10.2020 на сумму 2769,79 руб.;

2.2.7. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-2 от 22.10.2020 на сумму 5855,18 руб.;

2.2.8. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-3 от 22.10.2020 на сумму 4094,65 руб.;

2.2.9. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-4 от 22.10.2020 на сумму 24187,70 руб.;

2.2.10.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-5 от 22.10.2020 на сумму 191151,09 руб.;

2.2.11.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-6 от 22.10.2020 на сумму 2712,76 руб.;

2.2.12.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-7 от 22.10.2020 на сумму 82209,21 руб.;

2.2.13.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-8 от 22.10.2020 на сумму 69207,44 руб.;

2.2.14.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-9 от 22.10.2020 на сумму 18237,90 руб.;

2.2.15.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-10 от 22.10.2020 на сумму 123735,17 руб.;

2.2.16.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-11 от 22.10.2020 на сумму 47516,15 руб.;

2.2.17.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-12 от 22.10.2020 на сумму 254027,75 руб.;

2.2.18.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-13 от 22.10.2020 на сумму 186987,30 руб.;

2.2.19.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-14 от 22.10.2020 на сумму 62443,38 руб.;

2.2.20.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-15 от 22.10.2020 на сумму 139443,31 руб.;

2.2.21.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-16 от 22.10.2020 на сумму 26912,47 руб.;

2.2.22.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-17 от 22.10.2020 на сумму 22520,83 руб.;

3. Счет-фактура № 447 от 22.11.2020 на сумму 514 235,12 рублей, в том числе НДС;

3.1 Справка о стоимости выполненных работ КС-3 № 3 от 22.11.2020 на  сумму 514235,12 руб., в том числе НДС;

3.2.Акты о приемке выполненных работ за ноябрь  2020 года, подписанные обеими сторонами (Примечание: стоимость  выполненных работ в актах указана без учета НДС):

3.2.1.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839 доп1-3 от 22.11.2020 на сумму 5145,65 руб.;

3.2.2.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839 доп1-5 от 22.11.2020 на сумму 23500,04 руб.;

3.2.3.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839 доп1-7 от 22.11.2020 на сумму 24368,80 руб.;

3.2.4.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-18 от 22.11.2020 на сумму 14117,78 руб.;

3.2.5.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-19 от 22.11.2020 на сумму 27851,34 руб.;

3.2.6.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-20 от 22.11.2020 на сумму 35858,92 руб.;

3.2.7.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-21 от 22.11.2020 на сумму 27027,50 руб.;

3.2.8.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-22 от 22.11.2020 на сумму 11322,44 руб.;

3.2.9.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-23 от 22.11.2020 на сумму 7269,54 руб.;

3.2.10.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839доп1-1 от 22.11.2020 на сумму 84100,94 руб.;

3.2.11.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839доп1-2 от 22.11.2020 на сумму 32787,37 руб.;

3.2.12.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839доп1-4 от 22.11.2020 на сумму 98505,33 руб.;

3.2.13.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839доп1-6 от 22.11.2020 на сумму  36673,62 руб.;

4. Счет-фактура  № 465 от 22.12.2020 на сумму 1 705 241,44 рублей, в том числе НДС;

4.1. Справка о стоимости выполненных работ КС-3 № 5 от 22.12.2020 на  сумму 1705241,44 руб., в том числе НДС;

4.2. Акты о приемке выполненных работ за ноябрь  2020 года, подписанные обеими сторонами (Примечание: стоимость  выполненных работ в актах указана без учета НДС):

4.2.1.Акт о приемке выполненных работ КС-2  № 2-АКЗдоп1-1 от 22.12.2020 на сумму 60933,55 руб.;

4.2.2.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85119доп1-1 от 22.12.2020 на сумму 97276,01 руб.;

4.2.3.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85119доп1-2 от 22.12.2020 на сумму 47624,11 руб.;

4.2.4.Акт о приемке выполненных работ КС-2 №  85121доп1-1 от 22.12.2020 на сумму  124025,19 руб.;

4.2.5.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-1 от 22.12.2020  на сумму  252652,15 руб.;

4.2.6.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-2 от 22.12.2020 на сумму  59873,62 руб.;

4.2.7.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-3 от 22.12.2020 на сумму  58412,53 руб.;

4.2.8.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-4 от 22.12.2020 на сумму  357928,97 руб.;

4.2.9.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-5 от 22.12.2020 на сумму  276202,12 руб.;

4.2.10.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-6 от 22.12.2020 на сумму  4057,14 руб.;

4.2.11.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-7 от 22.12.2020 на сумму  19462,94 руб.;

4.2.12.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-8 от 22.12.2020 на сумму  62586,20 руб.;

5. Счет-фактура № 466 от 22.12.2020 на сумму 288454,61 рублей, в том числе НДС;

5.1 Справка о стоимости выполненных работ КС-3 № 6 от 22.12.2020 на  сумму 288454,61  руб., в том числе НДС;

 5.2.Акты о приемке выполненных работ за декабрь  2020 года, подписанные обеими сторонами (Примечание: стоимость  выполненных работ в актах указана без учета НДС):

5.2.1.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 4 от 22.12.2020 на сумму 240378,84 руб.;

6. Счет-фактура № 467 от 22.12.2020 на сумму 404667,23 рублей, в том числе НДС;

6.1 Справка о стоимости выполненных работ КС-3 № 7 от 22.12.2020 на  сумму 404667,23 рублей, в том числе НДС;

6.2. Акты о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года, подписанные обеими сторонами (Примечание: стоимость  выполненных работ в актах указана без учета НДС):

6.2.1. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 4 от 22.12.2020 на сумму 337222,69 руб.;

7. Счет-фактура № 45 от 22.01.2021 на сумму 1 035 697,02 руб., в том числе НДС. 

7.1. Справка о стоимости выполненных работ № 8 от 22.01.2021 на сумму 1 035 697,02 руб., в том числе НДС;

7.2.Акты о приемке выполненных работ за январь 2021 года, подписанные обеими сторонами (Примечание: стоимость  выполненных работ в актах указана без учета НДС):

7.2.1. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 21 от 22.01.2021 на сумму 19882,00 руб.;

7.2.2. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85119доп1-3 от 22.01.2021 на сумму 33863,09 руб.;

7.2.3. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-24 от 22.01.2021 на сумму 3877,68 руб.;

7.2.4. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-25 от 22.01.2021 на сумму 1199,94 руб.;

7.2.5. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-26 от 22.01.2021 на сумму 3641,29 руб.;

7.2.6. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-27 от 22.01.2021 на сумму 9696,87 руб.;

7.2.7. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-28 от 22.01.2021 на сумму 8288,69 руб.;

7.2.8. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-29 от 22.01.2021 на сумму 7323,58 руб.;

7.2.9. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-30 от 22.01.2021 на сумму 11040,39 руб.;

7.2.10. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-31 от 22.01.2021 на сумму 2338,36 руб.;

7.2.11. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №88839-32 от 22.01.2021 на сумму 58367,07 руб.;

7.2.12. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №88839-33 от 22.01.2021 на сумму 30882,16 руб.;

7.2.13. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №88839-34 от 22.01.2021 на сумму 6004,41 руб.;

7.2.14. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №88839-35 от 22.01.2021 на сумму 12337,68 руб.;

7.2.15. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №88839-36 от 22.01.2021 на сумму 15878,46 руб.;

7.2.16. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №88839-37 от 22.01.2021 на сумму 1480,72 руб.;

7.2.17. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №88839-38 от 22.01.2021 на сумму 40393,46 руб.;

7.2.18. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №88839-39 от 22.01.2021 на сумму 2890,75 руб.;

7.2.19. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №88839-40 от 22.01.2021 на сумму 28468,70 руб.;

7.2.20. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №88839-41 от 22.01.2021 на сумму 5513,60 руб.;

7.2.21. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №88839-42 от 22.01.2021 на сумму 4610,53 руб.;

7.2.22. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №88839доп1-8 от 22.01.2021 на сумму 16785,41 руб.;

7.2.23. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №88839доп1-9 от 22.01.2021 на сумму 8592,10 руб.;

7.2.24. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №88839доп1-10 от 22.01.2021 на сумму 1050,57 руб;

7.2.25. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №88839доп1-11 от 22.01.2021 на сумму 20530,59 руб.;

7.2.26. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №88839доп1-12 от 22.01.2021 на сумму 4809,76 руб.;

7.2.27. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №88839доп1-13 от 22.01.2021 на сумму 7496,70 руб.;

7.2.28. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №88839доп1-14 от 22.01.2021 на сумму 4970,13 руб.;

7.2.29. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-9 от 22.01.2021 на сумму 55277,87 руб. ;

7.2.30. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-10 от 22.01.2021 на сумму 10864,93 руб.;

7.2.31. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-11 от 22.01.2021 на сумму 10589,45 руб.;

7.2.32. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-12 от 22.01.2021 на сумму 64917,68 руб.;

7.2.33. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-13 от 22.01.2021 на сумму 200582,14 руб.;

7.2.34. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-14 от 22.01.2021 на сумму 62178,61 руб. ;

7.2.35. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-15 от 22.01.2021 на сумму 51820,00 руб. ;

7.2.36. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-16 от 22.01.2021 на сумму 19801,68 руб. ;

8. Счет-фактура № 97 от 22.03.2021 на сумму 2 913 464,45 руб., в том числе НДС. 

8.1. Справка о стоимости выполненных работ КС-3 № 9 от 22.03.2021 на  сумму 2913464,45 руб., в том числе НДС;

8.2. Акты о приемке выполненных работ за март 2021 года, подписанные обеими сторонами (Примечание: стоимость  выполненных работ в актах указана без учета НДС):

8.2.1. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-1 от 22.03.2021 на сумму 3780,58 руб.;

8.2.2. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-2 от 22.03.2021 на сумму 4077,65 руб.;

8.2.3. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-3 от 22.03.2021 на сумму 73749,83 руб.;

8.2.4. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-4 от 22.03.2021 на сумму 48879,49 руб.;

8.2.5. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-5 от 22.03.2021 на сумму 53581,59 руб.;

8.2.6. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-6 от 22.03.2021 на сумму 35740,31 руб.;

8.2.7. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-7 от 22.03.2021 на сумму 111551,34 руб;

8.2.8. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-8 от 22.03.2021 на сумму 10256,53 руб.;

8.2.9. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-9 от 22.03.2021 на сумму 314697,93 руб.;

8.2.10. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-10 от 22.03.2021 на сумму 16352,92 руб.;

8.2.11. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-11 от 22.03.2021 на сумму 135619,10 руб.;

8.2.12. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-12 от 22.03.2021 на сумму 4915,97 руб.;

8.2.13. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-13 от 22.03.2021 на сумму 58661,25 руб.;

8.2.14. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-14 от 22.03.2021 на сумму 94277,04 руб.;

8.2.15. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-15 от 22.03.2021 на сумму 7482,39 руб.;

8.2.16. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-16 от 22.03.2021 на сумму 139736,21 руб.;

8.2.17. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-17 от 22.03.2021 на сумму 38199,51 руб.;

8.2.18. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-18 от 22.03.2021 на сумму 143461,32 руб.;

8.2.19. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-19 от 22.03.2021 на сумму 27707,67 руб.;

8.2.20. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-20 от 22.03.2021 на сумму 20208,84 руб.;

8.2.21. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-21 от 22.03.2021 на сумму 16928,19 руб.;

8.2.22. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-22 от 22.03.2021 на сумму 11674,98 руб.;

8.2.23. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-23 от 22.03.2021 на сумму 30260,65 руб.;

8.2.24. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-24 от 22.03.2021 на сумму 40779,94 руб.;

8.2.25. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-25 от 22.03.2021 на сумму 252276,08 руб.;

8.2.26. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-26 от 22.03.2021 на сумму 194084,93 руб.;

8.2.27. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-27 от 22.03.2021 на сумму 46742,10 руб.;

8.2.28. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-28 от 22.03.2021 на сумму 42305,76 руб.;

8.2.29. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-29 от 22.03.2021 на сумму 83926,46 руб.;

8.2.30. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-30 от 22.03.2021 на сумму 2896,80 руб.;

8.2.31. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-31 от 22.03.2021 на сумму 11671,98 руб.;

8.2.32. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-32 от 22.03.2021 на сумму 7154,01 руб.;

8.2.33. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-33 от 22.03.2021 на сумму 109823,40 руб.;

8.2.34. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-34 от 22.03.2021 на сумму 12709,87 руб.;

8.2.35. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-35 от 22.03.2021 на сумму 93139,80 руб.;

8.2.36. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-36 от 22.03.2021 на сумму 1928,82 руб.;

8.2.37. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-37 от 22.03.2021 на сумму 126645,80 руб.;

9. Счет-фактура № 149 от 22.04.2021 на сумму 2 317 541,63 руб., в том числе НДС. 

9.1 Справка о стоимости выполненных работ КС-3 № 10 от 22.04.2021 на  сумму 2317541,63 руб., в том числе НДС;

9.2 Акты о приемке выполненных работ за апрель 2021 года, подписанные обеими сторонами (Примечание: стоимость  выполненных работ в актах указана без учета НДС):

9.2.1.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85122доп1-1 от 22.04.2021 на сумму 65204,93 руб.;

9.2.2.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85122доп1-2 от 22.04.2021 на сумму 69467,86 руб.;

9.2.3.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85122доп1-3 от 22.04.2021 на сумму 59726,39 руб.;

9.2.4. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-1 от 22.04.2021 на сумму 28422,43 руб.;

9.2.5. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-2 от 22.04.2021 на сумму 283428,07 руб.;

9.2.6. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-3 от 22.04.2021 на сумму 107566,34 руб.;

9.2.7. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-4 от 22.04.2021 на сумму 3223,61 руб.;

9.2.8. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-5 от 22.04.2021 на сумму 26668,64 руб.;

9.2.9. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-6 от 22.04.2021 на сумму 65959,29 руб.;

9.2.10. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-7 от 22.04.2021 на сумму 33466,91 руб.;

9.2.11. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-8 от 22.04.2021 на сумму 495291,99 руб.;

9.2.12. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-9 от 22.04.2021 на сумму 25005,72 руб.;

9.2.13. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-10 от 22.04.2021 на сумму 3945,00 руб.;

9.2.14. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-11 от 22.04.2021 на сумму 14352,08 руб.;

9.2.15. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-12 от 22.04.2021 на сумму 43638,41 руб.;

9.2.16. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-13 от 22.04.2021 на сумму 4507,16 руб.;

9.2.17. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-14 от 22.04.2021 на сумму 102768,80 руб.;

9.2.18. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-15 от 22.04.2021 на сумму 87939,61 руб.;

9.2.19. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-16 от 22.04.2021 на сумму 61796,70 руб.;

9.2.20. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-17 от 22.04.2021 на сумму 5398,79 руб.;

9.2.21. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-18 от 22.04.2021 на сумму 165597,35 руб.;

9.2.22. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-19 от 22.04.2021 на сумму 16246,68 руб.;

9.2.23. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-20 от 22.04.2021 на сумму 5799,72 руб.;

9.2.24. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-21 от 22.04.2021 на сумму 62423,47 руб.;

9.2.25. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-22 от 22.04.2021 на сумму 42138,74 руб.;

9.2.26. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-23 от 22.04.2021 на сумму 51300,00 руб.;

10. Счет-фактура № 201 от 22.05.2021 на сумму 737 503,46 руб., в том числе НДС. 

10.1 Справка о стоимости выполненных работ КС-3 № 11 от 22.05.2021 на  сумму 737503,46 руб., в том числе НДС;

10.2.Акты о приемке выполненных работ за май  2021 года, подписанные обеими сторонами (Примечание: стоимость  выполненных работ в актах указана без учета НДС):

10.2.1.Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174доп1-24 от 22.05.2021на сумму 78047,61 руб. ;

10.2.2.Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174доп1-25 от 22.05.2021на сумму 40960,18 руб.;

10.2.3.Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174доп1-26 от 22.05.2021на сумму 30556,50 руб.;

10.2.4.Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174доп1-27 от 22.05.2021на сумму 29555,62 руб.;

10.2.5.Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174доп1-28 от 22.05.2021на сумму 53460,47 руб.;

10.2.6.Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174доп1-29 от 22.05.2021на сумму 3275,98 руб.;

10.2.7.Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174доп1-30 от 22.05.2021на сумму 114322,63 руб.;

10.2.8.Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174доп1-31 от 22.05.2021на сумму 24729,25 руб.;

10.2.9.Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174доп1-32 от 22.05.2021на сумму 34687,00 руб.;

10.2.10.Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174доп1-33 от 22.05.2021на сумму 9120,21 руб.;

10.2.11.Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174доп1-34 от 22.05.2021на сумму 5531,02 руб.;

10.2.12.Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174доп1-35 от 22.05.2021на сумму 8016,67 руб.;

10.2.13.Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174доп1-36 от 22.05.2021на сумму 170160,74 руб.;

10.2.14.Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174доп1-37 от 22.05.2021на сумму 2304,08 руб.;

10.2.15.Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174доп1-38 от 22.05.2021на сумму 9858,26 руб.;

11.Счет-фактура № 228 от 22.06.2021 на сумму 8 760 563,41 руб., в том числе НДС. 

11.1 Справка о стоимости выполненных работ КС-3 №12 от 22.06.2021 на  сумму 8760563,41 руб., в том числе НДС;

11.2.Акты о приемке выполненных работ за июнь  2021 года, подписанные обеими сторонами (Примечание: стоимость  выполненных работ в актах указана без учета НДС):

11.2.1.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-38 от 22.06.2021 на сумму 39834,96 руб.;

11.2.2.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-39 от 22.06.2021 на сумму 170262,56 руб.;

11.2.3.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-40 от 22.06.2021 на сумму 44951,93 руб.;

11.2.4.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-41 от 22.06.2021 на сумму 52742,11 руб.;

11.2.5.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-42 от 22.06.2021 на сумму 89968,62 руб.;

11.2.6.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-48 от 22.06.2021 на сумму 5396,31 руб.;

11.2.7.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-49 от 22.06.2021 на сумму 1474,49 руб.;

11.2.8.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-50 от 22.06.2021 на сумму 12079,97 руб.;

11.2.9.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-51 от 22.06.2021 на сумму 91448,44 руб.;

11.2.10.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-52 от 22.06.2021 на сумму 44232,95 руб.;

11.2.11.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-53 от 22.06.2021 на сумму 824,88 руб.;

11.2.12.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-54 от 22.06.2021 на сумму 120863,20 руб.;

11.2.13.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-60 от 22.06.2021 на сумму 8453,62 руб.;

11.2.14.Акт о приемке выполненных работ КС-2 №2-АКЗ-11 от 22.06.2021 на сумму 97110,00 руб.;

11.2.15.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 2-АКЗ-12 от 22.06.2021  на сумму 97110,00 руб.;

11.2.16.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 2-АКЗ-17 от 22.06.2021 на сумму 217365,43 руб.;

11.2.17.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 2-АКЗ-18 от 22.06.2021  на сумму 112099,90 руб.;

11.2.18.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 2-АКЗ-19 от 22.06.2021 на сумму 18876,16 руб.;

11.2.19.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 2-АКЗ-20 от 22.06.2021  на сумму 49678,03 руб.;

11.2.20.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 2-АКЗ-22 от 22.06.2021  на сумму 25246,43 руб.;

11.2.21.Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85122доп1-4 от 22.06.2021 на сумму 12284,98 руб.;

11.2.22.Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85122доп1-5 от 22.06.2021 на сумму 90614,61 руб.;

11.2.23.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85124доп1-1 от 22.06.2021 на сумму 102525,85 руб.;

11.2.24.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-39 от 22.06.2021 на сумму 22300,36 руб.;

11.2.25.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-40 от 22.06.2021 на сумму 9190,15 руб.;

11.2.26.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-41 от 22.06.2021 на сумму 10322,20 руб;

11.2.27.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-42 от 22.06.2021 на сумму 8530,95 руб.;

11.2.28.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-43 от 22.06.2021 на сумму 9380,97 руб.;

11.2.29.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-44 от 22.06.2021 на сумму 80175,41 руб.;

11.2.30.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-45 от 22.06.2021 на сумму 188938,22 руб.;

11.2.31.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-46 от 22.06.2021 на сумму 108678,09 руб.;

11.2.32.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-47 от 22.06.2021 на сумму 3393,07 руб.;

11.2.33.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-48 от 22.06.2021 на сумму 26650,75 руб.;

11.2.34.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-49 от 22.06.2021 на сумму 5938,05 руб.;

11.2.35.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-50 от 22.06.2021 на сумму 710,41 руб.;

11.2.36.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-51 от 22.06.2021 на сумму 215235,89 руб.;

11.2.37.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-52 от 22.06.2021 на сумму 5065,37 руб.;

11.2.38.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-53 от 22.06.2021 на сумму 25850,98 руб.;

11.2.39.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-58 от 22.06.2021 на сумму 269347,71 руб.;

11.2.40.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-60 от 22.06.2021 на сумму 38698,97 руб.;

11.2.41.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-63 от 22.06.2021 на сумму 46637,43 руб.;

11.2.42.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-66 от 22.06.2021 на сумму 200393,05 руб.;

11.2.43.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85244изм1-1 от 22.06.2021 на сумму 4383503,15 руб.;

11.2.44.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-49 от 22.06.2021 на сумму 1521,67 руб.;

11.2.45.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-19 от 22.06.2021 на сумму 24004,14 руб.;

12. Счет-фактура № 311 от 22.07.2021 на сумму 904 829,63 руб., в том числе НДС. 

12.1. Справка о стоимости выполненных работ КС-3 №13 от 22.07.2021 на  сумму 904829,63 руб., в том числе НДС;

12.2.Акты о приемке выполненных работ за июль  2021 года, подписанные обеими сторонами (Примечание: стоимость  выполненных работ в актах указана без учета НДС):

12.2.1.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-55 от 22.07.2021 на сумму 59095,96 руб.;

12.2.2.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-56 от 22.07.2021 на сумму 187982,04 руб.;

12.2.3.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-57 от 22.07.2021 на сумму 61860,74 руб.;

12.2.4.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-58 от 22.07.2021 на сумму 40199,20 руб.;

12.2.5.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-59 от 22.07.2021 на сумму 1874,31 руб.;

12.2.6.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-54 от 22.07.2021 на сумму 4708,95 руб.;

12.2.7.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-56 от 22.07.2021 на сумму 505,47 руб.;

12.2.8.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-57от 22.07.2021 на сумму 1967,82 руб.;

12.2.9.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-59 от 22.07.2021 на сумму 44721,92 руб.;

12.2.10.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-62 от 22.07.2021 на сумму 32039,49 руб.;

12.2.11.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-64 от 22.07.2021 на сумму 1454,67 руб.;

12.2.12.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-65 от 22.07.2021 на сумму 142844,45 руб.;

12.2.13.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85190доп1-1 от 22.07.2021 на сумму 2649,42 руб.;

12.2.14.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85190доп1-2 от 22.07.2021 на сумму 3694,29 руб.;

12.2.15.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85190доп1-3 от 22.07.2021 на сумму 4242,59 руб.;

12.2.16.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85190доп1-4 от 22.07.2021 на сумму 7410,34 руб.;

12.2.17.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85190доп1-5 от 22.07.2021 на сумму 5245,24 руб.;

12.2.18.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85190доп1-6 от 22.07.2021 на сумму 9498,42 руб.;

12.2.19.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85190доп1-7 от 22.07.2021 на сумму 10842,85 руб.;

12.2.20.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-43 от 22.07.2021 на сумму 27114,31 руб.;

12.2.21.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-44 от 22.07.2021 на сумму 24230,26 руб.;

12.2.22.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-45 от 22.07.2021 на сумму 4591,05 руб.;

12.2.23.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-46 от 22.07.2021 на сумму 6592,34 руб.;

12.2.24.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-47 от 22.07.2021 на сумму 1325,09 руб.;

12.2.25.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-48 от 22.07.2021 на сумму 8664,31 руб.;

12.2.26.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-50 от 22.07.2021 на сумму 1903,28 руб.;

12.2.27.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-51 от 22.07.2021 на сумму 16646,69 руб.;

12.2.28.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839доп1-15 от 22.07.2021 на сумму 15990,97 руб.;

12.2.29.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-17 от 22.07.2021 на сумму 24310,02 руб.;

12.2.30.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-18 от 22.07.2021 на сумму 2848,20 руб.;

13. Счет-фактура № 369 от 15.10.2021 на  сумму 870 425,40 рублей, в том числе НДС.

13.1 Справка о стоимости выполненных работ КС-3 № 14 от 15.10.2021 на  сумму 870 425,40 руб., в том числе НДС;

13.2.Акты о приемке выполненных работ за октябрь  2021 года, подписанные обеими сторонами (Примечание: стоимость  выполненных работ в актах указана без учета НДС):

13.2.1. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174доп1 от 15.10.2021 на сумму 2458,19 руб.;

13.2.2. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174доп1-61 от 15.10.2021 на сумму 206,16 руб.;

13.2.3. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174фкс-1 от 15.10.2021 на сумму 305877,82 руб.;

13.2.4. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174фкс-2 от 15.10.2021 на сумму 166176,75 руб.;

13.2.5. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174фкс-3 от 15.10.2021 на сумму 67410,21 руб.;

13.2.6. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174фкс-4 от 15.10.2021 на сумму 183225,37 руб.

14. Счет-фактура № 371 от 22.10.2021 на сумму 4 554 351,06 рублей, в том числе НДС;

14.1 Справка о стоимости выполненных работ КС-3 №15 от 22.10.2021на  сумму 4 554 351,06 руб., в том числе НДС;

14.2.Акты о приемке выполненных работ за октябрь  2021 года, подписанные обеими сторонами (Примечание: стоимость  выполненных работ в актах указана без учета НДС):

14.2.1. Акт о приемке выполненных работ КС-2  № 88839-53 от 22.10.2021  на сумму 2134,21 руб.;

14.2.2. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-43 от 22.10.2021 на сумму 172880,16 руб.;

14.2.3. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-44 от 22.10.2021 на сумму 10688,41 руб.;

14.2.4. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-45 от 22.10.2021 на сумму 19710,76 руб.;

14.2.5. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-46 от 22.10.2021 на сумму 8849,94 руб.;

14.2.6. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-47 от 22.10.2021 на сумму 150058,85 руб.;

14.2.7. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-61 от 22.10.2021 на сумму 5596,38 руб.;

14.2.8. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 2-АКЗ-21 от 22.10.2021 на сумму 78252,97 руб.;

14.2.9. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85119доп1-4 от 22.10.2021 на сумму 487031,61 руб.;

14.2.10. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85122доп1-6 от 22.10.2021 на сумму 473529,41 руб.;

14.2.11. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85124доп1-2 от 22.10.2021 на сумму 45532,98 руб.;

14.2.12. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174-1фкс-5 от 22.10.2021 на сумму 170902,19 руб.;

14.2.13. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174-1фкс-6 от 22.10.2021 на сумму 252624,28 руб.;

14.2.14. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174-3фкс-1 от 22.10.2021 на сумму 278732,81 руб.;

14.2.15. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-67 от 22.10.2021 на сумму 402338,06 руб.;

14.2.16. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-68 от 22.10.2021 на сумму 248143,21 руб.;

14.2.17. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-69 от 22.10.2021 на сумму 17862,88 руб.;

14.2.18. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-70 от 22.10.2021 на сумму 12187,45 руб.;

14.2.19. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-71 от 22.10.2021 на сумму 18972,38 руб.;

14.2.20. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-72 от 22.10.2021 на сумму 480,66 руб.;

14.2.21. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85190доп1-8 от 22.10.2021 на сумму 14431,80 руб.;

14.2.22. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-2фкс-1 от 22.10.2021 на сумму 100126,05 руб.;

14.2.23. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-2фкс-2 от 22.10.2021 на сумму 123453,81 руб.;

14.2.24. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-52 от 22.10.2021 на сумму 194211,27 руб.;

14.2.25. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-54 от 22.10.2021 на сумму 52151,73 руб.;

14.2.26. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-2фкс-1 от 22.10.2021 на сумму 105165,85 руб.;

14.2.27. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-2фкс-2 от 22.10.2021 на сумму164032,81 руб.;

14.2.28. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-20 от 22.10.2021 на сумму 3133,66 руб.;

14.2.29. Корректировочный акт о приемке выполненных работ №1 от 22.10.2021 на  сумму 3924,00 руб.;

14.2.30. Корректировочный акт о приемке выполненных работ №2 от 22.10.2021 на  сумму 3697,00 руб.

Кроме того, ответчику (Подрядчику) истцом была предъявлена к оплате счет-фактура № 33 от 31.01.2021 на сумму 1014720,00 рублей за порошок абразийный, которая не была оплачена ответчиком в полном объеме.

По вышеуказанным счетам-фактурам за выполненные работы, включая счет-фактуру за абразийный  порошок, сторонами по договору была проведена корректировка долга и зачет взаимных требований, в результате которого встречные требования сторон на сумму 10 610 987,82 руб. (десять миллионов шестьсот десять тысяч девятьсот восемьдесят семь рублей 82 копейки) считаются погашенными.       

Вышеуказанные корректировка долга  и зачет взаимных требований проводилась  путем заключения нижеперечисленных Соглашений о корректировке долга:

1. Соглашение о корректировке долга № 1257 от 28.02.2021 на сумму 1922742,75 рублей, включая НДС;

2. Соглашение о корректировке долга № 1260 от 28.02.2021 на сумму 86147,57 рублей, включая НДС;

3. Соглашение о корректировке долга № 3591 от 30.05.2021 на сумму 1830289,85 рублей, включая НДС;

4. Соглашение о корректировке долга № 5652 от 30.07.2021 на сумму 203391,59 рублей, включая НДС;

5. Соглашение о корректировке долга № 5653 от 30.07.2021 на сумму 151134,79 рублей, включая НДС;

6. Соглашение о корректировке долга № 6277 от 18.08.2021 на  сумму 2239625,56 рублей, включая НДС;

7. Соглашение о корректировке долга № 9618 от 29.11.2021 на сумму 199533,56 рублей, включая НДС;

8. Соглашение о корректировке долга № 9609 от 29.11.2021 на сумму 436203,17 рублей, включая НДС;

10.Соглашение о корректировке долга № 10340 от 30.12.2021 на сумму 1853934,48 рублей, включая НДС;

и Актов зачета  взаимных требований:

1.Акт зачета  взаимных требований № 944 от 01.01.2021 на сумму 39733,58 руб. в том числе НДС;

2.Акт зачета взаимных требований № 6479 от 30.09.2020 на сумму 1361431,16 руб. в том числе НДС;

3.Акт зачета взаимных требований № 9140 от 31.12.2020 на сумму 188568, 84 руб. в том числе НДС;

4.Акт зачета взаимных требований № 10252 от 30.11.2021 на сумму 98250, 92 руб. в том числе НДС.

   В целях исполнения работ по договору, для проживания  работников истца, обеспечивающих производство работ по проекту: «Реконструкция производства изопропилбензола (кумола) с узлом получения изопропанола» на ПАО «Омский каучук» по Договору субподряда № 044/01ОС-20 от 01.06.2020 года, истец заключил договор №104 от 21.07.2020 года аренды квартиры в городе Омск. Арендная плата по указанному договору составляла 37931,00 рубль в месяц, с учетом затрат по коммунальным платежам, электроэнергии, водоснабжения и интернета, в том числе НДФЛ в размере 4 931,00 рублей, оплата производилась ежемесячно.

21 июля 2020 года между истцом и ответчиком было заключено дополнительное соглашение №1 от 21.07.2020 года,  согласно которого ответчик (Подрядчик) возмещает истцу (Субподрядчику) 50% (пятьдесят процентов) расходов, связанных с оплатой услуг по подбору жилого помещения (квартиры), необходимого для проживания сотрудников Субподрядчика, обеспечивающих производство Работ по проекту: «Реконструкция производства изопропилбензола (кумола) с узлом получения изопропанола» на ПАО «Омский каучук» по договору субподряда № 044/01ОС-20 от 01.06.2020 года.

Согласно п.2 вышеуказанного Дополнительного соглашения к Договору, компенсация расходов, связанных с оплатой услуг по подбору  жилого помещения (квартиры) осуществляется Ответчиком ( Подрядчиком ) на основании Договора № 103 на оказание услуг по подбору и сдаче в наем объекта недвижимости от 21.07.2020 года, заключенного Истцом (Субподрядчиком) с ИП ФИО3 Размер компенсации составляет 5 750,00 (пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей.     

Кроме того, согласно п. 3 Дополнительного соглашения №1 от 21.07.2020 года к Договору, Ответчик (Подрядчик) возмещает Истцу (Субподрядчику) расходы, связанные с арендой жилого помещения (квартиры), необходимого для проживания сотрудников Истца (Субподрядчика), обеспечивающих производство Работ по проекту: «Реконструкция производства изопропилбензола (кумола) с узлом получения изопропанола» на ПАО «Омский каучук» по Договору субподряда № 044/01ОС-20 от 01.06.2020 года. 

При этом, согласно п. 4 Дополнительного соглашения №1, размер компенсации составляет 50% (пятьдесят процентов) от понесенных расходов, которая перечисляется Подрядчиком Субподрядчику ежемесячно не позднее последнего дня каждого месяца на основании Договора № 104 аренды квартиры  от 21.07.2020 года, заключенного Субподрядчиком с гр. ФИО4 сроком до 21.10.2020 года. Ежемесячная сумма компенсации составляет 18 966,00 (восемнадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей, при этом сумма компенсации за июль 2020 года составляет 6 730,00 (шесть тысяч семьсот тридцать) рублей и за октябрь 2020 года – 12 848,00 (двенадцать тысяч восемьсот сорок восемь) рублей.

22 октября 2020 г. между истцом и ответчиком заключено Дополнительное соглашение № 2 к Договору субподряда № 044/01ОС-20 от 01.06.2020 года, согласно  которого Стороны пришли к соглашению изложить пункт 4 Дополнительного соглашения № 1 от 21.07.2020 года к Договору субподряда № 044/01ОС-20 от 01.06.2020 г. в следующей редакции: «Размер ежемесячной компенсации составляет 50% (пятьдесят процентов) от понесенных расходов Субподрядчиком и составляет 18 966,00 (восемнадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей в месяц. Компенсация перечисляется Подрядчиком Субподрядчику ежемесячно не позднее последнего дня каждого месяца.» 

В связи с вышеизложенным, истец выставил ответчику к оплате счета-фактуры для компенсации расходов, связанных с  подбором и арендой жилого помещения (квартиры), необходимого для проживания сотрудников истца, на сумму 186 967,20 рублей, а именно:

1. Счет-фактура № 305 от 30.09.2020 на сумму 50412,00 рублей на оплату компенсации расходов, связанных с оплатой услуг по подбору  жилого помещения (квартиры)  и компенсации проживания за июль, август, сентябрь 2020 года;

2. Счет-фактура № 87 от 01.01.2021 на сумму 56898,00 рублей на оплату компенсации проживания за октябрь, ноябрь, декабрь 2020 года;

3. Счет-фактура № 88 от 31.01.2021 на сумму 18966,00 рублей на оплату компенсации проживания за январь 2021 года;

4. Счет-фактура № 89 от 28.02.2021 на сумму 18966,00 рублей на оплату компенсации проживания за февраль 2021 года;

5. Счет-фактура №153 от 31.05.2021 на сумму 41725,20 рублей на оплату компенсации проживания за март, апрель, май 2021 года.

Ответчиком компенсация расходов, связанных с  подбором и арендой жилого помещения (квартиры), необходимого для проживания сотрудников Истца в размере 186 967,20 рублей не произведена. 

    Кроме того, 01 марта 2021 года между Истцом и Ответчиком заключено дополнительное соглашение № 4 к Договору, согласно которого Истец (Субподрядчик) в период действия Договора, при наличии возможности может дополнительно оказывать услуги по предоставлению Электрического винтового компрессора ЗИФ СВЭ-6,3/0,7 инв. № 813 (далее – Строительная техника) с обслуживающим персоналом. Данные услуги оказываются на основании заявок Ответчика (Подрядчика), согласованной сторонами и принятой к исполнению.

Стоимость вышеуказанных услуг, согласно п.1.2. Соглашения,  определяется из расчета суммы стоимости 1-го часа использования Строительной техники с  обслуживающим персоналом. Стоимость 1-го часа использования Строительной техники с обслуживающим персоналом составляет 800 (восемьсот) рублей с учетом НДС 20%. Указанная стоимость не включает в себя стоимость электроэнергии, предоставление которой обеспечивает Ответчик (Подрядчик) за счет собственных средств.

Истцом в марте и апреле 2021 года были оказаны услуги Ответчику по предоставлению Электрического винтового компрессора ЗИФ СВЭ-6,3/0,7 на сумму 52 000,00 рублей и выставлены к оплате счета-фактуры:

-Счет-фактура № 90 от 31.03.2021 на сумму 32000,00 рублей, в том числе НДС; 

-Счет-фактура № 131 от 30.04.2021 на сумму 20000,00 рублей, в том числе НДС;

Ответчиком вышеуказанные услуги не оплачены.

Таким образом, на текущую дату Ответчик (Подрядчик) имеет перед Истцом (Субподрядчиком) задолженность в сумме  в сумме 19 537 902,96 рублей (девятнадцать миллионов пятьсот тридцать семь тысяч девятьсот два рубля 96 копеек), в том числе:

- 18 858 991,46 рублей - за выполненные работы по проекту: «Реконструкция производства изопропилбензола (кумола) с узлом получения изопропанола» на ПАО «Омский каучук»;

- 186 967, 20 рублей - компенсация расходов Истца, связанных с  подбором и арендой жилого помещения (квартиры);

- 52 000, 00 рублей – услуги по предоставлению Электрического винтового компрессора;

- 439 944, 30 рублей- задолженность за абразийный порошок. 

    В соответствии с п.9.3. договора, споры, вытекающие из договора, стороны будут стремиться решать путем переговоров. При не достижении согласия спор передается на рассмотрение  Арбитражного суда Республики Башкортостан. До обращения в суд для сторон обязательным является соблюдение претензионного порядка, при этом для ответа на претензию Стороне предоставляется  15 (пятнадцать) рабочих дней  с даты получения соответствующей претензии.

В адрес ответчика была направлена претензия о досудебном урегулировании спора № 46/05 Ю-137 от 20.01.2022 года с требованием погасить задолженность перед истцом, в том числе по договору № 044/01ОС-20 от 01.06.2020 года. 

Получение ответчиком данного претензионного письма подтверждается отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором № 45326612027031, а также входящим регистрационным номером Ответчика на претензии (вхд. № 701 от 31.01.2022 года).

По состоянию на 25 апреля 2022 года ответчик ответ на претензию не предоставил.      Ответчик свою задолженность перед истцом в размере 19 537 902,96 рублей рубля подтверждает актом сверки взаимных расчетов от 14.04.2022 года, однако до настоящего времени задолженность ответчиком по договору не погашена.

Оценив представленные доказательства в их совокупности и выслушав доводы сторон в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В силу статей 64, 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В соответствии со статьей 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Стороны пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, представление арбитражному суду своих доводов и объяснений, осуществление иных процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных названным кодексом.

В силу статей 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд на основе принципа состязательности с учетом представленных сторонами доказательств устанавливает значимые для дела обстоятельства. При этом каждая из сторон несёт риск процессуальных последствий непредоставления доказательств.

В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определённое действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определённого действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Проанализировав условия представленного договора субподряда № 044/01ОС-20 от 01.06.2020 года, суд приходит к выводу, что сторонами заключен договор подряда, следовательно, между сторонами возникли отношения, регулируемые главой 37 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Договор субподряда № 044/01ОС-20 от 01.06.2020 года содержит все существенные условия договора подряда, по которым сторонами достигнуто соглашение, соответствует требованиям закона о форме и содержании, подписан сторонами, оснований полагать о незаключенности либо ничтожности договора у суда не имеется.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации, если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

В силу пункта 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно статье 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно пункту 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком должны оформляться актом, подписанным обеими сторонами.

В соответствии со статьей 753 Гражданского кодекса Российской Федерации и разъяснениями, изложенными в пункте 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" (далее - информационное письмо N 51) принятые заказчиком работы подлежат оплате. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Как следует из материалов дела, между истцом (Субподрядчик) и ответчиком (Подрядчик) заключен договор субподряда № 044/01ОС-20 от 01.06.2020 года (далее по тексту - Договор), согласно которого (п.1.1. договора), истец (субподрядчик) обязался выполнить работы по проекту: «Реконструкция производства изопропилбензола (кумола) с узлом получения изопропанола» на ПАО «Омский каучук», в соответствии с техническими заданиями, являющимися неотьемлемой частью настоящего договора, с рабочей документацией, иными условиями договора, а также требованиями действующего законодательства РФ. 

Наименование работ, объем и стоимость, номер сметы определены Сторонами в Приложении №1, 1/1, 1/1/1  к договору. Работы включают в  себя обеспыливание поверхности металлоконст- рукций, обезжиривание поверхностей металлоконструкций, огрунтовку, окраску металлических поверхностей, опознавательную покраску трубопроводов.

Согласно п.1.2. договора, стоимость работ, указанных в приложениях, определена в локально-сметном расчете, либо коммерческом предложении, составляемом к каждому техническому заданию в порядке, установленном разделом 2 настоящего договора. Подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

Согласно п.2.1. и 6.1. договора, стоимость работ ориентировочно составляет 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, в том числе НДС 20 %, и определяется по локальным сметным расчетам (далее - ЛСР). В указанную стоимость входят вспомогательные материалы, не входит стоимость основных материалов и оборудования.

Согласно п. 1.5. договора договор является рамочным, технические задания, сметы и иная рабочая документация подписывается по мере появления объемов работ в том же порядке, что и Договор.

22 декабря 2020 года сторонами было заключено дополнительное соглашение № 3 к договору субподряда № 044/01ОС-20 от 01.06.2020 года, распространяющее свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01 июня 2020 года.  Согласно Дополнительного соглашения №3 от 22.12.2020 г., истец (субподрядчик) дополнительно выполняет работы по антикоррозионной защите, сборке и обшивке контейнеров в количестве 8 штук для транспортировки трубных узлов, а также работы по упаковке трубных узлов в количестве 230 тонн после выполнения заводской антикоррозионной защиты по проекту: «Реконструкция производства изопропилбензола (кумола) с узлом получения изопропанола» на ПАО «Омский каучук».

В соответствии с пунктами 2-3 указанного соглашения, стоимость затрат составляет:

- по антикоррозионной защите, сборке и обшивке 1 контейнера - 26 708,76 (двадцать шесть тысяч семьсот восемь) рублей 76 копеек без НДС, согласно утвержденному Сторонами Расчету, являющемуся Приложением № 1 к Соглашению.  

-на упаковку трубных узлов за 1 тонну - 1 742,87 руб. (одна тысяча семьсот сорок два рубля 87 копеек) без НДС, согласно утвержденному Сторонами Расчету, являющемуся Приложением № 2 к  Соглашению.  

Оплата Субподрядчику понесенных затрат по настоящему Дополнительному соглашению осуществляется Подрядчиком в порядке и на условиях, предусмотренных договором субподряда № 044/01ОС-20 от 01.06.2020 года.   

В соответствии с п.4.7. договора, выполненные субподрядчиком работы и их стоимость оформляются актом о приемке выполненных работ (форма КС-2 по форме Приложения № 6), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 по форме Приложения № 7), актом о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (ОС-3) по форме Приложения № 8, подписанными обеими сторонами.

Согласно пунктов 6.3., 6.5. договора, оплата выполненных работ производится Подрядчиком на основании Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Оплата выполненных работ производится Подрядчиком денежными средствами в течение 40 (сорока) календарных дней с даты подписания актов по форме КС-2, КС-З.

Согласно п. 7.9. договора, при нарушении сроков оплаты, указанных в п. 6.5 договора, свыше 7 календарных дней  ответчик (подрядчик) уплачивает субподрядчику неустойку 0,02 % от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, но не более 7,5 % от несвоевременно оплаченной суммы.

В рамках исполнения договора субподряда № 044/01ОС-20 от 01.06.2020 года и дополнительных соглашений к нему, истец выполнил работы  на сумму 28 445 283, 58 рублей  (двадцать восемь миллионов четыреста сорок пять тысяч двести восемьдесят три рубля 58 копеек).

Выполнение работ истцом (Субподрядчиком) на сумму 28 445 283, 58 руб. и их приемка ответчиком (Заказчиком) подтверждается следующими документами:

1. Счет-фактура № 306 от 25.08.2020 на сумму 1 306 489,20 руб., в том числе НДС. 

1.1 Справка о стоимости выполненных работ КС-3 № 1 от 25.08.2020 на  сумму 1306489,20 руб., в том числе НДС;

1.2.Акты о приемке выполненных работ за август  2020 года, подписанные обеими сторонами (Примечание: стоимость  выполненных работ в актах указана без учета НДС):

1.2.1.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 2-АКЗ-1 от 25.08.2020 на сумму 66658,00 руб.;

1.2.2.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 2-АКЗ-2 от 25.08.2020 на сумму 47294,00 руб.;

1.2.3.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 2-АКЗ-3 от 25.08.2020 на сумму 11434,00 руб.;

1.2.4.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 2-АКЗ-4 от 25.08.2020 на сумму 141593,00 руб.;

1.2.5.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 2-АКЗ-5 от 25.08.2020 на сумму 37479,00 руб.;

1.2.6.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 2-АКЗ-6 от 25.08.2020 на сумму 175800,00 руб.;

1.2.7.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 2-АКЗ-7 от 25.08.2020 на сумму 175800,00 руб.;

1.2.8.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 2-АКЗ-8 от 25.08.2020 на сумму 97781,00 руб.;

1.2.9.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 2-АКЗ-9 от 25.08.2020 на сумму 230529,00 руб.;

1.2.10.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 2-АКЗ-10 от 25.08.2020 на сумму 104373,00 руб.;

2. Счет-фактура № 422 от 22.10.2020 на сумму 2 131 819,92 рубля, в том числе НДС;

2.1. Справка о стоимости выполненных работ КС-3 № 2 от 22.10.2020 на  сумму 2131819,92 руб., в том числе НДС;

2.2.Акты о приемке выполненных работ за октябрь  2020 года, подписанные обеими сторонами (Примечание: стоимость  выполненных работ в актах указана без учета НДС):

2.2.1. Акт о приемке выполненных работ КС-2  № 1 от 22.10.2020 на сумму 12045,29 руб.;

2.2.2. Акт о приемке выполненных работ КС-2  № 2 от 22.10.2020 на сумму 197518,73 руб.;

2.2.3. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85120доп1-1 от 22.10.2020 на сумму 66645,26 руб.;

2.2.4. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85120доп1-2 от 22.10.2020 на сумму 118147,62 руб.;

2.2.5. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85120доп1-3 от 22.10.2020 на сумму 118147,62 руб.;

2.2.6. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-1 от 22.10.2020 на сумму 2769,79 руб.;

2.2.7. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-2 от 22.10.2020 на сумму 5855,18 руб.;

2.2.8. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-3 от 22.10.2020 на сумму 4094,65 руб.;

2.2.9. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-4 от 22.10.2020 на сумму 24187,70 руб.;

2.2.10.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-5 от 22.10.2020 на сумму 191151,09 руб.;

2.2.11.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-6 от 22.10.2020 на сумму 2712,76 руб.;

2.2.12.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-7 от 22.10.2020 на сумму 82209,21 руб.;

2.2.13.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-8 от 22.10.2020 на сумму 69207,44 руб.;

2.2.14.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-9 от 22.10.2020 на сумму 18237,90 руб.;

2.2.15.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-10 от 22.10.2020 на сумму 123735,17 руб.;

2.2.16.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-11 от 22.10.2020 на сумму 47516,15 руб.;

2.2.17.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-12 от 22.10.2020 на сумму 254027,75 руб.;

2.2.18.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-13 от 22.10.2020 на сумму 186987,30 руб.;

2.2.19.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-14 от 22.10.2020 на сумму 62443,38 руб.;

2.2.20.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-15 от 22.10.2020 на сумму 139443,31 руб.;

2.2.21.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-16 от 22.10.2020 на сумму 26912,47 руб.;

2.2.22.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-17 от 22.10.2020 на сумму 22520,83 руб.;

3. Счет-фактура № 447 от 22.11.2020 на сумму 514 235,12 рублей, в том числе НДС;

3.1 Справка о стоимости выполненных работ КС-3 № 3 от 22.11.2020 на  сумму 514235,12 руб., в том числе НДС;

3.2.Акты о приемке выполненных работ за ноябрь  2020 года, подписанные обеими сторонами (Примечание: стоимость  выполненных работ в актах указана без учета НДС):

3.2.1.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839 доп1-3 от 22.11.2020 на сумму 5145,65 руб.;

3.2.2.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839 доп1-5 от 22.11.2020 на сумму 23500,04 руб.;

3.2.3.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839 доп1-7 от 22.11.2020 на сумму 24368,80 руб.;

3.2.4.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-18 от 22.11.2020 на сумму 14117,78 руб.;

3.2.5.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-19 от 22.11.2020 на сумму 27851,34 руб.;

3.2.6.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-20 от 22.11.2020 на сумму 35858,92 руб.;

3.2.7.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-21 от 22.11.2020 на сумму 27027,50 руб.;

3.2.8.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-22 от 22.11.2020 на сумму 11322,44 руб.;

3.2.9.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-23 от 22.11.2020 на сумму 7269,54 руб.;

3.2.10.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839доп1-1 от 22.11.2020 на сумму 84100,94 руб.;

3.2.11.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839доп1-2 от 22.11.2020 на сумму 32787,37 руб.;

3.2.12.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839доп1-4 от 22.11.2020 на сумму 98505,33 руб.;

3.2.13.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839доп1-6 от 22.11.2020 на сумму  36673,62 руб.;

4. Счет-фактура  № 465 от 22.12.2020 на сумму 1 705 241,44 рублей, в том числе НДС;

4.1. Справка о стоимости выполненных работ КС-3 № 5 от 22.12.2020 на  сумму 1705241,44 руб., в том числе НДС;

4.2. Акты о приемке выполненных работ за ноябрь  2020 года, подписанные обеими сторонами (Примечание: стоимость  выполненных работ в актах указана без учета НДС):

4.2.1.Акт о приемке выполненных работ КС-2  № 2-АКЗдоп1-1 от 22.12.2020 на сумму 60933,55 руб.;

4.2.2.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85119доп1-1 от 22.12.2020 на сумму 97276,01 руб.;

4.2.3.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85119доп1-2 от 22.12.2020 на сумму 47624,11 руб.;

4.2.4.Акт о приемке выполненных работ КС-2 №  85121доп1-1 от 22.12.2020 на сумму  124025,19 руб.;

4.2.5.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-1 от 22.12.2020  на сумму  252652,15 руб.;

4.2.6.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-2 от 22.12.2020 на сумму  59873,62 руб.;

4.2.7.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-3 от 22.12.2020 на сумму  58412,53 руб.;

4.2.8.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-4 от 22.12.2020 на сумму  357928,97 руб.;

4.2.9.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-5 от 22.12.2020 на сумму  276202,12 руб.;

4.2.10.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-6 от 22.12.2020 на сумму  4057,14 руб.;

4.2.11.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-7 от 22.12.2020 на сумму  19462,94 руб.;

4.2.12.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-8 от 22.12.2020 на сумму  62586,20 руб.;

5. Счет-фактура № 466 от 22.12.2020 на сумму 288454,61 рублей, в том числе НДС;

5.1 Справка о стоимости выполненных работ КС-3 № 6 от 22.12.2020 на  сумму 288454,61  руб., в том числе НДС;

 5.2.Акты о приемке выполненных работ за декабрь  2020 года, подписанные обеими сторонами (Примечание: стоимость  выполненных работ в актах указана без учета НДС):

5.2.1.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 4 от 22.12.2020 на сумму 240378,84 руб.;

6. Счет-фактура № 467 от 22.12.2020 на сумму 404667,23 рублей, в том числе НДС;

6.1 Справка о стоимости выполненных работ КС-3 № 7 от 22.12.2020 на  сумму 404667,23 рублей, в том числе НДС;

6.2. Акты о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года, подписанные обеими сторонами (Примечание: стоимость  выполненных работ в актах указана без учета НДС):

6.2.1. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 4 от 22.12.2020 на сумму 337222,69 руб.;

7. Счет-фактура № 45 от 22.01.2021 на сумму 1 035 697,02 руб., в том числе НДС. 

7.1. Справка о стоимости выполненных работ № 8 от 22.01.2021 на сумму 1 035 697,02 руб., в том числе НДС;

7.2.Акты о приемке выполненных работ за январь 2021 года, подписанные обеими сторонами (Примечание: стоимость  выполненных работ в актах указана без учета НДС):

7.2.1. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 21 от 22.01.2021 на сумму 19882,00 руб.;

7.2.2. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85119доп1-3 от 22.01.2021 на сумму 33863,09 руб.;

7.2.3. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-24 от 22.01.2021 на сумму 3877,68 руб.;

7.2.4. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-25 от 22.01.2021 на сумму 1199,94 руб.;

7.2.5. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-26 от 22.01.2021 на сумму 3641,29 руб.;

7.2.6. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-27 от 22.01.2021 на сумму 9696,87 руб.;

7.2.7. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-28 от 22.01.2021 на сумму 8288,69 руб.;

7.2.8. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-29 от 22.01.2021 на сумму 7323,58 руб.;

7.2.9. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-30 от 22.01.2021 на сумму 11040,39 руб.;

7.2.10. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-31 от 22.01.2021 на сумму 2338,36 руб.;

7.2.11. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №88839-32 от 22.01.2021 на сумму 58367,07 руб.;

7.2.12. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №88839-33 от 22.01.2021 на сумму 30882,16 руб.;

7.2.13. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №88839-34 от 22.01.2021 на сумму 6004,41 руб.;

7.2.14. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №88839-35 от 22.01.2021 на сумму 12337,68 руб.;

7.2.15. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №88839-36 от 22.01.2021 на сумму 15878,46 руб.;

7.2.16. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №88839-37 от 22.01.2021 на сумму 1480,72 руб.;

7.2.17. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №88839-38 от 22.01.2021 на сумму 40393,46 руб.;

7.2.18. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №88839-39 от 22.01.2021 на сумму 2890,75 руб.;

7.2.19. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №88839-40 от 22.01.2021 на сумму 28468,70 руб.;

7.2.20. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №88839-41 от 22.01.2021 на сумму 5513,60 руб.;

7.2.21. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №88839-42 от 22.01.2021 на сумму 4610,53 руб.;

7.2.22. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №88839доп1-8 от 22.01.2021 на сумму 16785,41 руб.;

7.2.23. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №88839доп1-9 от 22.01.2021 на сумму 8592,10 руб.;

7.2.24. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №88839доп1-10 от 22.01.2021 на сумму 1050,57 руб;

7.2.25. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №88839доп1-11 от 22.01.2021 на сумму 20530,59 руб.;

7.2.26. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №88839доп1-12 от 22.01.2021 на сумму 4809,76 руб.;

7.2.27. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №88839доп1-13 от 22.01.2021 на сумму 7496,70 руб.;

7.2.28. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №88839доп1-14 от 22.01.2021 на сумму 4970,13 руб.;

7.2.29. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-9 от 22.01.2021 на сумму 55277,87 руб. ;

7.2.30. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-10 от 22.01.2021 на сумму 10864,93 руб.;

7.2.31. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-11 от 22.01.2021 на сумму 10589,45 руб.;

7.2.32. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-12 от 22.01.2021 на сумму 64917,68 руб.;

7.2.33. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-13 от 22.01.2021 на сумму 200582,14 руб.;

7.2.34. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-14 от 22.01.2021 на сумму 62178,61 руб. ;

7.2.35. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-15 от 22.01.2021 на сумму 51820,00 руб. ;

7.2.36. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-16 от 22.01.2021 на сумму 19801,68 руб. ;

8. Счет-фактура № 97 от 22.03.2021 на сумму 2 913 464,45 руб., в том числе НДС. 

8.1. Справка о стоимости выполненных работ КС-3 № 9 от 22.03.2021 на  сумму 2913464,45 руб., в том числе НДС;

8.2. Акты о приемке выполненных работ за март 2021 года, подписанные обеими сторонами (Примечание: стоимость  выполненных работ в актах указана без учета НДС):

8.2.1. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-1 от 22.03.2021 на сумму 3780,58 руб.;

8.2.2. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-2 от 22.03.2021 на сумму 4077,65 руб.;

8.2.3. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-3 от 22.03.2021 на сумму 73749,83 руб.;

8.2.4. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-4 от 22.03.2021 на сумму 48879,49 руб.;

8.2.5. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-5 от 22.03.2021 на сумму 53581,59 руб.;

8.2.6. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-6 от 22.03.2021 на сумму 35740,31 руб.;

8.2.7. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-7 от 22.03.2021 на сумму 111551,34 руб;

8.2.8. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-8 от 22.03.2021 на сумму 10256,53 руб.;

8.2.9. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-9 от 22.03.2021 на сумму 314697,93 руб.;

8.2.10. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-10 от 22.03.2021 на сумму 16352,92 руб.;

8.2.11. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-11 от 22.03.2021 на сумму 135619,10 руб.;

8.2.12. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-12 от 22.03.2021 на сумму 4915,97 руб.;

8.2.13. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-13 от 22.03.2021 на сумму 58661,25 руб.;

8.2.14. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-14 от 22.03.2021 на сумму 94277,04 руб.;

8.2.15. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-15 от 22.03.2021 на сумму 7482,39 руб.;

8.2.16. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-16 от 22.03.2021 на сумму 139736,21 руб.;

8.2.17. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-17 от 22.03.2021 на сумму 38199,51 руб.;

8.2.18. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-18 от 22.03.2021 на сумму 143461,32 руб.;

8.2.19. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-19 от 22.03.2021 на сумму 27707,67 руб.;

8.2.20. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-20 от 22.03.2021 на сумму 20208,84 руб.;

8.2.21. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-21 от 22.03.2021 на сумму 16928,19 руб.;

8.2.22. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-22 от 22.03.2021 на сумму 11674,98 руб.;

8.2.23. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-23 от 22.03.2021 на сумму 30260,65 руб.;

8.2.24. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-24 от 22.03.2021 на сумму 40779,94 руб.;

8.2.25. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-25 от 22.03.2021 на сумму 252276,08 руб.;

8.2.26. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-26 от 22.03.2021 на сумму 194084,93 руб.;

8.2.27. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-27 от 22.03.2021 на сумму 46742,10 руб.;

8.2.28. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-28 от 22.03.2021 на сумму 42305,76 руб.;

8.2.29. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-29 от 22.03.2021 на сумму 83926,46 руб.;

8.2.30. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-30 от 22.03.2021 на сумму 2896,80 руб.;

8.2.31. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-31 от 22.03.2021 на сумму 11671,98 руб.;

8.2.32. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-32 от 22.03.2021 на сумму 7154,01 руб.;

8.2.33. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-33 от 22.03.2021 на сумму 109823,40 руб.;

8.2.34. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-34 от 22.03.2021 на сумму 12709,87 руб.;

8.2.35. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-35 от 22.03.2021 на сумму 93139,80 руб.;

8.2.36. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-36 от 22.03.2021 на сумму 1928,82 руб.;

8.2.37. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-37 от 22.03.2021 на сумму 126645,80 руб.;

9. Счет-фактура № 149 от 22.04.2021 на сумму 2 317 541,63 руб., в том числе НДС. 

9.1 Справка о стоимости выполненных работ КС-3 № 10 от 22.04.2021 на  сумму 2317541,63 руб., в том числе НДС;

9.2 Акты о приемке выполненных работ за апрель 2021 года, подписанные обеими сторонами (Примечание: стоимость  выполненных работ в актах указана без учета НДС):

9.2.1.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85122доп1-1 от 22.04.2021 на сумму 65204,93 руб.;

9.2.2.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85122доп1-2 от 22.04.2021 на сумму 69467,86 руб.;

9.2.3.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85122доп1-3 от 22.04.2021 на сумму 59726,39 руб.;

9.2.4. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-1 от 22.04.2021 на сумму 28422,43 руб.;

9.2.5. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-2 от 22.04.2021 на сумму 283428,07 руб.;

9.2.6. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-3 от 22.04.2021 на сумму 107566,34 руб.;

9.2.7. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-4 от 22.04.2021 на сумму 3223,61 руб.;

9.2.8. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-5 от 22.04.2021 на сумму 26668,64 руб.;

9.2.9. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-6 от 22.04.2021 на сумму 65959,29 руб.;

9.2.10. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-7 от 22.04.2021 на сумму 33466,91 руб.;

9.2.11. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-8 от 22.04.2021 на сумму 495291,99 руб.;

9.2.12. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-9 от 22.04.2021 на сумму 25005,72 руб.;

9.2.13. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-10 от 22.04.2021 на сумму 3945,00 руб.;

9.2.14. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-11 от 22.04.2021 на сумму 14352,08 руб.;

9.2.15. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-12 от 22.04.2021 на сумму 43638,41 руб.;

9.2.16. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-13 от 22.04.2021 на сумму 4507,16 руб.;

9.2.17. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-14 от 22.04.2021 на сумму 102768,80 руб.;

9.2.18. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-15 от 22.04.2021 на сумму 87939,61 руб.;

9.2.19. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-16 от 22.04.2021 на сумму 61796,70 руб.;

9.2.20. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-17 от 22.04.2021 на сумму 5398,79 руб.;

9.2.21. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-18 от 22.04.2021 на сумму 165597,35 руб.;

9.2.22. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-19 от 22.04.2021 на сумму 16246,68 руб.;

9.2.23. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-20 от 22.04.2021 на сумму 5799,72 руб.;

9.2.24. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-21 от 22.04.2021 на сумму 62423,47 руб.;

9.2.25. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-22 от 22.04.2021 на сумму 42138,74 руб.;

9.2.26. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-23 от 22.04.2021 на сумму 51300,00 руб.;

10. Счет-фактура № 201 от 22.05.2021 на сумму 737 503,46 руб., в том числе НДС. 

10.1 Справка о стоимости выполненных работ КС-3 № 11 от 22.05.2021 на  сумму 737503,46 руб., в том числе НДС;

10.2.Акты о приемке выполненных работ за май  2021 года, подписанные обеими сторонами (Примечание: стоимость  выполненных работ в актах указана без учета НДС):

10.2.1.Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174доп1-24 от 22.05.2021на сумму 78047,61 руб. ;

10.2.2.Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174доп1-25 от 22.05.2021на сумму 40960,18 руб.;

10.2.3.Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174доп1-26 от 22.05.2021на сумму 30556,50 руб.;

10.2.4.Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174доп1-27 от 22.05.2021на сумму 29555,62 руб.;

10.2.5.Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174доп1-28 от 22.05.2021на сумму 53460,47 руб.;

10.2.6.Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174доп1-29 от 22.05.2021на сумму 3275,98 руб.;

10.2.7.Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174доп1-30 от 22.05.2021на сумму 114322,63 руб.;

10.2.8.Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174доп1-31 от 22.05.2021на сумму 24729,25 руб.;

10.2.9.Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174доп1-32 от 22.05.2021на сумму 34687,00 руб.;

10.2.10.Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174доп1-33 от 22.05.2021на сумму 9120,21 руб.;

10.2.11.Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174доп1-34 от 22.05.2021на сумму 5531,02 руб.;

10.2.12.Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174доп1-35 от 22.05.2021на сумму 8016,67 руб.;

10.2.13.Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174доп1-36 от 22.05.2021на сумму 170160,74 руб.;

10.2.14.Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174доп1-37 от 22.05.2021на сумму 2304,08 руб.;

10.2.15.Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174доп1-38 от 22.05.2021на сумму 9858,26 руб.;

11.Счет-фактура № 228 от 22.06.2021 на сумму 8 760 563,41 руб., в том числе НДС. 

11.1 Справка о стоимости выполненных работ КС-3 №12 от 22.06.2021 на  сумму 8760563,41 руб., в том числе НДС;

11.2.Акты о приемке выполненных работ за июнь  2021 года, подписанные обеими сторонами (Примечание: стоимость  выполненных работ в актах указана без учета НДС):

11.2.1.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-38 от 22.06.2021 на сумму 39834,96 руб.;

11.2.2.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-39 от 22.06.2021 на сумму 170262,56 руб.;

11.2.3.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-40 от 22.06.2021 на сумму 44951,93 руб.;

11.2.4.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-41 от 22.06.2021 на сумму 52742,11 руб.;

11.2.5.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-42 от 22.06.2021 на сумму 89968,62 руб.;

11.2.6.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-48 от 22.06.2021 на сумму 5396,31 руб.;

11.2.7.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-49 от 22.06.2021 на сумму 1474,49 руб.;

11.2.8.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-50 от 22.06.2021 на сумму 12079,97 руб.;

11.2.9.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-51 от 22.06.2021 на сумму 91448,44 руб.;

11.2.10.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-52 от 22.06.2021 на сумму 44232,95 руб.;

11.2.11.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-53 от 22.06.2021 на сумму 824,88 руб.;

11.2.12.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-54 от 22.06.2021 на сумму 120863,20 руб.;

11.2.13.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-60 от 22.06.2021 на сумму 8453,62 руб.;

11.2.14.Акт о приемке выполненных работ КС-2 №2-АКЗ-11 от 22.06.2021 на сумму 97110,00 руб.;

11.2.15.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 2-АКЗ-12 от 22.06.2021  на сумму 97110,00 руб.;

11.2.16.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 2-АКЗ-17 от 22.06.2021 на сумму 217365,43 руб.;

11.2.17.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 2-АКЗ-18 от 22.06.2021  на сумму 112099,90 руб.;

11.2.18.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 2-АКЗ-19 от 22.06.2021 на сумму 18876,16 руб.;

11.2.19.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 2-АКЗ-20 от 22.06.2021  на сумму 49678,03 руб.;

11.2.20.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 2-АКЗ-22 от 22.06.2021  на сумму 25246,43 руб.;

11.2.21.Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85122доп1-4 от 22.06.2021 на сумму 12284,98 руб.;

11.2.22.Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85122доп1-5 от 22.06.2021 на сумму 90614,61 руб.;

11.2.23.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85124доп1-1 от 22.06.2021 на сумму 102525,85 руб.;

11.2.24.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-39 от 22.06.2021 на сумму 22300,36 руб.;

11.2.25.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-40 от 22.06.2021 на сумму 9190,15 руб.;

11.2.26.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-41 от 22.06.2021 на сумму 10322,20 руб;

11.2.27.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-42 от 22.06.2021 на сумму 8530,95 руб.;

11.2.28.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-43 от 22.06.2021 на сумму 9380,97 руб.;

11.2.29.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-44 от 22.06.2021 на сумму 80175,41 руб.;

11.2.30.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-45 от 22.06.2021 на сумму 188938,22 руб.;

11.2.31.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-46 от 22.06.2021 на сумму 108678,09 руб.;

11.2.32.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-47 от 22.06.2021 на сумму 3393,07 руб.;

11.2.33.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-48 от 22.06.2021 на сумму 26650,75 руб.;

11.2.34.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-49 от 22.06.2021 на сумму 5938,05 руб.;

11.2.35.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-50 от 22.06.2021 на сумму 710,41 руб.;

11.2.36.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-51 от 22.06.2021 на сумму 215235,89 руб.;

11.2.37.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-52 от 22.06.2021 на сумму 5065,37 руб.;

11.2.38.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-53 от 22.06.2021 на сумму 25850,98 руб.;

11.2.39.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-58 от 22.06.2021 на сумму 269347,71 руб.;

11.2.40.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-60 от 22.06.2021 на сумму 38698,97 руб.;

11.2.41.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-63 от 22.06.2021 на сумму 46637,43 руб.;

11.2.42.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-66 от 22.06.2021 на сумму 200393,05 руб.;

11.2.43.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85244изм1-1 от 22.06.2021 на сумму 4383503,15 руб.;

11.2.44.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-49 от 22.06.2021 на сумму 1521,67 руб.;

11.2.45.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-19 от 22.06.2021 на сумму 24004,14 руб.;

12. Счет-фактура № 311 от 22.07.2021 на сумму 904 829,63 руб., в том числе НДС. 

12.1. Справка о стоимости выполненных работ КС-3 №13 от 22.07.2021 на  сумму 904829,63 руб., в том числе НДС;

12.2.Акты о приемке выполненных работ за июль  2021 года, подписанные обеими сторонами (Примечание: стоимость  выполненных работ в актах указана без учета НДС):

12.2.1.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-55 от 22.07.2021 на сумму 59095,96 руб.;

12.2.2.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-56 от 22.07.2021 на сумму 187982,04 руб.;

12.2.3.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-57 от 22.07.2021 на сумму 61860,74 руб.;

12.2.4.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-58 от 22.07.2021 на сумму 40199,20 руб.;

12.2.5.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-59 от 22.07.2021 на сумму 1874,31 руб.;

12.2.6.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-54 от 22.07.2021 на сумму 4708,95 руб.;

12.2.7.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-56 от 22.07.2021 на сумму 505,47 руб.;

12.2.8.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-57от 22.07.2021 на сумму 1967,82 руб.;

12.2.9.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-59 от 22.07.2021 на сумму 44721,92 руб.;

12.2.10.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-62 от 22.07.2021 на сумму 32039,49 руб.;

12.2.11.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-64 от 22.07.2021 на сумму 1454,67 руб.;

12.2.12.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-65 от 22.07.2021 на сумму 142844,45 руб.;

12.2.13.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85190доп1-1 от 22.07.2021 на сумму 2649,42 руб.;

12.2.14.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85190доп1-2 от 22.07.2021 на сумму 3694,29 руб.;

12.2.15.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85190доп1-3 от 22.07.2021 на сумму 4242,59 руб.;

12.2.16.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85190доп1-4 от 22.07.2021 на сумму 7410,34 руб.;

12.2.17.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85190доп1-5 от 22.07.2021 на сумму 5245,24 руб.;

12.2.18.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85190доп1-6 от 22.07.2021 на сумму 9498,42 руб.;

12.2.19.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85190доп1-7 от 22.07.2021 на сумму 10842,85 руб.;

12.2.20.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-43 от 22.07.2021 на сумму 27114,31 руб.;

12.2.21.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-44 от 22.07.2021 на сумму 24230,26 руб.;

12.2.22.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-45 от 22.07.2021 на сумму 4591,05 руб.;

12.2.23.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-46 от 22.07.2021 на сумму 6592,34 руб.;

12.2.24.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-47 от 22.07.2021 на сумму 1325,09 руб.;

12.2.25.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-48 от 22.07.2021 на сумму 8664,31 руб.;

12.2.26.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-50 от 22.07.2021 на сумму 1903,28 руб.;

12.2.27.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-51 от 22.07.2021 на сумму 16646,69 руб.;

12.2.28.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839доп1-15 от 22.07.2021 на сумму 15990,97 руб.;

12.2.29.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-17 от 22.07.2021 на сумму 24310,02 руб.;

12.2.30.Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-18 от 22.07.2021 на сумму 2848,20 руб.;

13. Счет-фактура № 369 от 15.10.2021 на  сумму 870 425,40 рублей, в том числе НДС.

13.1 Справка о стоимости выполненных работ КС-3 № 14 от 15.10.2021 на  сумму 870 425,40 руб., в том числе НДС;

13.2.Акты о приемке выполненных работ за октябрь  2021 года, подписанные обеими сторонами (Примечание: стоимость  выполненных работ в актах указана без учета НДС):

13.2.1. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174доп1 от 15.10.2021 на сумму 2458,19 руб.;

13.2.2. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174доп1-61 от 15.10.2021 на сумму 206,16 руб.;

13.2.3. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174фкс-1 от 15.10.2021 на сумму 305877,82 руб.;

13.2.4. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174фкс-2 от 15.10.2021 на сумму 166176,75 руб.;

13.2.5. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174фкс-3 от 15.10.2021 на сумму 67410,21 руб.;

13.2.6. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №85174фкс-4 от 15.10.2021 на сумму 183225,37 руб.

14. Счет-фактура № 371 от 22.10.2021 на сумму 4 554 351,06 рублей, в том числе НДС;

14.1 Справка о стоимости выполненных работ КС-3 №15 от 22.10.2021на  сумму 4 554 351,06 руб., в том числе НДС;

14.2.Акты о приемке выполненных работ за октябрь  2021 года, подписанные обеими сторонами (Примечание: стоимость  выполненных работ в актах указана без учета НДС):

14.2.1. Акт о приемке выполненных работ КС-2  № 88839-53 от 22.10.2021  на сумму 2134,21 руб.;

14.2.2. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-43 от 22.10.2021 на сумму 172880,16 руб.;

14.2.3. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-44 от 22.10.2021 на сумму 10688,41 руб.;

14.2.4. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-45 от 22.10.2021 на сумму 19710,76 руб.;

14.2.5. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-46 от 22.10.2021 на сумму 8849,94 руб.;

14.2.6. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-47 от 22.10.2021 на сумму 150058,85 руб.;

14.2.7. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1-АКЗ-61 от 22.10.2021 на сумму 5596,38 руб.;

14.2.8. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 2-АКЗ-21 от 22.10.2021 на сумму 78252,97 руб.;

14.2.9. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85119доп1-4 от 22.10.2021 на сумму 487031,61 руб.;

14.2.10. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85122доп1-6 от 22.10.2021 на сумму 473529,41 руб.;

14.2.11. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85124доп1-2 от 22.10.2021 на сумму 45532,98 руб.;

14.2.12. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174-1фкс-5 от 22.10.2021 на сумму 170902,19 руб.;

14.2.13. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174-1фкс-6 от 22.10.2021 на сумму 252624,28 руб.;

14.2.14. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174-3фкс-1 от 22.10.2021 на сумму 278732,81 руб.;

14.2.15. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-67 от 22.10.2021 на сумму 402338,06 руб.;

14.2.16. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-68 от 22.10.2021 на сумму 248143,21 руб.;

14.2.17. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-69 от 22.10.2021 на сумму 17862,88 руб.;

14.2.18. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-70 от 22.10.2021 на сумму 12187,45 руб.;

14.2.19. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-71 от 22.10.2021 на сумму 18972,38 руб.;

14.2.20. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85174доп1-72 от 22.10.2021 на сумму 480,66 руб.;

14.2.21. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 85190доп1-8 от 22.10.2021 на сумму 14431,80 руб.;

14.2.22. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-2фкс-1 от 22.10.2021 на сумму 100126,05 руб.;

14.2.23. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-2фкс-2 от 22.10.2021 на сумму 123453,81 руб.;

14.2.24. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-52 от 22.10.2021 на сумму 194211,27 руб.;

14.2.25. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88839-54 от 22.10.2021 на сумму 52151,73 руб.;

14.2.26. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-2фкс-1 от 22.10.2021 на сумму 105165,85 руб.;

14.2.27. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-2фкс-2 от 22.10.2021 на сумму164032,81 руб.;

14.2.28. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 88850-20 от 22.10.2021 на сумму 3133,66 руб.;

14.2.29. Корректировочный акт о приемке выполненных работ №1 от 22.10.2021 на  сумму 3924,00 руб.;

14.2.30. Корректировочный акт о приемке выполненных работ №2 от 22.10.2021 на  сумму 3697,00 руб.

Кроме того, ответчику (Подрядчику) истцом была предъявлена к оплате счет-фактура № 33 от 31.01.2021 на сумму 1014720,00 рублей за порошок абразийный, которая не была оплачена ответчиком в полном объеме.

По вышеуказанным счетам-фактурам за выполненные работы, включая счет-фактуру за абразийный  порошок, сторонами по договору была проведена корректировка долга и зачет взаимных требований, в результате которого встречные требования сторон на сумму 10 610 987,82 руб. (десять миллионов шестьсот десять тысяч девятьсот восемьдесят семь рублей 82 копейки) считаются погашенными.       

Вышеуказанные корректировка долга  и зачет взаимных требований проводилась  путем заключения нижеперечисленных Соглашений о корректировке долга:

1. Соглашение о корректировке долга № 1257 от 28.02.2021 на сумму 1922742,75 рублей, включая НДС;

2. Соглашение о корректировке долга № 1260 от 28.02.2021 на сумму 86147,57 рублей, включая НДС;

3. Соглашение о корректировке долга № 3591 от 30.05.2021 на сумму 1830289,85 рублей, включая НДС;

4. Соглашение о корректировке долга № 5652 от 30.07.2021 на сумму 203391,59 рублей, включая НДС;

5. Соглашение о корректировке долга № 5653 от 30.07.2021 на сумму 151134,79 рублей, включая НДС;

6. Соглашение о корректировке долга № 6277 от 18.08.2021 на  сумму 2239625,56 рублей, включая НДС;

7. Соглашение о корректировке долга № 9618 от 29.11.2021 на сумму 199533,56 рублей, включая НДС;

8. Соглашение о корректировке долга № 9609 от 29.11.2021 на сумму 436203,17 рублей, включая НДС;

10.Соглашение о корректировке долга № 10340 от 30.12.2021 на сумму 1853934,48 рублей, включая НДС;

и Актов зачета  взаимных требований:

1.Акт зачета  взаимных требований № 944 от 01.01.2021 на сумму 39733,58 руб. в том числе НДС;

2.Акт зачета взаимных требований № 6479 от 30.09.2020 на сумму 1361431,16 руб. в том числе НДС;

3.Акт зачета взаимных требований № 9140 от 31.12.2020 на сумму 188568, 84 руб. в том числе НДС;

4.Акт зачета взаимных требований № 10252 от 30.11.2021 на сумму 98250, 92 руб. в том числе НДС.

   В целях исполнения работ по договору, для проживания  работников истца, обеспечивающих производство работ по проекту: «Реконструкция производства изопропилбензола (кумола) с узлом получения изопропанола» на ПАО «Омский каучук» по Договору субподряда № 044/01ОС-20 от 01.06.2020 года, истец заключил договор №104 от 21.07.2020 года аренды квартиры в городе Омск. Арендная плата по указанному договору составляла 37931,00 рубль в месяц, с учетом затрат по коммунальным платежам, электроэнергии, водоснабжения и интернета, в том числе НДФЛ в размере 4 931,00 рублей, оплата производилась ежемесячно.

21 июля 2020 года между истцом и ответчиком было заключено дополнительное соглашение №1 от 21.07.2020 года,  согласно которого ответчик (Подрядчик) возмещает истцу (Субподрядчику) 50% (пятьдесят процентов) расходов, связанных с оплатой услуг по подбору жилого помещения (квартиры), необходимого для проживания сотрудников Субподрядчика, обеспечивающих производство Работ по проекту: «Реконструкция производства изопропилбензола (кумола) с узлом получения изопропанола» на ПАО «Омский каучук» по договору субподряда № 044/01ОС-20 от 01.06.2020 года.

Согласно п.2 вышеуказанного Дополнительного соглашения к Договору, компенсация расходов, связанных с оплатой услуг по подбору  жилого помещения (квартиры) осуществляется Ответчиком ( Подрядчиком ) на основании Договора № 103 на оказание услуг по подбору и сдаче в наем объекта недвижимости от 21.07.2020 года, заключенного Истцом (Субподрядчиком) с ИП ФИО3 Размер компенсации составляет 5 750,00 (пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей.     

Кроме того, согласно п. 3 Дополнительного соглашения №1 от 21.07.2020 года к Договору, Ответчик (Подрядчик) возмещает Истцу (Субподрядчику) расходы, связанные с арендой жилого помещения (квартиры), необходимого для проживания сотрудников Истца (Субподрядчика), обеспечивающих производство Работ по проекту: «Реконструкция производства изопропилбензола (кумола) с узлом получения изопропанола» на ПАО «Омский каучук» по Договору субподряда № 044/01ОС-20 от 01.06.2020 года. 

При этом, согласно п. 4 Дополнительного соглашения №1, размер компенсации составляет 50% (пятьдесят процентов) от понесенных расходов, которая перечисляется Подрядчиком Субподрядчику ежемесячно не позднее последнего дня каждого месяца на основании Договора № 104 аренды квартиры  от 21.07.2020 года, заключенного Субподрядчиком с гр. ФИО4 сроком до 21.10.2020 года. Ежемесячная сумма компенсации составляет 18 966,00 (восемнадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей, при этом сумма компенсации за июль 2020 года составляет 6 730,00 (шесть тысяч семьсот тридцать) рублей и за октябрь 2020 года – 12 848,00 (двенадцать тысяч восемьсот сорок восемь) рублей.

22 октября 2020 г. между истцом и ответчиком заключено Дополнительное соглашение № 2 к Договору субподряда № 044/01ОС-20 от 01.06.2020 года, согласно  которого Стороны пришли к соглашению изложить пункт 4 Дополнительного соглашения № 1 от 21.07.2020 года к Договору субподряда № 044/01ОС-20 от 01.06.2020 г. в следующей редакции: «Размер ежемесячной компенсации составляет 50% (пятьдесят процентов) от понесенных расходов Субподрядчиком и составляет 18 966,00 (восемнадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей в месяц. Компенсация перечисляется Подрядчиком Субподрядчику ежемесячно не позднее последнего дня каждого месяца.» 

В связи с вышеизложенным, истец выставил ответчику к оплате счета-фактуры для компенсации расходов, связанных с  подбором и арендой жилого помещения (квартиры), необходимого для проживания сотрудников истца, на сумму 186 967,20 рублей, а именно:

1. Счет-фактура № 305 от 30.09.2020 на сумму 50412,00 рублей на оплату компенсации расходов, связанных с оплатой услуг по подбору  жилого помещения (квартиры)  и компенсации проживания за июль, август, сентябрь 2020 года;

2. Счет-фактура № 87 от 01.01.2021 на сумму 56898,00 рублей на оплату компенсации проживания за октябрь, ноябрь, декабрь 2020 года;

3. Счет-фактура № 88 от 31.01.2021 на сумму 18966,00 рублей на оплату компенсации проживания за январь 2021 года;

4. Счет-фактура № 89 от 28.02.2021 на сумму 18966,00 рублей на оплату компенсации проживания за февраль 2021 года;

5. Счет-фактура №153 от 31.05.2021 на сумму 41725,20 рублей на оплату компенсации проживания за март, апрель, май 2021 года.

Ответчиком компенсация расходов, связанных с  подбором и арендой жилого помещения (квартиры), необходимого для проживания сотрудников Истца в размере 186 967,20 рублей не произведена. 

    Кроме того, 01 марта 2021 года между Истцом и Ответчиком заключено дополнительное соглашение № 4 к Договору, согласно которого Истец (Субподрядчик) в период действия Договора, при наличии возможности может дополнительно оказывать услуги по предоставлению Электрического винтового компрессора ЗИФ СВЭ-6,3/0,7 инв. № 813 (далее – Строительная техника) с обслуживающим персоналом. Данные услуги оказываются на основании заявок Ответчика (Подрядчика), согласованной сторонами и принятой к исполнению.

Стоимость вышеуказанных услуг, согласно п.1.2. Соглашения,  определяется из расчета суммы стоимости 1-го часа использования Строительной техники с  обслуживающим персоналом. Стоимость 1-го часа использования Строительной техники с обслуживающим персоналом составляет 800 (восемьсот) рублей с учетом НДС 20%. Указанная стоимость не включает в себя стоимость электроэнергии, предоставление которой обеспечивает Ответчик (Подрядчик) за счет собственных средств.

Истцом в марте и апреле 2021 года были оказаны услуги Ответчику по предоставлению Электрического винтового компрессора ЗИФ СВЭ-6,3/0,7 на сумму 52 000,00 рублей и выставлены к оплате счета-фактуры:

-Счет-фактура № 90 от 31.03.2021 на сумму 32000,00 рублей, в том числе НДС; 

-Счет-фактура № 131 от 30.04.2021 на сумму 20000,00 рублей, в том числе НДС;

Ответчиком вышеуказанные услуги не оплачены.

Документы содержат подписи представителей сторон, а также информацию об объекте, наименовании и объемах работ, их стоимости.

Подписание данных документов представителями обеих сторон без замечаний и возражений по объемам и стоимости выполненных работ, их качеству, скрепление печатями истца и ответчика свидетельствуют о выполнении работ субподрядчиком (истцом), принятии их результата подрядчиком (ответчиком), а также о потребительской ценности результата работ для ответчика и желании последнего ими воспользоваться.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказывать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Принимая во внимание положения ст. 9 АПК РФ, которой установлено осуществление судопроизводства в арбитражном суде на основе состязательности, заинтересованные в исходе дела лица вправе отстаивать свою позицию в споре путем представления доказательств, состязательность предполагает возложение бремени доказывания на сами стороны и снятие, по общему правилу, с арбитражного суда обязанности по сбору доказательств, учитывая обстоятельства дела. Гарантируя каждому лицу, участвующему в деле, право представлять арбитражному суду доказательства ч. 2 ст. 9 АПК РФ одновременно возлагает на названных лиц риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Согласно ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, доказательств оплаты задолженности в полном объеме ответчиком в материалы дела не представлено. Обстоятельства, на которые ссылается истец, ответчиком не опровергнуты.

Учитывая вышеизложенное, требование истца о взыскании суммы долга по договору № 044/01ОС-20 от 01.06.2020 года в сумме 19 537 902 руб. 96 коп. подлежит удовлетворению.

В  соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации и подлежат взысканию в федеральный бюджет ввиду предоставленной отсрочки уплаты госпошлины при подаче иска и удовлетворении исковых требований.

Руководствуясь статьями  110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью "Фирма комплексного строительства"    удовлетворить.

Взыскать с Публичного акционерного общества "Акционерная компания "Востокнефтезаводмонтаж" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Фирма комплексного строительства" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  сумму долга по договору № 044/01ОС-20 от 01.06.2020 года в сумме 19 537 902 руб. 96 коп.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Взыскать с Публичного акционерного общества "Акционерная компания "Востокнефтезаводмонтаж" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  в доход федерального бюджета сумму  государственной пошлины в размере 120 690 руб.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его  в  полном  объеме)  через  Арбитражный  суд  Республики Башкортостан.                                   

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.

 

Судья Д.П. Кузнецов