Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-18086/2022

20 июля 2022 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  29 июня 2022 года.

Полный текст решения изготовлен  20 июля 2022 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Коросташова А.А.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЙККОМП" (адрес:  Россия 192029, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пр. ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, д. 76, к. 7, литер А, пом. 2313; ОГРН: 

<

***>);

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАНТЕК-СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (адрес:  Россия 194100, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. ЛИТОВСКАЯ д.10, ЛИТ. А, пом. 2Н, ком. 809; ОГРН:  

<

***>);

о взыскании, 

при участии: 

- от истца: ФИО2 (доверенность от 18.01.2022),

- от ответчика: ФИО3 (доверенность от 22.06.2020)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "МАЙККОМП" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью  "КВАНТЕК-СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" с требованием о взыскании 1 919 169 руб. 53 коп. долга по оплате выполненных работ по договору подряда от 22.10.2020 № 10-2020-37С, а также 90 000 руб. 00 коп. судебных расходов на оплату услуг представителя. 

На основании положений ст. 18 Арбитражного процессуального кодекса РФ дело передано в производство судьи Коросташова А.А. и рассмотрение дела начато сначала. 

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителей сторон, арбитражный суд установил следующее.

22.10.2020 между ООО «МайкКомп» (Субподрядчик) и ООО «Квантек-Сетевые Технологии» (Подрядчик) заключен договор подряда № 10-2020-37С (Договор), в соответствии с которым Субподрядчик принял на себя обязательства выполнить комплекс строительно-монтажных работ по инженерным сетям и системам в границах Земельного участка (Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, кадастровый номер 47:26:0417001:813, площадью 30000 кв.м) в соответствии с Рабочей документацией; передать результат выполненных Работ Подрядчику, а также осуществить юридические и иные действия в целях надлежащего исполнения Договора.

Согласно п. 1.3. Договора перечень, стоимость и объем выполняемых по Договору работ согласованы Сторонами в сметном расчете (приложение №1 к Договору).

По правилам п. 2.1.3. Договора корректировка и уточнение сметного расчета осуществляется путем подписания соответствующего дополнительного соглашения.

В соответствии с п. 2.1.14. Договора Субподрядчик обязуется ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставлять Подрядчику для проверки и дальнейшего утверждения документы, подтверждающие объем и стоимость выполненных Субподрядчиком работ: Акт формы КС-2; Журнал учета выполненных работ по форме КС-6 (и/или накопительная ведомость); Справки формы КС-3; Счета-фактуры; Комплект исполнительной документации на выполненный объем.

Согласно п. 2.2.1. Договора Подрядчик обязуется производить ежемесячную приемку выполненных Работ в соответствии с положениями раздела 2, 4 настоящего Договора.

В силу п. 2.2.6. Договора Подрядчик обязуется производить оплату выполненных Работ по Договору в размере и порядке, предусмотренном разделом 2 и разделом 3 настоящего Договора.

Согласно п. 2.2.10. Договора Подрядчик обязан организовать участие в освидетельствовании Скрытых работ государственных структурных подразделений и экспертных организаций.

В силу п. 2.2.11. Договора Подрядчик обязан принять работы по Акту приемки выполненных Работ, направив своего уполномоченного представителя для участия в приемке Работ и подписания Аката с Субподрядчиком.

В пункте 3.1. Договора стороны определили цену Работ по строительству Объекта согласно п. 1.1. Договора, а также всех сопутствующих расходов Субподрядчика, которая составила 5 961 145 рублей 83 копейки, кроме того НДС 20% - 1 192 229 рублей 17 копеек, итого с НДС 20% - 7 153 375 рублей 00 копеек.

Согласно п. 3.3. Изменение договорной цены может быть согласовано Сторонами в случае изменения технического задания, поручения Подрядчиком выполнения дополнительных работ, а также в случае изменения сметного расчета согласно п. 1.3. Договора. Объем, сроки выполнения и стоимость дополнительных работ фиксируется Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

В соответствии с п. 3.10. Договора оплата фактически выполненных работ производится Подрядчиком ежемесячно в срок до 20 числа следующего за отчетным месяца с пропорциональным удержанием авансового платежа. Основанием для оплаты выполненных Субпорядчиком за отчетный месяц работ является подписанные Сторонами Справка формы КС-3, Акты формы КС-2 и прилагаемая к ним Счет-фактура.

Порядку и условиям сдачи и приемки выполненных работ посвящен раздел 4 Договора.

Согласно п. 4.1. Договора Субподрядчик до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предъявляет Подрядчику объемы фактически выполненных за отчетный месяц работ с актами выполненных работ, составленными согласно разделу 2 настоящего Договора, по формам КС-2, КС-3 на выполненные Работы поэлементно в рамках стоимости настоящего Договора:

в трех экземплярах Справку формы КС-3 по Работам, выполненным Субподрядчиком в отчетном месяце, с приложением расшифровки по видам работ и затрат - Актов формы КС-2, подписанные Субподрядчиком;

Счет-фактуру.

По правилам п. 4.2. Договора Подрядчик в течение 5 рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет объем выполненных работ и, при отсутствии претензий, возвращает подписанные Акты формы КС-2, Справки формы КС-3 по 2 экземпляра каждого из документов Субподрядчику.

При несогласии Подрядчика с содержанием Акта (ов) формы КС-2, Справки (ок) формы КС-3 - ввиду выявления Подрядчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости определенной в соответствии с Приложением №2 к настоящему Договору - Подрядчик в течение 5 рабочих дней с момента подачи вышеуказанных документов письменно оформляет свои мотивированные замечания по выполненным Работам, после чего направляет последние совместно с Актом (ами) формы КС-2, Справкой (ами) формы КС-3 на согласование и исправление.

При уклонении или необоснованном отказе Подрядчика от подписания Актов формы КС-2 и Справок формы КС-3 и/или не направлении мотивированного отказа (замечаний) в установленный срок Работы считаются принятыми без замечаний, а Акты формы КС-2 и Справки формы КС-3 - подписанными на 5 рабочий день с даты их направления при этом в Актах формы КС-2 и Справках формы КС-3 Субподрядчиком ставятся отметки о приемке выполненных работ в одностороннем порядке, а Работы подлежат оплате.

Согласно п. 4.3.2. Договора, сдача результата выполненных Работ Субподрядчиком и приемка его Подрядчиком оформляется Актом приемки результата выполненных Работ, подписанным Сторонами.

В пункте 5.7. Договора сторонами согласовано, что в случае если просрочка оплаты выполненных Субподрядчиком Работ составит более 15 календарных дней, Субподрядчик, вправе письменно уведомив Подрядчика, приостановить выполнение Работ по Договору.

Согласно п. 7.1. Договора, Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, которое заключается в письменной форме и подписывается обеими Сторонами.

В соответствии с п. 2.1.3,3.3 в период действия Договора его стороны подписали ряд дополнительных соглашений, которыми согласовали выполнение дополнительных работ:

Дополнительным соглашением №1 от 07.12.2020 стороны согласовании стоимость дополнительных работ на сумму 1 964 029 руб. 30 коп. с учетом НДС 20% согласно приложению №1 к дополнительному соглашению. 

Данные работы подлежали оплате Подрядчиком после подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), по выставленному Субподрядчиком счету, в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения вышеперечисленных документов (п. 3.1. дополнительного соглашения №1 от 07.12.2020).

Дополнительным соглашением №3 от 01.03.2021 стороны согласовали стоимость дополнительных работ на сумму 1 616 702 руб. 40 коп. с учетом НДС 20% согласно приложению №1 к дополнительному соглашению. Данные работы подлежали оплате Подрядчиком после подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), по выставленному Субподрядчиком счету, в течение 3 трех) банковских дней с даты получения вышеперечисленных документов (п. 3.1. дополнительного соглашения №3 от 01.03.2021).

Дополнительным соглашением №4 от 01.04.2021 стороны согласовали стоимость дополнительных работ на сумму 711 674 руб. 40 коп. с учетом НДС 20% согласно приложению №1 к дополнительному соглашению. Данные работы подлежали оплате Подрядчиком после подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), по выставленному Субподрядчиком счету, в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения вышеперечисленных документов (п. 3.1. дополнительного соглашения №4 от 01.04.2021).

Дополнительным соглашением №5 от 01.06.2021 стороны согласовали стоимость дополнительных работ на сумму 1 180 858 руб. 80 коп. с учетом НДС 20% согласно приложению №1 к дополнительному соглашению. Данные работы подлежали оплате Подрядчиком после подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), по выставленному Субподрядчиком счету, в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения вышеперечисленных документов (п. 3.1. дополнительного соглашения №5 от 01.06.2021).

Дополнительным соглашением №6 от 01.07.2021 стороны согласовали стоимость дополнительных работ на сумму 736 786 руб. 80 коп. с учетом НДС 20% согласно приложению №1 к дополнительному соглашению. Данные работы подлежали оплате Подрядчиком после подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), по выставленному Субподрядчиком счету, в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения вышеперечисленных документов (п. 3.1. дополнительного соглашения №6 от 01.07.2021).

Из материалов дела следует, что в соответствии с Договором и дополнительными соглашениями к нему Субподрядчик выполнил комплекс строительно-монтажных работ по инженерным сетям и системам на общую сумму 10 549 312 рублей 20 копеек, из указанной суммы Подрядчиком было оплачено работ на общую сумму 8 630 151 рублей 67 копеек.

Задолженность по оплате фактически выполненных работ по Договору и дополнительным соглашениям к нему на сумму 1 919 160 рублей 53 копейки.

Так, по Договору, без учета объемов, указанных в дополнительных соглашениях, Истцом выполнено работ на общую сумму 5 718 993 руб. 36 коп., что подтверждается актами выполненных работ формы КС-2 и справками формы КС-3 на общую сумму 5 475 960 руб. 96 коп., подписанными Ответчиком без замечаний:

Объемы выполненных работ по Договору

Сумма в т.ч. НДС 20%/руб.

Срок оплаты по Договору

Акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3 №1 от 30.11.2020

202 322.40

до 20.12.2020

Акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3 №2 от 25.12.2020

59 784

до 20.01.2021

Акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3 №3 от 25.01.2021

621 489.60

до 20.02.2021

Акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3 №4 от 26.02.2021

1 071 405.60

до 20.03.2021

Акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3 №5 от 31.03.2021

263 947.80

до 20.04.2021

Акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3 №6 от 29.04.2021

768 052.80

до 20.05.2021

Акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3 №7 от 31.05.2021

879 394.80

до 20.06.2021

Акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3 №8 от 30.06.2021

1 173 204.36

до 20.07.2021

Акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3 №9 от 31.07.2021

115 552.80

до 20.08.2021

Акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3 №10 от 26.08,2021

320 806.80

до 20.09.2021

Объемы работ по Договору, выполненные согласно акту формы КС-2 и справке формы КС-3 № 11 от 30.09.2021 на сумму 243 032 руб. 40 коп., приняты в одностороннем порядке согласно абз. 3 п. 4.2. Договора ввиду не направления Ответчиком мотивированного отказа (замечаний) в установленный срок. 

Документы переданы 30.09.2021, повторно переданы и направлены 18.11.2021. Указанные Работы должны были быть оплачены не позднее 20.10.2021.

Задолженность Ответчика за фактически выполненные объемы работ по Договору составляет 710 383 руб. 67 коп.

По дополнительному соглашению №1 от 07.12.2020 Истцом выполнено работ на общую сумму 1 819 045 руб. 82 коп., что подтверждается актами выполненных работ формы КС-2 и справками формы КС-3, подписанными Ответчиком без замечаний:

Объемы выполненных работ по дополнительному соглашению №1 от 07.12.2020

Сумма в т.ч. НДС 20%/руб.

Срок оплаты по ДС

Акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3 №1 от 26.02.2021

1 316 321.42

до 03.03.2021

Акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3 №2 от 31.03.2021

43 020

до 05.04.2021

Акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3 №3 от 29.04.2021

215 947.08

до 05.05.2021

Акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3 №4 от 31.05.2021

160 959.12

до 03.06.2021

Акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3 №5 от 30.06.2021

32 511

до 05.07.2021

Акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3 №6 от 26.08.2021

50 287.20

до 31.08.2021

Задолженность  Ответчика за  фактически  выполненные  объемы  работ  по дополнительному соглашению №1 от 07.12.2020 составляет 50 287 руб. 20 коп.

По дополнительному соглашению №3 от 01.03.2021 Истцом выполнено работ на общую сумму 1 431 288 руб., что подтверждается актами выполненных работ формы КС-2 и справками формы КС-3, подписанными Ответчиком без замечаний:

Объемы выполненных работ по дополнительному соглашению №3 от 01.03.2021

Сумма в т.ч. НДС 20%/руб.

Срок оплаты по ДС

Акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3 №1 от 29.04.2021

545 414.28

до 05.05.2021

Акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3 №2 от 31.05.2021

772 194

до 03.06.2021

Акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3 №3 от 30.06.2021

98 725.32

до 05.07.2021

Акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3 №4 от 26.08.2021

14 954.40

до 31.08.2021

 

Задолженность  Ответчика  за  фактически  выполненные  объемы  работ  по дополнительному соглашению №3 от 01.03.2021 составляет 14 954 руб. 40 коп.

По дополнительному соглашению №4 от 01.04.2021 Истцом выполнено работ на общую сумму 407 238 руб. 60 коп., что подтверждается актами выполненных работ формы КС-2 и справками формы КС-3, подписанными Ответчиком без замечаний:

Объемы выполненных работ по дополнительному соглашению №4 от 01.04.2021

Сумма в т.ч. НДС 20% / руб.

Срок оплаты по

ДС

Акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3 №1 от 31.05.2021

275 388.60

до 03.06.2021

Акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3 №2 от 30.06.2021

111 061.20

до 05.07.2021

Акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3 №3 от 26.08.2021

20 788.80

до 31.08.2021

Задолженность  Ответчика  за  фактически  выполненные  объемы  работ  по дополнительному соглашению №4 от 01.04.2021 составляет 20 788 руб. 80 коп.

По дополнительному соглашению №5 от 01.06.2021 Истцом выполнено работ на сумму 684 222 руб. 86 коп., что подтверждается актом выполненных работ формы КС-2 и справкой формы КС-3, подписанными Ответчиком без замечаний:

Объемы выполненных работ по дополнительному соглашению №5 от 01.06.2021

Сумма в т.ч. НДС 20%/руб.

Срок оплаты по ДС

Акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3 №1 от 26.08.2021

684 222.86

до 31.08.2021

Задолженность Ответчика за фактически выполненные объемы работ по дополнительному соглашению №5 от 01.06.2021 составляет 634 222 руб. 86 коп.

По дополнительному договору №6 от 01.07.2021 Истцом выполнено работ на общую сумму 488 523 руб. 60 коп., что подтверждается актом выполненных работ формы КС-2 и справкой формы КС-3 на сумму 444 123 руб. 60 коп., подписанными Ответчиком без замечаний:

Объемы выполненных работ по дополнительному соглашению №6 от 01.07.2021

Сумма в т.ч. НДС 20%/руб.

Срок оплаты по ДС

Акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3 №1 от 26.08.2021

444 123.60

до 31.08.2021

Задолженность Ответчика за фактически выполненные объемы работ по дополнительному соглашению №5 от 01.06.2021 составляет 634 222 руб. 86 коп.

По дополнительному договору №6 от 01.07.2021 Истцом выполнено работ на общую сумму 488 523 руб. 60 коп., что подтверждается актом выполненных работ формы КС-2 и справкой формы КС-3 на сумму 444 123 руб. 60 коп., подписанными Ответчиком без замечаний:

Объемы выполненных работ по дополнительному соглашению №6 от 01.07.2021

Сумма в т.ч. НДС 20%/руб.

Срок оплаты по ДС

Акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3 №1 от 26.08.2021

444 123.60

до 31.08.2021

Объемы работ по дополнительному соглашению №6 от 01.07.2021, выполненные согласно акту формы КС-2 и справке формы КС-3 №2 от 30.09.2021 на сумму 44 400 руб., были в одностороннем порядке согласно абз. 3 п. 4.2. Договора ввиду не направления Ответчиком мотивированного отказа (замечаний) в установленный срок.

 Документы переданы Ответчику 30.09.2021, повторно переданы и направлены 18.11.2021. У

Указанные Работы должны были быть оплачены не позднее 05.10.2021.

Задолженность Ответчика за фактически выполненные объемы работ по дополнительному соглашению №6 от 01.07.2021 составляет 488 523 руб. 60 коп.

В октябре 2022 года Субподрядчик приостановил работы на объекте в связи с задолженностью Подрядчика по оплате выполненных Работ, о чем неоднократно уведомлялся Подрядчик (уведомление Исх. №02/07-1 от 02.07.2021г., направленное Ответчику на электронную почту), что соответствует п. 5.7 договора. 

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ)  по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 720 указанного кодекса заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В силу пункта 1 статьи 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

По смыслу пункта 1 статьи 711 и пункта 1 статьи 746 ГК РФ по договору подряда оплате подлежит фактически выполненный (переданный заказчику) результат работ (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда").

Пунктом 4 статьи 753 ГК РФ установлена презумпция действительности одностороннего акта сдачи или приемки результата работ, в связи с чем на заказчика ложится бремя доказывания обоснованности мотивов отказа от его подписания.

В соответствии с абзацем 2 части 4 статьи 753 ГК РФ, разъяснениями пункта 14 Письма N 51 односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Из материалов дела следует, что ответчик мотивированных возражений против принятия спорных работ не заявлял, следовательно, работы считаются принятыми и подлежат оплате.

Возражения ответчика в соответствии со ст. 65 АПК РФ не имеют документального подтверждения, о проведении судебной экспертизы не завялено.

При таких обстоятельствах иск об оплате работ на сумму 1 919 169 руб. 53 коп. следует удовлетворить. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Частью 2 названной статьи предусмотрено, что расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

Как разъяснено в пунктах 10, 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием.

Факт несения  истцом расходов на оплату услуг представителя в связи с рассмотрением настоящего дела подтвержден документально.

Критерий разумности, используемый при определении суммы расходов на оплату услуг представителя, понесенной лицом, в пользу которого принят судебный акт (часть 2 статьи 110 АПК РФ), является оценочным. 

Для установления разумности таких расходов суд оценивает их соразмерность применительно к условиям договора на оказание услуг по представлению интересов участвующего в деле лица и характеру услуг, оказанных в рамках этого договора, их необходимость и разумность для целей восстановления нарушенного права. При этом учитываются размер удовлетворенных требований, количество судебных заседаний и сложность рассматриваемого дела, а также принимаются во внимание доказательства, представленные другой стороной и свидетельствующие о чрезмерности заявленных расходов.

Применительно к обстоятельствам настоящего дела, суд принимая во внимание объем и сложность выполненной представителем истца работы, время, которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист, продолжительность рассмотрения и сложность дела, сложившуюся в регионе стоимость услуг представителя по аналогичным делам, признал по заявлению ответчика расходы в 90 000 руб. 00 коп. завышенными, считая 45 000 руб. 00 коп. достаточной суммой на оплату представительских услуг.

В остальной части заявления о взыскании судебных расходов следует отказать. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  "КВАНТЕК-СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "МАЙККОМП" 1 919 169 руб. 53 коп. долга, 32 192 руб. 00 коп. судебных расходов по уплате государственной пошлины, 45 000 руб. 00 коп. судебных расходов на оплату услуг представителя. 

В остальной части заявления о взыскании судебных расходов отказать. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Коросташов А.А.