АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-12058/2019

г. Чебоксары

03 февраля 2020 года

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Кисаповой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

акционерного общества "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгражданпроект"   

(428018, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Группа компаний Удача"   

(428015, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 216 817 руб. 82 коп., 

с участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "ЧЕСТР-ИНВЕСТ" (428035, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), Администрации города Чебоксары Чувашской Республики (428008, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).

при участии:

от истца: ФИО2 по доверенности от 19.04.2019,

установил:

акционерное общество "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгражданпроект" (далее – истец) обратилось в суд с иском с учетом уточнений ав порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Россимйской Федерации к общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Удача» (далее – ответчик) о взыскании 166 782 руб. 94 коп. долга, 205136 руб. 89 коп. пени за период с 18.10.2018 по 10.01.2020 (с учетом уточнений).

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением обязательств по договору №4727 от 04.05.2018.

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал.

Ответчик не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом. В предварительном судебном заседании представитель ответчика исковые требования не оспорил, подтвердил факт наличия долга в заявленном размере. Считает, что долг будет погашен после получения денежных средств от 3-го лица.

Третьи лица в судебное заседание не явились, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие ответчика, третьих лиц.

Выслушав представителя истца, изучив материалы дела, суд установил следующее.

04.05.2018 между ООО "ГК Удача" (заказчик) и АО "Чувашгражданпроект" (подрядчик) заключен договор № 4727 на выполнение проектно-сметных работ, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство по разработке проектной и рабочей документации по объекту: "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест с ясельными группами поз. 23 в микрорайоне "Солнечный" (II очередь) г. Чебоксары".

Согласно пункта 2.1. договора сроки выполнения работ: начало работ – со дня подписания договора и оплаты аванса; окончание работ: выдача стадии "Проектная документация" – 05 июля 2018; выдача стадии "Рабочая документация" в течение 30 календарных дней с даты получения положительного заключения государственной экспертизы.

Стоимость предмета договора согласована сторонами на основании сметы (приложение № 1) и составляет 2000000 руб., в т.ч. НДС (18%) – 305084 руб. 74 коп. (пункт 3.1. договора).

Согласно пункта 3.2. договора оплата стоимости предмета договора производится заказчиком на расчетный счет подрядчика следующем порядке:

1 платеж: аванс (25%) в размере 500000 руб., в т.ч. НДС (18%) – 76271 руб. 19 коп. в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора;

2 платеж: аванс (25%) в размере 500000 руб., в т.ч. НДС (18%) – 76271 руб. 19 коп. в течение 5 рабочих дней с момента получения положительного заключения экспертизы проектной документации и подписания акта об оказании услуг;

3 платеж: 50% в размере 1000 000 руб., в т.ч. НДС (18%) – 152542 руб. 37 коп. - в течение 5 рабочих дней с момента сдачи работ стадии "Рабочая документация" и подписания акта об оказании услуг.

Пунктом 3.3. договора предусмотрено, что в случае возникновения дополнительных работ, не входящих в предмет договора, то стороны подписывают дополнительное соглашение к договору, в котором определяется объем требуемых дополнительных работ, условия их оплаты и сроки окончания выполненных работ.

Согласно пункта 5.1. договора подрядчик передает заказчику выполненную работу (или ее этап) на основании двустороннего акта об оказании услуг. Заказчик в течении 3 дней со дня получения акта об оказании услуг обязан направить подрядчику подписанный акт об оказании услуг или мотивированный отказ.

В случае несоблюдения заказчиком сроков оплаты, предусмотренных пунктом 3.2. договора, он уплачивает подрядчику неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной в срок суммы за каждый календарный день просрочки платежа (пункт 6.3. договора).

31.08.2018 стороны заключили дополнительное соглашение № 1 пункты 3.1., 3.2., изложены в следующей редакции: "стоимость предмета договора согласована сторонами на основании смет (приложение № 1) и составляет 2100000 руб., в т.ч. НДС (18%) – 320339 руб. 98 коп.

Оплата стоимости предмета договора производится заказчиком на расчетный счет подрядчика следующем порядке:

1 платеж: аванс (25%) в размере 500000 руб., в т.ч. НДС (18%) – 76271 руб. 19 коп. в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора;

2 платеж: аванс (25%) в размере 500000 руб., в т.ч. НДС (18%) – 76271 руб. 19 коп. в течение 5 рабочих дней с момента получения положительного заключения экспертизы проектной документации и подписания акта об оказании услуг;

3 платеж: 50% в размере 1100 000 руб., в т.ч. НДС (18%) – 167796 руб. 61 коп. в течение 5 рабочих дней с момента сдачи работ стадии "Рабочая документация" и подписания акта об оказании услуг."

18.09.2018 стороны заключили дополнительное соглашение № 2, в котором пункты 2.1., 3.1., 3.2., стороны изложили в следующей редакции: " Пункт 2.1. договора сроки выполнения работ: начало работ – со дня подписания договора и оплаты аванса; окончание работ: выдача стадии "Проектная документация" – 05 июля 2018; выдача раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" – 28 сентября 2018; выдача стадии "Рабочая документация" в течение 30 календарных дней с даты получения положительного заключения государственной экспертизы.

Пункт 3.1. договора стоимость предмета договора согласована сторонами на основании смет (приложение № 1) и составляет 2100000 руб., в т.ч. НДС (18%) – 320339 руб. 98 коп.

Пункт 3.2. договора Оплата стоимости предмета договора производится заказчиком на расчетный счет подрядчика следующем порядке:

1 платеж: аванс (25%) в размере 500000 руб., в т.ч. НДС (18%) – 76271 руб. 19 коп. в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора;

2 платеж: аванс (25%) в размере 500000 руб., в т.ч. НДС (18%) – 76271 руб. 19 коп. в течение 5 рабочих дней с момента получения положительного заключения экспертизы проектной документации и подписания акта об оказании услуг;

3 платеж: 50% в размере 1 254 382 руб. 94 коп., в т.ч. НДС (18%) – 191346 руб. 55 коп. в течение 5 рабочих дней с момента сдачи работ стадии "Рабочая документация" и подписания акта об оказании услуг."

Во исполнении принятых на себя обязательств истец выполнил работы по разработке проектной и рабочей документации по объекту: "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест с ясельными группами поз. 23 в микрорайоне "Солнечный" (II очередь) г. Чебоксары" (стадия "Проектная документация", стадия "Рабочая документация") по договору №4727 от 04.05.2018, что подтверждается актами от 13.08.2018 № 317, от 11.10.2018 № 418 на общую сумму 2 254 382 руб. 94 коп. Акты ответчиком подписаны без возражений.

По данным истца задолженность ответчика перед истцом составляет 166782 руб. 94 коп.

Претензией от 18.07.2019 № 595 истец просил ответчика погасить оставшую задолженность в сумме 166782 руб. 94 коп.

Неисполнение требований изложенных в претензии послужило основанием для обращения с настоящим иском в суд.

Правоотношения, сложившиеся между сторонами на основании договора, подлежат регулированию общими нормами гражданского права об обязательствах и специальными нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Согласно статье 758 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их.

В соответствии с пунктом 1 статьи 760 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором; согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления; передать заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ.

В статье 746 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Выполнение истцом работ по договору на сумму 2254382 руб. 94 коп. подтверждено материалами дела и ответчиком не опровергнуто. 

При таких обстоятельствах, у ответчика возникли обязательства по оплате принятых работ. 

С учетом изложенного суд удовлетворяет требования истца в части взыскания долга в заявленном размере.

Довод ответчика о том, что причина задолженности произошла  по вине 3-го лица не влияет на обязательства перед истцом, поскольку последний не участник договора инвестирования от 13.06.2018 года.

Истец также просит взыскать с ответчика неустойку за период с 18.10.2018 по 10.01.2020.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Согласно пункту 6.3. договора в случае несоблюдения заказчиком сроков оплаты, предусмотренных пунктом 3.2. договора, он уплачивает подрядчику неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной в срок суммы за каждый календарный день просрочки платежа.

Так как материалами дела подтверждено неисполнение ответчиком обязательств по оплате выполненных работ, требование о взыскании неустойки правомерно и подлежит удовлетворению.

Проверив представленный истцом расчет пеней суд считает его подлежащим удовлетворению в заявленном размере 205136 руб. 89 коп. за период с 19.10.2018 по 10.01.2020, с учетом пункта 3.2. договора.

Доказательств уплаты долга и неустойки ответчик как того требует статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил, расчет пеней не оспорил.

Ввиду изложенного, суд удовлетворяет требование истца о взыскании с ответчика 166782 руб. 94 коп. долга, 205136 руб. 89 коп. неустойки за период с 19.10.2018 по 10.01.2020, как основанное на законе, подтвержденное материалами дела, ответчиком по существу не оспоренное.

Расходы по оплате государственной пошлины суд в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относит на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Группа компаний Удача" в пользу акционерного общества "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгражданпроект" 166 782 (Сто шестьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят два) руб. 94 коп. долга, 205 136 (Двести пять тысяч сто тридцать шесть) руб. 89 коп. неустойки за период с 19.10.2018 по 10.01.2020, 6 003 (Шесть тысяч три) руб. 00 коп. в возмещении расходов по оплате государственной пошлины. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Группа компаний Удача" в доход федерального бюджета 4 435 (Четыре тысячи четыреста тридцать пять) руб. 00 коп. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья

Н.В. Кисапова