77/2023-31509(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (р е з о л ю т и в н а я ч а с т ь)

Дело № А13-16259/2022

город Вологда

17 марта 2023 года

 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Вологодской области  

р е ш и л :

внести в пункт 3.2 государственного контракта № 232-ГЗ от 27.06.2022 на  выполнение работ по капитальному ремонту четвертого этажа здания больницы  в целях размещения отделения челюстно-лицевой хирургии  (стоматологическое); отделения травматологии и ортопедии № 1 БУЗ ВО  «Вологодская областная клиническая больница» следующие изменения:  

установить срок выполнения работ: с даты заключения контракта по  30.05.2023;  

установить срок 3 этапа исполнения контракта: с 01.10.2022 по  30.05.2023;  

установить срок исполнения контракта: с даты заключения контракта по  30.06.2023;  

установить срок исполнения 3 этапа исполнения контракта: по 30.06.2023.  

В остальной части заявленных исковых требований производство  прекратить в связи с отказом истца.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня принятия в  Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд.  

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа,  подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи (часть 5  статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

Судья Л.А. Соколова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 29.03.2022 8:46:00

 Кому выдана Соколова Лариса Анатольевна