АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

город Смоленск                                                                      

12.02.2025                                                                     Дело № А62-3562/2024

                          Резолютивная часть решения оглашена 23.01.2025

                                   Полный текст решения изготовлен 12.02.2025

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Бажановой Е.Г.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Медведевой Е.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

Общества с ограниченной ответственностью "АДС" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 

к Обществу с ограниченной ответственностью "СЕКВОЙЯ" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)

о расторжении договора субподряда от 21.03.2023 № 20/03-АБИ-3-СА, о взыскании неотработанного аванса в размере 911030 руб., неустойки за просрочку выполнения работ, начисленной за период с 20.06.2023 по 14.11.2023, в сумме 1435186,76 руб.,

и по встречному исковому заявлению

Общества с ограниченной ответственностью "СЕКВОЙЯ" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "АДС" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 

о взыскании задолженности по договору субподряда № 20/03-АБИ-3-СП от 21.03.2023 в размере 92698 руб. и неустойки, начисленной за период с 30.06.2023 по 10.04.2024, в сумме 26511,63 руб.

при участии:

от ООО "АДС": (посредством онлайн-связи): ФИО1 – представитель по доверенности; 

от ООО "СЕКВОЙЯ": (посредством онлайн-связи): ФИО2 – представитель по доверенности;

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью "АДС" (далее – ООО "АДС", субподрядчик) обратилось в арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "СЕКВОЙЯ" (далее – ООО "СЕКВОЙЯ", субсубподрядчик) с требованиями о расторжении договора субподряда от 21.03.2023 № 20/03-АБИ-3-СА, о взыскании неотработанного аванса в размере 911030 руб., неустойки за просрочку выполнения работ, начисленной за период с 20.06.2023 по 14.11.2023, в сумме 1435186,76 руб. (с учетом уточнения исковых требований (исх. от 26.12.2024) – протокол судебного заседания 23.01.2025).

ООО "СЕКВОЙЯ" заявленные требования не признало и предъявило встречный иск о взыскании задолженности по договору субподряда № 20/03-АБИ-3-СП от 21.03.2023 в размере 92698 руб. и неустойки, начисленной за период с 30.06.2023 по 10.04.2024, в сумме 26511,63 руб.

Требования сторон мотивированы обстоятельствами исполнения договора субподряда №20/03-АБИ-3-СП от 21.03.2023 (далее - договор), предметом которого являлось выполнение работ на объекте: Ml2 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва — Нижний Новгород — Казань, 6 этап км 454 — км 586, Нижегородская область, Чувашская Республика (от пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 22К-0162 "Работки — Порецкое" до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 "Цивильск — Ульяновск")" (далее также - объект).

Как видно из материалов дела, между ООО "АДС" (субподрядчик) и ООО "СЕКВОЙЯ" (субсубподрядчик) заключен договор субподряда № 20/03-АБИ-З-СП от 21.03.23 на выполнение работ на объекте (т.1 л.д. 7-16). 

Согласно пункту 1.1. договора субсубподрядчик обязуется в установленные настоящим договором сроки собственными силами и/или силами привлеченных субсубподрядных организаций на основании ведомости объемов и стоимости работ (далее - ведомость), проектной, технической, рабочей документацией (далее - рабочая документация) из материалов Субподрядчика выполнить работы на Объекте: М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань, 6 этап км 454 - км 586, Нижегородская область, Чувашская Республика (от пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 22К-0162 "Работки – Порецкое" до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 "Цивильск – Ульяновск")", а субподрядчик обязуется создать субсубподрядчику необходимые условия для выполнения таких работ, принять их результат и оплатить обусловленную стоимость в соответствии с условиями договора. Работы выполняются в соответствии с настоящим договором, и действующим законодательством, указаниями субподрядчика и/или инженерной организации подрядчика и/или заказчика, непротиворечащими условиям договора.

Пунктом 2.1. договора (в редакции дополнительного соглашения № 2 от 22.05.2023) сторонами установлено, что общая стоимость выполняемых работ договора (далее - Цена договора) является приблизительной и составляет 9697207,86 руб. (в т.ч. НДС 20%).

Цена договора / стоимость (цена) работ включает в себя все затраты, издержки, и иные расходы субсубподрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего договора и формируется на основе ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 1 к договору) и иные возможные затраты / издержки / расходы субсубподрядчика, в том числе, непредвиденные. Окончательная стоимость работ определяется по результатам приемки работ, выполненных субсубподрядчиком согласно настоящего договора на основании актов приемки выполненных работ.

Оплата стоимости (цены) работ производится субподрядчиком в следующем порядке и в сроки:

- в срок не позднее 5 рабочих дней с момента предоставления субсубподрядчиком счета субподрядчик оплачивает субсубподрядчику аванс в размере 1000000 руб. (в том числе НДС);

- последующее авансирование субподрядчик вправе осуществлять в вышеуказанном размере после подтверждения факта выполнения работ в объеме произведенного авансового платежа на тех же условиях;

- окончательная оплата стоимости выполненных субсубподрядчиком и принятых субподрядчиком работ производится в течение 10 рабочих дней после подписания субподрядчиком без замечаний акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, справки по форме КС-3, а также после предоставления субсубподрядчиком субподрядчику счета, счета-фактуры и всех журналов (Приложения №№2,3) на выполненные работы, которые должны быть оформлены надлежащим образом, при этом оплата выполненных субсубподрядчиком и принятых субподрядчиком работ не может быть выплачена ранее произведенной оплаты данных работ подрядчиком по договору, указанному в пункте 1.2. настоящего договора.

Срок окончания работ: не позднее 90 календарных дней с момента оплаты первого авансового платежа (пункт 3.2. договора в редакции дополнительного соглашения № 2 от 22.05.2023).

Перенос даты окончания работ может производиться только на основании заключенного сторонами дополнительного соглашения к договору или в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. В последнем случае, срок окончания работ переносится на срок действия форс-мажорных обстоятельств, признаваемых таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с условиями договора субсубподрядчик обязуется нести риск гибели и (или) повреждения (в т.ч. случайной / случайного) всех материалов и (или) оборудования, полученных от субподрядчика, другого имущества, а также нести риск гибели и (или) повреждения (в т.ч. случайной / случайного) всех выполненных работ до даты приемки их субподрядчиком по завершающему (заключительному) акту приемки выполненных работ (пункт 4.1.6. договора).

По условиям пункта 4.1.8. договора субсубподрядчик обязуется своевременно устранять дефекты, недостатки работ, выявленные в ходе выполнения и (или) при приемке работ.

Также пунктом 4.1.11. договора предусмотрено, что субсубподрядчик обязуется нести в полном объеме ответственность перед субподрядчиком за ненадлежащее выполнение работ по настоящему договору, а также нести перед субподрядчиком и (или) третьими лицами ответственность за повреждение или уничтожение (полное или частичное) результата работ и (или) объекта и (или) другого имущества.

Согласно пункту 4.1.14. договора риск повреждений и (или) ущерба всех работ, объекта или его части, имущества, оборудования, материалов, конструкций, механизмов и т.д., находящихся на объекте, территориях объекта и (или) находящихся в распоряжении субсубподрядчика, лежит в полном объеме на субсубподрядчике до момента приемки выполненных работ субподрядчиком по завершающему (заключительному) акту приемки выполненных работ

Договором предусмотрено, что субсубподрядчик несет ответственность за правильность и за качество выполняемых им Работ и оформление всей необходимой документации (пункт 5.2.3. договора).

Согласно пункту 5.4. и подпунктам 5.4.1., 5.4.2. договора:

- в случае если субподрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, субсубподрядчик обязан своими силами, за свой счет и без увеличения стоимости договора и без переноса сроков выполнения работ по договору переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества, в срок, согласованный сторонами, а если такой срок не оговорен, то в минимально технически возможный срок;

- если субсубподрядчик в срок, оговоренный с субподрядчиком, не исправит некачественно выполненные работы, то субподрядчик вправе привлечь других лиц для исправления некачественно выполненных работ. Все расходы, связанные с переделкой и (или) устранением недостатков таких работ другими лицами, несет субсубподрядчик.

За неисполнение условий договора пунктом 9.1. предусмотрена ответственность - за нарушение субсубподрядчиком сроков выполнения работ, указанных в пункте 3.2. настоящего договора, субсубподрядчик выплачивает субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более стоимости работ по настоящему договору; стоимость работ рассчитывается субподрядчиком исходя из расценок за единицу объема работ, указанных в ведомости объемов и стоимости работ.

Согласно пункту 9.4 договора, если субподрядчик задержит выплату средств, причитающихся субсубподрядчику по договору, то субсубподрядчик вправе требовать от субподрядчика уплатить неустойку в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более стоимости работ по настоящему договору.

Пунктом 11.2 договора предусмотрено, что договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ или по основаниям, предусмотренным договором.

Субподрядчик также имеет право отказаться от исполнения договора: в одностороннем внесудебном порядке в случае отсутствия необходимости в выполнении работ и нарушения субсубподрядчиком срока выполнения работ более чем на 15 календарных дней (пункт 11.3 договора).

Первый авансовый платеж в размере 1000000 руб. был перечислен субсубподрядчику в день заключения договора, платежным поручением № 615 от 21.03.2023. 

Таким образом, с учетом положений пункта 3.2. договора (в редакции дополнительного соглашения № 2 от 22.05.2023) срок окончания работ - не позднее 19.06.2023.

Исковые требования ООО "АДС" мотивированы следующими доводами.

В ходе производства работ субподрядчик неоднократно уведомлял ООО "СЕКВОЙЯ" о необходимости выполнения в полном объеме принятых на себя обязательств по договору. Однако субсубподрядчиком дефекты в работе, указанные в направленных в его адрес письмах, не были устранены.

При этом субподрядчиком были перечислены последующие авансовые платежи на общую сумму 8000000 руб., платежными поручениями № 718 от 04.04.23, № 877 от 14.04.23, № 1040 от 03.05.23, № 1130 от 16.05.23, № 1240 от 24.05.23, № 1270 от 01.06.23, № 1348 от 06.06.23. 

Однако, ни в предусмотренный договором срок, ни в последующий период, ООО "СЕКВОЙЯ" не выполнило предусмотренные договором работы, полученную по договору сумму аванса полностью не отработало, документы, подтверждающие фактическое выполнение работ и целевое расходование аванса не предоставило.

Субподрядчик принял от субсубподрядчика выполнение в соответствии с актами и справками о стоимости работ КС-2, КС-3 на сумму 7088970 руб. 

Таким образом, по мнению субподрядчика, ООО "СЕКВОЙЯ" не исполнило свои обязательства по договору, в связи с чем субподрядчиком заявлено требование о расторжении договора. 

Общая сумма полученных ООО "СЕКВОЙЯ", но неотработанных по договору денежных средств (аванса), по расчету субподрядчика, составляет 911030 руб. (8000000 руб. (аванс) - 7088970 руб. (стоимость сданных ООО "СЕКВОЙЯ" и принятых "АДС" работ)).

Кроме того, ООО "АДС" полагает, что в связи с нарушением срока выполнения работ (согласно пункту 3.2 договора (в редакции дополнительного соглашения) и с учетом даты первого аванса (21.03.2023) дата завершения работ – 19.06.2023) в соответствии с пунктом 9.1 договора ООО "СЕКВОЙЯ" обязано уплатить субподрядчику неустойку, начисленную за период с 20.06.2023 по 14.11.2023 (дата ввода объекта в эксплуатацию), в сумме 1435186,76 руб.

Встречные требования, заявленные ООО "СЕКВОЙЯ" обоснованы следующим.

Признавая получение указанных ООО "АДС" авансовых платежей в общем размере 8000000 руб., ООО "СЕКВОЙЯ" заявляет, что общий объем выполненных в пользу субподрядчика работ по договору составляет 8092698 руб., что подтверждается соответствующими документами (актами формы КС-2 и КС-3, журналом оперативной приемки). 

Между сторонами подписаны следующие акты формы КС-2 и КС-3:

- от 21.04.2023 № 1 – стоимость выполненных и принятых работ 2652960 руб.;

- от 05.05.2023 № 2 – стоимость выполненных и принятых работ 1424088 руб.;

- от 24.05.2023 № 3 - стоимость выполненных и принятых работ 1790088 руб.;

- от 05.06.2023 № 4– стоимость выполненных и принятых работ 1221088 руб.

15.06.2023 в рамках договора субсубподрядчиком были выставлены и направлены субподрядчику по электронной почте и через Почту России оригиналы документы, а именно акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 15.06.2023 №5, справка по форме КС-3 от 15.06.2023 №5, счет-фактура от 05.06.2023 №17, счет-фактура от 15.06.2023 №18, акт сверки за период и счет на оплату от 15.06.2023 №20, подтверждающие выполнение за период с 06.06.2023 по 15.06.2023 работ по договору на сумму 1003728 руб. При этом, мотивированного отказа в принятии указанных работ от ООО "АДС" в адрес ООО "СЕКВОЙЯ" не поступило, что может рассматриваться как принятие без замечаний выполненных работ за период с 06.06.2023 по 15.06.2023 стоимостью 1003728 руб.

Кроме того, факт выполнения работ (работы по устройству армогрунтовой стены на ПК5369+82,37: устройство прослойки из нетканного геотекстильного материала; монтаж модульных облицовочных блоков; укладка одноосной георешетки; устройство пристеночного дренажа из щебня; прослойная отсыпка песком с послойным уплотнением; дополнительная сортировка пристеночного дренажа из щебня), оформленный по неподписанным ООО "АДС" акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 №5 и справке по форме КС-3 №5 от 15.06.2023 (т.1 л.д.95 + оборот) подтверждается подписью со стороны представителя субподрядчика ФИО3 в журнале оперативной приемки выполненных работ (записи с № 55 по №59 за период с 07.06.2023 по 15.06.2023 – т.1 л.д.102 + оборот).

С учетом указанного, ООО "СЕКВОЙЯ" заявляет о выполнении без нарушения установленного договором срока работ общей стоимостью 8092698 руб., и соответственно о наличии на стороне субподрядчика долга за выполненные работы в размере 92698 руб., который субсубподрядчик просит взыскать в свою пользу.

Поскольку ООО "АДС" не оплатило всю стоимость выполненных работ в срок, предусмотренный пунктом 2.2 договора, ООО "СЕКВОЙЯ" заявлено также требование о взыскании неустойки на основании положений пункта 9.4. договора, начисленной за период с 30.06.2023 по 10.04.2024, в сумме 26511,63 руб.

Спор между сторонами относительно общей суммы авансовых платежей, подписания сторонами без возражений актов формы КС-2 и КС-3 на сумму 7088970 руб. отсутствует.

Фактически спорным вопросом является факт выполнения ООО "СЕКВОЙЯ" работ стоимостью 1003728 руб., отраженных в актах от 15.06.2023 формы КС-2 №5 и КС-3 №5, журнале оперативной приемки выполненных работ на объекте (запись от 15.06.2023) (т.1 л.д.95-102оборот).

Оценив в совокупности по правилам статьи 71 АПК РФ все имеющиеся в материалах дела документы, заслушав доводы лиц, участвующих в деле, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно пункту 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда. Результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования (пункт 1 статьи 721 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу (статья 717 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком строительных работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии названных указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 ГК РФ.

В пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" разъяснено, что основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Бремя доказывания обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, лежит на таких лицах (часть 1 статьи 65 АПК РФ).

Доказательством сдачи подрядчиком результата работ и приемки его заказчиком может являться акт, удостоверяющий приемку выполненных работ (статьи 720, 753 ГК РФ).

Приемка заказчиком выполненных работ влечет возникновение обязанности по их оплате (статьи 711, 753 ГК РФ).

Принятие работ свидетельствует о потребительской ценности произведенных работ для заказчика и желании ими воспользоваться. Таким образом, при приемке работ без разногласий заказчик обязан произвести их оплату.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ.

Поскольку иное не установлено Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные главой 60 ГК РФ "Обязательства вследствие неосновательного обогащения", подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством (подпункт 3 статьи 1103 ГК РФ).

Как следует из материалов дела 10.07.2023 (т.1 л.д.96) субсубподрядчиком в адрес субподрядчика были направлены оригиналы документы, позволяющие принять объем работ (в том числе; письмо – претензия, акты формы КС-2 и КС-3 №5 от 15.06.2023, счет-фактура от 05.06.2023 №17, счет-фактура от 15.06.2023 №18, акт сверки за период и счет на оплату от 15.06.2023 №20). Мотивированного возражения в установленный договором срок относительно предъявленных объемов выполненных работ не поступило.

Согласно положениям пункта 4.1.4. договора в случае если работы предусматривают проведение скрытых работ, то субсубподрядчик приступает к выполнению последующих работ после приемки (освидетельствования) субподрядчиком таких скрытых работ, которые оформляются журналом оперативной приемки работ на объекте (Приложение №2 к договору).

Таким образом, в соответствии с вышеуказанными положениями договора, установление фактически выполненных объемов работ предусмотрено сторонами отсылкой к содержанию совместно составляемого журнала оперативной приемки.

Вместе со встречным иском в материалы дела приобщен журнал оперативной приемке выполненных работ на объект, содержание которого ООО "АДС" не оспорено.

Согласно записям в журнале оперативной приемки (т.1 л.д. 102+оборот) в период с 06.06.2023 по 15.06.2023 ООО "СЕКВОЙЯ" выполнило и сдало в пользу ООО "АДС" следующие виды и объемы работ:

№ п/п

Виды работ

Объем

выполненных   и принятых работ

1

Отсыпка послойно песком с уплотнением

2615 м. куб.

2

Устройство прослойки из нетканного геотекстиля

1790 м.кв. •

3

Укладка однослойной георешетки RE 560

5438 м.кв.

4

Устройство пристеночного дренажа из щебня

136 м.куб.

5

Монтаж модульных облицовочных блоков

1884 шт.

Соответствующие виды работ отражены в акте о приемке выполненных работ №5 от 15.06.2023.

Все записи в журнале оперативной приемки о выполнении субсубподрядчиком работ (как принятых ООО "АДС", так и спорных) подтверждены подписью ФИО3 Таким образом, полномочия указанного лица на приемку выполненных субсубподрядчиком работ по спорному договору признавались ООО "АДС".

С учетом этого обстоятельства отклоняются возражения представителя ООО "АДС" о том, что данное лицо (ФИО3) не является их сотрудником, а может быть представителем подрядчика или генподрядчика. 

Как следует из материалов дела 10.07.2023 в адрес субподрядчика были направлены документы, позволяющие принять объем работ, согласно акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 №5, справке по форме КС-3 №5 от 15.06.2023; мотивированного возражения относительно предъявленных объемов выполненных работ не поступило.

Пунктом 5.3.1. договора сторонами определен порядок фиксации выполнения скрытых работ субсубподрядчиком на объекте. Так, субсубподрядчик информирует субподрядчика не менее чем за два рабочих дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций, скрытых работ, по мере их готовности. Скрытые работы подлежат освидетельствованию в соответствии с требованиями соответствующих ОДН, путем подписания журнала оперативной приемки работ.

Готовность принимаемых конструкций и (или) работ подтверждается подписанием сторонами журнала оперативной приемки работ (пункт 5.3.2. договора).

Таким образом, факт подписания уполномоченным лицом журнала оперативной приемки свидетельствует о фактическом принятии работ, выполняемых субсубподрядчиком.

Как пояснил представитель ООО "СЕКВОЙЯ", на практике приемка скрытых работ происходила один раз в два дня, поскольку весь выполняемый субсубподрядчиком объем работ являлся скрытым и требовал непрерывного освидетельствования. Указанная специфика взаимодействия сторон договора обусловила фактическое отсутствие фиксации уведомлений о готовности объема законченных скрытых работ к приемке, поскольку представитель субподрядчика постоянно находился на объекте и в ежедневном режиме принимал выполненные работы.

Данное утверждение представителем ООО "АДС" не оспорено.

Указанное обстоятельство также подтверждается отсутствием каких-либо уведомлений, направленных в адрес ООО "АДС" о готовности передачи выполненных работ (либо скрытых работ) по ранее принятых актам выполненных работ (КС-2 №1, КС-2 №2, КС-2 №3, КС-2 №4 за период с 21.03.2023 по 05.06.2023).

Так, например выполнение оформленное актом КС-2 №3 от 24.05.2024 было направлено в адрес ООО "АДС" по электронной почте 25.05.2024 без приложения иных документов, которые упоминает ООО "АДС" мотивируя свой отказ в принятии работ. При этом работы были приняты без замечаний по качеству и оформлению, поскольку соответствующие объемы также фиксировались в журнале оперативной приемке и в общем журнале производства работ, который находился у ООО "АДС".

При этом положениями договора предусмотрен порядок предъявления со стороны субподрядчика претензий относительно качества принимаемых работ. Так, согласно положениям пункта 5.5.2. договора если субподрядчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями субсубподрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ; а субсубподрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных субподрядчиком и/или заказчиком, подрядчиком в журнале.

Как следует из содержания представленного журнала оперативной приемки, в нем отсутствуют какие либо записи, из которых бы следовали претензии относительно качества принимаемых работ. Таким образом, доводы ООО "АДС" относительно отказа в приемке спорных работ не имеют документального подтверждения, предусмотренного положениями договора.

Первоначально документы о выполнении спорных работ были направлены ООО "СЕКВОЙЯ" в адрес субподрядчика по электронной почте.

Согласно письму с исх.№291/1 от 21.06.2023 отказ в приемке заявленных объемов работ по акту о приемке выполненных работ №5 от 15.06.2023 мотивирован отсутствием заблаговременного уведомления со стороны субсубподрядчика о приемке заявленных объемов.

В соответствии с условиями, изложенными пункта 6.1. договора по завершении выполнения работ (части работ), субсубподрядчик обязан подготовить и предоставить субподрядчику справку по форме КС-3, акт по форме КС-2 в двух экземплярах, которые должны быть подписаны уполномоченным лицом (руководителем, либо лицом, действующим на основании доверенности) со стороны субсубподрядчика, а также передать субподрядчику счет на оплату, счет-фактуру, журнал оперативной приемки, общий журнал работ, оформленные надлежащим образом.

Материалами дела подтверждается направление субсубподрядчиком 10.07.2023 указанных документов в адрес ООО "АДС".

14.11.2023 Федеральным дорожным агентством выдано разрешение РО34-00147-21/00770041 на ввод объекта в эксплуатацию (т.1 л.д.145), т.е. полный комплекс работ на объекте в целом сдан заказчику.

Таким образом, суд считает подтвержденным материалами дела факт выполнения ООО "СЕКВОЙЯ" спорных работ стоимостью 1003728 руб. согласно акту о приемке выполненных работ №5 от 15.06.2023 без нарушения установленного договором срока (19.06.2023).

Доказательств иного, отвечающих критериям относимости и допустимости, ООО "АДС" не представлено (в том числе, и общего журнала работ, со ссылкой на поэтапную передачу документации подрядчику/генподрядчику/заказчику; при этом представителем ООО "АДС" было заявлено суду о достаточности представленных в суд документов для рассмотрения дела по существу – протокол судебного заседания 23.01.2025).

Обязательство прекращается надлежащим исполнением (пункт 1 статьи 408 ГК РФ).

С учетом вышеизложенного отсутствуют правовые основания для удовлетворения требований ООО "АДС" о расторжении договора (при фактическом исполнении контрагентом обязательства по нему), о взыскании неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса (при фактическом выполнении контрагентом работ стоимостью свыше уплаченного аванса), о взыскании неустойки (при отсутствии доказательств нарушения срока исполнения обязательств по договору).

Соответственно требование ООО "СЕКВОЙЯ" о взыскании задолженности за выполненные работы в размере 92698 руб. подлежит удовлетворению. 

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой.

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Поскольку ООО "АДС" не оплатило всю стоимость выполненных работ в срок, предусмотренный пунктом 2.2 договора, ООО "СЕКВОЙЯ" заявлено также требование о взыскании неустойки на основании положений пункта 9.4. договора, начисленной за период с 30.06.2023 по 10.04.2024, в сумме 26511,63 руб.

Согласно пункту 2.2 договора окончательная оплата стоимости выполненных субсубподрядчиком и принятых субподрядчиком работ производится в течение 10 рабочих дней после подписания субподрядчиком без замечаний акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, справки по форме КС-3, а также после предоставления субсубподрядчиком субподрядчику счета, счета-фактуры и всех журналов (Приложения №№2,3) на выполненные работы, которые должны быть оформлены надлежащим образом.

Приложение № 2 к договору – это журнал оперативной приемки (т.1 л.д.14оборот – 15), Приложение № 3 отсутствует, представителями сторон в судебном заседании подтвердили, что этого приложения не было. 

Договор не содержит условий, что вышеперечисленные документы могут представляться субсубподрядчиком в электронной форме.

Согласно материалам дела оригиналы соответствующих документов направлены ООО "СЕКВОЙЯ" в адрес субподрядчика 10.07.2023 заказным почтовым отправлением, которое не получено ООО "АДС" и 14.08.2023 выслано обратно отправителю за истечением срока хранения.

Следовательно, с учетом положений статьи 165.1 ГК РФ, с 14.08.2023 эти документы считаются надлежащим извещением ООО "АДС" о сдаче выполненных работ. 

Таким образом, неустойка за несвоевременную оплату стоимости выполненных работ, предусмотренная пунктом 9.4 договора может начисляться не ранее 25.08.2023.

С учетом изложенного сумма неустойки, подлежащая взысканию с ООО "АДС" в пользу ООО "СЕКВОЙЯ" составляет 21320,54 руб. (92698 руб. х 0,1% х 230 дней).

Судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на стороны в порядке статьи 110 АПК РФ пропорционально удовлетворенным требованиям, излишне уплаченная ООО "АДС" государственная пошлина (с учетом уменьшения размера иска) подлежит возврату из федерального бюджета. 

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении исковых требований Общества с ограниченной ответственностью "АДС" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) отказать. 

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "АДС" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) из федерального бюджета 8485 руб. государственной пошлины, излишне уплаченной платежным поручением от 10.04.2024 № 245.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "АДС" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "СЕКВОЙЯ" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 114018,54 руб., в том числе: долг за выполненные работы в размере 92698 руб. и неустойку, начисленную за период с 25.08.2023 по 10.04.2024, в сумме 21320,54 руб., а также 4375 руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований Общества с ограниченной ответственностью "СЕКВОЙЯ" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

В соответствии с частью 3 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по письменному ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

Судья                                                                                          Е.Г. Бажанова