АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А66-12852/2023

г.Тверь

13 февраля 2024 года

Резолютивная часть решения принята 6 февраля 2024 года

 

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Голубевой Л. Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1, при участии представителей: истца – ФИО2, по доверенности, ответчика - ФИО3, по доверенности, рассмотрев в судебном заседании в режиме веб-конференции дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Гарантия стабильности», г. Тверь,

к Публичному акционерному обществу "Россети Центр", г. Москва, в лице филиала "Тверьэнерго", г. Тверь,

об обязании осуществить технологическое присоединение, о взыскании 7 096,55 руб. договорной неустойки, неустойки на будущее время,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия стабильности», г. Тверь, обратилось в Арбитражный суд Тверской области с иском к Публичному акционерному обществу "Россети Центр", г. Москва, в лице филиала "Тверьэнерго", г. Тверь, об обязании осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям по договору от 24.01.2023 №42319401 в течение 10 рабочих дней со дня вступления решения в законную силу,  о взыскании 7 096,55 руб. договорной неустойки за период с 25.07.2023 по 30.08.2023, неустойки за период с 31.08.2023 по день фактической оплаты долга исходя из ставки 0,25% за каждый день просрочки.

Истец  поддержал  исковые  требования  в  полном  объеме,  возражал  против   удовлетворения  ходатайства  ответчика  о   снижении размера неустойки в порядке  ст. 333 ГК РФ.

Ответчик  исковые  требования  не  признал  по  доводам,   изложенным в  письменных  возражениях  на  иск,  просил  снизить размер неустойки в соответствии со ст. 333 ГК РФ, увеличить срок исполнения обязательства по договору в течение одного месяца.

Из материалов дела установлено, что между истцом (Заявитель) и ответчиком (Филиал ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго») (Сетевая организация) заключен договор от 24.01.2023 №42319401 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в соответствии с условиями которого Сетевая организация приняла на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) малоэтажной жилой застройки, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

-максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 150 кВт;

-категория надёжности Ш;

-класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ.

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт.

Заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения малоэтажной жилой застройки, расположенной: почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, Верхневолжское с/п, дер. Князево (кадастровый номер земельного участка: 69:10:0290901:10).

Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее -технические условия) и располагается на расстоянии 15 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя  (пункт 3 договора).

Технические условия для присоединения к электрическим (далее - технические условия) сетям являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении № 1 Договору, срок их действия составляет 2 (два) года со дня заключения настоящего договора (п. 4 договора).

Согласно пункту 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 (шесть) месяцев со дня заключения настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6 договора сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже); не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). В случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже сетевая организация составляет в форме электронного документа и размещает в личном кабинете заявителя уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в течение одного рабочего дня со дня выполнения сетевой организацией мероприятий, предусмотренных техническими условиями, отнесенных к обязанностям сетевой организации.

Согласно пункту 8 договора Заявитель обязуется:

- надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, за исключением урегулирования отношений с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях,

- в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ - после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

- принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией (в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ);

- после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации, а в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже - рассмотреть и при наличии замечаний представить замечания к уведомлению об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям не позднее 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям,

надлежащим образом исполнять указанные в разделе Ш настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

Согласно пункту 10 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом ГУ РЭК Тверской области № 488-нп от 28.11.2022 г., составляет: 76 719 (семьдесят шесть тысяч семьсот девятнадцать) руб. 41 коп., в том числе НДС (20%) 12786 (двенадцать тысяч семьсот восемьдесят шесть) руб. 57 коп.

В соответствии с пунктом 11 договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке (кроме случаев, когда заявитель воспользовался правом предоставления рассрочки платежа за технологическое присоединение):

15 процентов платы вносятся в течение 5 рабочих дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета/квитанции на оплату технологического присоединения;

30 процентов платы вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета/квитанции;

35 процентов платы вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета/квитанции;

20 процентов платы вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

Пунктом 17 договора предусмотрено, что сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору (пункт 21.).

В счет оплаты по договору платёжным поручением от 24.01.2023 № 9 истец перечислил на счет ответчика денежные средства в размере 61 000 руб.

Однако ответчиком мероприятия по технологическому присоединению не выполнены, в связи с чем, 26 июля 2023 г. истец  направил в адрес претензию с требованием не позднее 28.08.2023 осуществить технологическое присоединение по договору.

Поскольку требование истца ответчиком не выполнено, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Проанализировав материалы дела, оценив собранные по делу доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по правилам ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд пришел к следующим выводам:

В соответствии с ч. 1 ст. 64, ст. ст. 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьей 65 АПК РФ установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

Защита гражданских прав осуществляется способами, установленными статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также иными способами, предусмотренными законом. Истец свободен в выборе способа защиты своего нарушенного права, однако избранный им способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения, характеру нарушения.

В тех случаях, когда закон предусматривает для конкретного правоотношения определенный способ защиты, лицо, обращающееся в суд, вправе воспользоваться именно этим способом защиты. Необходимым условием применения того или иного способа защиты гражданских прав является обеспечение восстановления нарушенного права истца. При этом при формулировании требования, основания иска должны соответствовать его предмету.

Положения статьи 12 ГК РФ, включая ее абзац восьмой, содержат перечень способов защиты гражданских прав, направленных на обеспечение восстановления нарушенных прав и стабильность гражданско-правовых отношений, в том числе путем присуждения к исполнению обязанности в натуре.

Исполнение обязанности в натуре подразумевает понуждение должника выполнить действия, которые он должен совершить в силу имеющегося гражданско-правового обязательства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Законодательство Российской Федерации об электроэнергетике состоит из ГК РФ, Закона об электроэнергетике и иных регулирующих отношения в сфере электроэнергетики федеральных законов, а также указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, принимаемых в соответствии с данными федеральными законами, к числу которых относятся Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 N 442 (далее - Основные положения N 442), Правила N 861.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке, и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В свою очередь, заявитель вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также выполняет технические условия, касающиеся обязательств заявителя (пункт 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике и пункты 16, 17 Правил N 861).

Согласно пункту 7 Правил N 861 подача напряжения и мощности в сеть и составление акта о технологическом присоединении являются этапами, завершающими процедуру технологического присоединения.

В рассматриваемом случае основанием для обращения Заявителя в арбитражный суд явилось нарушение Сетевой организацией срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению, установленного в пункте 5 договора.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик указал, что сетевая организация осуществляет технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя после уведомления сетевой организации о выполнении технических условий; невыполнение сетевой организацией указанных мероприятий обусловлено большими затратами на строительство и реконструкцию, расходы сетевой организации на выполнение мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт не были включены в тарифы на передачу электроэнергии, установленные на 2019 -2022 годы для филиала ПАО "Россети Центр" - "Тверьэнерго" в качестве выпадающих доходов сетевой организации; заявил ходатайство о снижении размера неустойки в соответствии со ст. 333 ГК РФ.

Факт нарушения ответчиком обязательств по осуществлению технологического присоединения подтверждается материалами дела, в том числе спорным договором, платежным поручением от 24.01.2023 № 9, и не оспаривается ответчиком.

Согласно пункту 12 технических условий для присоединения к электрическим сетям сетевая организация сетевая организация осуществляет:

- Реконструкцию существующей отпайки 10 кВ на СТП 10/0,4 кВ № 1008 «Князево» ВЛ 10 кВ фид. № 08 ПС 35/10 кВ Квакшино в части монтажа ответвительной арматуры в сторону проектируемого участка В Л 10 кВ от опоры № 18. Объем реконструкции, номер опоры уточнить при проектировании (пункт 12.1).

- Проектирование и строительство участка ВЛ 10 кВ от опоры № 18 отпайки 10 кВ на СТП 10/0,4 кВ № 1008 «Князево» ВЛ 10 кВ фид. № 08 ПС 35/10 кВ Квакшино проводом марки СИП 3 сечением 50 мм2 протяженностью ОД6 км. Трассу прохождения, протяженность, сечение провода и тип опор уточнить при проектировании (пункт 12.2).

- Проектирование и строительство ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА. Место установки, тип ТП 10/0,4 кВ, мощность трансформатора, состав и параметры оборудования уточнить при проектировании с учетом заявки 17320535 на 150 кВт (пункт 12.3).

- Проектирование и строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ до выносного пункта учета (ВПУ) сетевой организации, установленного на опоре вблизи границы протяженностью 0,01 км. Трассу прохождения, протяженность, марку и сечение провода уточнить при проектировании (пункт 12.4) и др.

Выполнение данных обязательств не обусловлено выполнением встречных обязательств со стороны истца.

 Согласно пояснениям ответчика данные работы ответчиком не выполнены, в связи с отсутствием финансирования ответчик не приступил к выполнению названных работ.

С учетом изложенного, довод ответчика о не направлении истцом уведомления о выполнении технических условий отклоняется судом.

Неисполнение ответчика обязательств по договору нарушает имущественные права истца, в связи с чем они подлежат восстановлению.

Вместе с тем, суд не может согласиться со сроком исполнения обязательства, который истец просит установить для ответчика - 10 рабочих дней с даты вступления решения в законную силу. С учетом того, что согласно пункту 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 (шесть) месяцев со дня заключения настоящего договора, ответчик не приступил к выполнению работ, предусмотренных договором, суд считает запрошенный срок неисполнимым.

При указанных обстоятельствах исковые требования об обязании ответчика исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 24.01.2023 №42319401 путем технологического присоединения подлежат удовлетворению со сроком исполнения - в течение месяца с даты вступления решения в законную силу.

Истец также просит взыскать с ответчика 7 096,55 руб. договорной неустойки за период с 25.07.2023 по 30.08.2023, неустойку с 31.08.2023 по день фактической оплаты долга исходя из ставки 0,25% за каждый день просрочки.

Неустойка в силу статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации является способом обеспечения исполнения договорных обязательств, поскольку стимулирует стороны к надлежащему выполнению своих обязанностей.

Пунктом 17 договора предусмотрено, что сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

В силу статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, граждане и юридические лица свободны в заключение договора и условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. Одним из основных проявлений свободы договора является предоставленная сторонам возможность самостоятельно устанавливать его условия.

Ответчик, заключив с истцом спорный договор, добровольно принял на себя обязательство по выплате неустойки в случае несвоевременного выполнения обязательств по договору.

Нарушение срока выполнения работ по договору подтверждено материалами дела: в предусмотренный договором срок - в течение 6 (шести) месяцев с даты заключения договора (оплаты по договору платежным поручением от 24.01.2023 №9) работы не выполнены, доказательства обратного в материалы дела не представлены.

Ответчик как субъект предпринимательской деятельности в соответствии со статьей 2 ГК РФ осуществляет предпринимательскую деятельность на свой риск, следовательно должен и мог предположить и оценить возможность отрицательных последствий такой деятельности, в том числе связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) принятых по договору обязательств.

Основания для освобождения ответчика от ответственности либо уменьшения размера ответственности в порядке статей 401 - 406 ГК РФ судом не установлены.

Поскольку ответчик своевременно не исполнил обязательства, предусмотренные договором, требование истца о взыскании с ответчика неустойки является обоснованным.

Расчет неустойки судом проверен, признан верным, соответствующим условиям обязательства и фактическим обстоятельствам.

В пункте 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" разъяснено, что по смыслу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации  истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

Ответчиком заявлено об уменьшении размера неустойки в соответствии со статьей 333 ГК РФ

В силу пункту 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе ее уменьшить.

Пунктом 69 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (постановление № 7) установлено, что подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке.

В пункте 71 постановления № 7 разъяснено, что если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, сформировавшейся при осуществлении конституционно-правового толкования статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушений обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных законом, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, по существу, на реализацию требований статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать прав и свобод других лиц. При применении данной нормы суд обязан установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности (неустойкой) и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения (определение Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2000 N 263-О).

В соответствии с пунктом 77 постановления № 7 снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды.

Гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.

В соответствии с правовыми подходами, выработанными в судебной практике, обычно принятым в деловом обороте и несчитающимся чрезмерно высоким является размер неустойки 0,1%.

Предусмотренная договором неустойка превышает указанный показатель.

С учетом изложенного суд считает возможным снизить размер неустойки до 0,1% от указанного общего размера платы за каждый день просрочки.

С учетом изложенного, по расчету суда, размер неустойки за период с 25.07.2023 по 30.08.2023 составляет 2 838,27 руб.

При указанных обстоятельствах подлежат удовлетворению требования о взыскании договорной неустойки в размере 2 838,27 руб. за период с 25.07.2023 по 30.08.2023 и с 31.08.2023 по день фактического исполнения обязательства в размере 0,1% от стоимости платы за технологическое присоединение (76 719,41 руб.), за каждый день просрочки исполнения обязательства.

В пункте 23 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах" при частичном удовлетворении требования неимущественного характера, в том числе имеющего денежную оценку (например, требования о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок), расходы по уплате государственной пошлины в полном объеме взыскиваются с противоположной стороны по делу.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ, с учетом разъяснений пункта 23 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 № 46 расходы по оплате госпошлины подлежат отнесению на ответчика в полном объеме.

Руководствуясь ст. ст. 110,167-171,174, 176 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

обязать Публичное акционерное общество  «Россети Центр», г. Москва, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, в лице филиала ПАО «Россети Центр»- «Тверьэнерго» исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 42319401 от 24.01.2023 в течение месяца со дня вступления настоящего решения в законную силу, осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Гарантия стабильности»,  г. Тверь, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, - малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Тверская область, Калининский район, Верхневолжское сельское поселение, дер. Князево (кадастровый номер земельного участка 69:0290901:10).

Взыскать с   Публичного акционерного общества  «Россети Центр», г. Москва, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Гарантия стабильности»,  г. Тверь, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  2 838,27 руб. неустойки за период с 25.07.2023 по 30.08.2023 и с 31.08.2023 по день фактического исполнения обязательства в размере 0,1% от стоимости платы за технологическое присоединение (76 719,41 руб.), за каждый день просрочки исполнения обязательства,  а также 8 000 руб. судебных расходов по уплате госпошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Исполнительные листы по делу подлежат выдаче в порядке, предусмотренном ст. 319 АПК РФ.

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Вологда, в течение месяца со дня его принятия, в порядке, предусмотренном АПК РФ.

 

Судья                                                                                              Л. Ю. Голубева