АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Дело №А27-19828/2024

именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

11 декабря 2024 г.                                                                                                  г. Кемерово

Резолютивная часть решения объявлена 11 декабря 2024 г.

Полный текст решения изготовлен 11 декабря 2024 г.

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Тимохина В.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шубиной И.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании с участием

представителя истца по доверенности от 20.06.2024 – ФИО1,

дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью проектный институт «Кузбассгорпроект»,  ИНН: 

<

***>

к обществу с ограниченной ответственностью «Биосфера»,   ИНН: 

<

***>

о взыскании 2 398 117,40 руб. долга, 453 410,40 руб. неустойки

у с т а н о в и л:

в арбитражный суд поступило исковое заявление общества с ограниченной ответственностью проектный институт «Кузбассгорпроект» к обществу с ограниченной ответственностью «Биосфера» о взыскании 2 398 117,40 руб. долга, 453 410,40 руб. неустойки.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку ответчик не заявил возражений против рассмотрения дела в отсутствие его представителя, суд, в отсутствие возражений со стороны истца, завершил предварительное судебное заседание, признал дело подготовленным к судебному разбирательству, в соответствии с ч. 4 ст. 137 АПК РФ перешел к основному судебному заседанию и рассмотрел дело по существу, что не нарушает прав ответчика.

В соответствии со ст. 156 АПК РФ рассмотрение дела производится в отсутствие представителя ответчика.

Как усматривается из материалов дела, между истцом и ответчиком заключен Договор №6891 на разработку проектно-сметной документации от 22.09.2022 г., согласно условиям которого истец обязан по утвержденному заказчиком заданию разработать проектно-сметную документацию по объекту: Пятиэтажный 90-то квартирный жилой дом по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, п. Звездный, строительный номер 1 (п. 1.1 Договора).

Согласно п. 3.1 Договору стоимость работ по Договору составляет 4 398 057 руб. Оплата работ производится поэтапно:

- аванс в размере 20 % в срок 30 календарных дней после подписания договора;

- промежуточные платежи при поэтапной готовности проектно-сметной документации на основании предъявленного акта выполненных работ и счет-фактуры с учетом уменьшения на сумму аванса пропорционально выполненному объему работ в срок до 30 календарных дней.

Истцом обусловленные Контрактами работы выполнены и сданы по актам выполненных работ №1-6891-2022 от 23.12.2022, №2-6891-2023 от 25.01.2023, №3-6891-2023 от 22.02.2023, №4-6891-2023 от 24.03.2023, №5-6891-2023 от 24.04.2023, №6-6891-2023 от 23.06.2023, №7-6891-2023 от 24.07.2023 на общую сумму 4 398 057 руб.

Ответчик принятые работы оплатил частично в общей сумме 1 999 939,60 руб., что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями.

С учетом изложенного задолженность ответчика перед истцом за выполненные работы составляет 2 398 117,40 рублей.

Доказательств полной оплаты принятых работ в материалы дела не предоставлено.

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки и произведен расчет неустойки на общую сумму 453 410,40 руб.

Относительно указанного требования суд отмечает следующее.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Договором №6891 на разработку проектно-сметной документации от 22.09.2022 г. условие о неустойке не предусмотрено.

Вместе с этим согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

С учетом изложенного суд полагает обоснованным взыскание в данном случае с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами.

Представитель истца в судебном заседании пояснил, что неустойка как мера ответственности за неоплату выполненных работ и ее размер указаны в исковом заявлении ошибочно, расчет размера финансовой санкции производился по правилам ст. 395 ГК РФ.

Проверив расчет суд признал его не нарушающим права ответчика.

В связи с этим исковые требования признаны судом обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Судебные расходы распределяются судом по правилам ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 395, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

р е ш и л:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Биосфера» (ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью проектный институт «Кузбассгорпроект» (ИНН: 

<

***>) 2 962 073,80 руб., в том числе 2 398 117,40 руб. задолженности по Договору №6891 на разработку проектно-сметной документации от 22.09.2022 г., 453 410,40 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период 28.02.2023 г. – 13.09.2024 г., 110 546 руб. расходов на уплату государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в арбитражный  суд апелляционной инстанции в течение одного месяца с момента его принятия. Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья                                                                                       В.В. Тимохин