Арбитражный суд Калининградской области Рокоссовского ул., д. 2-4, г. Калининград, 236040 

E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru http://www.kaliningrad.arbitr.ru Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А21-8061/2024

г. Калининград

24 сентября 2024 года

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Специализированной некоммерческой организации  Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах» удовлетворить.  

 Обязать ООО «МиАРТ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в  тридцатидневный срок с момента вступления в законную силу решения суда  выполнить работы по устранению дефектов при выполнении работ по Договору от  23.04.2021 № 27701000/12/ПД/СМР/21 на оказание услуг и (или) выполнение работ  по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,  расположенному по адресу: - 

<

...>. ФИО1, д. 20: ⎯  восстановить парапетные крышки, закрепить должным образом, загерметизировать  в местах стыков; ⎯ выполнить узлы примыкания кровельного покрытия к  машинным отделениям (3 шт.) по всему периметру в соответствии с нормативными  требованиями.  

 В случае неисполнения решения суда взыскать с ООО «МиАРТ» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу СНО КО «Фонд капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) судебную неустойку по 1 500 руб. в день, начиная со дня вступления  решения суда в законную силу и до фактического исполнения обязательств.  

 В удовлетворении остальной части требований о взыскании неустойки  отказать.  

 Взыскать с ООО «МиАРТ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в  пользу СНО КО «Фонд капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 6 000 руб. в  возмещение расходов по уплате государственной пошлины.  

 Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.  

Судья Т.В. Пахомова