Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ  

(резолютивная часть)

Дело № А41-51987/23

02 апреля 2024 года

г. Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Т.Ю. Цыганковой  

при ведении протокола судебного заседания ФИО1  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Фонда капитального  ремонта общего имущества многоквартирных домов к ООО «Мультисистема» о  безвозмездном устранении недостатков работ, выполненных по договору подряда,  взыскании неустойки,  

при участии в судебном заседании лиц, согласно протоколу 

 Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать ООО «Мультисистема» безвозмездно устранить недостатки (дефекты)  работ, выполненные по Договору от 14.07.2017 № 1409-К, указанные в Рекламационном  акте от 21.12.2021, после капитального ремонта балконных плит многоквартирного дома,  расположенного по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул.  Железнодорожная, д. 6, а именно:  

- отслоение штукатурно-окрасочного слоя балконных плит (6 шт.) (7 м.кв.); 

- ненадлежащий монтаж капельника подъезда № 2, этаж 2 (0,8 м.п.);  

 Взыскать с ООО «Мультисистема» в пользу Фонда капитального ремонта общего  имущества многоквартирных домов неустойку в размере 34 941,02 руб. за период с  01.10.2022 по 31.05.2023  

Взыскать с ООО «Мультисистема» в пользу Фонда капитального ремонта общего  имущества многоквартирных домов неустойку за нарушение сроков устранения  недостатков работ, определенных в Рекламационном акте от 21.12.2021, за период с  01.06.2023 по дату фактического исполнения обязательства по устранению недостатков  (дефектов) капитального ремонта.  

Взыскать с ООО «Мультисистема» судебную неустойку в размере 1 000 руб. за  каждый день в случае просрочки исполнения решения Арбитражного суда Московской  области.  

Взыскать с ООО «Мультисистема» в пользу Фонда капитального ремонта общего  имущества многоквартирных домов судебные расходы по оплате государственной  пошлины в размере 7 967,08 руб.  

Возвратить Фонду капитального ремонта общего имущества многоквартирных  домов из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину,  уплаченную по платежному поручению № 10996 от 13.06.2023 в размере 293 руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в  полном объеме).  

Судья Т.Ю. Цыганкова