Арбитражный  суд  Брянской  области

241050, г. Брянск, пер. Трудовой, д.6 сайт: www.bryansk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации   

 

РЕШЕНИЕ

Дело №А09-2987/2021

город Брянск

24 февраля 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 16 февраля 2022 года

Арбитражный суд Брянской области в составе судьи  Ивашиной Я.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

общества с ограниченной ответственностью «Пласт Лайн», г. Брянск, 

к Региональному фонду капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области, г. Брянск, 

третьи лица: 1. ФИО2, 2. ФИО3, 3. ФИО4, 4. ФИО5  5. ФИО6 6. ФИО7 7. ФИО8 

о взыскании 4 934 637 руб. 69 коп. (с учетом уточнения),

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО9 (доверенность от 08.01.2021г.), 

от ответчика: не явился, после перерыва: ФИО10 (доверенность №5 от 01.06.2021г., диплом),

от третьих лиц: 1. – 7. не явились 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Пласт Лайн»Казенное (далее - ООО «Пласт Лайн»), г.Брянск обратилось в Арбитражный суд Брянской области с исковым заявлением к Региональному фонду капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области, г. Брянск о взыскании  50 000 руб. неосновательного обогащения в виде неосновательно сбереженной суммы пени.

В ходе рассмотрения дела истец заявил ходатайство об уточнении размера исковых требований до  4 934 637,69 руб., в том числе неосновательного обогащения по контракту от 26.02.2020 №193.К.Р.2020 в сумме 747 251,83 руб., неосновательного обогащения по контракту от 05.02.2020 №153.К.Р.2020 в сумме 2 161 283,14 руб., неосновательного обогащения по контракту от 23.01.2020 №136К.Р.2020 в сумме 241 784,57 руб., неосновательного обогащения по контракту от 23.01.2020 №135.К.Р.2020 в сумме                   233 115,18 руб., неосновательного обогащения по контракту от 27.03.2020 №217.К.Р.2020 в сумме 56 997,78 руб., неосновательного обогащения по контракту от 27.03.2020 №215.К.Р.2020 в сумме 379 025,95 руб., неосновательного обогащения по контракту от 18.12.2020 №78.К.Р.2020 в сумме 1 115 159,24 руб.

Согласно ч. 1 ст. 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Уточнение исковых требований принято судом в порядке ст. 49 АПК РФ.

Определением суда к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования привлечены 1. ФИО2, 2. ФИО3, 3. ФИО4, 4. ФИО5  5. ФИО6 6. ФИО7 7. ФИО8 (т. 5 л.д. 81-82).

Ответчик исковые требования не признал по основаниям, изложенным в письменных отзывах на иск, считает, что истцом не представлено доказательств, объективно свидетельствующих об отсутствии его вины в неисполнении условий договоров.

Истец в свою очередь представил письма контрагентов, подтверждающие перебои в поставке товаров.

Третье лица, уведомленные надлежащим образом, в судебное заседание не явились, письменные отзывы на иск не представили.

В порядке ст. 163 АПК РФ в судебном заседании 09.02.2022 объявлен перерыв до 16.02.2022.

После объявленного перерыва, судебное заседание продолжено 16.02.2022 с участием представителей сторон.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Выслушав доводы представителей сторон, изучив материалы дела, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

18.12.2019 между Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области (Заказчик) и ООО «Пласт Лайн» (Подрядчик) был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД  №78.КР.2020, по условиям которого подрядчик обязался выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества МКД, расположенных по адресу (ам), указанному (ым) в приложении №1 к настоящему договору в соответствии с условиями настоящего договора и проектной документаций (п. 1.1. контракта).

 Согласно п. 1.3 договора заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Подрядчик обязался выполнить работы в соответствии с проектной документацией и в соответствии с графиком производства работ (п. 2.1. договора).

Сроки начала и окончания работ по каждому объекту указаны в приложении №1 настоящего договора, которые определены по результатам электронного аукциона (п.2.2договора).

Согласно п. 2.6. договора фактической датой окончания работ на объекте (ах) является дата подписания акта сдачи-приемки в эксплуатацию объекта (ов) приемочной комиссией и подписанных актов выполненных работ КС-2. 

Цена настоящего договора определяется на основании утвержденной проектной документации и согласно результатам электронного аукциона, на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества МКД, включенных в краткосрочный (2020-2022 гг. этап 2020) план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества МКД на территории Брянской области (2014-2043) и составляет 3 530 186,50 (без НДС), включает в се затраты подрядчика, так или иначе связанные с выполнением полного комплекса работ на объекте, в том числе:

-затраты на производство строительно-монтажных работ с учетом стоимости материалов, конструкций, изделий и оборудования;

-затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала подрядчика, доставкой на объекты) материалов, изделий и оборудования, необходимых для начала производства работ, и их демобилизацией после окончания работ, или в случае прекращения действия договора;

-затраты, связанные с обеспечением подрядчика электроэнергией, теплом, водой бытовой и питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства работ на объекте;

-затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, содержание и уборку строительной площадки;

-оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим договором;

-затраты, связанные с получением  подрядчиком всех свидетельств, лицензий, разрешений, допусков, необходимых для выполнения обязательств по договору;

-иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим договором (п. 3.1. договора).

 Согласно п. 10.1 договора в случае просрочки исполнения подрядчиком любого из обязательств, предусмотренных настоящим договором, заказчик вправе требовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня следующего после дня истечения, установленного договором и приложениями к неустойка исполнения обязательства до фактического исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается  в размере 0,25% от общей стоимости работ по объекту, по которому допущена просрочка исполнения обязательств.

В соответствии с п. 10.9. уплата неустойки за нарушение обязательств по договору производится подрядчиком на основании претензии заказчика перечислением денежных средств в безналичной форме на расчетный счет заказчика. В случае применения к заказчику мер, указанных в настоящей главе, заказчик вправе в одностороннем порядке произвести соответствующее удержание из стоимости работ, согласно условиям настоящего договора.

Приложением №1 к договору установлен срок выполнения работ по капитальному ремонту: дата начала – 16.03.2020, дата окончания – 14.05.2020.   

01.10.2020 межу Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области (Заказчик) и ООО «Пласт Лайн» (Подрядчик) подписано дополнительное соглашение №1, согласно которому внесены изменения в графу 4, строку 1, Приложения №1 к договору №78.КР.2020 от 18.12.2019 в части уменьшения стоимости работ по капитальному ремонту до 3 517 518 руб.

02.10.2020 межу Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области (Заказчик) и ООО «Пласт Лайн» (Подрядчик) подписано дополнительное соглашение №2, согласно которому, п.3.7. раздела 3 договора изложен в следующей редакции: «окончательная оплата выполненных работ по настоящему договору производится заказчиком не позднее 28.02.2021 включительно, п. 10.2. раздела 10 «ответственность сторон» дополнен абзацем следующего соглашения: «Пени, предусмотренные п.10.2. договора, а также проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, не начисляются заказчику до истечения срока, указанного в п. 1 настоящего дополнительного соглашения.

23.01.2020 между Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области (Заказчик) и ООО «Пласт Лайн» (Подрядчик) был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД  №135.КР.2020, по условиям которого подрядчик обязался выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества МКД, расположенных по адресу (ам), указанному (ым) в приложении №1 к настоящему договору в соответствии с условиями настоящего договора и проектной документаций (п. 1.1. контракта).

 Согласно п. 1.3 договора заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Подрядчик обязался выполнить работы в соответствии с проектной документацией и в соответствии с графиком производства работ (п. 2.1. договора).

Сроки начала и окончания работ по каждому объекту указаны в приложении №1 настоящего договора, которые определены по результатам электронного аукциона (п.2.2 договора).

Согласно п. 2.6. договора фактической датой окончания работ на объекте (ах) является дата подписания акта сдачи-приемки в эксплуатацию объекта (ов) приемочной комиссией и подписанных актов выполненных работ КС-2. 

Цена настоящего договора определяется на основании утвержденной проектной документации и согласно результатам электронного аукциона, на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества МКД, включенных в краткосрочный (2020-2022 гг. этап 2020) план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества МКД на территории Брянской области (2014-2043) и составляет 2 008 921,50 руб. (без НДС), включает все затраты подрядчика, так или иначе связанные с выполнением полного комплекса работ на объекте, в том числе:

-затраты на производство строительно-монтажных работ с учетом стоимости материалов, конструкций, изделий и оборудования;

-затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала подрядчика, доставкой на объекты) материалов, изделий и оборудования, необходимых для начала производства работ, и их демобилизацией после окончания работ, или в случае прекращения действия договора;

-затраты, связанные с обеспечением подрядчика электроэнергией, теплом, водой бытовой и питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства работ на объекте;

-затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, содержание и уборку строительной площадки;

-оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим договором;

-затраты, связанные с получением  подрядчиком всех свидетельств, лицензий, разрешений, допусков, необходимых для выполнения обязательств по договору;

-иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим договором (п. 3.1. договора).

 Согласно п. 10.1 договора в случае просрочки исполнения подрядчиком любого из обязательств, предусмотренных настоящим договором, заказчик вправе требовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня следующего после дня истечения, установленного договором и приложениями к неустойка исполнения обязательства до фактического исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается  в размере 0,25% от общей стоимости работ по объекту, по которому допущена просрочка исполнения обязательств.

В соответствии с п. 10.9. уплата неустойки за нарушение обязательств по договору производится подрядчиком на основании претензии заказчика перечислением денежных средств в безналичной форме на расчетный счет заказчика. В случае применения к заказчику мер, указанных в настоящей главе, заказчик вправе в одностороннем порядке произвести соответствующее удержание из стоимости работ, согласно условиям настоящего договора.

Приложением №1 к договору установлен срок выполнения работ по капитальному ремонту: дата начала – 18.05.2020, дата окончания – 16.07.2020.   

15.07.2020 межу Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области (Заказчик) и ООО «Пласт Лайн» (Подрядчик) подписано дополнительное соглашение №1, согласно которому внесены изменения в графу 4,строку 1,Приложения №1 к договору №135.КР.2020 от 23.01.2020 в части уменьшения стоимости работ по капитальному ремонту до 1 709 467,61 руб.

23.01.2020 между Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области (Заказчик) и ООО «Пласт Лайн» (Подрядчик) был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД  №136.КР.2020, по условиям которого подрядчик обязался выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества МКД, расположенных по адресу (ам), указанному (ым) в приложении №1 к настоящему договору в соответствии с условиями настоящего договора и проектной документаций (п. 1.1. контракта).

 Согласно п. 1.3 договора заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Подрядчик обязался выполнить работы в соответствии с проектной документацией и в соответствии с графиком производства работ (п. 2.1. договора).

Сроки начала и окончания работ по каждому объекту указаны в приложении №1 настоящего договора, которые определены по результатам электронного аукциона (п.2.2 договора).

Согласно п. 2.6. договора фактической датой окончания работ на объекте (ах) является дата подписания акта сдачи-приемки в эксплуатацию объекта (ов) приемочной комиссией и подписанных актов выполненных работ КС-2. 

Цена настоящего договора определяется на основании утвержденной проектной документации и согласно результатам электронного аукциона, на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества МКД, включенных в краткосрочный (2020-2022 гг. этап 2020) план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества МКД на территории Брянской области (2014-2043) и составляет 2568 771,70 руб. (без НДС), включает в се затраты подрядчика, так или иначе связанные с выполнением полного комплекса работ на объекте, в том числе:

-затраты на производство строительно-монтажных работ с учетом стоимости материалов, конструкций, изделий и оборудования;

-затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала подрядчика, доставкой на объект (ты) материалов, изделий и оборудования, необходимых для начала производства работ, и их демобилизацией после окончания работ, или в случае прекращения действия договора;

-затраты, связанные с обеспечением подрядчика электроэнергией, теплом, водой бытовой и питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства работ на объекте;

-затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, содержание и уборку строительной площадки;

-оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим договором;

-затраты, связанные с получением  подрядчиком всех свидетельств, лицензий, разрешений, допусков, необходимых для выполнения обязательств по договору;

-иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим договором (п. 3.1. договора).

 Согласно п. 10.1 договора в случае просрочки исполнения подрядчиком любого из обязательств, предусмотренных настоящим договором, заказчик вправе требовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня следующего после дня истечения, установленного договором и приложениями к неустойка исполнения обязательства до фактического исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается  в размере 0,25% от общей стоимости работ по объекту, по которому допущена просрочка исполнения обязательств.

В соответствии с п. 10.9. уплата неустойки за нарушение обязательств по договору производится подрядчиком на основании претензии заказчика перечислением денежных средств в безналичной форме на расчетный счет заказчика. В случае применения к заказчику мер, указанных в настоящей главе, заказчик вправе в одностороннем порядке произвести соответствующее удержание из стоимости работ, согласно условиям настоящего договора.

Приложением №1 к договору установлен срок выполнения работ по капитальному ремонту: дата начала – 20.04.2020, дата окончания – 03.07.2020.   

02.07.2020 межу Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области (Заказчик) и ООО «Пласт Лайн» (Подрядчик) подписано дополнительное соглашение №1, согласно которому внесены изменения в графу 4,строку 1,Приложения №1 к договору №136.КР.2020 от 23.01.2020 в части уменьшения стоимости работ по капитальному ремонту до 2 209 594,40 руб.

11.08.2020 межу Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области (Заказчик) и ООО «Пласт Лайн» (Подрядчик) подписано дополнительное соглашение №2, согласно которому, п.3.7. раздела 3 договора изложен в следующей редакции: «окончательная оплата выполненных работ по настоящему договору производится заказчиком в течение 60 календарных дней, с даты подписания акта о приемке в эксплуатацию объекта. Оплата производится до 15.12.2020 включительно,  п. 10.2. раздела 10 «ответственность сторон» дополнен абзацем следующего соглашения: «Пени, предусмотренные п.10.2. договора, а также проценты предусмотренные ст. 395 ГК РФ, не начисляются заказчику до истечения срока, указанного в п. 1 настоящего дополнительного соглашения.

05.02.2020 между Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области (Заказчик) и ООО «Пласт Лайн» (Подрядчик) был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД  №153.КР.2020, по условиям которого подрядчик обязался выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества МКД, расположенных по адресу (ам), указанному (ым) в приложении №1 к настоящему договору в соответствии с условиями настоящего договора и проектно (сметной) документаций (п. 1.1. контракта).

 Согласно п. 1.3 договора заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Подрядчик обязался выполнить работы в соответствии с проектной документацией и в соответствии с графиком производства работ (п. 2.1. договора).

Сроки начала и окончания работ по каждому объекту указаны в приложении №1 настоящего договора, которые определены по результатам электронного аукциона (п.2.2 договора).

Согласно п. 2.6. договора фактической датой окончания работ на объекте (ах) является дата подписания акта сдачи-приемки в эксплуатацию объекта (ов) приемочной комиссией и подписанных актов выполненных работ КС-2. 

Цена настоящего договора определяется на основании утвержденной проектной документации и согласно результатам электронного аукциона, на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества МКД, включенных в краткосрочный (2020-2022 гг. этап 2020) план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества МКД на территории Брянской области (2014-2043) и составляет 6 561 295,79 (без НДС), включает все затраты подрядчика, так или иначе связанные с выполнением полного комплекса работ на объекте, в том числе:

-затраты на производство строительно-монтажных работ с учетом стоимости материалов, конструкций, изделий и оборудования;

-затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала подрядчика, доставкой на объект (ты) материалов, изделий и оборудования, необходимых для начала производства работ, и их демобилизацией после окончания работ, или в случае прекращения действия договора;

-затраты, связанные с обеспечением подрядчика электроэнергией, теплом, водой бытовой и питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства работ на объекте;

-затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, содержание и уборку строительной площадки;

-оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим договором;

-затраты, связанные с получением  подрядчиком всех свидетельств, лицензий, разрешений, допусков, необходимых для выполнения обязательств по договору;

-иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим договором (п. 3.1. договора).

 Согласно п. 10.1 договора в случае просрочки исполнения подрядчиком любого из обязательств, предусмотренных настоящим договором, заказчик вправе требовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня следующего после дня истечения, установленного договором и приложениями к неустойка исполнения обязательства до фактического исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается  в размере 0,25% от общей стоимости работ по объекту, по которому допущена просрочка исполнения обязательств.

В соответствии с п. 10.9. уплата неустойки за нарушение обязательств по договору производится подрядчиком на основании претензии заказчика перечислением денежных средств в безналичной форме на расчетный счет заказчика. В случае применения к заказчику мер, указанных в настоящей главе, заказчик вправе в одностороннем порядке произвести соответствующее удержание из стоимости работ, согласно условиям настоящего договора.

Приложением №1 к договору установлен срок выполнения работ по капитальному ремонту: дата начала – 01.04.2020, дата окончания – 29.06.2020.   

17.11.2020 межу Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области (Заказчик) и ООО «Пласт Лайн» (Подрядчик) подписано дополнительное соглашение №1, согласно которому внесены изменения в графу 4, строку 1, Приложения №1 к договору №153.КР.2020 от 05.02.2020 в части уменьшения стоимости работ по капитальному ремонту до 6 179 624,36 руб.

 26.02.2020 между Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области (Заказчик) и ООО «Пласт Лайн» (Подрядчик) был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД  №193.КР.2020, по условиям которого подрядчик обязался выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества МКД, расположенных по адресу (ам), указанному (ым) в приложении №1 к настоящему договору в соответствии с условиями настоящего договора и проектно (сметной) документаций (п. 1.1. контракта).

 Согласно п. 1.3 договора заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Подрядчик обязался выполнить работы по договору в соответствии с проектной документацией и в соответствии с графиком производства работ (п. 2.1. договора).

Сроки начала и окончания работ по каждому объекту указаны в приложении №1 настоящего договора, которые определены по результатам электронного аукциона (п.2.2 договора).

Согласно п. 2.6. договора фактической датой окончания работ на объекте (ах) является дата подписания акта сдачи-приемки в эксплуатацию объекта (ов) приемочной комиссией и подписанных актов выполненных работ КС-2. 

Цена настоящего договора определяется на основании утвержденной проектной документации и согласно результатам электронного аукциона, на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества МКД, включенных в краткосрочный (2020-2022 гг. этап 2020) план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества МКД на территории Брянской области (2014-2043) и составляет 3109 1040,10 (без НДС), включает все затраты подрядчика, так или иначе связанные с выполнением полного комплекса работ на объекте, в том числе:

-затраты на производство строительно-монтажных работ с учетом стоимости материалов, конструкций, изделий и оборудования;

-затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала подрядчика, доставкой на объект (ты) материалов, изделий и оборудования, необходимых для начала производства работ, и их демобилизацией после окончания работ, или в случае прекращения действия договора;

-затраты, связанные с обеспечением подрядчика электроэнергией, теплом, водой бытовой и питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства работ на объекте;

-затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, содержание и уборку строительной площадки;

-оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим договором;

-затраты, связанные с получением  подрядчиком всех свидетельств, лицензий, разрешений, допусков, необходимых для выполнения обязательств по договору;

-иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим договором (п. 3.1. договора).

 Согласно п. 10.1 договора в случае просрочки исполнения подрядчиком любого из обязательств, предусмотренных настоящим договором, заказчик вправе требовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня следующего после дня истечения, установленного договором и приложениями к неустойка исполнения обязательства до фактического исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается  в размере 0,25% от общей стоимости работ по объекту, по которому допущена просрочка исполнения обязательств.

В соответствии с п. 10.9. уплата неустойки за нарушение обязательств по договору производится подрядчиком на основании претензии заказчика перечислением денежных средств в безналичной форме на расчетный счет заказчика. В случае применения к заказчику мер, указанных в настоящей главе, заказчик вправе в одностороннем порядке произвести соответствующее удержание из стоимости работ, согласно условиям настоящего договора.

Приложением №1 к договору установлен срок выполнения работ по капитальному ремонту: дата начала – 01.06.2020, дата окончания – 30.07.2020.   

10.11.2020 межу Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области (Заказчик) и ООО «Пласт Лайн» (Подрядчик) подписано дополнительное соглашение №1, согласно которому внесены изменения в графу 4, строку 1, Приложения №1 к договору №193.КР.2020 от 26.02.2020 в части уменьшения стоимости работ по капитальному ремонту до 3 038 119,90 руб.

27.03.2020 между Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области (Заказчик) и ООО «Пласт Лайн» (Подрядчик) был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД  №215.КР.2020, по условиям которого подрядчик обязался выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества МКД, расположенных по адресу (ам), указанному (ым) в приложении №1 к настоящему договору в соответствии с условиями настоящего договора и проектно (сметной) документаций (п. 1.1. контракта).

 Согласно п. 1.3 договора заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Подрядчик обязался выполнить работы в соответствии с проектной документацией и в соответствии с графиком производства работ (п. 2.1. договора).

Сроки начала и окончания работ по каждому объекту указаны в приложении №1 настоящего договора, которые определены по результатам электронного аукциона (п.2.2 договора).

Согласно п. 2.6. договора фактической датой окончания работ на объекте (ах) является дата подписания акта сдачи-приемки в эксплуатацию объекта (ов) приемочной комиссией и подписанных актов выполненных работ КС-2. 

Цена настоящего договора определяется на основании утвержденной проектной документации и согласно результатам электронного аукциона, на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества МКД, включенных в краткосрочный (2020-2022 гг. этап 2020) план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества МКД на территории Брянской области (2014-2043) и составляет 3 155 000 руб. (без НДС), включает все затраты подрядчика, так или иначе связанные с выполнением полного комплекса работ на объекте, в том числе:

-затраты на производство строительно-монтажных работ с учетом стоимости материалов, конструкций, изделий и оборудования;

-затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала подрядчика, доставкой на объект (ты) материалов, изделий и оборудования, необходимых для начала производства работ, и их демобилизацией после окончания работ, или в случае прекращения действия договора;

-затраты, связанные с обеспечением подрядчика электроэнергией, теплом, водой бытовой и питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства работ на объекте;

-затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, содержание и уборку строительной площадки;

-оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим договором;

-затраты, связанные с получением  подрядчиком всех свидетельств, лицензий, разрешений, допусков, необходимых для выполнения обязательств по договору;

-иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим договором (п. 3.1. договора).

 Согласно п. 10.1 договора в случае просрочки исполнения подрядчиком любого из обязательств, предусмотренных настоящим договором, заказчик вправе требовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня следующего после дня истечения, установленного договором и приложениями к неустойка исполнения обязательства до фактического исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается  в размере 0,25% от общей стоимости работ по объекту, по которому допущена просрочка исполнения обязательств.

В соответствии с п. 10.9. уплата неустойки за нарушение обязательств по договору производится подрядчиком на основании претензии заказчика перечислением денежных средств в безналичной форме на расчетный счет заказчика. В случае применения к заказчику мер, указанных в настоящей главе, заказчик вправе в одностороннем порядке произвести соответствующее удержание из стоимости работ, согласно условиям настоящего договора.

Приложением №1 к договору установлен срок выполнения работ по капитальному ремонту: дата начала – 01.04.2020, дата окончания – 29.06.2020.   

02.11.2020 межу Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области (Заказчик) и ООО «Пласт Лайн» (Подрядчик) подписано дополнительное соглашение №1, согласно которому внесены изменения в графу 4, строку 1, Приложения №1 к договору №215.КР.2020 от 27.03.2020 в части уменьшения стоимости работ по капитальному ремонту до 2 991 969,80 руб.

02.11.2020 межу Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области (Заказчик) и ООО «Пласт Лайн» (Подрядчик) подписано дополнительное соглашение №2, согласно которому, п.3.7. раздела 3 договора изложен в следующей редакции: «окончательная оплата выполненных работ по настоящему договору производится заказчиком не позднее 25.03.2021,  п. 10.2. раздела 10 «ответственность сторон» дополнен абзацем следующего соглашения: «Пени, предусмотренные п.10.2. договора, а также проценты предусмотренные ст. 395 ГК РФ, не начисляются заказчику до истечения срока, указанного в п. 1 настоящего дополнительного соглашения.

27.03.2020 между Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области (Заказчик) и ООО «Пласт Лайн» (Подрядчик) был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД  №217.КР.2020, по условиям которого подрядчик обязался выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества МКД, расположенных по адресу (ам), указанному (ым) в приложении №1 к настоящему договору в соответствии с условиями настоящего договора и проектно (сметной) документаций (п. 1.1. контракта).

 Согласно п. 1.3 договора заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Подрядчик обязался выполнить работы в соответствии с проектной документацией и в соответствии с графиком производства работ (п. 2.1. договора).

Сроки начала и окончания работ по каждому объекту указаны в приложении №1 настоящего договора, которые определены по результатам электронного аукциона (п.2.2 договора).

Согласно п. 2.6. договора фактической датой окончания работ на объекте (ах) является дата подписания акта сдачи-приемки в эксплуатацию объекта (ов) приемочной комиссией и подписанных актов выполненных работ КС-2. 

Цена настоящего договора определяется на основании утвержденной проектной документации и согласно результатам электронного аукциона, на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества МКД, включенных в краткосрочный (2020-2022 гг. этап 2020) план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества МКД на территории Брянской области (2014-2043) и составляет 3 884 000 руб. (без НДС), включает все затраты подрядчика, так или иначе связанные с выполнением полного комплекса работ на объекте, в том числе:

-затраты на производство строительно-монтажных работ с учетом стоимости материалов, конструкций, изделий и оборудования;

-затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала подрядчика, доставкой на объект (ты) материалов, изделий и оборудования, необходимых для начала производства работ, и их демобилизацией после окончания работ, или в случае прекращения действия договора;

-затраты, связанные с обеспечением подрядчика электроэнергией, теплом, водой бытовой и питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства работ на объекте;

-затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, содержание и уборку строительной площадки;

-оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим договором;

-затраты, связанные с получением  подрядчиком всех свидетельств, лицензий, разрешений, допусков, необходимых для выполнения обязательств по договору;

-иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим договором (п. 3.1. договора).

 Согласно п. 10.1 договора в случае просрочки исполнения подрядчиком любого из обязательств, предусмотренных настоящим договором, заказчик вправе требовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня следующего после дня истечения, установленного договором и приложениями к неустойка исполнения обязательства до фактического исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается  в размере 0,25% от общей стоимости работ по объекту, по которому допущена просрочка исполнения обязательств.

В соответствии с п. 10.9. уплата неустойки за нарушение обязательств по договору производится подрядчиком на основании претензии заказчика перечислением денежных средств в безналичной форме на расчетный счет заказчика. В случае применения к заказчику мер, указанных в настоящей главе, заказчик вправе в одностороннем порядке произвести соответствующее удержание из стоимости работ, согласно условиям настоящего договора.

Приложением №1 к договору установлен срок выполнения работ по капитальному ремонту: дата начала – 01.04.2020, дата окончания – 29.07.2020.   

15.10.2020 межу Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области (Заказчик) и ООО «Пласт Лайн» (Подрядчик) подписано дополнительное соглашение №1, согласно которому внесены изменения в графу 4, строку 1, Приложения №1 к договору №217.КР.2020 от 27.03.2020 в части уменьшения стоимости работ по капитальному ремонту до 3 257 015,20 руб.

17.10.2020 межу Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области (Заказчик) и ООО «Пласт Лайн» (Подрядчик) подписано дополнительное соглашение №2, согласно которому, п.3.7. раздела 3 договора изложен в следующей редакции: «окончательная оплата выполненных работ по настоящему договору производится заказчиком не позднее 25.03.2021,  п. 10.2. раздела 10 «ответственность сторон» дополнен абзацем следующего соглашения: «Пени, предусмотренные п.10.2. договора, а также проценты предусмотренные ст. 395 ГК РФ, не начисляются заказчику до истечения срока, указанного в п. 1 настоящего дополнительного соглашения.

По договору №78.КР.2020 от 18.12.2019 сторонами установлен срок выполнения работ: начало 16.03.2020 окончание - 14.05.2020.

В нарушение договора №78.КР.2020 от 18.12.2019 подрядчиком сданы работы заказчику 02.10.2020, что подтверждается актами о приемке выполненных работ (т. 3 л.д. 41-55).

В связи с нарушением сроков сдачи работ ответчик удержал 1 239 925,80 руб. неустойки из стоимости работ.

По договору №135.КР.2020 от 23.01.2020 сторонами установлен срок выполнения работ: начало 18.05.2020 окончание - 16.07.2020.

В нарушение договора №135.КР.2020 от 23.01.2020 подрядчиком сданы работы заказчику 02.09.2020, что подтверждается актами о приемке выполненных работ (т.2 л.д. 83-95).

В связи с нарушением сроков сдачи работ ответчик удержал 241 070,58 руб. неустойки из стоимости работ.

По договору №136.КР.2020 от 23.01.2020 сторонами установлен срок выполнения работ: начало 20.04.2020 окончание - 03.07.2020.

В нарушение договора №136.КР.2020 от 23.01.2020 подрядчиком сданы работы заказчику 11.08.2020, что подтверждается актами о приемке выполненных работ (т. 3 л.д. 74-83).

В связи с нарушением сроков сдачи работ ответчик удержал 250 455,24 руб. неустойки из стоимости работ.

По договору №153.КР.2020 от 05.02.2020 сторонами установлен срок выполнения работ: начало 01.04.2020 окончание - 29.06.2020.

В нарушение договора №153.КР.2020 от 05.02.2020 подрядчиком сданы работы заказчику 18.11.2020, что подтверждается актами о приемке выполненных работ (т.2 л.д. 150-160).

 В связи с нарушением сроков сдачи работ ответчик удержал 2 329 260,08 руб. неустойки из стоимости работ.

По договору №193.КР.2020 от 26.02.2020 сторонами установлен срок выполнения работ: начало 01.06.2020 окончание - 30.07.2020.

В нарушение договора №193.КР.2020 от 26.02.2020 подрядчиком сданы работы заказчику 11.11.2020, что подтверждается актами о приемке выполненных работ (т. 3 л.д. 56-74).

В связи с нарушением сроков сдачи работ ответчик удержал 808 376,40 руб. неустойки из стоимости работ.

По договору №215.КР.2020 от 27.03.2020 сторонами установлен срок выполнения работ: начало 01.04.2020 окончание - 29.06.2020.

В нарушение договора №215.КР.2020 от 27.03.2020 подрядчиком сданы работы заказчику 02.11.2020, что подтверждается актами о приемке выполненных работ (т.2 л.д. 96-149).

 В связи с нарушением сроков сдачи работ ответчик удержал 396 436,30 руб. неустойки из стоимости работ.

По договору №217.КР.2020 от 27.03.2020 сторонами установлен срок выполнения работ: начало 01.04.2020 окончание - 29.07.2020.

В нарушение договора №217.КР.2020 от 27.03.2020 подрядчиком сданы работы заказчику 17.10.2020, что подтверждается, актами о приемке выполненных работ и актом приемки в эксплуатацию объекта (т. 2 л.д. 161, т. 3 л.д. 1-40).

В связи с нарушением сроков сдачи работ ответчик удержал 56 997,78 руб. неустойки из стоимости работ.

Мотивируя заявленные исковые требования, истец сослался на то, что удержанная ответчиком неустойка явно несоразмерна нарушенному обязательству, завышена и вследствие чего, является неосновательным обогащением ответчика, просил применить положения 333 ГК РФ.

Согласно представленному расчету истца размер неустойки должен составлять  по договору №78.КР.2020 от 18.12.2019 - 124 766,56 руб. (разница между удержанной суммой штрафа составляет  1 115 159,24 руб.),  по договору №135.КР.2020 от 23.01.2020 -7 955,40 руб. (разница между удержанной суммой штрафа составляет  233 115,18 руб.), по договору №136.КР.2020 от 23.01.2020 – 8 670,67 руб. (разница между удержанной суммой штрафа составляет  241 784,57 руб.), по договору №153.КР.2020 от 05.02.2020 -167 976,94 руб. (разница между удержанной суммой штрафа составляет  2 161 283,14 руб.), по договору №193.КР.2020 от 26.02.2020 -61 104,57 руб. (разница между удержанной суммой штрафа составляет  747 271,83 руб.), по договору №215.КР.2020 от 27.03.2020 -17 410,35 руб. (разница между удержанной суммой штрафа составляет  379 025,95 руб.), по договору №217.КР.2020 от 27.03.2020 – 0 руб. (разница между удержанной суммой штрафа составляет  56 997,78 руб.).

Досудебными претензиям, полученными ответчиком 02.04.2021, истец просил Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области рассмотреть вопрос уменьшения штрафа исходя из двукратной ставки Банка России (т. 1 л.д. 15-16, 20-21, т. 2 л.д. 14-15, 19-20, 24-25, 29-30, 34-35) 

Указанные претензии оставлены без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца с настоящим иском.

Согласно статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (пункт 1 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Обязательства истца по выполнению работ возникли из договоров №78.КР.2020 от 18.12.2019, №135.КР.2020 от 23.01.2020, №136.КР.2020 от 23.01.2020, №153.КР.2020 от 05.02.2020, №193.КР.2020 от 26.02.2020, №215.КР.2020 от 27.03.2020, №217.КР.2020 от 27.03.2020, которые являются договорами подряда и регулируется нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Согласно ч. 1 ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с ч. 1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В соответствии со ст. 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Как установлено судом, в ходе исполнения договоров сторонами были согласованы сроки сдачи работ: по договору №78.КР.2020 от 18.12.2019 – 14.05.2020, по договору  №135.КР.2020 от 23.01.2020 – 16.07.2020, по договору №136.КР.2020 от 23.01.2020 – 03.07.2020, по договору №153.КР.2020 от 05.02.2020 29.06.2020, по договору №193.КР.2020 от 26.02.2020 -30.07.2020, по договору №215.КР.2020 от 27.03.2020 - 29.06.2020, по договору №217.КР.2020 от 27.03.2020 - 29.07.2020. Разногласий в отношении указанной даты у сторон не имелось. Однако, вместо согласованного сторонами срока сдачи, работы были сданы подрядчиком с нарушением срока. 

В нарушение договора №78.КР.2020 от 18.12.2019 подрядчиком сданы работы заказчику 02.10.2020, что подтверждается актами о приемке выполненных работ (т. 3 л.д. 41-55).

В нарушение договора №135.КР.2020 от 23.01.2020 подрядчиком сданы работы заказчику 02.09.2020, что подтверждается актами о приемке выполненных работ (т.2 л.д. 83-95).

В нарушение договора №136.КР.2020 от 23.01.2020 подрядчиком сданы работы заказчику 11.08.2020, что подтверждается актами о приемке выполненных работ (т. 3 л.д. 74-83).

В нарушение договора №153.КР.2020 от 05.02.2020 подрядчиком сданы работы заказчику 18.11.2020, что подтверждается актами о приемке выполненных работ (т.2 л.д. 150-160).

В нарушение договора №193.КР.2020 от 26.02.2020 подрядчиком сданы работы заказчику 11.11.2020, что подтверждается актами о приемке выполненных работ (т. 3 л.д. 56-74).

В нарушение договора №215.КР.2020 от 27.03.2020 подрядчиком сданы работы заказчику 02.11.2020, что подтверждается актами о приемке выполненных работ (т.2 л.д. 96-149).

В нарушение договора №217.КР.2020 от 27.03.2020 подрядчиком сданы работы заказчику 17.10.2020, что подтверждается, актами о приемке выполненных работ и актом приемки в эксплуатацию объекта (т. 2 л.д. 161, т. 3 л.д. 1-40).

Ответчик не оспорил, что работы по договорам №78.КР.2020 от 18.12.2019, №135.КР.2020 от 23.01.2020, №136.КР.2020 от 23.01.2020, №153.КР.2020 от 05.02.2020, №193.КР.2020 от 26.02.2020, №215.КР.2020 от 27.03.2020, №217.КР.2020 от 27.03.2020 были выполнены истцом в полном объеме. 

Согласно п. 10.1 договора в случае просрочки исполнения подрядчиком любого из обязательств, предусмотренных настоящим договором, заказчик вправе требовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня следующего после дня истечения, установленного договором и приложениями к неустойка исполнения обязательства до фактического исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается  в размере 0,25% от общей стоимости работ по объекту, по которому допущена просрочка исполнения обязательств.

В соответствии с п. 10.9. уплата неустойки за нарушение обязательств по договору производится подрядчиком на основании претензии заказчика перечислением денежных средств в безналичной форме на расчетный счет заказчика. В случае применения к заказчику мер, указанных в настоящей главе, заказчик вправе в одностороннем порядке произвести соответствующее удержание из стоимости работ, согласно условиям настоящего договора.

В связи с нарушением сроков выполнения истцом работ, ответчик удержал неустойку  из стоимости работ №78.КР.2020 от 18.12.2019 - 1 239 925,80 руб., по договору №135.КР.2020 от 23.01.2020 - удержано 241 070,58 руб., по договору №136.КР.2020 от 23.01.2020 - удержано 250 455,24 руб., по договору №153.КР.2020 от 05.02.2020 - 2 329 260,08 руб., по договору №193.КР.2020 от 26.02.2020 - 808 346,40 руб., по договору №215.КР.2020 от 27.03.2020 - 396 436,30 руб., по договору №217.КР.2020 от 27.03.2020 - 56 997,78 руб.

Истец сослался на чрезмерность неустойки и ее несоразмерность последствиям допущенного им нарушения срока выполнения работ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

На основании статьи 333 ГК РФ истец просит снизить размер пени, предусмотренный договором. 

Согласно представленному расчету истца размер неустойки должен составлять  по договору №78.КР.2020 от 18.12.2019 - 124 766,56 руб.,  по договору №135.КР.2020 от 23.01.2020 -7 955,40 руб., по договору №136.КР.2020 от 23.01.2020 – 8 670,67 руб., по договору №153.КР.2020 от 05.02.2020 -167 976,94 руб., по договору №193.КР.2020 от 26.02.2020 -61 104,57 руб., по договору №215.КР.2020 от 27.03.2020 -17 410,35 руб., по договору №217.КР.2020 от 27.03.2020 – 0 руб.

Согласно пункту 79 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" в случае списания по требованию кредитора неустойки со счета должника (пункт 2 статьи 847 Гражданского кодекса Российской Федерации), а равно зачета суммы неустойки в счет суммы основного долга и /или процентов должник вправе ставить вопрос о применении к списанной неустойке положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, например, путем предъявления самостоятельного требования о возврате излишне уплаченного (статья 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из материалов дела следует, что истец, не согласился с размером удержанной ответчиком неустойки.

Таким образом, суд приходит к выводу, что подрядчик вправе обратиться с требованием о взыскании с заказчика неосновательного обогащения в связи с наличием оснований для уменьшения неустойки по правилам статьи 333 ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

В пункте 71 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" разъяснено, что если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ) (пункт 73 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств"). 

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 77 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ).

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (подпункт 3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации) (пункт 75 постановления Пленума № 7). 

Таким образом, гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право  снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение) за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ.

Проверяя расчет неустойки, представленный истцом, суд установил, что он произведен некорректно. 

Согласно п. 6 дополнительного соглашения к договору №217.КР.2020 от 27.03.2020, п. 5 дополнительных соглашений к договору №78.КР.2020 от 18.12.2019, №135.КР.2020 от 23.01.2020, №136.КР.2020 от 23.01.2020, №153.КР.2020 от 05.02.2020, №193.КР.2020 от 26.02.2020, №215.КР.2020 от 27.03.2020 в части уменьшения стоимости работ по капитальному ремонту соглашения вступают в силу с момента его подписания сторонами.

Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором (пункт 1 статьи 450 Кодекса). 

В пункте 1 статьи 453 Кодекса установлено, что при изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде. 

В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора (пункт 3 статьи 453 Кодекса).

Следовательно, по общему правилу, изменение договора влечет изменение соответствующих обязательств сторон лишь на будущее время и не освобождает стороны от ответственности за нарушение обязательств, возникших до такого изменения.

Принимая изложенное, суд приходит к выводу о том, действие указанных соглашений не распространяется на прошлые отношения сторон. Следовательно, неустойка по иску подлежит начислению на первоначальную сумму договоров до ее уменьшения, что также подтверждается судебной практикой (Определение Верховного Суда от 30.09.2016 N 303-ЭС16-12260 по делу N А51-22545/2015 в котором суд заключил, что до изменения цены договора неустойка начисляется в соответствии с первоначально установленной в договоре ценой, после изменения цены договора неустойка рассчитывается согласно измененной цены договора).

Размер ответственности заказчика за нарушение срока оплаты работ, предусмотренный пунктом 10.2 договоров составляет 1/300 действующую на дату уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ, не соответствует размеру ответственности подрядчика за просрочку исполнения обязательств, предусмотренному пунктом 10.1 договоров (0,25% от общей стоимости работ).

Включение в договоры явно несправедливых договорных условий, ухудшающих положение стороны в договоре (подрядчика), ставит заказчика в более выгодное положение и позволяет ему извлечь необоснованное преимущество. Превращение института неустойки в способ обогащения кредитора недопустимо и противоречит ее компенсационной функции.

Таким образом, суд считает необходимым произвести перерасчет неустойки исходя из первоначально установленной в договорах цены и ставок, действующих в соответствующие периоды, а именно по договору №217.КР.2020 от 27.03.2020 неустойка за период с 30.07.2020 по 17.10.2020 составляет 70 767,94 руб., по договору №78.КР.2020 от 18.12.2019 неустойка за период с 15.05.2020 по 02.10.2020 составляет 125 220,33 руб., по договору №135.КР.2020 от 23.01.2020, неустойка за период с 17.07.2020 по 02.09.2020 составляет 11 334,49 руб., по договору №136.КР.2020 от 23.01.2020 неустойка за период с 04.07.2020 по 11.08.2020 составляет 12 036, 73 руб., по договору №153.КР.2020 от 05.02.2020 неустойка за период с 30.06.2020 по 18.11.2020 составляет 180 704,54 руб., по договору  №193.КР.2020 от 26.02.2020 неустойка за период с 31.07.2020 по 11.11.2020 составляет 62 819, 92 руб., по договору №215.КР.2020 от 27.03.2020 неустойка за период с 30.06.2020 по 02.11.2020 составляет 46 743,14 руб.

С учетом изложенного, судом установлено, что на стороне ответчика образовалось неосновательное обогащение в размере 4 905 009,67 руб., в том числе по договору от 26.02.2020 №193.К.Р.2020 в сумме 745 556,48 руб., по договору от 05.02.2020 №153.К.Р.2020 в сумме 2 148 555,54 руб., по договору от 23.01.2020 №136К.Р.2020 в сумме 238 418,51 руб., по договору от 23.01.2020 №135.К.Р.2020 в сумме 229 736,09 руб., по договору от 27.03.2020 №217.К.Р.2020 в сумме 50 805,78 руб., по договору от 27.03.2020 №215.К.Р.2020 в сумме 377 231,80 руб., по договору от 18.12.2020 №78.К.Р.2020 в сумме 1 114 705,47 руб.

Вместе с тем, судом установлено, что ответчиком при расчете неустойки и ее удержании в соответствии с условиями договоров некорректно был произведен ее расчет: - по договору от 26.02.2020 №193.КР.2020 заказчиком начислено пени 808 376,40 руб., а должно быть начислено – 676 060,42 руб.;

- по договору от 27.03.2020 №217.КР.2020 заказчиком начислено пени 56 967,78 руб., а должно быть начислено – 66 654,79 руб., 

- по договору от 23.01.2020 №136.КР.2020 заказчиком начислено пени 250 455,24 руб., а должно быть начислено 186 235,87 руб.,

- по договору от 05.02.2020 №153.КР.2020 заказчиком начислено пени 2 329 260,80 руб. , а должно быть начислено 1 918 224,84 руб.,

- по договору от 27.03.2020 №215.КР.2020 заказчиком начислено 396 436,30 руб., а должно быть начислено 289 638,50 руб.,

- по договору от 23.01.2020 №135.КР.2020 заказчиком начислено 241 070,58 руб., а должно быть начислено 106 452,55 руб.,

- по договору от 18.12.2020 №78.КР.2020 заказчиком начислено 1 239 925,80 руб. руб., а должно быть начислено 1 231120,70 руб.,

При таких обстоятельствах, исковые требования о взыскании неосновательного обогащения, в силу статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации являются обоснованными и подлежат удовлетворению в сумме 4 905 009,67 руб.

В остальной части требования истца о взыскании неустойки удовлетворению не подлежат.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В силу подп.1 п.1 ст.333.21 Налогового кодекса Российской Федерации госпошлина по делу при цене иска 4 934 637 руб. 69 коп. составляет 47 673 руб.

При подаче в арбитражный суд иска истец уплатил в доход федерального бюджета              2 000 руб. госпошлины по чек-ордеру от 20.04.2021, операция 46.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 16 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 №46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» в тех случаях, когда до окончания рассмотрения дела государственная пошлина не была уплачена (взыскана) частично либо в полном объеме ввиду действия отсрочки, рассрочки по уплате госпошлины, увеличения истцом размера исковых требований после обращения в арбитражный суд, вопрос о взыскании неуплаченной в федеральный бюджет государственной пошлины разрешается судом исходя из следующих обстоятельств: если суд удовлетворяет заявленные требования, государственная пошлина взыскивается с другой стороны непосредственно в доход федерального бюджета применительно к части 3 статьи 110 АПК РФ. 

В связи с частичным удовлетворением исковых требований с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 1 714 руб. расходов по оплате госпошлины, в доход федерального бюджета Российской Федерации 45 673 руб. госпошлины.

В остальной части расходы по уплате государственной пошлины относятся на истца.

Руководствуясь ст.ст.167-170, ч.2 ст.176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества ограниченной ответственностью «Пласт Лайн» удовлетворить частично.

Взыскать с Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области в пользу общества ограниченной ответственностью «Пласт Лайн» 4 905 009,67 руб., в том числе неосновательного обогащения по контракту от 26.02.2020 №193.К.Р.2020 в сумме 745 556,48 руб., неосновательного обогащения по контракту от 05.02.2020 №153.К.Р.2020 в сумме 2 148 555,54 руб., неосновательного обогащения по контракту от 23.01.2020 №136К.Р.2020 в сумме 238 418,51 руб., неосновательного обогащения по контракту от 23.01.2020 №135.К.Р.2020 в сумме 229 736,09 руб., неосновательного обогащения по контракту от 27.03.2020 №217.К.Р.2020 в сумме 50 805,78 руб., неосновательного обогащения по контракту от 27.03.2020 №215.К.Р.2020 в сумме 377 231,80 руб., неосновательного обогащения по контракту от 18.12.2020 №78.К.Р.2020 в сумме 1 114 705,47 руб., а также 1714 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Взыскать с Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области в доход федерального бюджета Российской Федерации 45 673 руб. государственной пошлины.

Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня принятия и может быть обжаловано в течение указанного срока в Двадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Тула.

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Брянской области.

 

СудьяИвашина Я.В.