АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/,

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-12482/2024

г. Уфа

17 сентября 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 09.09.2024

Полный текст решения изготовлен 17.09.2024

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе

судьи Кузнецова Д.П.,

при ведении протокола судебного заседания

секретарем судебного заседания Зайнуллиной А.Р.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "Термопоинт" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Мосэнергострой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 1 343 397 руб. 12 коп.

 

при участии в судебном заседании:

От истца – ФИО1 по доверенности от 07.12.2023,диплом № 27 от 23.06.2007, паспорт.

От ответчика - явки нет, извещены надлежащим образом.

 

Общество с ограниченной ответственностью "Термопоинт" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Мосэнергострой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании долга по договору подряда №07/23-1 от 06 июля 2023 года в размере 1 286 178 руб., долга по договору подряда №09/23-1 от 15 сентября 2023 года в размере 57 219 руб. 12 коп., расходов по оплате государственной пошлины в размере 26 434 руб.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 23.05.2024 исковое заявление было принято к производству.

От истца через канцелярию суда посредством Сервиса подачи документов в электронном виде http://my.arbitr.ru поступили пояснения по делу.

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые требования.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв, возражения по существу иска не представил, об уважительных причинах неявки не сообщил.

Копии судебных актов были направлены судом ответчику по юридическому адресу: 450076, 

<

...>, и вернулись с отметкой органа почтовой связи о причине возврата: истек срок хранения. Возвратные конверты содержат необходимые отметки организации почтовой связи о первичном и вторичном извещении адресата о поступлении судебной корреспонденции.

В соответствии с ч. 4 ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если, несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд.

Согласно п. 34 Приказа Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 234 (ред. от 13.02.2018) "Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи" письменная корреспонденция и почтовые переводы при невозможности их вручения (выплаты) адресатам (их уполномоченным представителям) хранятся в объектах почтовой связи места назначения в течение 30 дней, иные почтовые отправления - в течение 15 дней, если более длительный срок хранения не предусмотрен договором об оказании услуг почтовой связи. Почтовые отправления разряда "судебное" при невозможности их вручения адресатам (их уполномоченным представителям) хранятся в объектах почтовой связи места назначения в течение 7 дней.

При исчислении срока хранения почтовых отправлений разряда "судебное" день поступления и возврата почтового отправления, а также нерабочие праздничные дни, установленные трудовым законодательством Российской Федерации, не учитываются.

Срок хранения почтовых отправлений (почтовых переводов) исчисляется со следующего рабочего дня после поступления почтового отправления (почтового перевода) в объект почтовой связи места назначения.

Из указанного следует, что порядок вручения почтовых отправлений, предусмотренный названными Правилами, соблюден. Ответчик не являлся за получением заказных писем арбитражного суда.

Тот факт, что ответчик не получал направляемую ему корреспонденцию, не свидетельствует о том, что последний не мог знать о предъявленном к нему иске, поскольку не являлся за получением корреспонденции.

Как разъяснено в п. 1 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 г.  N 61 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с  достоверностью адреса юридического лица", юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, поступивших по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия по этому адресу своего представителя, и такое юридическое лицо не вправе в отношениях с лицами, добросовестно полагавшимися на данные ЕГРЮЛ об адресе юридического лица, ссылаться на данные, не внесенные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем (в том числе на ненадлежащее извещение в ходе рассмотрения дела судом, в рамках производства по делу об административном правонарушении и т.п.), за исключением случаев, когда соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица (п. 2 ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

Суд учитывает, что информация о времени и месте судебного разбирательства дополнительно размещена на интернет-сайте Арбитражного суда Республики Башкортостан и является общедоступной.

Дело рассмотрено в порядке ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы дела, выслушав истца,  арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, между обществом с ограниченной ответственностью "Термопоинт" (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Мосэнергострой" (заказчик) заключен договор подряда №07/23-1 от 06 июля 2023 года, по которому Подрядчик обязуется выполнить работы, перечисленные в приложении №1, являющейся неотъемлемой частью договора на объекте Заказчика, газоснабжение 4-этажного 69-квартирного дома литер 11-2, расположенного по адресу: РБ, Уфимского района, СП Миловский сельсовет, земельный участок с кадастровым номером 02:47:101001:618, идентификатор объекта р-13520, а Заказчик принять и оплатить работы в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

Согласно п. 3.1 договора стоимость договора является договорной, и составляет: 2186178,0 (два миллиона сто восемьдесят шесть тысяч сто семьдесят восемь), в т.ч. НДС 20% 364363,0 рублей.

Оплата стоимости работ по настоящему договору производится в рублях по безналичному расчету (п. 3.2).

В соответствии с п. 3.3 договора расчеты по настоящему договору производятся в следующем порядке:

- Аванс в размере 45% от указанной стоимости в п.3.1, в течении 7 (семи) рабочих дней с даты подписания настоящего договора;

- Оплата выполненных по настоящему Договору Работ осуществляется ежемесячно в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Подрядчиком надлежащим образом оформленных оригиналов Актов о приемке выполненных Работ (по этапу Работ) (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных Работ и затрат (по этапу Работ) (форма КС-3), на основании выставленных Субподрядчиком оригиналов счетов, счетов-фактур, оформленных в соответствии со ст. 169 НК РФ (при необходимости - других расчётных документов) с учётом авансового платежа 45% до полного его погашения.

Оплата по настоящему Договору производится путём перечисления Подрядчиком денежных средств на расчётный счёт

Субподрядчика. Датой платежа признается дата списания денежных средств с расчётного счета Подрядчика.

Окончательный расчёт осуществляется после сдачи исполнительно-технической документации Заказчику.

Согласно п. 4.1 договора начало работ устанавливается с момента получения аванса согласно п.3.3.

Подрядчик имеет право сдать работы по настоящему договору досрочно (п. 4.2).

Подрядчик обязан уведомить Заказчика в письменном виде об окончании работ по настоящему договору (п. 4.3).

В соответствии с п. 4.4 договора срок выполнения работ составляет: строительно-монтажные работы 45 календарных дней с момента заключения договора, предоставление исполнительно-технической документации Заказчику 60 календарных дней с момента заключения договора.

Факт выполнения работ по договору подряда №07/23-1 от 06 июля 2023 года подтверждается актами приемки выполненных работ от 27.09.2023г. на сумму 1 555 746 руб., от 27.11.2023г. на сумму 630 432 руб.

ООО «МОСЭНЕРГОСТРОЙ» оплатил аванс в адрес ООО «Термопоинт» в размере 900 000 рублей, что подтверждается следующими платежными поручениями:

- платежное поручение № 537 от 06.07.2023 года на сумму 475 000 руб. (с назначением платежа за ООО «Мосэнергострой»)

- платежное поручение № 539 от 07.07.2023 года на сумму 425 000 руб. (с назначением платежа за ООО «Мосэнергострой»)

Таким образом, сумма долга по договору подряда №07/23-1 от 06 июля 2023 года составила 1 286 178 руб.

15 сентября 2023 года между обществом с ограниченной ответственностью "Термопоинт" (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Мосэнергострой" (заказчик) заключен договор подряда №09/23-1, по которому Подрядчик обязуется выполнить работы, перечисленные в приложении №1, являющейся неотъемлемой частью договора на объекте Заказчика, газоснабжение 4-этажного 69-квартирного дома литер 11 -2, расположенного по адресу: РБ, Уфимского района, СП Миловский сельсовет, земельный участок с кадастровым номером 02:47:101001:618, идентификатор объекта р-13520, а Заказчик принять и оплатить работы в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

Согласно п. 3.1 договора стоимость договора является договорной, и составляет: 286095,6 (Двести восемьдесят шесть тысяч девяносто пять рублей 60 копеек), в т.ч. НДС 20% 47682,6 рублей.

Оплата стоимости работ по настоящему договору производится в рублях по безналичному расчету (п. 3.2).

В соответствии с п. 3.3 договора расчеты по настоящему договору производятся в следующем порядке:

- Аванс в размере 80% от указанной стоимости в п.3.1, в течении 7 (семи) рабочих дней с даты подписания настоящего договора;

- Оплата выполненных по настоящему Договору Работ осуществляется ежемесячно в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Подрядчиком надлежащим образом оформленных оригиналов Актов о приемке выполненных Работ (по этапу Работ) (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных Работ и затрат (по этапу Работ) (форма КС-3), на основании выставленных Субподрядчиком оригиналов счетов, счетов-фактур, оформленных в соответствии со ст. 169 НК РФ (при необходимости - других расчётных документов) с учётом авансового платежа 80% до полного его погашения.

Оплата по настоящему Договору производится путём перечисления Подрядчиком денежных средств на расчётный счёт

Субподрядчика. Датой платежа признается дата списания денежных средств с расчётного счета Подрядчика.

Окончательный расчёт осуществляется после сдачи исполнительно-технической документации Заказчику.

Согласно п. 4.1 договора начало работ устанавливается с момента получения аванса согласно п.3.3.

Подрядчик имеет право сдать работы по настоящему договору досрочно (п. 4.2).

Подрядчик обязан уведомить Заказчика в письменном виде об окончании работ по настоящему договору (п. 4.3).

В соответствии с п. 4.4 договора срок выполнения работ составляет: строительно-монтажные работы 25 календарных дней с момента заключения договора, предоставление исполнительно-технической документации Заказчику 40 календарных дней с момента заключения договора.

Факт выполнения работ по договору подряда №09/23-1 от 15 сентября 2023 года подтверждается актом приемки выполненных работ от 27.11.2023г. на сумму 286 095 руб.

12 октября 2023 года ООО «МОСЭНЕРГОСТРОЙ» оплатил аванс в размере 80 % в адрес ООО «Термопоинт» в размере 228 876 руб. 48 коп., что подтверждается платежным поручением № 784 от 12.10.2023 года.

Таким образом, сумма долга по договору подряда №09/23-1 от 15 сентября 2023 года составила 57 219 руб. 12 коп.

Поскольку спор в досудебном порядке урегулировать не удалось, претензия истца была оставлена ответчиком без удовлетворения, истец обратился с настоящим иском в суд.

Оценив представленные доказательства в их совокупности и выслушав доводы сторон в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В силу статей 64, 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В соответствии со статьей 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Стороны пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, представление арбитражному суду своих доводов и объяснений, осуществление иных процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных названным кодексом.

В силу статей 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд на основе принципа состязательности с учетом представленных сторонами доказательств устанавливает значимые для дела обстоятельства. При этом каждая из сторон несёт риск процессуальных последствий непредоставления доказательств.

В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определённое действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определённого действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Проанализировав условия представленных договоров подряда №07/23-1 от 06 июля 2023 года и №09/23-1 от 15 сентября 2023 года, суд приходит к выводу, что сторонами заключены договоры подряда, следовательно, между сторонами возникли отношения, регулируемые главой 37 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Договоры подряда №07/23-1 от 06 июля 2023 года и №09/23-1 от 15 сентября 2023 года содержат все существенные условия договора подряда, по которым сторонами достигнуто соглашение, соответствуют требованиям закона о форме и содержании, подписаны сторонами, оснований полагать о незаключенности либо ничтожности договора у суда не имеется.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации, если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

В силу пункта 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно статье 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно пункту 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком должны оформляться актом, подписанным обеими сторонами.

В соответствии со статьей 753 Гражданского кодекса Российской Федерации и разъяснениями, изложенными в пункте 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" (далее - информационное письмо N 51) принятые заказчиком работы подлежат оплате. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Факт выполнения работ по договору подряда №09/23-1 от 15 сентября 2023 года подтверждается актом приемки выполненных работ от 27.11.2023г. на сумму 286 095 руб.

12 октября 2023 года ООО «МОСЭНЕРГОСТРОЙ» оплатил аванс в размере 80 % в адрес ООО «Термопоинт» в размере 228 876 руб. 48 коп., что подтверждается платежным поручением № 784 от 12.10.2023 года.

Факт выполнения работ по договору подряда №09/23-1 от 15 сентября 2023 года подтверждается актом приемки выполненных работ от 27.11.2023г. на сумму 286 095 руб.

12 октября 2023 года ООО «МОСЭНЕРГОСТРОЙ» оплатил аванс в размере 80 % в адрес ООО «Термопоинт» в размере 228 876 руб. 48 коп., что подтверждается платежным поручением № 784 от 12.10.2023 года.

Документы содержат подписи представителей сторон, а также информацию об объекте, наименовании и объемах работ, их стоимости.

Подписание данных документов представителями обеих сторон без замечаний и возражений по объемам и стоимости выполненных работ, их качеству, скрепление печатями истца и ответчика свидетельствуют о выполнении работ субподрядчиком (истцом), принятии их результата подрядчиком (ответчиком), а также о потребительской ценности результата работ для ответчика и желании последнего ими воспользоваться.

Таким образом, сумма долга по договору подряда №09/23-1 от 15 сентября 2023 года составила 57 219 руб. 12 коп.

Таким образом, сумма долга по договору подряда №09/23-1 от 15 сентября 2023 года составила 57 219 руб. 12 коп.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказывать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Принимая во внимание положения ст. 9 АПК РФ, которой установлено осуществление судопроизводства в арбитражном суде на основе состязательности, заинтересованные в исходе дела лица вправе отстаивать свою позицию в споре путем представления доказательств, состязательность предполагает возложение бремени доказывания на сами стороны и снятие, по общему правилу, с арбитражного суда обязанности по сбору доказательств, учитывая обстоятельства дела. Гарантируя каждому лицу, участвующему в деле, право представлять арбитражному суду доказательства ч. 2 ст. 9 АПК РФ одновременно возлагает на названных лиц риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Согласно ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, доказательств оплаты задолженности в полном объеме ответчиком в материалы дела не представлено. Обстоятельства, на которые ссылается истец, ответчиком не опровергнуты.

Учитывая вышеизложенное, требование истца о взыскании суммы долга по договору подряда №07/23-1 от 06 июля 2023 года в размере 1 286 178 руб., долга по договору подряда №09/23-1 от 15 сентября 2023 года в размере 57 219 руб. 12 коп. подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями  110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Термопоинт" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить.

Взыскать с обществу с ограниченной ответственностью "Мосэнергострой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Термопоинт" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)   сумму долга по договору подряда №07/23-1 от 06 июля 2023 года в размере 1 286 178 руб., долга по договору подряда №09/23-1 от 15 сентября 2023 года в размере 57 219 руб. 12 коп, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 26 434 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его  в  полном  объеме)  через  Арбитражный  суд  Республики Башкортостан.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.

 

Судья                                                                          Д.П. Кузнецов