АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5

http://www.udmurtiya.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Дело  №А71-17314/2019

г. Ижевск

15 января 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 15 января 2020 года. Полный текст решения изготовлен 15 января 2020 года. 

 

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи    Желновой Е.В.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном  заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Электрические сети Удмуртии", г.Ижевск к Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Спецстрой", г.Ижевск о взыскании 804 121,96руб. долга, 396 030,06руб. неустойки, с последующим начисление по день фактической оплаты долга по договору об осуществлении технологическое присоединение к электрическим сетям №11.0-00005Гб17.03.2017С4, М1, М3, М4,С7 от 17.03.2017, 347 539,81 руб. долга, 317,129,50 руб. неустойки по договору об осуществлении технологическое присоединение к электрическим сетям №11.0-00006Гб17.03.2017С4, М1, М3, С7, М4 от 17.03.2017.       

В присутствии представителей сторон: 

от истца: ФИО2- представитель по доверенности от 24.12.2019г.

от ответчика: не явился, уведомлен

Установлено: Общество с ограниченной ответственностью "Электрические сети Удмуртии", г.Ижевск обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском к Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Спецстрой", г.Ижевск о взыскании  804 121,96руб. долга, 396 030,06руб. неустойки, с последующим начисление по день фактической оплаты долга по договору об осуществлении технологическое присоединение к электрическим сетям №11.0-00005Гб17.03.2017С4, М1, М3, М4,С7 от 17.03.2017, 347 539,81 руб. долга, 317 129,50руб. неустойки по договору об осуществлении технологическое присоединение к электрическим сетям №11.0-00006Гб17.03.2017С4, М1, М3, С7, М4 от 17.03.2017.

Дело рассмотрено с перерывом в судебном заседании с 13.01.2020 по 15.01.2020, о чем вынесено протокольное определение, на основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

После объявленного судом перерыва, представители сторон  надлежащим  образом  уведомлённые  о времени  и  месте  судебного  заседания  в суд,  не  явились. Дело рассмотрено  в их отсутствие  в  соответствии  со статьями  123,156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, между истцом и ответчиком заключены  договора об осуществлении технологическое присоединение к электрическим сетям №11.0-00005Гб17.03.2017С4, М1, М3, М4,С7 от 17.03.2017, об осуществлении технологическое присоединение к электрическим сетям №11.0-00006Гб17.03.2017С4, М1, М3, С7, М4 от 17.03.2017 по условиям которых, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя многоквартирного жилого дома №1, №2, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом характеристик (пункт 1 договоров).

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения многоквартирного пятиэтажного жилого дома №1, №2, расположенного по адресу: 

<

...> (пункт 2 Договоров).

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: 15  процентов  платы  за технологическое  присоединение вносятся  в течение   15 дней со дня заключения настоящего договора; 30  процентов  платы  за технологическое присоединение  вносятся  в течение 60 дней со дня заключения настоящего договора, но не позже дня фактического присоединения; 45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения; 10 процентов платы  за технологическое присоединение вносятся  в течение  15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения (пункт 11 договоров).

В соответствии заявками и актами об осуществлении технологического присоединения №5 от 25.03.2019, №6 от 27.09.2018 истец исполнил перед ответчиком обязательства в полном объеме. 

В нарушение принятых на себя обязательств, ответчиком произведена оплата только части платежа. По расчетам истца,  сумма задолженности ответчика по договору №11.0-00005Гб17.03.2017С4, М1, М3, М4,С7 от 17.03.2017 составляет 804 121,96руб., по договору 11.0-00006Гб17.03.2017С4, М1, М3, С7, М4 от 17.03.2017- 347 539,81руб.

Направленная истцом претензия с требованием об оплате задолженности, ответчиком оставлена без удовлетворения. Данное обстоятельство, послужило истцу основанием для обращения  в суд  с требованием о взыскании с ответчика 1 151 661,77руб. долга, 713 159,56руб. неустойки, в судебном порядке.

Рассмотрев и изучив материалы дела, суд считает иск не подлежащим удовлетворению, исходя из следующего:

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

 Согласно статье 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

При этом, в соответствии с пунктом  1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации, заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Наличие у ответчика задолженности  на сумму 1 151 661,77руб.   суд считает подтверждённым материалами дела, а именно: договорами об осуществлении технологическое присоединение к электрическим сетям №11.0-00005Гб17.03.2017С4, М1, М3, М4,С7 от 17.03.2017, об осуществлении технологическое присоединение к электрическим сетям №11.0-00006Гб17.03.2017С4, М1, М3, С7, М4 от 17.03.2017, актами об осуществлении технологического присоединения №5 от 25.03.2019, №6 от 27.09.2018, подписанными ответчиком без разногласий, заявками на присоединение.

Заявленные истцом требования ответчиком документально не оспорены, письменный отзыв на иск не представлен.

         Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации). 

При изложенных обстоятельствах, суд считает, факт наличия задолженности в сумме 1 151 661,77руб. подтвержденным, в связи с чем, заявленные исковые требования являются обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме на основании статей 309, 310, 539, 544 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно пункту 17 договоров сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

         По расчетам истца, сумма неустойки по договору №11.0-00005Гб17.03.2017С4, М1, М3, М4,С7 от 17.03.2017 за период с 04.04.2019 по 18.10.2019 составляет 396 030,06руб., по договору 11.0-00006Гб17.03.2017С4, М1, М3, С7, М4 от 17.03.2017 за период с 09.10.2018 по 18.10.2019 составляет 317 129,50 руб.

Поскольку просрочка в оплате подтверждена материалами дела, сумма неустойки подлежит взысканию с ответчика в пользу истца на основании  пункта 17 Договоров,  статей    330, 331  Гражданского кодекса Российской Федерации. Неустойка в размере 396 030руб.06коп. подлежит взысканию с последующим начислением с 19.10.2019г. исходя из 0,25% от суммы задолженности за каждый день просрочки по день фактической оплаты долга либо истечения 365-дневного срока, которым ограничен размер неустойки, предусмотренный п.17 Договора.

С учетом принятого решения, в соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  расходы по госпошлине по иску относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями  110, 156, 163, 167- 171, 176  Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд 

Р е ш и л:

1.  Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью "Электрические сети Удмуртии", г.Ижевск удовлетворить.

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Спецстрой", г.Ижевск (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Электрические сети Удмуртии", г.Ижевск (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженность в общей сумме   1 864 821руб.33коп.,  из которых: долг в сумме 804 121руб.96коп. по договору №11.0-00005Гб17.03.2017С4 М1, М3, М4,С7 от 17.03.2017, неустойку в сумме 396 030руб.06коп.,  с последующим начислением неустойки с 19.10.2019г. исходя из 0,25% от суммы задолженности за каждый день просрочки по день фактической оплаты долга либо истечения 365-дневного срока, которым ограничен размер неустойки, предусмотренный п.17 Договора,  347 539руб.81коп. долга по №11.0-00006Гб17.03.2017С4, М1, М3, С7, М4 от 17.03.2017, неустойку в сумме 317 129руб.50коп., а также 31 648руб.21коп. в возмещение расходов по оплате госпошлины по иску.

         3. Исполнительный  лист выдать после  вступления решения в законную силу.

 

           Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

    Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда www.17aas. arbitr.ru».  

 

Судья                                                                                                 Е.В.Желнова