АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Театральный переулок, дом 10, г. Биробиджан, Еврейская автономная область, 679016

E-mail: info@eao.arbitr.ru, сайт: https://eao.arbitr.ru, тел./факс: (42622) 2-37-98, 3-82-40, факс 2-11-23

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А16-2780/2024

г. Биробиджан

28 октября 2024 года

Арбитражный суд Еврейской автономной области в составе:

судьи Столбовой С.К., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Дедешко А.В. 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Рус Гео" (г. Хабаровск Хабаровского края, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к администрации Известковского городского поселения Облученского муниципального района Еврейской автономной области (п. Известковый Облученского района Еврейской автономной области, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании   24 852,43 рубля пени по муниципальному контракту от 17.10.2022 № 13 за период с 26.11.2022 по 23.12.2022,

не явились;,  

 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Рус Гео" (далее - Общество) обратилось в Арбитражный суд Еврейской автономной области с иском к администрации Известковского городского поселения Облученского муниципального района Еврейской автономной области (далее - Администрация) о взыскании   24 852,43 рубля пени по муниципальному контракту от 17.10.2022 № 13 за период с 26.11.2022 по 23.12.2022.

 

 

       Ответчик в отзыве требования истца не признал, ссылаясь на отсутствие вины в просрочке исполнения обязательств,  указал, что оплата по контракту осуществлялась за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и средств муниципального образования. Денежные средства в бюджет муниципального образования поступили из областного бюджета  20.12.2022 и  перечислены платежными поручениями 23.12.2022.

         Стороны своих представителей в суд не направили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

        В силу части 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.

        Согласно пункту 27 постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 20 декабря 2006 года N 65 "О подготовке дела к судебному разбирательству" если лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения предварительного судебного заседания и судебного разбирательства дела по существу, не явились в предварительное судебное заседание и не заявили возражений против рассмотрения дела в их отсутствие, судья вправе завершить предварительное судебное заседание и начать рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции в случае соблюдения требований ч. 4 ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

        Суд, согласно части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ, считает возможным  рассмотреть дело в отсутствие истца и  ответчика. 

         Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства, суд установил следующее. 

         Как видно из материалов дела, между Администрацией (заказчиком) и Обществом (поставщиком) 17.10.2022 заключен муниципальный контракт № 13 на приобретение жилого помещения (благоустроенной квартиры) в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

          Пунктом 1.1 контракта установлено, что поставщик обязуется передать в собственность муниципального образования «Известковское городское поселение», а заказчик – принять в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту), являющимся неотъемлемой частью контракта, благоустроенное жилое помещение (квартиру) в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

       Согласно пункту 1.2 контракта, благоустроенное жилое помещение, расположенное по адресу: ЕАО, 

<

...>, общей площадью 67,9 кв.м, состоящее из 3 жилых комнат, кадастровый номер 79:05:3000008:569, принадлежит поставщику на праве собственности, что подтверждается записью регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 27.03.2020 № 79:05:3000008:569-79/009/2020-3.

         Цена контракта составила  3 550 347 рублей 53 копейки, источник финансирования: средства федерального бюджета, областного бюджета и средства бюджета муниципального образования «Известковское городское поселение».

        Оплата по контракту осуществляется заказчиком в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика платежными поручениями в течение 30 дней после государственной регистрации права собственности и получения выписки из Единого государственного реестра прав на основании счета/счета-фактуры и подписанного сторонами акта приема-передачи квартиры (пункты 2.1, 2.2 контракта).

         Согласно пункту 6.4 контракта, в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. 

        Право собственности на квартиру зарегистрировано за муниципальным образованием «Известковское городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной области 16.11.2022 и данный факт не оспаривается.

      Оплата по контракту осуществлена заказчиком 23.12.2022, что подтверждается платежными поручениями, представленными в материалы дела.

        15.08.2023 истец направил ответчику претензию  с требованием оплатить пени за просрочку исполнения обязательств (л.д. 31).

       Претензия оставлена ответчиком без ответа и удовлетворения, что послужило поводом для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.   

       Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему (статья 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)).

        В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (пункт 1 статьи 307 ГК РФ).

       Статьей 309 ГК РФ установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

        Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 ГК РФ).

        В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

      Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе, неустойкой.

      В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) при знается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

     На основании пункта 6.4 контракта истец рассчитал пени за период  с 26.11.2022 по 23.12.2022. на сумму 24 852,43 рубля пени по муниципальному контракту от 17.10.2022 № 13. Расчет пени судом проверен и признан арифметически верным.   

      Факт просрочки исполнения обязательств по оплате подтверждается материалами дела, ответчиком не оспорен. 

      Доказательства оплаты пени ответчиком в суд не представлены.  

       Доводы ответчика, приведенные в отзыве на иск, судом отклонятся в силу следующего. 

       Согласно пп. 1 и 2 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

          Несвоевременное поступление денежных средств из областного бюджета само по себе не может служить обстоятельством, свидетельствующим об отсутствии вины заказчика и, следовательно, основанием для освобождения его от ответственности на основании пункта 1 статьи 401 ГК РФ.

       Доказательств принятия ответчиком надлежащих и заблаговременных мер, направленных на обеспечение финансирования своих обязательств, вытекающих из контракта, в материалы дела не представлено.  Исполнение заказчиком своих обязательств по контракту не может быть поставлено в зависимость от исполнения обязательств третьим лицом, не являющимся субъектом спорного правоотношения.  

Таким образом, исковые требования Общества являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

         При обращении в арбитражный суд истцу предоставлена отсрочка по уплате госпошлины (определением от 01.10.2024).  Ответчик освобожден от уплаты госпошлины. 

        Руководствуясь статьями 110, 156, 167-171, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

реШил:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Рус Гео" удовлетворить.

       Взыскать с администрации Известковского городского поселения Облученского муниципального района Еврейской автономной  в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Рус Гео" 24 852,43 рубля пени по муниципальному контракту от 17.10.2022 № 13 за период с 26.11.2022 по 23.12.2022.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца с даты его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд, а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Дальневосточного округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Еврейской автономной области.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Шестого арбитражного апелляционного суда http://6aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Дальневосточного округа http://fasdvo.arbitr.ru.  

 

Судья 

С.К. Столбова