9080/2022-93891(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть Дело № А43-9328/2022 

г. Нижний Новгород «25» июля 2022 года  

Арбитражный суд Нижегородской области в составе: судьи (шифр 17-216) Окорокова Дмитрия  Дмитриевича, при ведении протокола помощником судьи Кузнецовой Светланой  Владимировной, рассмотрел в судебном заседании иск министерства лесного хозяйства и  охраны объектов животного мира Нижегородской области, г.Н.Новгород (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>),  

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью "Вознесенское-Ресурс",  р.п.Вознесенское, Нижегородская область (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  о внесении изменений в договор аренды лесного участка № 632 от 11.03.2013 года,  

при участии представителей сторон: 

от истца: ФИО1 по доверенности от 29.03.2021 года № 5,  от ответчика: ФИО2 по доверенности от 10.11.2021 года,  

Руководствуясь статьями 167-174 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

внести изменения в договор аренды лесного участка № 632 от 11.03.2013 года: 

внести изменения в договор аренды лесного участка № 632 от 11.03.2013 года следующего  содержания:  

«Приложение № 6 

к договору аренды 

лесного участка от 11.03.2013 г. № 632 

Объемы и сроки исполнения работ 

по обеспечению пожарной безопасности на арендуемом лесном участке 

Целевое назначение лесов 

Виды мероприятий  

 

Единица  измерения  

Среднегодовой объем 

Срок исполнения  

 

Обеспечение пожарной безопасности в лесах 

 

Установка и размещение стендов и  других знаков и указателей,  содержащих информацию о мерах  пожарной безопасности в лесах, в  виде:  

- стендов; - плакатов; - объявлений (аншлагов) и других знаков и указателей 

 

шт 

1 

10 

До начала  пожароопасного  

сезона 

 

Благоустройство зон отдыха граждан,  пребывающих в лесах  

 

шт 

1 

Апрель 

 

Установка и эксплуатация  

 

шт 

13 

В течении  

 

шлагбаумов, устройство преград,  обеспечивающих  

ограничение пребывания граждан в  лесах в целях обеспечения пожарной  безопасности  

 

пожароопасного  

сезона в  зависимости от  

класса пожарной  

опасности  

 

Прокладка противопожарных разрывов  

 

км 

- 

- I этап – 70 % от  запланированного  объёма до 1 июля;  - II этап – 30 % от  запланированного  

объёма до 1 

октября  

 

Уход за противопожарными разрывами 

 

км 

- 

- I этап – 70 % от  запланированного  объёма до 1 июля;  - II этап – 30 % от  запланированного  объёма до 1  октября  

 

Прокладка просек 

 

км 

1,5 (в случае необходимости) 

- I этап – 70 % от  запланированного  объёма до 1 июля;  - II этап – 30 % от  запланированного  

объёма до 1 

октября  

 

Прочистка просек 

 

км 

4,1 

- I этап – 70 % от  запланированного  объёма до 1 июля;  - II этап – 30 % от  запланированного  

объёма до 1 

октября  

 

Устройство противопожарных  минерализованных полос  

 

км 

39 

Апрель-сентябрь I  

этап – 90 % от  

запланированного  объёма до 1 мая;  

- II этап – 10 % от  запланированного  объёма сентябрь-октябрь.  

 

Прочистка противопожарных  минерализованных полос  

 

км 

39 

Апрель-сентябрь I  

этап – 90 % от  

запланированного  объёма до 1 мая;  

- II этап – 10 % от  запланированного  объёма сентябрь-октябрь  

 

Устройство пожарных водоёмов 

 

шт 

- 

Апрель-сентябрь  

 

У стройство подъездов к источникам  противопожарного водоснабжения  

 

шт 

- 

Апрель  

 

Эксплуатация пожарных водоёмов и  

 

шт 

1 

Апрель-октябрь  

 

подъездов к источникам водоснабжения 

 

Лесные дороги, предназначенные для  охраны лесов от пожаров:  

-строительство 

- реконструкция 

- эксплуатация 

 

км 

2,75 

58,6 

 

- I этап – 70 % от  запланированного  объёма до 1 июля;  - II этап – 30 % от  запланированного  объёма до 1  октября  

В течение всего  пожароопасного  

сезона 

В течение всего  пожароопасного  

сезона 

 

Агитационно – разъяснительная работа  (распространение листовок, буклетов,  памяток, выступления в СМИ и  печати)  

 

шт 

Листовки – 400  

(ежегодно) 

Выступления в  

СМИ – 1 (ежегодно) 

 

- I этап – перед  началом  

пожароопасного  сезона – 25 %;  

- II этап – майские  праздники – 25 %;  - III этап -  массовое  

посещение лесов  в целях сбора  пищевых лесных  ресурсов – 35 %;  

- IV этап –  открытие  

осеннего сезона  охоты – 15 %;  

 

Организация и эксплуатация пункта  сосредоточения средств  

предупреждения и тушения лесных  пожаров  

 

шт 

1 

 

В течение года  

 

Арендатор обязуется осуществлять обеспечение пожарной безопасности в лесах на  

арендуемом участке в объемах, в сроки и в порядке, предусмотренных проектом освоения  лесного участка, прошедшим государственную экспертизу.  

Примечание: указанный объем и перечень мероприятий могут быть изменены на  основании проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу и получившего  положительное заключение экспертной комиссии».  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения. В  таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа  в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого  судебного акта при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

В полном объеме судебный акт будет изготовлен в течение пяти рабочих дней.  

Судья Д.Д. Окороков