49/2018-123414(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А13-20685/2017

город Вологда

08 октября 2018 года

 

Руководствуясь статьями 110, 150, 167 – 170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Вологодской области  

р е ш и л :

обязать Общество с ограниченной ответственностью  «Производственно-коммерческая фирма «Передовые строительные  технологии» в соответствии с проектом планировки территории и  требованиями действующих технических регламентов и строительных норм  в срок 30.06.2019 осуществить:  

подсыпку проездов до проектных отметок (0,15 м), с укреплением  откосов насыпи путем их засева по георешетке, заполненной растительным  грунтом;  

придать проезжей части покрытий нормативный уклон (вертикальный  и продольный), обеспечивающий сток поверхностных вод с прилегающих  территорий в лотки проезжей части;  

выкопать вдоль проездов уличные канавы для отвода дождевых вод;  

и в месячный срок по окончании строительства безвозмездно передать  указанные объекты инженерной инфраструктуры в муниципальную  собственность Череповецкого муниципального района.  

Производство по делу в части требования о взыскании неустойки в  размере 11 127 руб. 49 коп. прекратить.  

В остальной части иска к Обществу с ограниченной ответственностью  Производственно-коммерческая фирма «Передовые строительные  технологии» Комитету имущественных отношений Администрации  Череповецкого муниципального района Вологодской области отказать.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  «Производственно-коммерческая фирма «Передовые строительные  технологии» в пользу Комитета имущественных отношений Администрации  Череповецкого муниципального района Вологодской области 50 000 руб. в  

возмещение судебных издержек на проведение экспертизы.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  «Производственно-коммерческая фирма «Передовые строительные  технологии» в доход федерального бюджета 6000 руб. государственной  пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента его  принятия в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд.  

Судья С.В. Корепин