РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

   12 июля 2024 года    

по делу А33-7158/2023 Красноярск  

«12» июля 2024 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 174 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу  исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к  электрическим сетям № 20.2400.2897.21 от 31.05.2021, осуществить технологическое  присоединение энергопринимающих устройств заявителя - базовой станции/оборудование  сотовой связи, расположенной (которая будет располагаться) по адресу: г. Красноярск,  Свердловский район, ул. Складская, 24, в границах кадастрового квартала 24:50:0700142, в  точке присоединения:  

I точка присоединения: максимальная мощность 10 кВт.  Линия (0,4) Проектируемая  

ТП ТП-396 ПС ПС № 3 0 «Белые росы» 110/6 кВ 

Основной источник питания: ПС № 30 «Белые росы» 110/6 кВ  Резервный источник питания: отсутствует,  

в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая  их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих  устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости  строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого  хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом  следующих характеристик:  

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 10 кВт; - категория надежности третья; 

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое  присоединение 0,4 кВ;  

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств  отсутствует; включая мероприятия согласно Техническим условиям № 8000457319:  

-выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов  проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением  Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласование со всеми заинтересованными  организациями в соответствии с действующим законодательством;  

-выполнении монтажа комплекса коммерческого учета электрической энергии в  соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков  электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №  442) -от РУ 0,4 кВ ТП 396 до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во  внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами  

заявителя, запроектировать и построить ЛЭП 0,4 кВ. Способ прокладки, марку и сечение  провода определить проектом.  

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Инфраструктурные решения» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку по  договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям   № 20.2400.2897.21 от 31.05.2021 г. за период с 02.12.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по  12.07.2024 в размере 123 987,64 руб., а с 13.07.2024 по день фактического исполнения  обязательства из расчета 161,02 рублей за каждый день просрочки, а также 8 000 руб.  судебных расходов по уплате государственной пошлины.  

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Инфраструктурные решения» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) судебную  неустойку в размере 1 300 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда по день  его фактического исполнения.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 2720 руб. государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья М.Ю. Винокурова