РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-25415/24-126-183

г. Москва

11 июля 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 25 июня 2024 года

Полный текст решения изготовлен 11 июля 2024 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

председательствующего судьи Новикова М.С. 

протокол судебного заседания вел секретарь судебного заседания Елина А.С.,

рассматривает в судебном заседании дело

по иску ООО "МЕГАСТРОЙ" (ИНН 

<

***>)

к ООО "Китайская Национальная Химическая Инженерная и Строительная Компания Севен" (НЗА 10190001294)

о взыскании 3 490 036 руб.

В судебное заседание явились:

от истца – ФИО1, доверенность от 07.05.2024., ФИО2, ген. директор согласно выписке из ЕГРЮЛ

от ответчика – ФИО3, доверенность от 26.09.2022 

 

УСТАНОВИЛ:

ООО "МЕГАСТРОЙ" обратилось с исковым заявлением к ООО "Китайская Национальная Химическая Инженерная и Строительная Компания Севен" о взыскании задолженности в размере 3 490 036,21 руб. в качестве 5 % гарантийного удержания от стоимости выполненных субподрядчиком и принятых подрядчиком работ по договору № CC7-RUS-GCC-NO2-SC-C2/1-005 от 25/10/2021.

Ответчик, согласно представленному отзыву, требования не признал, считает, что не наступили условия предусмотренные договором для выплаты гарантийного удержания.

Истец исковые требования поддержал, по доводам иска и возражениям на отзыв.

Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав представителей сторон, оценив представленные документы, приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материала дела, истец мотивирует свои требования тем, что в рамках договора № CC7-RUS-GCC-NO2-SC-C2.1-005 от 25.10.2021 наступили условия для выплаты ему первой части гарантийного удержания, в соответствии с п.п. 8.3.2. договора, в размере 5 % от стоимости выполненных работ в размере 3 490 036,21 руб.

Ответчик свои обязательства по Договору выполнил не в полном объеме, до настоящего времени не оплатил 5 % гарантийного удержания.

В адрес ответчика была направлена претензия с требованием погашения задолженности, претензия оставлена без ответа, что и послужило основанием для обращения с настоящим заявлением в суд.

В соответствии со ст. ст. 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательств одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Статья 746 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В соответствии с положениями статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии со статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором (пункт 1). Прекращение основного обязательства влечет прекращение обеспечивающего его обязательства, если иное не предусмотрено законом или договором (пункт 4).

Согласно представленным в материалы дела доказательствам, субподрядчик выполнил работы в срок, в полном объеме и качественно, о чем Сторонами были подписаны Акты выполненных работ без замечаний на общую сумму 69 800 784,27 рубля:

1.      Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 02.12.2021 г., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 01.10.2021 г. на сумму 38 505 714,94 рубля;

2.      Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 2 от 07.01.2022 г., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 2 от 07.01.2022 г. на сумму 11 298 914,59 рубля;

3.      Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 3 от 06.05.2022 г., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 3 от 06.05.2022 г. на сумму 13 278 136,64 рублей;

4.      Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 4 от 01.07.2022 г., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 4 от 01.07.2022 г. на сумму 4 101 502,28 рубля;

5.      Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 5 от 02.07.2022 г., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 5 от 02.07.2022 г. на сумму 2 616 515,82 рублей.

В соответствии с п. 8.3.1 Договора оплата за выполненные Субподрядчиком и принятые Подрядчиком Работы в соответствии со статьей 7 Договора производится ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком Справки о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3 в порядке, предусмотренном статьей 7 Договора, при условии предоставления следующих оригиналов документов:

•          Счета субподрядчика на 100% стоимости Работ, указанной в Акте о приемке выполненных Работ по форме КС-2.

•          Подписанные Подрядчиком документы в соответствии со статьей 7.3.

•          Банковская гарантия исполнения обязательств

•          Счет-фактура

Оплата осуществляется при условии наличия у Подрядчика действующих банковских гарантий, обязанность по предоставлению и поддержанию в силе которых Субподрядчиком устанавливается статьей 22 Договора.

В силу п. 8.3.2 Договора, если Субподрядчик не может обеспечить выдачу банковской гарантии исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора, Подрядчик вправе приостановить платежи Субподрядчику до тех пор, пока Субподрядчик не предоставить такие банковские гарантии либо Подрядчик при приемке выполненных Субподрядчиком Работ в обеспечение надлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору осуществляет удержание денежных средств в размере 10 % (десяти процентов) (далее - Гарантийное удержание) от стоимости выполненных и принятых Подрядчиком Работ. Приостановка платежей Подрядчика Субподрядчику в таком случае не является просрочкой платежей и не облагается штрафом неустойкой.

Выплата удержанных Подрядчиком 10% (десяти процентов) Гарантийных удержаний от стоимости Работ согласно условиям статьи 8 Договора в случае не предоставления Субподрядчиком Подрядчику Банковской гарантии исполнения обязательств, осуществляется в следующем порядке:

a)         первая часть Гарантийного удержания в размере 5% (пять процентов) от стоимости выполненных и принятых Работ выплачиваются в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приёмки выполненных работ в полном объеме и получения оригинала счета на оплату с пометкой «5%-Гарантийное удержание», выставленного без замечаний;

b)         вторая часть Гарантийного удержания в размере 5% (пять процентов) от стоимости выполненных и принятых Работ выплачиваются в течение 30 (тридцати) рабочих дней по истечении Гарантийного периода в соответствии со статьей 10 Договора с даты получения оригинала счета на оплату с пометкой «5%-Гарантийное удержание», выставленного без замечаний.

Согласно п. 10.1. Договора Гарантийный период Работ по Договору начинается с даты подписания Акта приемки выполненных Работ в полном объеме и истекает через 24 (двадцать четыре) месяца с указанной даты. Субподрядчик обязан своими силами и средствами устранять Дефекты в Результатах Работ, в течение периода выполнения Работ, а также в течение Гарантийного периода.

В силу п. 10.8 Договора Гарантийный период на Работы приостанавливается на срок ремонта, замены или устранения Дефектов в отношении части(-ей) Работ, отремонтированных, замененных таким образом, или Дефекты которых были устранены иным способом по согласованию Сторон.

При этом, учитывая, что Субподрядчик не предоставил Подрядчику безусловную безотзывную Банковскую гарантию исполнения обязательств Субподрядчиком по Договору, Подрядчик, руководствуясь п. 8.3.2. Договора, осуществил удержание денежных средств в размере 10 % (десяти процентов) (Гарантийное удержание) от стоимости выполненных и принятых Подрядчиком Работ.

С учетом Гарантийного удержания Подрядчик произвел оплату стоимости выполненных Субподрядчиком работ по Договору в размере 62 820 705 (Шестьдесят два миллиона восемьсот двадцать тысяч семьсот пять) рублей 85 копеек.

Размер Гарантийного удержания составил 6 980 072 (Шесть миллионов девятьсот восемьдесят тысяч семьдесят два) рубля 42 копейки.

Подрядчик, в нарушение п. 8.3.2 Договора, не произвел до настоящего момента выплату Гарантийного удержания, согласно условиям статьи 8 Договора.

По состоянию на 27.11.2023 задолженность Подрядчика перед Субподрядчиком составляет 6 980 072 (Шесть миллионов девятьсот восемьдесят тысяч семьдесят два) рубля 42 копейки, что подтверждается Актом сверки взаимных расчетов за период: 25.10.2021 -27.11.2023 между ООО «Мегастрой» (ИНН 

<

***>) и ООО «Китайская Национальная Химическая Инженерная и Строительная Корпорация Севен» (ИНН 

<

***>) по договору № CC7-RUS-GCC-NO2-SC-C2.1-005 от 25.10.2021 (прилагается к настоящей претензии).

Гарантийный период на Работы не приостанавливался, ремонта, замены или устранения Дефектов в отношении части(-ей) Работ не производилось. В соответствии с п. 10.1 Договора, Гарантийный период Работ по Договору заканчивается датой 02.07.2024.

Согласно п. п. 8.3.2 Договора возникло обязательство по оплате первой части Гарантийного удержания в размере 5% (пять процентов) от стоимости выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком Работ, в размере 3 490 036 руб. 21 коп.

В соответствии с ч. 1 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В связи с чем требования истца о взыскании суммы задолженности по оплате гарантийного удержания в общем размере 3 490 036,21 руб. подлежит удовлетворению.

Отклоняя доводы ответчика, суд отдельно отмечает, что согласно п 8.9 договора обязательство ответчика по оплате работ является встречным по отношению к обязательству истца передать надлежащим образом оформленную документацию, указанную в статьях 7 и 8 договора. Таким образом факт передачи исполнительной документации ответчику подтверждается произведенной им оплатой работ.

Кроме того, итоговый акт был получен ответчиком 16.12.2023, но в нарушение п. 7.8 договора в течении 15 рабочих дней мотивированный отказ с указанием перечня замечаний направлен не был.

Суд, рассмотрев остальные доводы ответчика, отклоняет их ввиду того, что они не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и основаны на неверном толковании права, кроме того, суд считает, что данные доводы ответчика направлены на уклонение от исполнения обязательства.

Расходы по госпошлине относятся на ответчика в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании ст. ст. 8, 12, 15, 309, 310, 329, 711, 740 ГК РФ,   руководствуясь ст. ст. 41, 65, 70, 71, 110, 123, 156, 167-171, 176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "Китайская Национальная Химическая Инженерная и Строительная Компания Севен" (НЗА 10190001294) в пользу ООО "МЕГАСТРОЙ" (ИНН 

<

***>) 3 490 036 (три миллиона четыреста девяносто тысяч тридцать шесть) руб. 21 коп. гарантийного удержания.

Взыскать с ООО "Китайская Национальная Химическая Инженерная и Строительная Компания Севен" (НЗА 10190001294) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 40 450 (сорок тысяч четыреста пятьдесят) руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья:

М.С. Новиков