АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А84-9948/2022

03 апреля 2023 г.

г. Севастополь

 

Резолютивная часть решения объявлена «27» марта 2023 года.  

Решение в полном объёме изготовлено «03» апреля 2023 года.

 

Арбитражный суд  города Севастополя в составе судьи Ражкова Р.А.,  рассмотрев в судебном заседании требования по заявлению от 16.11.2022 № 40,01-19607

Публичное акционерное общество по газоснабжению и газификации "Севастопольгаз" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Город Севастополь)

 к Обществу с ограниченной ответственностью "Байдарбетон-Плюс" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Город Севастополь) 

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора: Государственного казенного учреждения города Севастополя "Единая дирекция капитального строительства" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, г. Севастополь)

об обязании исполнить пункт договора,

при участии в судебном заседании 27.03.2023:

от ответчика – ФИО1 по доверенности от 28.11.2022,  

при ведении протокола судебного заседания 27.03.2023 секретарем судебного заседания Г.А. Амбарцумяном, 

УСТАНОВИЛ:

истец обратился к ответчику с исковым заявлением об обязании исполнить пункт 5.2.1. Договора субподряда по выполнению обязательства предоставить субподрядчику на период строительных работ по объекту строительную площадку по акту приема-передачи генеральным подрядчиком субподрядчику строительной площадки, а также взыскать государственную пошлину в размере 6 000 рублей по платежному поручению от 15.11.2022 № 7815.  

Определением от 22.11.2022 исковое заявление принято к производству суда, назначено предварительное судебное заседание. 

16.12.2022 от ООО "Байдарбетон-Плюс" поступил отзыв на исковое заявление.

14.02.2023 от ПАО по газоснабжению и газификации "Севастопольгаз" поступило ходатайство об уточнении размера исковых требований, в которых просит: Дополнить ранее заявленное исковое заявление следующими требованиями: Обязать ООО «Байдарбетон-Плюс» исполнить подпункт а) пункта 5.2.2. Договора субподряда, а именно предоставить утвержденную «в производство работ» проектно-сметную документацию, рабочую документацию стадии «Р» в полном объеме в бумажном виде в 1 (одном) экземпляре и в электронном виде, которое принято к рассмотрению в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определением от 15.02.2023.

16.03.2023 от ООО "Байдарбетон-Плюс" поступил отзыв на заявление об уточнении размера исковых требований.

Сведения о времени и месте судебного разбирательства 27.03.2023 размещены в сети Интернет на сайте www.arbitr.ru. 16.02.2023.

В судебном заседании представитель ответчика возражал относительно удовлетворения исковых требований.

Истец явку уполномоченных  представителей  в  судебное заседание 27.03.2023 не обеспечил, о времени и месте судебного заседания уведомлен надлежащим образом, о чем свидетельствуют материалы дела.

При неявке в судебное заседание  арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

С учетом изложенного, по мнению суда, материалы дела достаточно характеризуют спорные правоотношения, основания для отложения рассмотрения дела отсутствуют, а дело подлежит рассмотрению в отсутствие представителей истца по имеющимся в деле материалам.

Имеющиеся в деле доказательства исследованы и оценены судом в совокупности по правилам статей 65, 70, 71 АПК РФ.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Как следует из материалов дела, 07.07.2022 между Публичным акционерным обществом по газоснабжению и газификации «Севастопольгаз» (далее - ПАО «Севастопольгаз», Субподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Байдарбетон-Плюс» (далее - ООО «Байдарбетон-Плюс», Генеральный подрядчик) заключен договор субподряда № 29204007681220000460/2-СМР/2022/1 (далее - Договор) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Газификация сел Байдарской долины и ЮБК, 2-я очередь».

В соответствии с пунктом 1.1 Договора, Субподрядчик принял на себя обязательство в установленный Договором срок выполнить строительно-монтажные работы по объекту: «Газификация сел Байдарской долины и ЮБК, 2-я очередь), а Генеральный подрядчик обязуется принять результат выполненных работ и обеспечить их оплату в соответствии с условиями настоящего Договора в пределах цены Договора.

На основании пункта 1.2 Договора, к выполнению работ по настоящему Договору Субподрядчик привлекается в рамках исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по государственному контракту от 23.06.2022 № 2-СМР/2022 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Газификация сел Байдарской долины и ЮБК, 2-я очередь».

Согласно пункта 5.2.1 Договора - для реализации настоящего Договора Генеральный подрядчик принял на себя обязательство в течении 10 (десяти) рабо1 их дней с даты заключения настоящего Договора предоставить Субподрядчику на период строительных работ по Объекту строительную площадку по Акту приема-передачи Генеральным подрядчиком Субподрядчику строительной площадки.

В свою очередь, пунктом 3.1 Договора, предусмотрено, что срок начала работ определен с момента передачи строительной площадки в соответствии с пунктом 5.2.1 настоящего Договора и подписания соответствующего акта о передаче строительной площадки между Субподрядчиком и Генеральным подрядчиком. При этом срок окончания работ - не позднее «20» декабря 2023 года.

23.06.2022 между Государственным казенным учреждением города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» (далее - Заказчик, ГКУ «ЕДКС») и ООО «Байдарбетон-Плюс» (Подрядчик) в порядке Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключен Государственный контракт № 2- СМР/2022, в соответствии с условиями которого Подрядчик принял на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ по объекту: «Газификация сел Байдарской долины и ЮБК, 2-я очередь», а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и обеспечить их оплату в соответствии со Сметой контракта и условиями настоящего Контракта в пределах цены Контракта.

В соответствии с пунктом 5.2.1 государственного контракта Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта предоставить Подрядчику на период строительных работ по Объекту строительную площадку по Акту приема-передачи Заказчиком Подрядчику строительной площадки.

Таким образом, в целях реализации государственного контракта от 23.06.2022 № 2- СМР/2022, учитывая положения пункта 5.2., ГКУ «ЕДКС» в срок до 07.07.2022 должен был передать ООО «Байдарбетон-Плюс» на период строительных работ по Объекту не только строительную площадку по Акту приема-передачи строительной площадки, но и следующие документы:

а)      утвержденную «в производство работ» проектно-сметную документацию, рабочую документацию стадии «Р» в полном объеме в бумажном виде в 1 (одном) экземпляре и в электронном виде;

б)      копию документа Заказчика, оформленного в установленном порядке, о назначении своего ответственного представителя строительного контроля и надзора за строительными работами.

в)      копию разрешения на строительства, а также копии и (или) оригиналы иных разрешительных документов, оформление которых возлагается на Заказчика, согласно требованиям действующего законодательства;

г)       а также иные формы необходимые для проведения строительно-монтажных работ.

Пунктом 3.1. государственного контракта № 2-СМР/2022 предусмотрено, что срок начала работ определен с момента передачи строительной площадки в соответствии с пунктом 5.2.1 настоящего Контракта и подписания соответствующего акта о передаче строительной площадки между Подрядчиком и Заказчиком. Срок окончания работ - не позднее «30» ноября 2023 года.

Письмом от 02 сентября 2022 года Субподрядчиком в адрес Генерального подрядчика направлялось письмо, в соответствии с которым указывалось на необходимость в кратчайшие сроки осуществления передачи земельных участков для осуществления строительно-монтажных работ и недопущения срыва сроков выполнения работ по Договору.

В ответ ООО «Байдарбетон-Плюс» сообщил о неисполнении ГКУ «ЕДКС» своих обязательств по Государственному контракту от 23.06.2022 № 2-СМР/2022 в части передачи Подрядчику строительной площадки, разрешения на строительство, а также иных документов, гарантирующих полное и законное исполнение договорных обязательств со стороны Подрядчика (письмо за исх. № 2-24 от 05.09.2022).

Уведомлением от 30.09.2022 № 2-31 ООО «Байдарбетон-Плюс», вследствие неисполнения ГКУ «ЕДКС» встречных обязательств по договору, в т.ч. не предоставления Подрядчику строительной площадки, уведомил о временном приостановлении строительно-монтажных работ на объекте с 01.10.2022 до официального разъяснения дальнейшего порядка проведения работ, которое получено ГКУ «ЕДКС» 30.09.2022 вх. № 10291/03-05-02- 01-20/01/22.

В связи с тем, что обязательство Генерального подрядчика ООО «Байдарбетон-Плюс», изложенное в пункте 5.2.1 Договора, не исполнено ПАО «Севастопольгаз» обратилось с иском в суд об обязании ООО «Байдарбетон-Плюс» исполнить пункт 5.2.1 Договора субподряда по выполнению обязательства предоставить Субподрядчику на период строительных работ по Объекту строительную площадку по Акту приема-передачи Генеральным подрядчиком Субподрядчику строительной площадки.

В ходе судебного разбирательства истец уточнил требования, в которых просил так же обязать ООО «Байдарбетон-Плюс» исполнить подпункт а) пункта 5.2.2. Договора субподряда, предоставив утвержденную «в производство работ» проектно-сметную документацию, рабочую документацию стадии «Р» в полном объеме в бумажном виде в 1 (одном) экземпляре и в электронном виде.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, суд приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

Согласно нормам статей 420, 425 Гражданского кодекса Российской Федерации договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Договор вступает в силу, и становится обязательным для сторон с момента его заключения. 

По своей правовой природе между сторонами заключен договор субподряда на выполнение строительно-монтажных работ.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определённую работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (пункт 2 статьи 719 ГК РФ).

В рассматриваемом случае ООО «Байдарбетон-Плюс» (Генеральный подрядчик) не передал Субподрядчику на период строительных работ по объекту строительную площадку по акту приема-передачи в связи с  неисполнением ГКУ «ЕДКС» (Заказчик) встречных обязательств по контракту от 23.06.2022 № 2-СМР/2022.

В связи с тем, что обязательство Генерального подрядчика ООО «Байдарбетон-Плюс», изложенное в пункте 5.2.1 Договора, не исполнено ПАО «Севастопольгаз» обратилось с иском в суд об обязании ООО «Байдарбетон-Плюс» исполнить пункт 5.2.1 Договора субподряда по выполнению обязательства предоставить Субподрядчику на период строительных работ по Объекту строительную площадку по Акту приема-передачи Генеральным подрядчиком Субподрядчику строительной площадки.

В соответствии со статьёй 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Таким образом, из закона и существа отношений по договору подряда следует, что заказчик по общему правилу вправе в любое время отказаться от договора. Законный интерес подрядчика может быть защищён требованием о взыскании убытков, вызванных неисполнением заказчиком своих организационных обязанностей (статья 718 ГК РФ), понуждение заказчика, имеющего право на односторонний отказ от договора к исполнению договора законом, договором между сторонами не предусмотрено.

При вынесении решения суд действует в пределах заявленных исковых требований, т.е. рассматривает их по существу, исходя из выбранного истцом способа защиты нарушенного права. В случае выбора ненадлежащего способа защиты нарушенного или оспариваемого права основным последствием, которое наступает в соответствии с действующим законодательством, является отказ в удовлетворении исковых требований и вынесение соответствующего решения судом. Кроме того, избрание ненадлежащего способа защиты права является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований (Определение Верховного Суда РФ от 22.10.2020 № 308- ЭС20-16542 по делу № А32-27793/2019).

Учитывая изложенное, суд считает, что исковые требования лишены правового обоснования и удовлетворению не подлежат. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина отнесена судом на истца. 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Севастополя

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца с момента его вынесения в Двадцать первый Арбитражный апелляционный суд. Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд города Севастополя.

 

Судья         

Р.А. Ражков