68/2018-11581(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 630102, город Новосибирск, улица Нижегородская, 6 Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А45-31817/2017

г. Новосибирск

24 января 2018 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Печуриной Ю.А.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Теневой Т.В., 

руководствуясь статьями 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

р е ш и л:

I) обязать ООО «Строители Дорог Сибири» безвозмездно устранить  недостатки, выявленные в период гарантийного срока по контракту №  Ф.2016.82282 от 25.05.2016 на выполнение работ по планово- предупредительному ремонту искусственных сооружений на автомобильных  дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения  в Барабинском и Куйбышевском районах Новосибирской области, согласно  актам обследования сооружений и ведомостям устранения дефектов от  16.05.2017, 21.06.2017, 18.09.2017, в срок до 20.05.2018г. на следующих  объектах:  

1) на объекте Путепровод через ж/д "Омск-Новосибирск" на 4 км а/д "М- 51" -Барабинск - Куйбышев" в Барабинском районе Новосибирской области  устранить разрушение деформационных швов (10 м).  

2) на объекте Мост через р. Угурманка на 14 км а/д "66 км а/д "Н-1408" -  Ушково - Михайловка" в Куйбышевском районе Новосибирской области  устранить нарушение лакокрасочного покрытия балок -100 м2.  

4) на объекте Мост через р. Ича на 58 км а/д "Куйбышев - Северное" в  Куйбышевском районе Новосибирской области устранить:  

- разрушение бетона на консолях балок и на сливах ригелей опор- 60  м2;  

- разрушение ремонтных смесей в местах сколов балок - 5 м2. 

5) на объекте Мост через р. Западниха на 64 км а/д "Куйбышев - Чу  маково-Балман" в Куйбышевском районе Новосибирской области устранить  нарушение лакокрасочного покрытия балок - 140 м2.  

II) на объекте (3) Мост через р. Узакла на 35 км а/д "Куйбышев -  Венгерово-гр.Омской области (старый Московский тракт)" в Куйбышевском  районе Новосибирской области устранить разрушение бетона укрепления  конусов насыпи 20 м2 в срок, не позднее трех недель с момента вступления в  законную силу решения суда.  

III) взыскать с ООО «Строители Дорог Сибири» в пользу ГКУ НСО ТУ  АД уплаченную при подаче иска государственную пошлину в размере 6 000  руб.  

 После вступления решения в законную силу выдать исполнительные  листы.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия.  

 Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия  в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г.Томск).  

 Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г.Тюмень) в срок, не  превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при  условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

 Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный  суд Новосибирской области.  

Судья Ю.А. Печурина