Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-91671/2018

23 октября 2018 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  27 сентября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  23 октября 2018 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Данилова Н.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРТУС" (адрес:  Россия 192007, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул КУРСКАЯ 21/А/29Н, ОГРН:  1097847213804);

ответчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ" (адрес:  Россия 197348, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пр-кт БОГАТЫРСКИЙ 2, ОГРН:  1027801544308);

о взыскании

при участии

- от истца: ФИО2 (доверенность от 28.08.2018)

- от ответчика: ФИО3 (доверенность от 04.07.2018)

установил:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРТУС" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ" о взыскании 11 325 477,46 руб. задолженности.

В настоящем судебном заседании представитель ответчика заявил ходатайство об объединении дела А56-56562/2018 о взыскании 38 500 021,06 руб. неотработанного аванса по трем договорам: от 20.08.2012 № КВЦ/ВЗ-59, от 11.07.2013 № КВЦ/ВЗ-190, от 20.12.2013 № КВЦ/ВЗ-247 по иску АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ" к АО "ОРТУС" с делом №А56-91671/2018 в одно производство для совместного их рассмотрения.

В соответствии с частью 2.1 статьи 130 АПК РФ арбитражный суд первой инстанции, установив, что в его производстве имеются несколько дел, связанных между собой по основаниям возникновения заявленных требований и (или) представленным доказательствам, а также в иных случаях возникновения риска принятия противоречащих друг другу судебных актов, по собственной инициативе или по ходатайству лица, участвующего в деле, объединяет эти дела в одно производство для их совместного рассмотрения.

В обоснование заявленного ходатайства истец ссылается на то, что указанные дела связаны между собой, в том числе по составу лиц, участвующих в деле, основаниям возникновения заявленных требований и представленным доказательствам, и их одновременное рассмотрение приведет к более быстрому разрешению споров.

Объединение дел для совместного рассмотрения допускается в том случае, если установлено, что в производстве имеются несколько дел, связанных между собой по основаниям возникновения заявленных требований и (или) представленным доказательствам, а также в иных случаях возникновения риска принятия противоречащих друг другу судебных актов, в то время как в данном случае в рассматриваемых делах заявленные требования вытекают из разных договоров и доказательств возникновения риска противоречивого разрешения рассматриваемых требований не имеется, что не отвечает требованиям ст. 130 АПК РФ.

Суд, установил, что в рамках вышеуказанных дел рассматриваются исковые требования, возникшие из разных договоров, подлежащих установлению, выяснению и исследованию при рассмотрении каждого из заявленных требований в каждом деле является различным, совместное рассмотрение указанных дел нецелесообразно и не приведет к более быстрому и правильному разрешению спора.

Таким образом, суд пришел к выводу о том, что истцом не представлено мотивированных доказательств в обоснование данного заявления, основания для объединения указанных дел в одно производство отсутствуют.

Представитель истца заявил ходатайство об уточнении исковых требований, просит взыскать 11 260 377,46 руб. задолженности.

Суд в порядке ст. 49 АПК РФ принимает данные уточнения.

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражал по мотивам, изложенным в отзыве. Вместе с тем ответчик заявил о пропуске срока исковой давности по требованию о взыскании задолженности в размере 7 126,22 руб. по договору №003-ВО/11 от 29.03.2011.

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

ЗАО ССМО «ЛенСпецСму», правопреемником которого является АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (генподрядчик), и ЗАО "ОРТУС" правопреемником которого является АО "ОРТУС" (субподрядчик) заключили 15 договоров субподряда: № КВЦ/ВЗ-223 от 16.10.2013, № КВЦ/ВЗ-238 от 01.12.2013, № КВЦ/ВЗ-277 от 02.04.2014, № КВЦ/ВЗ-320 от 28.04.2014, № КВЦ/ВЗ-392 от 01.09.2014, № КВЦ/ВЗ-394 от 11.09.2014, № КВЦ/ВЗ-508 от 09.02.2015, № КВЦ/ВЗ-510 от 02.02.2015, № КВЦ/ВЗ-572 от 19.11.2015, № КВЦ/ВЗ-462 от 16.02.2015, № КВЦ/ВЗ-490 от 21.05.2015, № КВЦ/ВЗ-491 от 21.05.2015, № КВЦ/ВЗ-518 от 15.07.2015, № КВЦ/ВЗ-595 от 23.03.2016, № 021-МУ/15 от 01.08.2015, а также договор подряда №003- ВО/11 от 29.03.2011.

Представленными в материалы дела актами о приемке выполненных работ, подписанными без возражений, подтверждается выполнение субподрядчиком работ по данным договорам.

Порядок расчетов согласован в разделе 4 договоров.

В соответствии с п.4.7.2 договора № КВЦ/ВЗ-223 от 16.10.2013 и договора № КВЦ/ВЗ-238 от 01.12.2013 сумму в размере 5 % от сумм, указанных в ежемесячных отчетах о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), генподрядчик оплачивает в течение 2 лет после фактического выполнения субподрядчиком всех работ по настоящему договору и подписания сторонами окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ (форма №КС-2), окончательной справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), при условии надлежащего исполнения субподрядчиком своих гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 5 договора.

По договору № КВЦ/ВЗ-223 от 16.10.2013 окончательный акт сдачи-приемки выполненных работ подписан сторонами 31.08.2013 на сумму 735 896,01 руб. и 30.09.2014 на сумму 12 533 625,02 руб.

По договору № КВЦ/ВЗ-238 акты КС-2 и КС-3 (окончательные) подписаны сторонами 30.09.2013 на общую сумму 4 371 475,53 руб.

На основании п.4.7.2 договоров ответчик произвел удержание следующих гарантийных сумм:

- 663 476,07 руб. по договору № КВЦ/ВЗ-223 от 16.10.2013;

-218 573,78 руб. по договору № КВЦ/ВЗ-238 от 01.12.2013.

В соответствии с п.4.7.3 договора № КВЦ/ВЗ-277 от 02.04.2014 сумму в размере 5 % от сумм, указанных в ежемесячных отчетах о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), генподрядчик оплачивает в течение 2 лет после фактического выполнения субподрядчиком всех работ по настоящему договору и подписания сторонами окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ (форма №КС-2), окончательной справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), при условии надлежащего исполнения субподрядчиком своих гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 5 договора.

По договору № КВЦ/ВЗ-277 от 02.04.2014 акты КС-2 и КС-3 (окончательные) подписаны сторонами 30.06.2015 на общую сумму 655 971,92 руб.

На основании п.4.7.3 данного договора ответчик произвел удержание гарантийной суммы по договору в размере 32 798,60 руб.

В соответствии с п.4.7.4 договора № КВЦ/ВЗ-320 от 28.04.2014 сумму в размере 2,5 % от сумм, указанных в ежемесячных отчетах о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), генподрядчик оплачивает в течение 1 года после фактического выполнения субподрядчиком всех работ по настоящему договору и подписания сторонами окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ (форма №КС-2), окончательной справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), при условии надлежащего исполнения субподрядчиком своих гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 5 договора.

В соответствии с п.4.7.5 договора № КВЦ/ВЗ-320 от 28.04.2014 сумму в размере 2,5 % от сумм, указанных в ежемесячных отчетах о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), генподрядчик оплачивает в течение 2 лет после фактического выполнения субподрядчиком всех работ по настоящему договору и подписания сторонами окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ (форма №КС-2), окончательной справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), при условии надлежащего исполнения субподрядчиком своих гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 5 договора.

По договору № КВЦ/ВЗ-320 от 28.04.2014 акты КС-2 и КС-3 (окончательные) подписаны сторонами 31.10.2014 на общую сумму 1 201 626,51 руб.

На основании п.п.4.7.4, 4.7.5 данного договора ответчик произвел удержание гарантийной суммы по договору в размере 60 081,33 руб.

В соответствии с п.4.6.2 договора № КВЦ/ВЗ-392 от 01.09.2014 сумму в размере 5 % от сумм, указанных в ежемесячных отчетах о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), генподрядчик оплачивает в течение 2 лет после фактического выполнения субподрядчиком всех работ по настоящему договору и подписания сторонами окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ (форма №КС-2), окончательной справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), при условии надлежащего исполнения субподрядчиком своих гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 5 договора.

По договору № КВЦ/ВЗ-392 от 01.09.2014 акты КС-2 и КС-3 (окончательные) подписаны сторонами 31.05.2015 на общую сумму 655 971,92 руб.

На основании п.4.6.2 данного договора ответчик произвел удержание гарантийной суммы по договору в размере 3 361,31 руб.

В соответствии с п.4.7.6 договора № КВЦ/ВЗ-394 от 11.09.2014 в редакции дополнительного соглашения №5 от 26.11.2015 сумму в размере 5 % от сумм, указанных в ежемесячных отчетах о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), генподрядчик оплачивает в течение 2 месяцев после фактического выполнения субподрядчиком всех работ по настоящему договору и подписания сторонами окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ (форма №КС-2), окончательной справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), при условии надлежащего исполнения субподрядчиком своих гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 5 договора.

По договору № КВЦ/ВЗ-394 от 11.09.2014 акты КС-2 и КС-3 (окончательные) подписаны сторонами 30.11.2015 на общую сумму 2 103 150 руб.

На основании п.4.7.6 данного договора ответчик произвел удержание гарантийной суммы по договору в размере 105 157,50 руб.

В соответствии с п.4.7.5 договора № КВЦ/ВЗ-508 от 09.02.2015 и № КВЦ/ВЗ-510 от 02.02.2015 в редакции дополнительного соглашения №1 от 01.04.2015 сумму в размере 2,5 % от сумм, указанных в ежемесячных отчетах о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), генподрядчик оплачивает в течение 1 года после фактического выполнения субподрядчиком всех работ по настоящему договору и подписания сторонами окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ (форма №КС-2), окончательной справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), при условии надлежащего исполнения субподрядчиком своих гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 5 договора.

В соответствии с п.4.7.6 договора № КВЦ/ВЗ-508 от 09.02.2015 и № КВЦ/ВЗ-510 от 02.02.2015 сумму в размере 2,5 % от сумм, указанных в ежемесячных отчетах о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), генподрядчик оплачивает в течение 2 лет после фактического выполнения субподрядчиком всех работ по настоящему договору и подписания сторонами окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ (форма №КС-2), окончательной справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), при условии надлежащего исполнения субподрядчиком своих гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 5 договора.

По договору № КВЦ/ВЗ-508 от 09.02.2015 акты КС-2 и КС-3 (окончательные) подписаны сторонами 30.06.2015 на общую сумму 87 329 914,15 руб.

По договору № КВЦ/ВЗ-510 от 02.02.2015 акты КС-2 и КС-3 (окончательные) подписаны сторонами 30.06.2015 на общую сумму 44 489 657,27 руб.

На основании п.4.7.5, 4.7.6 договоров ответчик произвел удержание следующих гарантийных сумм:

- 4 366 495,71 руб. по договору № КВЦ/ВЗ-508 от 09.02.2015;

-2 224 482,86 руб. по договору № КВЦ/ВЗ-510 от 02.02.2015.

В соответствии с п.4.7.3 договора № КВЦ/ВЗ-572 от 19.11.2015 сумму в размере 2,5 % от сумм, указанных в ежемесячных отчетах о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), генподрядчик оплачивает в течение 1 месяца после фактического выполнения субподрядчиком всех работ по настоящему договору и подписания сторонами окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ (форма №КС-2), окончательной справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), при условии надлежащего исполнения субподрядчиком своих гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 5 договора.

В соответствии с п.4.7.4 договора № КВЦ/ВЗ-572 от 19.11.2015 сумму в размере 2,5 % от сумм, указанных в ежемесячных отчетах о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), генподрядчик оплачивает в течение 2 месяцев после фактического выполнения субподрядчиком всех работ по настоящему договору и подписания сторонами окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ (форма №КС-2), окончательной справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), при условии надлежащего исполнения субподрядчиком своих гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 5 договора.

По договору № КВЦ/ВЗ-572 от 19.11.2015 акты КС-2 и КС-3 (окончательные) подписаны сторонами 31.05.2015 на общую сумму 13 500 000 руб.

На основании п.п.4.7.3, 4.7.4 данного договора ответчик произвел удержание гарантийной суммы по договору в размере 675 000 руб.

В соответствии с п.4.7.3 договоров № КВЦ/ВЗ-462 от 16.02.2015, № КВЦ/ВЗ-490 от 21.05.2015, № КВЦ/ВЗ-491 от 21.05.2015 сумму в размере 2,5 % от сумм, указанных в ежемесячных отчетах о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), генподрядчик оплачивает в течение 1 года после фактического выполнения субподрядчиком всех работ по настоящему договору и подписания сторонами окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ (форма №КС-2), окончательной справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), при условии надлежащего исполнения субподрядчиком своих гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 5 договора.

В соответствии с п.4.7.4 договоров № КВЦ/ВЗ-462 от 16.02.2015, № КВЦ/ВЗ-490 от 21.05.2015, № КВЦ/ВЗ-491 от 21.05.2015 сумму в размере 2,5 % от сумм, указанных в ежемесячных отчетах о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), генподрядчик оплачивает в течение 2 лет после фактического выполнения субподрядчиком всех работ по настоящему договору и подписания сторонами окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ (форма №КС-2), окончательной справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), при условии надлежащего исполнения субподрядчиком своих гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 5 договора.

По договору № КВЦ/ВЗ-462 от 16.02.2015 акты КС-2 и КС-3 (окончательные) подписаны сторонами 29.02.2016 на общую сумму 5 979 868,82 руб.

По договору № КВЦ/ВЗ-490 от 21.05.2015 акты КС-2 и КС-3 (окончательные) подписаны сторонами 29.02.2016 на общую сумму 3 816 860,89 руб.

По договору № КВЦ/ВЗ-491 от 21.05.2015 акты КС-2 и КС-3 (окончательные) подписаны сторонами 31.08.2015 на общую сумму 1 125 500 руб.

На основании п.4.7.3, 4.7.4 договоров ответчик произвел удержание следующих гарантийных сумм:

- 293 552,68 руб. по договору № КВЦ/ВЗ-462 от 16.02.2015;

-190 843,05 руб. по договору № КВЦ/ВЗ-490 от 21.05.2015;

-56 275 руб. по договору № КВЦ/ВЗ-491 от 21.05.2015.

В соответствии с п.4.7.6 договора № КВЦ/ВЗ-518 от 15.07.2015 в редакции дополнительного соглашения №1 от 22.09.2015 сумму в размере 2,5 % от сумм, указанных в ежемесячных отчетах о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), генподрядчик оплачивает в течение 1 года после фактического выполнения субподрядчиком всех работ по настоящему договору и подписания сторонами окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ (форма №КС-2), окончательной справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), при условии надлежащего исполнения субподрядчиком своих гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 5 договора.

В соответствии с п.4.7.7 договора № КВЦ/ВЗ-518 от 15.07.2015 сумму в размере 2,5 % от сумм, указанных в ежемесячных отчетах о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), генподрядчик оплачивает в течение 2 лет после фактического выполнения субподрядчиком всех работ по настоящему договору и подписания сторонами окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ (форма №КС-2), окончательной справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), при условии надлежащего исполнения субподрядчиком своих гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 5 договора.

По договору № КВЦ/ВЗ-518 от 15.07.2015 акты КС-2 и КС-3 (окончательные) подписаны сторонами 31.12.2015 на сумму 2 604 000 руб., 31.10.2016 на сумму 19 627 208,40 руб.

На основании п.п.4.7.6, 4.7.7 данного договора ответчик произвел удержание гарантийной суммы по договору в размере 516 320,88 руб.

В соответствии с п.4.7.3 договора № КВЦ/ВЗ-595 от 23.03.2016 сумму в размере 5 % от сумм, указанных в ежемесячных отчетах о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), генподрядчик оплачивает в течение 2 месяцев после фактического выполнения субподрядчиком всех работ по настоящему договору и подписания сторонами окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ (форма №КС-2), окончательной справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), при условии надлежащего исполнения субподрядчиком своих гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 5 договора.

По договору № КВЦ/ВЗ-595 от 23.03.2016 акты КС-2 и КС-3 (окончательные) подписаны сторонами 31.08.2016 на сумму 3 595 481,90 руб.

На основании п.4.7.3 данного договора ответчик произвел удержание гарантийной суммы по договору в размере 179 774,10 руб.

В соответствии с п.4.6.3 договора № 021-МУ/15 от 01.08.2015 в редакции дополнительного соглашения от 30.10.2015 сумму в размере 5 % от сумм, указанных в ежемесячных отчетах о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), генподрядчик оплачивает в течение 10 банковских дней после выполнения подрядчиком всех работ по настоящему договору, согласования исполнительной документации на выполнение работ в РЖД, приемки результата работ ответственным представителем ОАО РЖД и подписания сторонами окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ (форма №КС-2), окончательной справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), предусмотренных настоящим договором.

30.10.2015, 31.05.2016, 30.11.2017 между сторонами были подписаны акты КС-2, КС-3 на общую сумму 81 059 386,97 руб.

На основании п.4.6.3 данного договора ответчик произвел удержание гарантийной суммы по договору в размере 1 667 058,37 руб.

Ответчиком не представлены доказательства наличия претензий и замечаний к работам в гарантийный период.  

Срок выплаты гарантийных удержаний по вышеуказанным договорам наступил.

29.03.2011 между ЗАО ССМО «ЛенСпецСму», правопреемником которого является АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (заказчик), и ЗАО "ОРТУС" правопреемником которого является АО "ОРТУС" (подрядчик) заключен договор подряда № 003-ВО/11 на выполнение работ по монтажу систем вентиляции.

В соответствии с п.4.1 договора стоимость работ по настоящему договору составляет 142 524,38 руб.

В соответствии с п.4.5 договора оплату общей стоимости работ заказчик производит в течение 10 банковских дней после фактического выполнения подрядчиком всех работ по настоящему договору передачи заказчику исполнительной документации и подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему договору (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Как следует из искового заявления, истец выполнил работы по договору надлежащим образом, что подтверждается имеющимися в материалах дела актом №1 от 30.04.2011 и справкой №1 от 30.04.2011 на общую сумму 135 398,16 руб., подписанными обеими сторонами.

Ответчик выполненные работы в полном объеме не оплатил в результате чего образовалась задолженность в размере 7 126,22 руб.

Таким образом, общая задолженность ответчика перед истцом по всем перечисленным выше договорам составляет 11 260 377,46 руб.

11.01.2018 истцом была направлена в адрес ответчика претензия №001 от 11.01.2018 с требованием оплаты задолженности.

Оставление ответчиком претензии без удовлетворения явилось основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Ответчик, возражая против удовлетворения исковых требований, ссылался на то, что истцом пропущен срок исковой давности по заявленному требованию по договору № 003-ВО/11 от 29.03.2011.

В силу пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Статья 746 ГК РФ устанавливает обязанность заказчика оплатить выполненные подрядчиком работы в сроки, установленные законом или договором подряда.

В соответствии со ст. ст. 307, 309 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается (ст. 310 ГК РФ).

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Ответчик не представил мотивированных возражений против удовлетворения исковых требований по договорам № КВЦ/ВЗ-223 от 16.10.2013, № КВЦ/ВЗ-238 от 01.12.2013, № КВЦ/ВЗ-277 от 02.04.2014, № КВЦ/ВЗ-320 от 28.04.2014, № КВЦ/ВЗ-392 от 01.09.2014, № КВЦ/ВЗ-394 от 11.09.2014, № КВЦ/ВЗ-508 от 09.02.2015, № КВЦ/ВЗ-510 от 02.02.2015, № КВЦ/ВЗ-572 от 19.11.2015, № КВЦ/ВЗ-462 от 16.02.2015, № КВЦ/ВЗ-490 от 21.05.2015, № КВЦ/ВЗ-491 от 21.05.2015, № КВЦ/ВЗ-518 от 15.07.2015, № КВЦ/ВЗ-595 от 23.03.2016, № 021-МУ/15 от 01.08.2015.

Оценив доводы сторон, условия договоров, представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, учитывая, что ответчик не представил в материалы дела доказательств оплаты спорной суммы задолженности, суд признает исковые требования обоснованными и подлежащими частичному удовлетворению в размере 11 253 251 руб., в остальной части в размере 7 126,22 руб. считает требования не подлежащими удовлетворению.

Согласно ст. ст. 195, 196 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности составляет три года.

В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 200 ГК РФ по обязательствам, срок исполнения которых не определен либо определен моментом востребования, течение исковой давности начинается с момента, когда у кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется льготный срок для исполнения такого требования, исчисление исковой давности начинается по окончании указанного срока.

Согласно абз. 2 п. 2 ст. 199 ГК РФ истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является самостоятельным основанием для отказа в иске.

Течение срока исковой давности по требованию о взыскании задолженности по договору №003-ВО/11 от 29.03.2011 началось на следующий день после подписания 30.04.2011 акта сдачи-приемки выполненных работ и установленного п. 4.5 договора срока оплаты работ (10 банковских дней с даты подписания актов по форме КС-2, КС-3), то есть с 17.05.2011. Принимая во внимание, что исковое заявление было подано в суд 18.07.2018, срок исковой давности по требованию о взыскании 7 126,22 руб. задолженности по договору №003-ВО/11 истцом пропущен, следует в иске в этой части отказать.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ" в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ОРТУС" 11 253 251 руб. задолженности. 

В остальной части отказать.

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ОРТУС" в доход федерального бюджета 50 руб. государственной пошлины.

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ" в доход федерального бюджета 79 252 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Данилова Н.П.