РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Москва

Дело № А40-256004/20-105-1216 

29.06.2021

Резолютивная часть решения объявлена 17.06.2021

Текст решения изготовлен в полном объеме 29.06.2021

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Судьи Никоновой О.И.

при ведении протокола судебного заседания  секретарем ФИО1

рассмотрев  в судебном заседании дело по исковому заявлению

истец:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002" (125362, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА СВОБОДЫ, ДОМ 17, Э ПОДВАЛ П I КОМ 1 ОФ 2, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 12.02.2003, ИНН: 

<

***>, КПП: 773301001)

ответчик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТЛАНТ" (127247, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ, ДОМ 100, СТР 2, ЭТ 9 ОФИС 4938А-Г, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 09.01.2015, ИНН: 

<

***>, КПП: 771301001)

О взыскании задолженности по оплате выполненных работ в размере 11 604 094 руб. 23 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 31.03.2020г. по 23.12.2020г. в размере 158 454 руб. 08 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 24.12.2020 по день фактической оплаты долга.

Встречное исковое заявление о взыскании процентов в размере 175 244 руб. 42 коп. 

При участии:

от истца- ФИО2 (по дов. от 17.08.2020, диплом)

от ответчика- ФИО3 (по дов. от 30.12.20, диплом)

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002" обратилось в суд с иском к ОБЩЕСТВОУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТЛАНТ" о взыскании задолженности по оплате выполненных работ в размере 11 604 094 руб. 23 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 31.03.2020г. по 23.12.2020г. в размере 158 454 руб. 08 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 24.12.2020 по день фактической оплаты долга.

Исковые требования заявлены со ссылкой на ст.ст.309, 310, 395, 702 ГК РФ и мотивированы не надлежащим исполнением обязательств по договору подряда №19-380-КЖЛ-19-8-2 от 01.08.2019г. на выполнение подрядных работ по постоянному обустройству «Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11 этаж: «Кожуховская линия от переходной камеры за ст. «Косино» до ст. «Нижегородская улица» ст. «Юго-Восточная».

 Ответчик исковые требования не признает, заявил встречный иск о взыскании процентов в размере 175 244 руб. 42 коп. 

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основания иска, исследовав и оценив представленные по делу доказательства, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, арбитражный суд установил следующее.

01.08.2019г. между ООО «Строй-Монтаж 2002» (Субподрядчик) и ООО «СК «Атлант» (Подрядчик) заключен Договор № 19-380-КЖЛ-19-8-2 на выполнение подрядных работ по постоянному обустройству «Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11 этаж: «Кожуховская линия от переходной камеры за ст. «Косино» до ст. «Нижегородская улица» ст. «Юго-Восточная». В соответствии с п. 1.1. Договора Субподрядчик обязуется в установленный Договором срок в соответствии с Техническим заданием и проектно-сметной документацией (шифр: 11-4026-Л-Р-11Э-2975- 2-АДП), выполнить строительно-монтажные работы по устройству системы автоматики и телемеханики движения поездов (напольные устройства АТДП) станционного комплекса «Юго-Восточная», а Подрядчик обязуется принять результат выполненной работы и оплатить установленную Договором цену.

08.11.2019г. ООО «СК «Атлант» перечислило ООО «Строй-Монтаж 2002» аванс в размере 5 996 913,82 (пять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч девятьсот тринадцать) рублей 82 копейки, что подтверждается платежным поручением №1228 от 08.11.2019г.

В соответствии с п. 3.1. Договора Цена Договора определяется Сторонами на основании рабочих смет, утвержденных в установленном порядке и выданных Подрядчиком (Заказчиком АО «Мосинжпроект») «В производство работ», с учетом индексов пересчета базовой цены в текущую цену, утвержденных Москомэкспертизой на дату производства работ, и с применением понижающего коэффициента (К=0,88 применяемого только к стоимости работ в Акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2). 

ООО «Строй-Монтаж 2002» выполнило работы на общую сумму 18 017 278,57 (восемнадцать миллионов семнадцать тысяч двести семьдесят восемь) рублей 57 копеек, что подтверждается Актами о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 1 от 29.02.2020г., № 2 от 31.08.2020г. 

В соответствии с п. 4.4. Договора оплата выполненных по Договору работ производится промежуточными платежами в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), при наличии выставленных Субподрядчиком счета и счета-фактуры. 

Таким образом оплата выполненных работ, в соответствии с п. 4.4. Договора должна быть произведена 30.03.2020г. и 01.10.2020г. 

19.11.2020г. ООО «Строй-Монтаж 2002» в адрес ООО «Строительная компания Атлант» направлена претензия исх. № 2692-СМ20 от 16.11.2020г. Указанная претензия оставлена Ответчиком без удовлетворения.

В соответствии с п. 4.9. Договора Субподрядчик предоставляет Подрядчику право на удержание части цены Договора (включая НДС) в общем размере 2% от цены Договора (включая НДС), указанной в п. 3.1. Договора, из платежей, причитающихся Субподрядчику за выполненные работы, в качестве обеспечительного платежа, предусмотренного первым абзацем настоящего пункта. Предусмотренное настоящим абзацем удержание осуществляется на весь период обеспечения в размере 2% от стоимости выполненных работ за отчетный период до достижения общего размера обеспечительного платежа, предусмотренного настоящим пунктом. 

Таким образом, с учетом гарантийного удержания в размере 2% от стоимости выполненных Субподрядчиком работ и расходов на генеральную уборку объекта в размере 1,21% НР от ЗП и ЗПМ (в том числе НДС) стоимость выполненных ООО «Строй-Монтаж 2002» работ, подлежащих оплате в соответствии с п. 4.4. Договора, составляет 7 821 536,85 +9 779 471,20 = 17 601 008,05 (семнадцать миллионов шестьсот одна тысяча восемь) рублей 05 копеек. 

На основании изложенного, с учетом ранее перечисленного авансового платежа, задолженность ООО «Строительная компания «Атлант» перед ООО «Строй-Монтаж 2002» составляет 17 601 008,05 - 5 996 913,82 = 11 604 094,23 (одиннадцать миллионов шестьсот четыре тысячи девяносто четыре) рубля 23 копейки.

На основании статьи 309 Гражданского кодекса России обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с законом и условиями самого обязательства. 

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Доказательства оплаты долга суду не представлены.

Оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, определив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности суд считает требования истца о взыскании долга обоснованными и  подлежащими удовлетворению.

Истец просит взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 31.03.2020г. по 23.12.2020г. в размере 158 454 руб. 08 коп., продолжить начисление процентов по дату исполнения решения суда.

В пункте 1 статьи 395 ГК РФ предусмотрено, что в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами  произведенный истцом  за период с  31.03.2020 по  23.12.2020 ответчиком по существу не оспорен, судом проверен, арифметически и  методологически выполнен верно.

Требование о взыскании процентов подлежит удовлетворению в заявленном размере.

Также подлежат взысканию проценты, начисляемые на сумму 169 990  руб. с 24.12.2020 по день фактической оплаты, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующий период.

ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТЛАНТ"  предъявлен встречный иск о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами  согласно ст. 395 ГК РФ  в размере 175 244 руб. 42 коп.

В соответствии с п. 1.3 и п. 8.1 Договора Ответчик обязался завершить работы в объеме, порядке и сроки, установленные Договором (в частности, в п. 5.1).

В соответствии с п. 5.1 Договора стороны определили срок начала работ – с момента подписания договора, срок окончания работ не позднее 30.11.2019 года.

В соответствии с Актом о приемке выполненных работ и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат, составленными 29.02.2020 года, работ было выполнено на общую сумму 9 779 471,20 рублей за вычетом гарантийного удержания в 2 % и удержания 1,21 % от НР (приобщен в материалы дела ответчиком при подаче искового заявления по делу № А40-256004/2020).

В соответствии с Актом о приемке выполненных работ и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат, составленными 31.08.2020 года, работ было выполнено на общую сумму 7 821 536,85 рублей за вычетом гарантийного удержания в 2 % и удержания 1,21 % от НР (приобщен в материалы дела ответчиком при подаче искового заявления по делу № А40-256004/2020).

В соответствии с ч. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. Таким образом, обязательство по выполнению работ считается выполненным с момента подписания акта о приемке выполненных работ. 

Акты о приемке выполненных работ датированы 29.02.2020 и 31.08.2020. Акт о приемке выполненных работ от 29.02.2020 г., был составлен 29 февраля 2020 года, подписан ООО «Строй-Монтаж 2002» 25 мая 2020 г. Об этом свидетельствует подпись ФИО4 и печать «По доверенности № 44/2020-СМ от 25.05.2020 г. ФИО4.».

Как указано ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТЛАНТ" во встречном иске, усматривается просрочка исполнения обязательств по договору, вследствие чего истец по встречному иску  просит взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ.

В силу статьи 395 Гражданского кодекса РФ. в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Однако истцом по встречному иску не учтено, что обязательство по выполнению работ, за нарушение которого начислены заявленные проценты, является неденежным.

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, в силу природы гражданско-правовых отношений сама по себе возможность применения санкции, предусмотренной пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, направлена на защиту имущественных интересов лица, чьи денежные средства незаконно удерживались. 

При этом применение положений данной статьи в конкретных спорах зависит от того, являются ли спорные имущественные правоотношения гражданско-правовыми, а нарушенное обязательство - денежным, а если не являются, то имеется ли указание законодателя о возможности их применения к этим правоотношениям (определения от 19 апреля 2001 года № 99-О, от 7 февраля 2002 года № 30-О, от 26 января 2010 года № 97-О-О, от 19 октября 2010 года № 1273-О-О, от 25 ноября 2010 года № 1535-О-О и др.). 

Между тем ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТЛАНТ" не приведено норм права, позволяющих применять положения статьи 395 ГК РФ к нарушению неденежного обязательства подрядчика по выполнению работ в установленный соглашением сторон срок.

Оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, определив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности суд считает требования ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТЛАНТ" не обоснованными и не подлежащими удовлетворению.

Судебные расходы распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 8, 12, 309, 310, 330, 702, 711 ГК РФ, ст.ст.  65, 66, 67, 71, 101-103, 110, 112,167-171, 176 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТЛАНТ" в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002" задолженность в размере 11 604 094 руб. 23 коп. (Одиннадцать миллионов шестьсот четыре тысячи  девяносто четыре  рубля, двадцать три копейки), проценты в размере 158 454 руб. 08 коп. (Сто пятьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят четыре рублей,  восемь копеек), проценты, начисляемые на сумму долга с 24.12.2020 по день фактической оплаты исходя из ключевой ставки ЦБ РФ действующей в соответствующий период, расходы по госпошлине в размере 81 813 руб. (Восемьдесят одна тысяча восемьсот тринадцать рублей).

В удовлетворении встречного иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

О.И. Никонова