27_7450613  

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ

 

(резолютивная часть)

Дело № А41-24592/18

20 августа 2018 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе:  

председательствующего судьи Горшковой М.П. 

протокол судебного заседания вел секретарь судебного заседания Кудрявцева С.Ю.  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску (заявлению) Акционерного общества  "СТРОЙТРАНСГАЗ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к Государственному казенному учреждению Московской области "Дирекция дорожного  строительства" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о внесении изменений в государственный контракт при участии в заседании представителей от истца – ФИО1, представитель по доверенности № 01/Д-163 от 20.06.2018 

от ответчика –ФИО2, представитель по доверенности № 16 от 16.01.2018  

установил:

Руководствуясь ст.ст.167, 168, 169, 170 АПК РФ, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования АО "СТРОЙТРАНСГАЗ" удовлетворить в полном объеме. 

Внести в пункт 3.4. Государственного контракта № 76/2015 от 29.12.2015 на  выполнение строительных работ по объекту: Строительство транспортной развязки на  пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорском районе Московской  области (1 пусковой комплекс) изменения, изложив его в следующей редакции: «3.4. Работы  по Контракту должны быть завершены не позднее 48 месяцев с даты начала выполнения  работ».  

Внести в пункт 17.1. Государственного контракта № 76/2015 от 29.12.2015 на  выполнение строительных работ по объекту: Строительство транспортной развязки на  пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорском районе Московской  области (1 пусковой комплекс) изменения, изложив его в следующей редакции: «17.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до  

Взыскать с Государственного казенного учреждения Московской области "Дирекция  дорожного строительства" в пользу Акционерного общества «Стройтрансгаз» расходы по  оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).  

Судья М.П.Горшкова