Арбитражный суд Калининградской области   236040, г. Калининград, ул. Рокоссовского, 2  

E-mail: info@kaliningrad.arbitr.ru 

 http: www.kaliningrad.arbitr.ru 

 Именем Российской Федерации  

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Калининград Дело № А21 - 3894/2023 

«30» мая 2023 года  Резолютивная часть оглашена 23 мая 2023 года.  

В полном объеме решение изготовлено 30 мая 2023 года. 

Арбитражный суд Калининградской области в составе: Судьи Залужной Ю.Д. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  

ФИО1 

 рассмотрев заявление АО «Россети Янтарь» о признании незаконным и отмене  постановления УФАС по Калининградской области № 039/04/9.21-1/2023 от 22.03.2023 года,  

 при участии в судебном заседании: от заявителя: ФИО2 по доверенности от 01.01.2022, 

от заинтересованного лица: ФИО3 по доверенности от 03.02.2023,  

установил:

АО «Россети Янтарь» (далее – Общество, заявитель) обратилось в Арбитражный  суд Калининградской области с заявлением о признании незаконным и отмене  постановления УФАС по Калининградской области (далее - административный  орган) № 039/04/9.21-1/2023 от 22.03.2023 или снижении суммы штрафа.  

 Определением суда о принятии заявления к производству суда стороны извещались о  назначении предварительного заседания и основного судебного заседания суда первой  инстанции.  

 Информация о месте и времени проведения судебного заседания была размещена  арбитражным судом на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» в  установленные законом сроки, согласно ст. 121 АПК РФ.  

 Суд признал дело подготовленным, завершил предварительное судебное заседание и  перешел к рассмотрению дела по существу.  

 В судебном заседании представитель заявителя поддержал заявленные требования.  

 Представитель заинтересованного лица просил отказать в удовлетворении  заявленных требований.  

 Исследовав материалы дела и дав им оценку в соответствии со статьей 71 АПК РФ,  суд приходит к следующему.  

 Как следует из материалов дела, В Управление поступило заявление по факту  нарушения АО «Россети Янтарь» (далее — Общество) сроков выполнения мероприятий  по технологическому присоединению по договору № 5309/05/22 от 19.05.2022 об  осуществлении технологического присоединения объекта, расположенного (который  будет располагаться) по адресу: Калининградская обл, Гурьевский р-н, п. Владимировка  — почтовый адрес ориентира (кадастр. № 39:03:060006:507) (далее — Договор).  

 Пунктом 6 Договора предусмотрено, что срок осуществления мероприятий по  технологическому присоединению составляет 6 месяцев с даты заключения Договора;  соответственно, дата начала исполнения обязательств со стороны Общества — 19.05.2022,  дата окончания — 19.11.2022.  

 На основании поступившего заявления, должностным лицом Управления было  возбуждено дело по признакам административного правонарушения, предусмотренного  ч.2 ст.9.21 КоАП РФ.  

 Общество сообщило заявителю (исх. № ЯЭ/19/9182 от 14.12.2022) о необходимости  выполнения комплекса мероприятий, в том числе проведения закупочных процедур в  соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,  работ, услуг отдельными видами юридических лиц», о передаче технического задания в  работу.  

 Из всех мероприятий по технологическому присоединению утверждено техническое  задание № Z/024610/2022-20 от 12.06.2022 в целях присоединения объекта заявителя.  

 На дату составления протокола, согласно письменным пояснениям Общества (исх. №  ЯЭ/5/13 от 10.01.2023), о выполнении мероприятий и составлении акта о выполнении  технологического присоединения информация отсутствует.  

 Представленное защитником распоряжение № 52 от 13.01.2023 о выполнении  строительно-монтажных работ хозяйственным способом не может рассматриваться как  подтверждение надлежащего исполнения взятых на себя обязательств, поскольку  распоряжение принято на 2 месяц просрочки.  

 Сведений о выполнении обязательств на дату рассмотрения дела не представлено. 

 Повторность нарушения положений статьи 9.21 КоАП РФ в части нарушения  Обществом пунктов Правил № 861 подтверждена вступившими в законную силу актами  Тринадцатого Арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда  Калининградской области по делам №№ А21-1453/2020, А21-2809/2020, А21-2810/2020,  А21-4571/2020, А21-4858/2020, А21-5893/2020, А21-7355/2020, А21-7863/2020, А212267/2021, А21-3462/2021, А21-6563/2021, А21-11/2022, А21-86/2022, А21-204/2022, А21340/2022.  

 09 февраля 2023 года УФАС в отношении Общества был составлен протокол об  административном правонарушении № 039/04/9.21-1/2023.  

 По результатам рассмотрения дела АО «Россети Янтарь» 22 марта 2023 года  привлечено к административной ответственности по ч.2 ст.9.21 КоАП РФ согласно  постановлению № 039/04/9.21-1/2023 о наложении штрафа по делу об административном  правонарушении в размере 600 000 рублей.  

 Не согласившись с постановлением о наложении штрафа по делу об  административном правонарушении, общество обратилось в арбитражный суд с  настоящим заявлением.  

Частью 1 статьи 9.21 КоАП установлена административная ответственность за  нарушение субъектом естественной монополии правил установленного порядка  

подключения (технологического присоединения) к магистральным нефтепроводам и (или)  магистральным нефтепродуктопроводам, электрическим сетям, тепловым сетям,  газораспределительным сетям или централизованным системам горячего водоснабжения,  холодного водоснабжения и водоотведения.  

В соответствии с частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ повторное совершение  административного правонарушения, предусмотренного частью 1 данной статьи, влечет  наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от шестисот тысяч  до одного миллиона рублей.  

Объективная сторона вмененного обществу правонарушения заключается в  нарушении субъектом естественной монополии установленного порядка  технологического присоединения к электрическим сетям.  

В силу статьи 4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ "О естественных  монополиях" услуги по передаче электрической энергии отнесены к сфере деятельности  субъектов естественных монополий.  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861  утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств  потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а  также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и  иным лицам к электрическим сетям (далее — Правила № 861).  

 Согласно пункту 16 Правил № 861 договор об осуществлении технологического  присоединения, заключаемый с физическим лицом в целях технологического  присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых  составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке  присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и  иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и  электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, должен содержать  срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который не  может превышать 6 (шесть) месяцев.  

 Согласно подпункту «и» пункта 9 Правил № 861, в заявке, направляемой заявителем  (за исключением лиц, указанных в пунктах 12-14 настоящих Правил), должны быть в  зависимости от конкретных условий указаны сроки проектирования и поэтапного  введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и  очередям).  

 При этом Заявители — физические лица — из указанного пункта исключены. В силу  пункта 14 Правил № 861 заявка физического лица не предусматривает указания на  поэтапное введение в эксплуатацию энергопринимающих устройств.  

 В силу пункта 15 Правил № 861 в адрес заявителей, за исключением случаев  осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту, сетевая  организация направляет для подписания заполненный и подписанный ею проект договора  в 2 экземплярах и подписанные технические условия как неотъемлемое приложение к  договору в течение 20 рабочих дней со дня получения заявки.  

В соответствии с пунктом 16.1 Правил № 861, заявители несут балансовую и  эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка  заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация,  если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем,  

заключенным на основании его обращения в сетевую организацию, а также абзацем  пятым настоящего пункта.  

 Согласно пункту 18 Правил № 861, мероприятия по технологическому  присоединению включают в себя:  

а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их  согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского  управления в технологически изолированных территориальных  электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий  электростанцией — согласование их с системным оператором (субъектом  оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных  территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми  организациями;  

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно  обязательствам, предусмотренным техническими условиями;  

в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного  участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за  исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской  Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации  не является обязательной;  

г) выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий,  включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению  энергопринимающих устройств.  

 Исходя из системного толкования положений пунктов 15, 16.1, 18, 25(1) Правил   № 861, определение мероприятий в целях осуществления технологического  присоединения объекта, в том числе определение точки присоединения является  исключительной прерогативой сетевой организации, так как только сетевая организация  имеет в своем штате специалистов, способных оценить схемно-режимную обстановку в  каждом конкретном энергорайоне. Только сетевая организация, владеющая  распределительными сетями, может определить их техническое состояние, степень  загруженности и изношенности, дать заключение о наличии/отсутствии возможности,  целесообразности/нецелесообразности осуществления технологического присоединения  объектов заявителей к тому или иному объекту электросетевого хозяйства.  

В течение 2020-2022г. Общество неоднократно привлекалось к административной  ответственности по части 1 статьи 9.21 КоАП РФ, штрафы оплачены, следовательно,  настоящее деяние как повторное квалифицировано Управлением обоснованно.  

Поскольку факт нарушения и вина общества подтверждены материалами дела,  нарушений установленного КоАП РФ порядка производства по делу об  административном правонарушении, имеющих существенный характер, не выявлено, то  оснований для вывода о несоответствии оспариваемого постановления антимонопольного  органа требованиям законодательства у суда не имеется.  

Вместе с тем, суд считает возможным изменить оспариваемое постановление в части  назначения наказания, снизив размер назначенного обществу административного штрафа  до 300 000 руб. исходя из следующего.  

В соответствии с частью 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ при наличии исключительных  обстоятельств, связанных с характером совершенного административного  правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением  

привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган,  должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо  жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных  правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в  размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного  соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если  минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не  менее ста тысяч рублей.  

При назначении административного наказания в соответствии с частью 3.2  настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее  половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для  юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего  Кодекса (часть 3.3 статьи 4.1 КоАП РФ).  

Оценив обстоятельства дела, принимая во внимание характер правонарушения,  конституционный принцип соразмерности административного наказания, а также  приведенные обществом доводы о том, им утверждено техническое задание; выполнены  строительно-монтажные работы хозяйственным способом, штраф в размере 600 000 руб.  является чрезмерным, не соответствует тяжести совершенного правонарушения и носит  неоправданно карательный характер.  

Кроме того, на момент вынесения решения суда в материалы дела представлен Акт  об осуществлении технологического присоединения от 27.04.2023, срок нарушения  выполнения работ является незначительным (4 месяца).  

Суд считает необходимым снизить размер назначенного обществу штрафа до 300  000 рублей.  

При таких обстоятельствах постановление Управления от 22.03.2023 о наложении  штрафа по делу об административном правонарушении № 039/04/9.21-1/2023 подлежит  изменению в части назначенного обществу наказания.  

Руководствуясь статьями 167-170, 211 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Постановление УФАС по Калининградской области от 22.03.2023г. № 039/04/9.21- 1/2023 изменить, снизив размер назначенного АО «Россети Янтарь» штрафа до 300 000  рублей.  

Решение может быть обжаловано в течение 10 дней со дня принятия в Тринадцатый  арбитражный апелляционный суд.  

 Ю.Д.Залужная 

 Судья     (подпись, фамилия) 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 16.03.2023 6:39:00Кому выдана Залужная Юлия Дмитриевна