АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru         E-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А83-15206/2020

22 апреля 2021 года

город Симферополь

   

Резолютивная часть решения оглашена 15 апреля 2021

Решение в полном объеме изготовлено 22 апреля 2021

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Можаровой М.Е., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по исковому заявлению 

Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «КапРемСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании,

с участием представителей:

от истца не явился;

от ответчика – ФИО2, представитель по доверенности № б/н от 28.12.2020 г., сроком на 1 год;

УСТАНОВИЛ:

Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым» (далее по тексту – НО «РФКРМКД РК», Фонд, истец) обратилась в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «КапРемСтрой» (далее по тексту – ООО «КапРемСтрой», Общество, ответчик) о взыскании неустойки за нарушение условий договора в размере 488 639,20 руб., а также расходов по оплате государственной пошлины.

Определением от 18.09.2020 г. суд принял исковое заявление к производству с рассмотрением дела в порядке упрощенного производства.

Определением от 11.11.2020 г. суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, назначено предварительное судебное заседание на 17.12.2020 г.

Определением от 17.12.2020 г. суд в порядке, предусмотренном статьей 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту - АПК РФ). Судебные заседания неоднократно откладывались, так определением от 04.03.2021 г. суд отложил судебное заседание по делу на 08.04.2021 г. 

В судебном заседании от 08.04.2021 в соответствии с положениями статьи 163 АПК РФ был объявлен перерыв до 15.04.2021 года 16 часов 00 минут.

Представитель истца явку в судебное заседание не обеспечил, извещен о времени и месте судебного заседания под расписку.

Кроме того, суд в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 121 АПК РФ, разместил информацию о совершении процессуальных действий по данному делу на сайте Арбитражного суда Республики Крым - в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.crimea.arbitr.ru.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что истец надлежащим образом уведомлен о времени и месте судебного заседания. 

Согласно части 3 статьи 156 АПК РФ при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

Таким образом, суд определил рассмотреть дело в отсутствие истца.

От ответчика до начала судебного заседания поступили дополнительные документы, которые суд приобщил к материалам дела. В ходе судебного заседания, представитель ответчика просил отказать в удовлетворении исковых требований по основаниям, изложенным в отзыве на иск, указывая на то, что работы Обществом выполнены в установленные сроки.

Выслушав пояснения представителя ответчика, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу о том, что исковые требования истца не подлежат удовлетворению, исходя из следующего.

Так, судом установлено, что 19.11.2017 года между НО «РФКРМКД РК» (Заказчик) и ООО «КапРемСтрой» (Подрядчик) по итогам проведения электронного аукциона                               № РТС291А170003 заключен договор на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества (ремонт фасада и кровли) и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества (ремонт фасада и кровли) в многоквартирном доме по адресу; Республика Крым, Нижнегорский район, пгт. Нижнегорский, пер. Чехова, д. 3 (далее по тексту – Договор).

В соответствии с п. 2.1. Договора Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязательство в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 9 к настоящему Договору) своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организации, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества (ремонт кровли) и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества (ремонт кровли) в многоквартирном (-ых) доме (-ах) (далее «Работы») по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, пгт. Нижнегорский, пер. Чехова, д. 3 включая разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных работ на каждом Объекте, поставку Материалов, Изделий, Конструкций, своевременное устранение недостатков (дефектов), сдачу каждого Объекта (-ов) по Акту приемки выполненных работ по разработке проектной документации акту приемки выполненных работ по Объекту, выполнение обязательств в течение Гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных работ. Заказчик принимает надлежащим образом выполненные Генподрядчиком работы и оплачивает их в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

В разделе 3 Договора, определена цена договора, которая составила 3 537 129,34 руб.

Оплата выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по настоящему договору производится заказчиком с учетом ранее перечисленного аванса в течение 10 (десяти) дней (без учета выходных и праздничных дней) после предоставления генподрядчиком надлежаще оформленных в соответствии с п. 1.5, 3.7 настоящего договора и при условии выполнения требования, предусмотренного п. 3.8. настоящего договора, Акта приемки выполненных работ по Объекту, счета, счета-фактуры, Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Пометки, исправления, подчистки не допускаются, такие документы юридической силы не имеют (пункт 3.6 Договора).

Согласно пункта 3.7 Договора с целью осуществления расчетов по настоящему договору генподрядчик представляет Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не менее, чем в 4 (четырех) экземплярах, а также представляет Отчет о выполненных работах по форме согласно Приложения № 7 к настоящему договору. Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 должны быть оформлены в строгом соответствии с действующими требованиями к оформлению указанных документов; пометки, исправления, подчистки не допускаются, такие документы юридической силы не имеют.

Заказчик в течение 5 (пяти) дней (без учета выходных и праздничных дней) с момента получения документов рассматривает представленные документы и уведомляет генподрядчика о готовности объекта к приемке выполненных работ в соответствии с пунктом 7.8 договора либо направляет обоснованный отказ с указанием замечаний и сроков их устранения. Неполучение генподрядчиком отказа заказчика в установленный срок не влечет за собой признание работ принятыми.

При непредставлении Генподрядчиком оформленных с учетом замечаний заказчика первичных документов (формы КС-2, КС-3, Отчет) в срок, установленный соответствующим документом заказчика и (или) в случае повторного предоставления генподрядчиком первичных документов (формы КС-2, КС-3, Отчет) без устранения выявленных замечаний, генподрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего договора.

Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) подписываются уполномоченными представителями сторон одновременно с подписанием Акта приемки выполненных работ по объекту.

Генподрядчик обязуется выполнить работы по договору, как в целом, так и по отдельным объектам работ в соответствии с Графиком производства и стоимости работ (Приложение №1 к настоящему Договору). Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования генподрядчика о продлении сроков выполнения работ, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем договоре, либо предусмотренных нормами действующего законодательства РФ и ПП РФ № 615 от 01.07.2016г. Сроки начала и окончания выполнения работ по каждому объекту, а также работ в целом, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения генподрядчиком сроков производства работ (пункт 4.1 Договора).

Согласно пункта 4.2.1 договора начальный срок выполнения работ - согласно Графику производства и стоимости работ (Приложение № 1 к Договору), со дня заключения Договора.

Согласно пункта 4.2.2 Договора конечный срок выполнения работ - последний день установленного срока выполнения работ согласно Графику производства и стоимости работ (Приложение № 1 к Договору).

В соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 1 к Договору) конечным сроком выполнения работ является 01.07.2018 г. При этом, срок выполнения работ в части составления проектно-сметной документации установлен до 01.02.2018.

В соответствии с пунктом 12.1 Договора при нарушении условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором.

Согласно пункта 12.7.9 Договора в случае задержки Генподрядчиком срока начала и/или завершения работ по капитальному ремонту общего имущества по объекту в соответствии с Графиком производства и стоимости работ (начальный и конечный сроки выполнения работ) Генподрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества по объекту за каждый день просрочки.

Далее, между истцом и ответчиком подписано дополнительное соглашение к Договору, согласно которого из объема работ, подлежащего выполнению Обществом была исключена подготовка проектно-сметной документации.

Согласно уточненных исковых требований, истец указывает на то, что Подрядчиком просрочен срок сдачи выполненных работ, а именно.

- работы по капитальному ремонту общего имущества (фасад) на сумму 1 365 599,09 руб. сданы 14.08.2018 г.;

 - работы по капитальному ремонту общего имущества (кровля) на сумму 2 178 027,21 руб. сданы 30.12.2018 г.;

В силу статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, участвующих в деле, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

По своей правовой природе заключенный сторонами Договор является договором строительного подряда.

В соответствии с частью 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) выполнить определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 708 ГК РФ, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются. 

Согласно статьи 12 ГК РФ взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права.

Частью 1 статьи 329 ГК РФ предусмотрено, что исполнение обязательств может обеспечиваться, в частности, неустойкой.

Согласно части 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Обосновывая свои исковые требования, истец ссылается на нарушение ответчиком сроков выполнения работ по Договору.

Согласно статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Доказательства, на основании которых лицо, участвующее в деле, обосновывает свои требования и возражения, должны быть допустимыми, относимыми и достаточными.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (статья 9 АПК РФ).

В соответствии с положениями статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Так, истцом подаче искового заявления представлены акт выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3, в которых отсутствуют даты подписания указанных документов. Иные документы, свидетельствующие о принятии работ, выполненных Обществом, также представлены истцом без указания срока выполнения работ. В последующем истцом представлены копии соответствующих документов с указанием о принятии работ по фасаду – 14.08.2018, по кровле – 30.12.2018. Одновременно, в качестве подтверждения выполнения ответчиком работ с нарушением срока, истцом указывается на то, что Фондом оплата работ по Договору была осуществлена только в январе 2019 года.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик также представил подписанные сторонами акты по форме КС-2 и КС3.

Ответчиком в материалы дела во исполнение взятых на себя обязанной в рамках заключенного договора, представлены акты о приемке выполненных работ за август 2018 г. датированные 01.08.2018 г., на сумму 1 365 599,09 руб. (фасад) и от 01.08.2018 г. на сумму 2 178 027,21 руб. (кровля), справки о стоимости выполненных работ от 01.08.2018 г. на сумму 1 365 599,09 руб. и 2 178 027,21 руб. соответственно.

Также ответчиком представлены акты приемки выполненных работ (комиссионные), датированные 30.07.2018 г. 

Кроме того, согласно представленного Фондом журнала производства работ, срок окончания работ по кровле указан как 26.07.2018 г., по фасаду – 30.07.2018 г.

Оценивая представленные сторонами доказательства, суд полагает, что ООО «КапРемСтрой» представлены надлежащие доказательства выполнения работ соответственно по кровле и фасаду в срок до 01.08.2018.

Соответствующие выводы суда основаны на совокупности представленных доказательств, в том числе данных журнала производства работ.

Также, возражая против удовлетворения исковых требований в части взыскания пени, ООО «КапРемСтрой» также указывает, что в связи с подписанием сторонами дополнительного соглашения, обязанность по выполнению работ по разработке проектно-сметной документации была возложена на Фонд. Соответствующее дополнительное соглашение подписано сторонами 30.05.2018, соответствующая проектная документация была передана Обществу для выполнения работ 30.05.2018. Акты об открытии работ также датированы 30.05.2018 г. Следовательно, ранее указанной даты (30.05.2018) ответчик не имел возможности приступить к выполнению ремонтных работ.

Соответствующие обстоятельства НО «РФКРМКД РК» не опровергнуты.

При этом, как следует из положений Договора, в том числе Графика производства работ, утвержденного Приложением № 1 к Договору, выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества должно было проводится в период с 01.02.2018 по 01.07.2018., т.е. в течение пяти месяцев.

Как установлено в статье 743 ГК РФ, подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете. Договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию.

Заказчик обязан в случаях и в порядке, предусмотренных договором строительного подряда, передавать подрядчику в пользование необходимые для осуществления работ здания и сооружения, обеспечивать транспортировку грузов в его адрес, временную подводку сетей энергоснабжения, водо- и паропровода и оказывать другие услуги (часть 2 статьи 747 ГК РФ).

В соответствии с положениями статьи 328 ГК РФ встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств. В случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков. 

Ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне (часть 2 статьи 328 ГК РФ). 

Согласно статье 406 ГК РФ, кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства. 

Анализ взаимосвязанных норм статей 743, 747 и 750 ГК РФ позволяет прийти к выводу о том, что доступ к объекту выполнения работ является встречным обязательством Заказчика, без которого невозможно выполнение своих обязательств в части строительных работ Подрядчиком.

Таким образом, суд соглашается с позицией ответчика о том, что начало выполнения работ Обществом не могло быть ранее, чем 30.05.2018 г.

При этом, срок выполнения строительных работ (01.08.2018) не превысил срока, предусмотренного Договором, т.е. пяти месяцев.

При таких обстоятельствах, суд полагает, что просрочки ответчиком (Подрядчиком) исполнения обязательств по Договору в части выполнения строительных (ремонтных) работ судом не установлено.

При этом суд отмечает, что истец свои исковые требования мотивирует именно просрочкой выполнения ООО «КапРемСтрой» ремонтных работ.

Одновременно, оценивая довод истца о том, что оплата работ Фондом была произведена только в январе 2019 года, то суд отмечает,  указанные обстоятельства не могут являться доказательствами просрочки своих обязательств со стороны Подрядчика и, следовательно, не могут быть положены судом в основу настоящего решения.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что материалами дела подтверждается надлежащее исполнение ответчиком своих обязательств по договору в части выполнения ремонтных работ, в связи с чем в удовлетворении исковых требований НО «РФКРМКД РК» следует отказать.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Согласно уменьшения истцом размера исковых требований, судом в порядке статьи 104 АПК РФ, разрешается вопрос о возврате излишне уплаченной государственной пошлины.

Так, истцом при подаче иска уплачена государственная пошлина в размере 12 773,00 руб., что подтверждается платежным поручением № 0524 от 17.08.2020 (л.д. 10 Том 1).

Ввиду уменьшения исковых требований до суммы 455 121,71 руб., ранее принятого судом возврату государственная пошлина из федерального бюджета подлежит в размере 671,00 руб.

Следовательно, государственная пошлина, оплаченная истцом при подаче иска в остальной сумме, подлежит отнесению на истца и возмещению не подлежит.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 104, 110, 167 – 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме.

Возвратить Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 671,00 руб.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объеме) постановления суда апелляционной инстанции. 

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Судья                                                             М.Е. Можарова