АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2

http://kostroma.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

Дело № А31-13695/2020

г. Кострома

24 марта 2021 года

Резолютивная часть определения объявлена 17 марта 2021 года.

Полный текст определения изготовлен 24 марта 2021 года.

Арбитражный суд Костромской области в составе судьи Хомяка Николая Георгиевича, при ведении протокола секретарем судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Яравтодор" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании устранить недостатки работ по муниципальному контракту в рамках гарантийных обязательств, взыскании 2 317 793 рублей 85 копеек штрафа,

при участии представителей:

от истца: ФИО2 (доверенность от 08.02.2021),

от ответчика: не явился,

установил:

Администрация муниципального района города Нерехта и Нерехтского района Костромской области (далее – истец) обратилась в арбитражный суд Костромской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Яравтодор» (далее – ответчик), требуя взыскать штраф в сумме 2 317 793 рублей 85 копеек, а также обязать безвозмездно выполнить следующие работы по муниципальному контракту № 01413000266190000210001 от 08 мая 2019 года: 

- произвести доуплотнение покрытия из щебня с расклинцовкой на всем протяжении участка автомобильной дороги;

- продольный профиль кюветов довести до проектных отметок, ликвидировав места застоя воды на всем протяжении участка автомобильной дороги;

- произвести подсыпку, уплотнение, планировку обочины у водопропускной трубы на ПК 10-40;

- произвести подсыпку и уплотнение берм дорожных знаков:

- произвести оштукатуривание в местах шелушений бетонного укрепления оголовка водопропускных труб на всем протяжение участка автомобильной дороги:

- устранить расхождение швов входного оголовка водопропускных труб па ПК 21+45, ПК 1+20;

- произвести очистку от намывного грунта укрепления русла водопропускных труб на всем протяжении участка автомобильной дороги;

- произвести обратную засыпку бетонного быстротока;

- произвести оштукатуривание в местах шелушения монолитного бетона быстротоков и водобойных колодцев;

- произвести оштукатуривание бетонных стенок быстротоков:

- довести до проектных геометрических параметров укрепления кюветов щебнем на всем протяжении участка автомобильной дороги.

В судебном заседании представитель истца заявленные требования поддержал.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства, явку представителей для участия в судебном заседании не обеспечил, отзыв на исковое заявление не представил.

Суд, руководствуясь частями 1, 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрел дело имеющимся в нем доказательствам в отсутствие ответчика.

Исследовав материалы дела, суд установил следующие фактические обстоятельства. 

8 мая 2019 года истец (заказчик) и ответчик (подрядчик) заключили контракт № 01413000266190000210001, согласно которому ответчик обязался выполнить работы по реконструкции объекта «Автомобильная дорога подъезд к ферме д.Хомутово в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район Костромской области» в соответствии с проектно-сметной документацией, графиком производства работ, а заказчик - принять работы и оплатить их.

Стоимость работ по контракту составляет 46 355 877 руб. (п. 3.1 контракта). 

Согласно п. 9.2 контракта Заказчик в течение 10-ти рабочих с момента получения извещения от Подрядчика о выполнении работ, обязан осуществить приемку выполненной работы (ее результатов) в части соответствия их объема требованиям, установленным контрактом либо направить Подрядчику мотивированный письменный отказ в подписании с указанием соответствующих причин и сроков их устранения.

Подрядчик обязан в течение 3-х рабочих дней с момента получения возражений Заказчика произвести корректировку возвращенных документов и повторно направить их Заказчику.

Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Подрядчиком документов производится в течение 5-ти рабочих дней после устранения последним причин отказа в подписании документов.

Приемка Заказчиком работ производится с проведением экспертизы результатов выполненной работы в части соответствия условиям Контракта.

Работы считаются принятыми с даты проведения Заказчиком экспертизы выполненных работ. 

Пунктом 10.3.1. предусмотрено, что за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн.рублей:

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

в) 1 процент пены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно):

и составляет 5 процент(ов) цены контракта или 2 317 793,5 рублей.

Приложение №1 содержит гарантийные условия (пункт 7): на время выполнения работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Объем предоставления гарантий качества работ: Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный Заказчиком, возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема-сдачи результата работ по устранению недостатков Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов на Объекте и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов и работ в соответствии с гарантийным паспортом составляет: 

Земляное полотно - не менее 8 лет,

Основание дорожной одежды -  не менее 8 лет,

Обочины - не менее 5 лет,

Искусственные сооружения - не менее 6 лет,

Дорожные знаки - от 3 лет,

Столбики сигнальные дорожные -  от 4 лет,

Посев трав - 1 год. 

19 декабря 2019 года комиссией, в состав которой в том числе входили представители сторон, подписан акт приемки завершенного строительством объекта.

2 июня 2020 года составлен комиссионный акт обследования объекта с указанием выявленных дефектов, определен срок их устранения - до 10 июня 2020 года.

15 июля 2020 года в связи с неисполнением гарантийных обязательств по муниципальному контракту в установленный срок ответчику направлено требование о взыскании штрафа.

Указанное требование оставлено ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском. 

Оценив представленные доказательства на основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд находит требования истца подлежащими частичному удовлетворению по следующим мотивам.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательств должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Сложившиеся между сторонами правоотношения вытекают из муниципального контракта № 01413000266190000210001 от 08 мая 2019 года, являющегося по своей правовой природе договором подряда на выполнение ремонтных работ, и регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) о договоре подряда, а также Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон N 44-ФЗ).

Согласно пункту 1 статьи 702 Кодекса по договору подряда подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить ее.

Согласно п. 2 ст. 755 ГК РФ подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

На основании п. 3 ст. 724 ГК РФ заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

Факт обнаружения истцом в течение гарантийного срока недостатков в выполненной ответчиком работе судом установлен.

В пределах гарантийного срока действует презумпция вины подрядчика за недостатки (дефекты) выполненных работ и на него в соответствии со статьей 65 АПК РФ возлагается обязанность доказать, что работы им выполнены качественно, а возникшие в период гарантийного срока недостатки (дефекты) не являются следствием выполненных подрядчиком работ.

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Вместе с тем вышеуказанные доводы ООО " Яравтодор " не опровергнуты. Каких-либо доказательств, подтверждающих отсутствие вины подрядчика во вмененных нарушениях и выявленных недостатках, ответчиком не представлено.

В соответствии со статьей 329 (пунктом 1) ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В статье 330 (пункте 1) ГК РФ предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Нарушение срока исполнения обязательств, в том числе гарантийных, в соответствии с пунктом 10.3.1 контракта является основанием для привлечения должника к ответственности – взыскания штрафа в пользу истца.

В силу части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, иск подлежит удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате госпошлины подлежат отнесению на ответчика.

В соответствии с частью 1 статьи 174 АПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

Принимая во внимание обстоятельства дела, объем гарантийных обязательств, подлежащих исполнению, суд полагает возможным установить ответчику 30-дневный срок для исполнения судебного акта с момента вступления решения в законную силу

На основании вышеизложенного, руководствуясь со статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Яравтодор»  (ИНН 

<

***> , ОГРН 

<

***>) в течение 30 рабочих дней после вступления решения суда в законную силу исполнить гарантийное обязательство в рамках муниципального контракта № 01413000266190000210001 от 08 мая 2019 года, а именно:

1.1. Безвозмездно устранить дефекты, выявленные в течение гарантийного срока по муниципальному контракту № 01413000266190000210001 от 08 мая 2019 года: 

- произвести доуплотнение покрытия из щебня с расклинцовкой на всем протяжении участка автомобильной дороги;

- продольный профиль кюветов довести до проектных отметок, ликвидировав места застоя воды на всем протяжении участка автомобильной дороги;

- произвести подсыпку, уплотнение, планировку обочины у водопропускной трубы на ПК 10-40;

- произвести подсыпку и уплотнение берм дорожных знаков:

- произвести оштукатуривание в местах шелушений бетонного укрепления оголовка водопропускных труб на всем протяжение участка автомобильной дороги:

- устранить расхождение швов входного оголовка водопропускных труб па ПК 21+45, ПК 1+20;

- произвести очистку от намывного грунта укрепления русла водопропускных труб на всем протяжении участка автомобильной дороги;

- произвести обратную засыпку бетонного быстротока;

- произвести оштукатуривание в местах шелушения монолитного бетона быстротоков и водобойных колодцев;

- произвести оштукатуривание бетонных стенок быстротоков:

- довести до проектных геометрических параметров укрепления кюветов щебнем на всем протяжении участка автомобильной дороги.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Яравтодор»  (ИНН 

<

***> , ОГРН 

<

***>) в пользу администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 2 317 793 руб. 85 коп. штрафа.

Исполнительные листы выдаются по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Яравтодор»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 40 589 рублей.

Ответчику предлагается добровольно уплатить в доход федерального бюджета государственную пошлину в десятидневный срок со дня вступления в законную силу решения суда в порядке, установленном в статье 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации и представить доказательства ее уплаты в арбитражный суд.

Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать по истечении 10 дней со дня вступления в законную силу решения суда в случае непредставления ответчиком сведений о ее добровольной уплате.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месячного срока со дня его принятия или в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Костромской области.

СудьяХомяк Н. Г.