АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-10253/2024

г. Чебоксары

07 февраля 2025 года

Резолютивная часть решения оглашена 30.01.2025.

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Кисаповой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Александровой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "С-Кран", ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Россия 428000, г. Чебоксары, Чувашская Республика, ул. Афанасьева д. 8, лит. А2, оф. 415

к индивидуальному предпринимателю ФИО1, ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Россия 432063, г. Ульяновск, Ульяновская область, 

о взыскании 7 881 185 руб. 77 коп.

при участии:

от истца: ФИО2 по доверенности от 01.10.2024

установил:

общество с ограниченной ответственностью «С-Кран» обратилось в суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании 7 728 515 руб.90 коп. неосновательного обогащения, 152 669 руб.87 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 221.10.2024 по 25.11.2024 и далее по день оплаты долга.

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением обязательств по договорам подряда №02/07-2023 от 21.07.2023, №08/06-2023 от 08.06.2023, №12/11-2023 от 10.11.2023.

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержала по основаниям, изложенным в иске.

Ответчик, будучи надлежащим образом, извещен о времени и месте судебного заседания, полномочного представителя в суд не направил.

На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в его отсутствие.

Выслушав представителя истца, изучив материалы дела, суд установил.

05.04.2023 между Предпринимателем (исполнитель) и Обществом (заказчик) заключен договор на выполнение работ №01/04-2023, по условиям которого заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства произвести демонтажные работы на объекте «Реконструкция Корпуса №351 под размещение промышленного технопарка «ВОЛГАХИМ» (далее - объект) по адресу: 

<

...> влд.10.1, корпус 351, а заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить обусловленную договором цену.

Все работы, предусмотренные договором, выполняются исполнителем в соответствии с проектной документацией (шифр 00735-351) и действующим законодательством Российской Федерации (пункт 1.2. договора).

Стоимость работ и форма оплаты формируется согласно подписанной Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью договора (пункт 2 договора).

Пунктом 3.1. договора установлено, что срок выполнения работ указывается в Спецификации, являющихся неотъемлемой частью договора.

Согласно Спецификации от 05.04.2023 стоимость работ составляет 20335262 руб. 89 коп. Оплата за выполненные работы осуществляется заказчиком в течение 20 календарных дней после подписания актов выполненных работ.

Пунктом 3 спецификации установлен срок выполнения работ - 90 рабочих дней, который начинает исчисляться с момента подписания настоящей Спецификации.

Во исполнении принятых на себя обязательств ответчик выполнил работы на сумму 20335262 руб. 91 коп., что подтверждается актами о приемке выполненных работ № 1 от 08.06.2023, № 2 от 19.06.2023.

01.06.2023 между Обществом и Предпринимателем заключен договор на выполнение работ, по условиям которого заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства произвести демонтажные работы на объекте «Реконструкция Корпуса №351 под размещение промышленного технопарка «ВОЛГАХИМ» (далее - объект) по адресу: 

<

...> влд.10.1, корпус 351, а заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить обусловленную договором цену.

Согласно пункта 2.1. договора стоимость работ составляет 18 230 000 руб. 00 коп., и может уточняться по факту выполненных работ.

Оплата работ производится в следующем порядке: в качестве авансового платежа заказчик оплачивает 50% от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1. договора после подписания договора сторонами. Заказчик оплачивает оставшуюся стоимость работ в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1. договора в течение 3 (трех) календарных дней после окончания работ и подписания акта выполненных работ (пункт 2 договора).

Пунктом 3.1. договора установлено, срок выполнения работ составляет 30 рабочих дней, который начинает исчисляться с момента подписания договора.

Также между сторонами 26.06.2023 заключен договор на выполнение работ № 08/06-2023, по условиям которого заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства произвести демонтажные работы на объекте: «Реконструкция Корпуса №351 под размещение промышленного технопарка «ВОЛГАХИМ» (далее - объект) по адресу: Новочебоксарск, ул. Промышленная, влд.101, корпус 351, а заказчик обязуется принять результаты работы и оплати-обусловленную договором цену.

Все работы, предусмотренные договором, выполняются исполнителем в соответствии с проектной документацией (шифр 00735-351) и действующим законодательством Российской Федерации (пункт 1.2. договора).

Стоимость работ и форма оплаты формируется согласно подписанной Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью договора (пункт 2 договора).

Согласно Спецификации от 26.06.2023 стоимость работ составляет 2 923 507 руб. 76 коп. Авансовый платеж в размере 1 450 000 руб. 00 коп. оплачивается заказчиком в течение 10 календарных дней после подписания Спецификации. Окончательная оплата оплачивается заказчиком в течение 30 календарных дней после окончания работ подписания акта выполненных работ.

Пунктом 3.1. договора установлено, что срок выполнения работ указывается в Спецификации, являющихся неотъемлемой частью договора.

Пунктом 3 спецификации установлен срок выполнения работ - 90 рабочих дней, который начинает исчисляться с момента подписания Спецификации.

Во исполнении принятых на себя обязательств ответчик выполнил работы на сумму 440051 руб. 36 коп., что подтверждается актом выполненных работ № 4 от 02.10.2023.

Кроме того, 21.07.2023 между сторонами заключен договор на выполнение работ № 02/07-2023, по условиям которого заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы, указанные в спецификациях, прилагаемых к договору, на объекте «Реконструкция Корпуса № 351 под размещение промышленного технопарка «ВОЛГАХИМ» по адресу: 

<

...> влд.101, корпус 351, а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить обусловленную договором цену.

Все работы, предусмотренные договором, выполняются исполнителем в соответствии с проектной документацией (шифр 00735-351) и действующим законодательством Российской Федерации (пункт 1.2. договора).

Стоимость работ и форма оплаты указывается в подписанных Спецификациях (Приложение к договору), являющейся неотъемлемой частью договора (пункт 2 договора).

Пунктом 3.1. договора установлено, что срок выполнения работ указывается в Спецификации, являющихся неотъемлемой частью договора.

Согласно Спецификации № 1 от 21.07.2023 стоимость работ - 212 297 руб. 49 коп. Оплата за выполненные работы осуществляется заказчиком в течение 20 календарных дней после подписания актов выполненных работ. Окончательная оплата производится заказчиком в течение 30 календарных дней после окончания работ и подписания акта выполненных работ.

Пунктом 3 спецификации установлен срок выполнения работ - 60 календарных дней, который начинает исчисляться с момента подписания настоящей Спецификации.

Согласно Спецификации № 2 от 02.10.2023 стоимость работ - 556985 руб. 51 коп. Оплата за выполненные работы осуществляется заказчиком в течение 20 календарных дней после подписания актов выполненных работ. Окончательная оплата производится заказчиком в течение 30 календарных дней после окончания работ и подписания акта выполненных работ.

Пунктом 3 спецификации установлен срок выполнения работ - 180 календарных дней, который начинает исчисляться с момента подписания настоящей Спецификации.

Согласно Спецификации № 3 от 05.10.2023 стоимость работ - 726420 руб. 00 коп. Окончательная оплата производится заказчиком в течение 30 календарных дней после окончания работ и подписания акта выполненных работ.

Срок выполнения работ составляет 120 (Сто двадцать) календарных дней, который начинает исчисляться с момента подписания настоящей Спецификации (пункт 3 спецификации).

Во исполнении принятых на себя обязательств ответчик выполнил работы на сумму 1252060 руб. 56 коп., что подтверждается актами выполненных работ № 8 от 30.09.2023, № 11 от 30.10.2023, № 12 от 30.12.2023, № 10 от 18.12.2023.

Также 10.11.2023 между сторонами подписан договор на выполнение работ № 12/11-2023, по условиям которого, заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства произвести работы, указанные в спецификациях, прилагаемых к договору, на объекте «Реконструкция Корпуса № 351 под размещение промышленного технопарка «ВОЛГАХИМ» по адресу: 

<

...> влд.101, корпус 351, а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить обусловленную договором цену.

Все работы, предусмотренные договором, выполняются исполнителем в соответствии с проектной документацией (шифр 00735-351) и действующим законодательством Российской Федерации (пункт 1.2. договора).

Стоимость работ и форма оплаты указывается в подписанных Спецификациях, являющейся неотъемлемой частью договора (пункт 2 договора).

Пунктом 3.1. договора установлено, что срок выполнения работ указывается в Спецификации, являющихся неотъемлемой частью договора.

Согласно Спецификации № 1 от 10.11.2023 стоимость работ - 400500 руб. 00 коп. Оплата производится в следующем порядке: авансовый платеж в размере 1 356 900 руб. 00 коп., оплачивается заказчиком в течение 20 календарных дней после подписания Спецификации. Окончательная оплата производится заказчиком в течение 30 календарных дней после окончания работ и подписания акта выполненных работ.

Срок выполнения работ составляет 90 рабочих дней, который начинает исчисляться с момента подписания настоящей Спецификации (пункт 3 спецификации).

Согласно Спецификации № 2 от 20.11.2023 стоимость работ - 561600 руб. 00 коп. Оплата производится в следующем порядке: окончательная оплата производится заказчиком в течение 30 календарных дней после окончания работ и подписания акта выполненных работ.

Срок выполнения работ составляет 30 календарных дней, который начинает исчисляться с момента подписания настоящей Спецификации (пункт 3 спецификации).

Во исполнении принятых на себя обязательств ответчик выполнил работы на сумму 6078944 руб. 00оп., что подтверждается актами выполненных работ № 3 от 22.01.2024, № 6 от 04.12.2023, № 7 от 2512.2023, № 2 от 12.01.2024, № 9 от 14.12.2023, № 1 от 26.01.2024, № 4 от 12.02.2024.

Общая стоимость выполненных Предпринимателем работ по вышеуказанным договорам составляет 29871396 руб. 22 коп.

Истец платежными поручениями от 25.10.2023 № 280, от 26.02.2024 № 221, от 27.02.2024 № 239, от 27.11.2023 № 467, от 29.02.2024 № 259, от 29.02.2024 № 260, от 30.10.2023 № 311, от 30.10.2023 № 312, от 19.02.2024 № 185, от 19.02.2024 № 186, от 19.10.2023 № 249, от 21.12.2023 № 578, от 22.01.2024 № 49, от 22.02.2024 № 216, от 24.11.2023 № 459, от 24.11.2023 № 460, от 24.11.2023 № 461, от 24.11.2023 № 462, от 13.02.2024 № 143, от 13.02.2024 № 143, от 13.02.2024 № 144, от 13.03.2024 № 353, от 14.08.2023 № 96, от 14.11.2023 № 384, от 14.11.2023 № 386, от 14.11.2023 № 385, от 17.07.2023, от 17.08.2023 № 111, от 18.10.2023 № 247, от 18.10.2023 № 246, от 08.11.2023 № 352, от09.08.2023 № 88, от 09.08.2023 № 89, от 09.11.2023 № 362, от 09.11.2023 № 363, от 11.03.2024 № 341, от 11.08.2023 № 91, от 11.12.2023 №533, от 11.12.2023 № 534, от 12.07.2023 № 21, от 01.11.2023 № 322, от 01.11.2023 № 323, от 02.11.2023 № 329, от 02.11.2023 № 330, от 03.07.2023 № 11, от 05.07.2023 № 17, от 06.12.2023 № 506, от 06.12.2023 № 507, от 07.08.2023 № 79, от 07.08.2023 № 78 перечислил ответчику денежные средства в сумме 37599912 руб. 12 коп. в качестве оплаты по вышеуказанным договорам.

Претензией от 17.10.2024 № СК10-41 истец расторг договора, ввиду просрочки сдачи стороной работ, предусмотренных спецификациями № 2, 3 к договору подряда № 02/07-2023 от 21 июля 2023 г. на сумму 243 642,44 руб., спецификацией от 26 июня 2024 г. к договору подряда № 08/06-2023 от 08 июня 2023 г. в части суммы 2 483 456,40 руб., спецификацией № 3 от 23 января 2024 г. к договору № 12/11- 2023от 10 ноября 2023 г. на сумму 2 234 656,00 руб., договором б/н от 01 июня 2023 г., договором № 11/09-23 от 13 сентября 2023 г., и просил возвратить переплату в сумме 7728515 куб. 90 коп.

Неисполнение ответчиком требований изложенных в претензии послужило основанием для обращения с настоящим иском в суд.

На основании статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных подрядных работ является сдача результата работ подрядчиком (статьи 711, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работ. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии с пунктом 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно статье 717 Гражданского кодекса Российской Федерации если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

На основании пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Как следует из пунктов 8 и 14 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" односторонний акт приемки результата работ является доказательством исполнения подрядчиком обязательства по договору, и при отказе заказчика от оплаты на суд возлагается обязанность рассмотреть доводы заказчика, обосновывающие его отказ от подписания акта приемки результата работ.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации именно заказчик должен представить доказательства обоснованного отказа от подписания актов выполненных работ, а также того, что подрядчиком выполнены работы по договору с существенными и неустранимыми недостатками, которые исключают возможность использования их результата заказчиком и не имеют для него потребительской ценности.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом (статьи 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным (пункты 1, 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 2 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства.

Положения пункта 4 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации не исключают возможности истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала, о чем прямо указано в абзаце 2 указанного пункта, а именно: в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Согласно статье 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Кодекса.

По требованию о взыскании сумм, составляющих неосновательное обогащение, на основании части 1 статьи 1102, части 2 статьи 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации истец должен доказать: факт приобретения или сбережения ответчиком денежных средств за счет истца; отсутствие установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований для приобретения; размер неосновательного обогащения.

Судом установлено, что ответчик выполнил работы по спорным договорам на сумму 29871396 руб. 22 коп., указанные работы заказчик принял без возражений, в свою очередь истец перечислил ответчику денежные средства в сумме 37599912 руб. 12 коп. в качестве оплаты работ, в последующем Общество расторгло договора в одностороннем порядке.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, несет риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий (статьи 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании изложенного, руководствуясь положения спорных договоров, суд пришел к выводу об отсутствии у Предпринимателя оснований для удержания денежных средств, перечисленных последнему в качестве аванса и оплаты в размере 7728515 руб. 90 коп. (37599912 руб. 12 коп. - 29871396 руб. 22 коп.).

Подрядчик в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства выполнения работ и передачи результата выполненных работ заказчику не представил.

Поскольку спорные договора подряда расторгнуты истцом в одностороннем порядке, а ответчиком не представлено доказательств выполнения работ на сумму испрашиваемую сумму, а также доказательств пользования истцом результатами работ ответчика либо возвращения заказчику указанной суммы, суд пришел к выводу, что Предприниматель неосновательно удерживает сумму в размере 7728515 руб. 90 коп., которая подлежит взысканию в пользу Общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395 ГК РФ) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

В силу пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Поскольку ответчик пользовался денежными средствами истца вследствие их неправомерного удержания, уклоняется от их возврата без законных к тому оснований, у подрядчика возникло право на взыскание процентов в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Истец начислил проценты за период с 22.10.2024 по 25.11.2024 на сумму 7728515 руб. 90 коп., к взысканию предъявлено 152669 руб. 87 коп.

Проверив представленный расчет, суд счел подлежащим его удовлетворению в заявленном размере.

С 26.11.2024 проценты начислять по день фактической оплаты долга.

На основании изложенного суд удовлетворяет требования истца о взыскании 7 728 515 руб.90 коп. неосновательного обогащения, 152 669 руб.87 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 22.10.2024 по 25.11.2024 и далее по день оплаты долга, как основанное на законе, подтвержденное материалами дела и ответчиком фактически не оспоренное.

Государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку истцу представлена отсрочка ее уплаты.

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью "С-Кран" 7`728`515 (Семь миллионов семьсот двадцать восемь тысяч пятьсот пятнадцать) руб.90 коп. неосновательного обогащения, 152`669 (Сто пятьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят девять) руб.87 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 21.10.2024 по 25.11.2024 и далее по день оплаты долга.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 261`436 (Двести шестьдесят одна тысяча четыреста тридцать шесть) руб.00 коп.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья

Н.В. Кисапова