АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-250636/19-67-1063

г. Москва

17 декабря 2019 г.

Резолютивная часть решения оглашена 06 декабря 2019 г.

Полный тест решения изготовлен 17 декабря 2019 г.                                                                   

Арбитражный суд в составе:                                                                                                                                                    

Судья: В.Г. Джиоев (единолично)

при ведении протокола секретарём с/з ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании 

дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "ИБТ" (109029, Москва город, улица Талалихина, дом 1, корпус 3, эт 1 пом 1 ком 12, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 12.10.2012, ИНН: 

<

***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Интехстрой" (143912, 

<

...>, помещение II, 312, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 27.09.2004, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 11 500 000 руб. штрафа за несвоевременное предоставление информации

при участии: 

от истца: ФИО2 по дов. от 04.10.2019. диплом. 

от ответчика: ФИО3 по дов. от 11.04.2019. диплом.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ИБТ" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Интехстрой" (далее – ответчик) о взыскании с учетом приятых судом уточнегнний в порядке ст. 49  АПК РФ штрафа по договорам субподряда № ИБТ-11-07/2017 от 11.07.2017 и № 601-ИБТ-01-09/2017 от 01.09.2017 в размере 22 540 000 руб. 00 коп. 

Заявленные требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору. 

Истец в судебное заседание поддержал заявленные требования в полном объеме. 

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований, ходатайствовал о применении положений 333 ГК РФ.

Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению, на основании следующего.

Как усматривается из материалов дела, Между ООО «ИБТ» (Далее-Подрядчик) и ООО «Интехстрой» (далее – Субподрядчик) были заключены договоры субподряда № ИБТ-11-07/2017 от 11.07.2017 (далее – Договор-1) и № 601-ИБТ-01-09/2017 от 01.09.2017 (далее – Договор-2).

1. Согласно п. 1.2 Договора-1 содержание работ, указанных в техническом задании (Приложение № 1 к Договору-1) объемы работ, указанные в проектной документации, сроки выполнения работ в календарном плане работ (Приложение № 3 к Договору-1), который является неотъемлемой частью Договора-1.

В соответствии с п. 2.2 Договора-1 директивный срок окончания работ – 31.12.2017.

Согласно п. 7.1 и п. 7.3 Договора-1 Субподрядчик гарантирует выполнить работы в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора, с качеством выполнения всех работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, своевременное устранение недостатков выявленных при приемке работ в период гарантийного срока.

По состоянию на 15.10.2019 обязательства по исполнению Договора-1 ООО «Интехстрой» в полном объеме не исполнены.

В соответствии с п. 3.2.28 Договора-1, Субподрядчик обязан представлять Подрядчику в электронном виде на электронный адрес ibt-mos@mail.ru:

- ежедневно, не позднее 09:00 информацию о строящемся объекте (по форме, предоставленной Подрядчиком (в формате Exсel или ином редактируемом формате);

- каждый понедельник, не позднее 09:00 еженедельный отчет о строящемся объекте (по форме, предоставленной Подрядчиком (в формате Exсel или ином редактируемом формате);

- ежемесячно, не позднее 26-ого числа, план выполнения работ на следующий месяц по форме, предоставленной Подрядчиком (в формате Exсel или ином редактируемом формате) план также направляется на бумажном носителе, подписанный Субподрядчиком;

- ежемесячно, не позднее 4-ого числа месяца, следующего за отчетным, одновременно с промежуточной приемкой работ, отчет о строящемся объекте по форме, предоставленной Подрядчиком (в формате Exсel или ином редактируемом формате), данная информация также направляется на бумажном носителе, за подписью уполномоченного представителя Субподрядчика;

- ежемесячно, не позднее 9-ого числа месяца, следующего за отчетным, информацию о переработке давальческих материалов поставщика Подрядчика по форме, предоставленной Подрядчиком (в формате Exсel или ином редактируемом формате), данная информация также направляется на бумажном носителе вместе с формами КС-2 и КС-3, заверенная печатью Субподрядчика и за подписью уполномоченного представителя Субподрядчика;

- каждый понедельник, не позднее 15:00 еженедельный отчет о поставке материально-технических ресурсов силами Субподрядчика по форме, предоставленной Подрядчиком (в формате Exсel или ином редактируемом формате);

- ежемесячно, не позднее 8-ого числа, следующего за отчетным, информацию по охране труда, промышленной безопасности охране окружающей среды за отработанный месяц (в формате Word или ином редактируемом формате), данная информация также направляется на бумажном носителе, за подписью уполномоченного представителя Субподрядчика;

Согласно п. 8.4.4 Договора-1 Субподрядчик несет ответственность за непредставление, несвоевременное предоставление ежедневной, еженедельной, ежемесячной информации по настоящему Договору, или предоставление информации в формате, несоответствующем требованиям Подрядчика, Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 10 000 руб. за каждый день просрочки по каждому факту непредставления информации.

Предусмотренные Договором штрафные санкции за непредставление, несвоевременное предоставление ежедневной, еженедельной, ежемесячной информации начисляются со следующего за отчетным днем непредставления информации.

В рамках выполнения работ по настоящему Договору, Субподрядчик с момента заключения не предоставлял ежедневную, еженедельную, ежемесячную информацию.

За непредставление, несвоевременное предоставление ежедневной информации о строящемся объекте: 11.07.2017 – дата подписания Договора-1 и начала работ по договору согласно календарному плану работ; 12.07.2017 -15.10.2019 – 826 дней, 10 000 х 755 = 8 260 000 руб.

За непредставление, несвоевременное предоставление еженедельной информации о строящемся объекте: 11.07.2017 – дата подписания Договора-1 и начала работ по договору согласно календарному плану работ. 17.07.2017 – первый день сдачи еженедельной документации (понедельник). Период 18.07.2017 -15.10.2019 составляет 117 недель, 10 000 х 117 = 1 170 000 руб.

За непредставление, несвоевременное предоставление ежемесячного плана выполнения работ на следующий месяц: 26.07.2017 – первый день сдачи ежемесячной документации. Период 27.07.2017 – 15.10.2019 составляет 26 месяцев; 10 000 х 26 = 260 000 руб.

За непредставление, несвоевременное предоставление ежемесячного отчета о строящемся объекте: 04.08.2017 – первый день сдачи ежемесячной документации. Период 05.08.2017 – 15.10.2019 составляет 26 месяцев; 10 000 х 26 = 260 000 руб.

За непредставление, несвоевременное предоставление ежемесячной информации о переработке давальческих материалов Подрядчика: 09.08.2017 – первый день сдачи ежемесячной документации. Период 10.08.2017 – 15.10.2019 составляет 26 месяцев, 10 000 х 26 = 260 000 руб.

За непредставление, несвоевременное предоставление еженедельной информации о поставке материально – технических ресурсов силами Субподрядчика: 17.07.2017 – первый день сдачи документации (понедельник). Период 18.07.2017-15.10.2019 составляет 117 недель, 10 000 х 117 = 1 170 000 руб.

За непредставление, несвоевременное предоставление ежемесячной информации по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды за отработанный месяц: 08.08.2017 – первый день сдачи документации. Период 09.08.2017 – 15.10.2019 составляет 26 месяцев. 10 000 х 26 = 260 000 руб.

Таким образом, сумма штрафа по договору субподряда Договора-1 за непредставление, несвоевременное представление ежедневной, еженедельной, ежемесячной информации составляет 11 640 000 руб.

2. Согласно п. 1.2 Договора-2, содержание работ, указанных в техническом задании (Приложение №1 к Договору-2), объемы работ, указанные в проектной документации, сроки выполнения работ в календарном плане работ (Приложение №3 к Договору-2), который является неотъемлемой частью Договора-2.

В соответствии с п. 2.2 Договора-2 директивный срок окончания работ – 31.12.2017 с учетом окончания пусконаладочных работ в полном объеме.

По состоянию на 15.10.2019 обязательства по исполнению Договора-2 ООО «Интехстрой» не исполнены в полном объеме.

Согласно п. 7.1 и п. 7.3 Договора-2 Субподрядчик гарантирует выполнить работы в полном объеме и в сроки, определенные условиями Договора-2, с качеством выполнения всех работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, своевременное устранение недостатков выявленных при приемке работ в период гарантийного срока.

В соответствии с п. 3.2.28 Договора-2, Субподрядчик обязан представлять Подрядчику в электронном виде на электронный адрес ibt-mos@mail.ru:

- ежедневно, не позднее 09:00 информацию о строящемся объекте (по форме, предоставленной Подрядчиком (в формате Exсel или ином редактируемом формате);

- каждый понедельник, не позднее 09:00 еженедельный отчет о строящемся объекте (по форме, предоставленной Подрядчиком (в формате Exсel или ином редактируемом формате);

- ежемесячно, не позднее 26-ого числа, план выполнения работ на следующий месяц по форме, предоставленной Подрядчиком (в формате Exсel или ином редактируемом формате) план также направляется на бумажном носителе, подписанный Субподрядчиком;

- ежемесячно, не позднее 4-ого числа месяца, следующего за отчетным, одновременно с промежуточной приемкой работ, отчет о строящемся объекте по форме, предоставленной Подрядчиком (в формате Exсel или ином редактируемом формате), данная информация также направляется на бумажном носителе, за подписью уполномоченного представителя Субподрядчика;

- ежемесячно, не позднее 9-ого числа месяца, следующего за отчетным, информацию о переработке давальческих материалов поставщика Подрядчика по форме, предоставленной Подрядчиком (в формате Exсel или ином редактируемом формате), данная информация также направляется на бумажном носителе вместе с формами КС-2 и КС-3, заверенная печатью Субподрядчика и за подписью уполномоченного представителя Субподрядчика;

- каждый понедельник, не позднее 15:00 еженедельный отчет о поставке материально-технических ресурсов силами Субподрядчика по форме, предоставленной Подрядчиком (в формате Exсel или ином редактируемом формате);

- ежемесячно, не позднее 8-ого числа, следующего за отчетным, информацию по охране труда, промышленной безопасности охране окружающей среды за отработанный месяц (в формате Word или ином редактируемом формате), данная информация также направляется на бумажном носителе, за подписью уполномоченного представителя Субподрядчика;

Согласно п. 8.4.4 Договора-2 Субподрядчик несет ответственность за непредставление, несвоевременное предоставление ежедневной, еженедельной, ежемесячной информации по Договору-2, или предоставление информации в формате, несоответствующем требованиям Подрядчика, Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 10 000 руб. за каждый день просрочки по каждому факту непредставления информации.

Предусмотренные Договором-2 штрафные санкции за непредставление, несвоевременное предоставление ежедневной, еженедельной, ежемесячной информации начисляются со следующего за отчетным днем непредставления информации.

За непредставление, несвоевременное предоставление ежедневной информации о строящемся объекте: дата начала работ согласно календарному плану графику – с момента подписания Договора-2 01.09.2017. Таким образом период 02.09.2017 - 15.10.2019 составляет 774 дня. 10 000 х 774 = 7 740 000 руб.

За непредставление, несвоевременное предоставление еженедельной информации о строящемся объекте :04.09.2017 – день сдачи документации. Период 05.09.2017 – 15.10.2019 составляет 110 недель, 10 000 х 110 = 1 100 000 руб.

За непредставление, несвоевременное предоставление ежемесячного плана выполнения работ на следующий месяц: 26.09.2017 – день сдачи документации. Период 27.09.2017 – 15.10.2019 составляет 24 месяца, 10 000 х 24 = 240 000 руб.

За непредставление, несвоевременное предоставление ежемесячного отчета о строящемся объекте: 04.10.2017 – день сдачи документации. Период 05.10.2017 – 15.10.2019 составляет 24 месяца. 10 000 х 24 = 240 000 руб.

За непредставление, несвоевременное предоставление ежемесячно информации о переработке давальческих материалов Подрядчика: 09.10.2017 – день сдачи документации. Период 10.10.2017 – 15.10.2019 составляет 24 месяц, 10 000 х 24 = 240 000 руб.

За непредставление, несвоевременное предоставление еженедельной информации о поставке материально-технических ресурсов силами Субподрядчика: 04.09.2017 – день сдачи документации. Период 05.09.2017 – 15.10.2019 составляет 110 недель. 10 000 х 110 = 1 100 000 руб.

За непредставление, несвоевременное предоставление ежемесячной информации по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды за отработанный месяц: 08.10.2019 – день сдачи документации. Период 09.10.2019 - 15.10.2019 составляет 24 месяцев; 10 000 х 24 = 240 000 руб.

Сумма штрафа по Договору-2 за непредставление, несвоевременное предоставление ежедневной, еженедельной, ежемесячной информации составляет 10 900 000 руб.

Таким образом, общая сумма штрафа по Договорам за непредставление, несвоевременное представление ежедневной, еженедельной, ежемесячной информации составляет 22 540 000 руб.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе, предусмотренной законом или договором неустойкой.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Суд, рассмотрев заявление ответчика о снижении неустойки, усматривает основания для уменьшения размера неустойки на основании ст. 333 ГК РФ, в связи со следующим.

В соответствии со ст. 333 ГК РФ, подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке.

Неустойка как способ обеспечения обязательства должна компенсировать кредитору расходы или уменьшить неблагоприятные последствия, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения должником своего обязательства перед кредитором.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу п.73 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

Согласно абз. 2 п. 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 N 81 "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суды могут исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого нарушения.

Таким образом требование о взыскании штрафа в размере 22 540 000 руб. 00 коп. подлежит частичному удовлетворению, так как суд считает возможным применить норму ст. 333 ГК РФ и снизить сумму штрафа до размера 10 000 руб. за каждое нарушение  исполнения обязательств и взыскать неустойку в размере 140 000 руб. 00 коп., поскольку подлежащая ко взысканию сумма неустойки явно несоразмерна последствиям нарушения обязательств с учетом имеющихся в деле доказательств, суд считает такую сумму справедливой, достаточной и соразмерной, принимая во внимание, что неустойка служит средством, обеспечивающим исполнение обязательства, а не средством обогащения истца за счет должника.

Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Согласно пп. 2 п. 1 ст. 333.22 НК РФ в цену иска включаются указанные в исковом заявлении суммы неустойки (штрафов, пеней) и проценты.

Как разъяснено в абзаце третьем пункта 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.12.2011 N 81, если размер заявленной неустойки снижен арбитражным судом по правилам ст. 333 ГК РФ на основании заявления ответчика, расходы истца по государственной пошлины не возвращаются в части сниженной суммы из бюджета и подлежат возмещению ответчиком исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета ее снижения.

Таким образом, независимо от уменьшения суммы неустойки по правилам ст. 333 ГК РФ, размер госпошлины, подлежащей взысканию, должен исчисляться с заявленной суммы неустойки при условии ее верного определения.

Согласно п. 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11.07.2014  N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах" в тех случаях, когда до окончания рассмотрения дела государственная пошлина не была уплачена (взыскана) частично либо в полном объеме ввиду действия отсрочки, рассрочки по уплате госпошлины, увеличения истцом размера исковых требований после обращения в арбитражный суд, вопрос о взыскании неуплаченной в федеральный бюджет государственной пошлины разрешается судом исходя из следующих обстоятельств.

Если суд удовлетворяет заявленные требования, государственная пошлина взыскивается с другой стороны непосредственно в доход федерального бюджета применительно к части 3 статьи 110 АПК РФ. При отказе в удовлетворении требований государственная пошлина взыскивается в федеральный бюджет с лица, увеличившего размер заявленных требований после обращения в суд, лица, которому была дана отсрочка или рассрочка в уплате государственной пошлины.

Таким образом, в соответствии с п. 3 ст. 110 АПК РФ  с ответчика подлежит взысканию в доход федерального бюджета государственная пошлина в размере 55 200 руб. 00 коп.

 Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Интехстрой" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ИБТ" штраф в размере 140 000 (сто сорок тысяч) руб. 00 коп., расходы по уплате госпошлины в размере 80 500 (восемьдесят тысяч пятьсот) руб. 00 коп.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Интехстрой" в  доход федерального бюджета госпошлину в размере 55 200 (пятьдесят пять тысяч двести) руб. 00 коп.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:                                                                                                              В.Г. Джиоев