63/2021-25562(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (р е з о л ю т и в н а я ч а с т ь)

Дело № А13-8618/2020

город Вологда

10 марта 2021 года

 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Вологодской области  

р е ш и л:

обязать общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» в  течение 20 календарных дней с даты вступления решения суда в законную  силу устранить недостатки в выполненных работах по муниципальному  контракту от 16.06.2015 № 81-06-03/15 по объектам «Реконструкция  Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до улицы  Любецкой», «Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до улицы  Рыбинской в г. Череповце», а именно:  

1. по Октябрьскому проспекту на участке от Октябрьского моста до  улицы Любецкой»:  

- устранить выкрашивание асфальта на проезжей части дороги,  многочисленные трещины на асфальтобетонном покрытии от ПК0 до ПК6, от  ПК9+34,0 до ПК11+3,0,  

- на перекрестке улицы Раахе с Октябрьским проспектом устранить  некачественное сопряжение полос асфальтобетонного покрытия на проезжей  части,  

- устранить провал асфальтобетонного покрытия тротуара на пикете  ПК3+30,0, и местами износ поверхности асфальтобетонного покрытия;  

2. по улице Раахе на участке от Октябрьского проспекта до улицы  Рыбинской в г. Череповце:  

- устранить на перекрестке улице Раахе с улицы Батюшкова  выкрашивание асфальта на сопряжение полос асфальтобетонного покрытия на  проезжей части;  

- устранить большие участки покрытия с выкрашиванием асфальта на  проезжей части дороги, многочисленные трещины на асфальтобетонном  покрытии от ПК0 до ПК2, от ПК6+3,0 до ПК7+38,45;  

- устранить многочисленные трещины и некачественное сопряжение  полос асфальтобетонного покрытия на проезжей части от ПК0+14,70 до  ПК7+38,45,  

- устранить трещины на асфальтобетонном покрытии тротуаров,  местами износ поверхности асфальтобетонного покрытия на участках ПК0+50  до ПК2+50 (тротуар справа), ПК6+55 до ПК7+63 (тротуар слева).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» в  пользу муниципального казенного учреждения «Управление капитального  строительства и ремонтов» 6 000 руб. 00 коп. в возмещение расходов по  уплате государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента его  принятия в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд.  

Судья Е.В. Дегтярева  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 21.05.2020 5:34:41

 Кому выдана Дегтярева Елена Викторовна