АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443001, г.Самара, ул. Самарская,203Б, тел. (846) 207-55-15

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

10 марта 2023 года

Дело №

А55-34747/2022

 

Резолютивная часть решения объявлена 02 марта 2023 года

Решение в полном объеме изготовлено   10 марта 2023 года

Арбитражный суд Самарской области

в составе

судьи Балькиной  Л.С.

При ведении протокола судебного заседания

секретарем  судебного заседания    ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании  02 марта 2023 года  дело по иску, заявлению

Общества с ограниченной ответственностью "Лига-Траст"

к  Обществу с ограниченной ответственностью "Агростроймонтаж-2"

 

о взыскании  1 752 002 руб. 86 коп.

при участии в заседании

от истца – представитель ФИО2,

от ответчика – не участвовал , извещен

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Лига-Траст" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к  Обществу с ограниченной ответственностью "Агростроймонтаж-2" о взыскании с учетом принятых судом уточнений  1 752 002 руб. 86 коп. , в том числе задолженности 1 693 045 руб. и неустойки 58 957 руб. 86 коп. за период с 02.10.2022 по 09.11.2022 (с учетом принятого судом уточнения исковых требований).

Истец поддержал заявленные требования.

Ответчик явку представителя в судебное заседание не обеспечил, извещен надлежащим образом, представил отзыв, в котором возражал против удовлетворения исковых требований, в обоснование возражений ответчик указал на необоснованное начисление неустойки в период действия моратория, и на неверное определение начальной даты начисления неустойки с учетом   сроков, предусмотренных на   исполнение  обязательств по оплате. По задолженности мотивированных возражений ответчика не заявил.

Истец уточнил исковые требования , заявив о  взыскании неустойки с 02.10.2022, и приняв доводы ответчика по отзыву.

Рассмотрев материалы дела, изучив доводы и возражения сторон в совокупности с исследованными доказательствами, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

 

 Как следует из материалов дела, 25.10.2021 сторонами был заключен договор подряда на выполнение ремонтных работ № 25/10-21 (далее - Договор), согласно которому истец, как подрядчик принял на себя обязательства выполнить по заданию заказчика (ответчика) ремонтные работы на объектах заказчика, а ответчик, как заказчик, обязался по данному договору принять результат выполненных работ и оплатить их в порядке и размерах, предусмотренных договором

Согласно п. 1.2 договора конкретный перечень выполняемых, в соответствии с договором работ, цена и сроки выполнения работ определяются в заданиях, которые являются неотъемлемой частью договора.

Согласно Задания № 1 от 10.01.2022 подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика:

-АКТ-1205/1 Ремонт теплоизоляции участка механической очистки Инв №06996-Склад оборудования Инв№ 10128-(Материальный склад с рампой) Инв №16478-(арочное здание ПКО МТЛ «Росвет» ЗА 30-0002) Цена работ с учетом НДС 20% 236 028,97 руб Начальный срок выполнения работ 10 01 2022 г Конечный срок выполнения работ 14.01.2011 ;

-АКТ-1071/1 Ремонт теплоизоляции участка механической очистки Инв № 08427-Здание насосной станции № 2 Инв№ 08429-Здание насосной станции Инв№ 14790-Теплопроводы к КНС Цена работ с учетом НДС 20 % 707 987,95 руб Начальный срок выполнения работ 10 01 2022 г Срок окончания работ 19 01 2022 г -АКТ-1159/1 Изоляционные работы трубопроводов и емкостей участка № 1 в 2021 г Инв№ 64428-Емкость Е-1 Инв№ 64420-Емкость Е-2 Инв№ 64421-Технологические трубопроводы узла ввода присадок, Инв № 18797-Линия 57/2 Горячая вода, Инв № 20557-. Трубопроводы обвязки резервуаров № 866,867 Цена работ с учетом НДС 20 % 2 237197,27 руб. Начальный срок выполнения работ 10.01.2022 окончание выполнения работ 20.01.2022.

Всего стоимость выполнения работ в соответствии с заданием №1 составляет 3181 214,19 руб.

Согласно заданию № 2 от 01.04.2022 подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика:

-АКТ-950/1 Ремонт теплоизоляции по подготовке к осенне-зимнему периоду на 2021-2022 г по участку реагентов Инв№ 35199-Трубопровод аммиака Инв№ 39243-Выкид серной кислоты (Н-2,3, старое реагентное хозяйство) на установку 24/36 Инв № 47496 -Кислота от Н-9,Ю в резервуары № 695, 696, 697,698, Инв № 47496-Кислота из резервуаров № 695,696,697,698 к Н-9,10, Инв №11126-Щелочь из резервуаров № 667,680-684 на прием Н-3,4, Инв № 11126-Щелочь от н-3,4 в резервуары № 667, 680-684, инв № 12519-Щелочь из резервуаров 50,74,3,4,12 на прием Н-2а,За, Инв№ 12519-Выкид Н-3,4 на СРХ, Инв № 12519-Щелочь от Н-2аЗа в резервуары № 50,74,3,4,12, Инв №29654-Пар 10 от межзаводского трубопровода до задвижки ввода пара на новое реагентное хозяйство, Инв №29654-Пар 10 от задвижки ввода пара на установку до гребенки и обогрев резервуаров, Инв № 29654-Пар 10 на СРХ, Инв № 01526-Содовая линия на прием Н-1,2, Инв № 329654-Пар 10 атм УПАВ, Инв № 29655-Промышленная вода на СРХ, Инв № 27653-Приемо-раздаточные трубопроводы масла, Инв № 29706-Откачка сбросных вод из заглубленных емкостей Е-16,17 Цена работ с учетом НДС 20% 4 528368,49 руб. Начальный срок выполнения работ 01.04.2022. Конечный срок выполнения работ 04.04.2022.

Согласно заданию № 3 от 12.04.2022 подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика:

-АКТ-16/22-1 Изоляционные работы по УКСНГ в цехе №4 (Инв№0001/005-Трубопровод «Топливный газ на дежурные грелки и лабиринтное уплотнение свечи № 3 с факельной установки FCC» Цена работ с учетом НДС 20% 265 555,44 руб Начальный срок выполнения работ 12.04.2022. Конечный срок выполнения работ 06.05.2022;

-АКТ-28/22-1 Изоляционные работы по УКСНГ в цехе №4 (ИнвШООО 1/005-Трубопровод «Перемычка между трубопроводами подачи H2S сырье с 24/6 на 24/7 Цена работ с учетом НДС 20% 888 228,53 руб Начальный срок выполнения работ 12.04.2022. Конечный срок выполнения работ 06.05.2022.

Всего стоимость выполнения работ в соответствии с заданием № 3 составляет 1153 783,97 руб.

Согласно заданию № 4 от 14.06.2022 подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика:

-АКТ-1028/1 Ремонт мягкой кровли здания КНС-ТЭЦ участка механической очистки цеха очистных сооружений (цехб) на 2021год Инв №29530 Цена работ с учетом НДС 20% 125 767,40 руб. Начальный срок выполнения работ 14.06.2022. Конечный срок выполнения работ 01.07.2022 ;

-АКТ-950/2 Ремонт теплоизоляции по подготовке к осенне-зимнему периоду на 2021-2022 г по участку реагентов Цена работ с учетом НДС 20% 760 293,78 руб Начальный срок выполнения работ 14.06.2022. Конечный срок выполнения работ 01.07.2022.

Общая стоимость выполнения работ по заданию № 4 составляет 886061,18 руб.

Согласно заданию № 5 от 15.07.2022 подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика:

-АКТ-1024/1   Ремонт мягкой кровли здания насосной станции №2 участка механической очистки цеха очистных сооружений (цех 6) Цена работ с учетом НДС 20% 552 566,93 (Пятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят шесть),93 руб Начальный срок выполнения работ 15. 07.2022. Конечный срок выполнения работ 01.08.2022.

Согласно заданию № 6 от 15.08.2022 подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика:

-АКТ-1009/1 Ремонт кровли здания насосной при первичных отстойниках установки БХО цеха очистных сооружений Инв № 08651 Цена работ с учетом НДС 20% 242 511,83 руб. Начальный срок выполнения работ 15 08 2022 г конечный срок выполнения работ 01.09.2022.

Согласно п. 2.1 договора цена работ указывается в заданиях.

В соответствии с п. 2.6 договора заказчик производит подрядчику оплату за выполненные работы в течение не менее 45 (Сорока пяти) и не более 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента получения денег от заказчика, при наличии подписанных актов выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ по форме КС-3, счет-фактуры.

Как следует из материалов дела, работы по заданию № 1 выполнены истцом, что подтверждается подписанными с обеих сторон документами: справка о стоимости выполненных работ 1205/1 от 14.01.2022, акт о приемке выполненных работ № 1205/1 от 14.01.2022 г, счет-фактура №3 от 14.01.2022, справка о стоимости № 1071/1 от 19.01. 2022,акт о приемке выполненных работ № 1071/1 от 19.01.2022 г, счет-фактура № 4 от 19. 01.2022, справка 0    стоимости выполненных работ и затрат № 1159/1 от 20 01 2022 г, акт о приемке выполненных работ № 1159/1 от 20.01.2022, счет-фактура № 5 от 20.01.2022. 

Работы по заданию №2 выполнены истцом в срок до 04.04.2022, что подтверждается подписанными с обеих сторон документами: справка о стоимости выполненных работ и затрат № 950/1 от 04.04.2022, акт о приемке выполненных работ № 950/1 от 04.04.2022, счет-фактура № 30 от 04.04.2022. 

Работы по заданию №3 выполнены истцом в срок до 01.05.2022, что подтверждается подписанными с обеих сторон документами: справка о стоимости выполненных работ 28/22-1 от 01. 05. 2022, акт о приемке выполненных работ 28/22-1 от

01        .05.2022, счет-фактура №37от 01.05. 2022, справка о стоимости выполненных работ №16/22-1 от 01.05.2022, акт о приемке выполненных работ 16/22-1 от 01.05.2022,счет-фактура № 35 от 01.05.2022.

Работы по заданию №4 выполнены истцом в срок до 01.07.2022, что подтверждается подписанными с обеих сторон документами справка о стоимости выполненных работ 950/2 от 01.07.2022, акт о приемке выполненных работ 950/2 от 01. 07. 2022, счет-фактура № 72 от 01.07.2022, справка о стоимости выполненных работ № 1028/1 от 01.07.2022, акт о приемке выполненных работ 1028/1 от 01.07.2022, счет-фактура № 73 от 01.07. 2022.

Работы по заданию №5 выполнены истцом в срок до 01.08.2022, что подтверждается подписанными с обеих сторон документами справка о стоимости выполненных работ 1024/1 от 01.08.2022, акт о приемке выполненных работ 1024/1 от 01. 08.2022, счет-фактура № 83 от 01.08.2022 работ.

Работы по заданию № 6 выполнены истцом в срок до 01.09.2022, что подтверждается подписанными с обеих сторон документами справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1009/1 от 01.09.2022, акт выполненных работ № 1009/1 от 01.09.2022, счет-фактура № 84 от 01.09.2022.

Общая стоимость работ, выполненных по договору подряда составляет 10 544 506,59 руб.

Работы, выполненные в соответствии с заданием №1 оплачены заказчиком полностью, что подтверждается платежными поручениями № 744 от 16.03.2022 на сумму 226 857, 01 руб. , № 793 от 22.03.2022 на сумму 680 763,31руб. , № 862 от 27.03.2022 на сумму 1 000 000 руб. , № 878 от 29.03.2022 на сумму 1 000 000 руб., актом зачета взаимных требований № 2 от 31.03.2022 на сумму 121 415,93 руб., актом зачета взаимных требований б/н от 31.05.2022 на сумму 152 177,94 руб. 

Работы, выполненные в соответствии с заданием №2 оплачены заказчиком полностью, что подтверждается платежными поручениями № 33 от 20.06.2022 на сумму 1 000 000 руб ., № 36 от 21.06.2022 на сумму 1 000 000 руб. , № 39 от 22.06.2022 г на сумму 1 000 000 руб. , № 40 от 22.06.2022 на сумму 1 000 000 руб. , № 1800 от 05.07.2022 на сумму 450 000 руб. ,  № 410 от 14 .07. 2022 на сумму 500 000 руб (оставшаяся сумма в размере 6 230,38), актом зачета взаимных требований б/н от 31.05.2022 на сумму 72 138 руб. 

Работы, выполненные в соответствии с заданием №3 частично оплачены заказчиком, что подтверждается    платежными поручениями № 410 от 14.07.2022 на сумму 500 000 руб. (оставшаяся сумма493 769,62руб), № 416 от 15.07.2022 на сумму 500 000 руб , -платежным поручением № 1914 от 28 07 2022 г на сумму 100 000 руб. Таким образом, по состоянию на 09.11.2022 задолженность за работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с заданием № 3 составляет 60 014,35 руб.

Работы, выполненные в соответствии с заданием № 4 частично погашены на сумму 31 737,04 руб. , что подтверждается актом зачета взаимных требований № 12 от 31 07 2022 г Задолженность за работы, выполненные в соответствии с заданием № 4 составляет 854 324,14 руб.

Работы, выполненные в соответствии с заданием № 5 частично погашены на сумму 9 557,03 руб. , что подтверждается актом зачета взаимных требований № 15 от 31.08. 2022 г Задолженность за работы, выполненные в соответствии с заданием № 5 на день подачи искового заявления составляет 543 009,90 руб.

Работы, выполненные в соответствии с Заданием № 6 частично погашены на сумму 6 815,22 руб , что подтверждается Актом зачета взаимных требований № 18 от 30 09 2022 г Задолженность за работы, выполненные в соответствии с заданием № 6 по состоянию на 09 .11. 2022 составляет 235 696,61 руб.

Таким образом, по состоянию на 09.11.2022 за ответчиком числится задолженность в размере 1 693 045 руб.

 

Истцом был направлена в адрес ответчика претензия исх. № 143 от 10.10.2022 с требованием погасить образовавшуюся задолженность в течении 5 календарных дней с

момента получения претензии. Данное требование не исполнено ответчиком.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

 В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -ГК РФ) по договору подряда одна сторона (Подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика) определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его

Основанием   для   возникновения   обязательства   по   оплате   выполненных подрядчиком работ является сдача их результата заказчику (статьи 711 и 746 ГК РФ) Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

 

Частью 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчик требование истца о взыскании суммы основного долга не оспорил, доказательств оплаты долга  в материалы дела не представил, в связи с чем оценка требований истца была осуществлена судом с учетом положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о бремени доказывания, исходя из принципа состязательности, согласно которому риск наступления последствий несовершения соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле (часть 2 статьи 9 того же Кодекса).

При вышеуказанных обстоятельствах требований истца о взыскании с ответчика 1 693 045 руб . основной задолженности является обоснованным и подлежит удовлетворению.

В соответствии с п. 11.2 договора за нарушение срока оплаты выполненных Работ Подрядчик имеет право потребовать от лица, производящего оплату по данному договору, уплаты пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

В соответствии с 11.14 договора датой начисления сумм пени (штрафа, процентов), а также возмещения убытков по настоящему договору стороны договорились считать дату признания должником своего обязательства по уплате пени штрафа, процентов), возмещения убытков или дату вступления в законную силу решения суда, в котором установлена обязанность должника по уплате пени (штрафа, процентов),возмещению убытков.

Согласно ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В связи с просрочкой оплаты истцом, с учетом доводов ответчика, изложенных в отзыве, истец заявил о взыскании с ответчика неустойки в размере 58 957 руб. 86 коп. 58 957 руб. 86 коп. за период с 02.10.2022 по 09.11.2022.  Проверив расчет пени, суд пришел к выводу о том, что арифметически он произведен верно, период просрочки определен с учетом фактических обстоятельств дела.

Поскольку материалами дела подтверждается факт просрочки исполнения ответчиком денежного обязательства, требование истца о взыскании с ответчика 58 957 руб. 86 коп. следует удовлетворить.

Согласно ст. 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины 30 520 руб. относятся на ответчика.

На основании ст. 333.40 НК РФ следует возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Лига-Траст"        из федерального бюджета государственную  пошлину в сумме 352 руб. , перечисленную  по платежному поручению  № 826 от 09.11.2022.

Руководствуясь ст.  ст. 110. 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с  Общества с ограниченной ответственностью "Агростроймонтаж-2" (ИНН 

<

***> ) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Лига-Траст" (ИНН  

<

***> )  1 752 002 руб. 86 коп., в том числе:  1 693 045 руб . основной задолженности , 58 957 руб. 86 коп. неустойки, а также 30 520 руб. в счет возмещения судебных  расходов по оплате государственной пошлины.

  Возвратить    истцу     Обществу с ограниченной ответственностью "Лига-Траст"        из федерального бюджета государственную  пошлину в сумме 352 руб. , перечисленную  по платежному поручению  № 826 от 09.11.2022. 

       Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара в течение месяца со дня принятия  с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

 

Судья

 

/

Л.С. Балькина