39_8814843 

Арбитражный суд Московской области   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-67040/19

05 сентября 2019 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи М.В. Базаевой,  рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙСК(ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к ООО "ФАРМСТРОЙ РК" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

третье лицо: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение детский сад общеразвивающего вида № 2 "Кораблик"  

об устранении недостатков строительных работ в рамках гарантийных  обязательств  

при участии в заседании: согласно протоколу 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, 216 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

 Обязать Общество с ограниченной ответственностью "ФАРМСТРОЙ  РК"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) за свой счет в разумные сроки  устранить недостатки строительных работ в рамках гарантийных обязательств,.  предусмотренных муниципальным контрактом от 03.06.2013 № 97, на объекте:  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский  сад общеразвивающего вида № 2 «Кораблик» по адресу: 

<

...>, в соответствии с дефектной ведомостью и  локальным сметным расчетом, приведенных в экспертном заключении №  ЗЭ2019А-38 от 13.05.2019, а именно произвести:  

 Стены:  1. Демонтаж плинтусов ПВХ - 620 погонных метров 

 2. Монтаж плинтусов ПВХ - 620 погонным метров   3. Демонтаж штукатурки (Н=20-40мм) - 192,7 м  

 4. Демонтаж штукатурки оконных откосов - 164,4м  

 5. Обеспыливание поверхности - 357,1м  

 6. Обработку поверхности грунтовкой - 357,1 м2  7. Установку маяков - 192,7 м"  8. Улучшенная штукатурка (Н=20-40мм) - 192,7 м  9. Штукатурку оконных откосов - 164,4 м2 

 10. Покраску стен (акриловая краска «Акродом-В» - по проекту) -  2735,72м2  

 11. Вынос и занос мебели  12. Мусор  1. Демонтаж тротуарной плитки - 133,2 м2  2. Устройство отмостки - 111 погонных метров  3. Монтаж тротуарной плитки - 133,2 м2 

 Взыскать с Общество с ограниченной ответственностью "ФАРМСТРОЙ  РК"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 6 000 руб.  

В соответствии с частью 1 статьи 259 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации решение может быть обжаловано в Десятый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия  арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.  

Судья Е.А. Морозова