Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-11277/2023

г. Хабаровск

20 ноября 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 13 ноября 2023 года.

В полном объеме решение изготовлено 20 ноября 2023 года.

 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Д.Л. Малашкина

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрел в судебном заседании дело по иску Администрации городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 682800, 

<

...>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Центр комплексных решений» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 682800, 

<

...>)

об обязании устранить недостатки выполненных работ,

при участии в судебном заседании:

от истца – не явились,

от ответчика – не явились,

У С Т А Н О В И Л:

Администрация городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края (далее – истец, Администрация городского поселения «Город Советская Гавань») обратилась в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Центр комплексных решений»  (далее – ответчик, ООО «Центр комплексных решений») об обязании устранить недостатки выполненных работ по муниципальному контракту № 54 от 24.08.2020.

Определением от 21.07.2023 исковое заявление принято, возбуждено производство по делу № А73-11277/2023, назначено предварительное судебное заседание на 28.09.2023 в 12 часов 00 минут.

Определением от 28.09.2023 дело назначено к судебному разбирательству на 13.11.2023 на 10 часов 00 минут.

Стороны явку своих представителей в судебное не обеспечили, извещены о времени и месте рассмотрения дела в соответствии с правилами статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в том числе путем размещения сведений в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии с частью 3 статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в судебном заседании в отсутствие не явившихся истца и ответчика.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.

Между Администрацией городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края (заказчик) и ООО «Центр комплексных решений» (подрядчик) заключен муниципальный контракт № 54 от 24.08.2020, по условиям которого подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить работы по благоустройству площади имени В.И. Ленина в городе Советская Гавань (объект), а заказчик обязался принять результат работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Работы выполняются в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к настоящему контракту), Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему контракту), являющиеся его неотъемлемой частью и условиями настоящего контракта (пункт 1.2 контракта).

Пунктом 2.1 предусмотрена цена контракта, которая составила 2 910 448 руб. 27 коп., в том числе НДС – 20 % - 485 074 руб. 71 коп.

Согласно пункту 3.1 контракта срок выполнения работ: 30 календарных дней со дня заключения контракта.

Порядок сдачи-приемки выполненных работ предусмотрен разделом 4 контракта.

В соответствии с пунктом 6.2 контракта, гарантийный срок на выполняемые по настоящему контракту работы составляет 3 года с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ на объекте.

Подрядчик несет ответственность за все недостатки (дефекты) выполненных работ, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными или третьими лицами (пункт 6.3 контракта).

В силу пункта 6.4 контракта, при обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 6.3 контракта недостатков заказчик должен заявить о них подрядчику в течение 5 рабочих дней с даты их обнаружения.

Как следует из материалов дела, заказчиком при обследовании результатов выполненных работ по муниципальному контракту № 54 от 24.08.2020 были выявлены недостатки в период гарантийного срока.

17.11.2021 Администрация городского поселения «Город Советская Гавань» направила в адрес ООО «Центр комплексных решений» уведомление о выявлении недостатков в выполненной работе и предложила направить представителя для составления акта выявленных недостатков.

19.11.2021 произведен комиссионный осмотр с участием представителя ООО «Центр комплексных решений», по результатам которого составлен акт от 19.11.2021 выявленных недостатков в рамках муниципального контракта № 54 от 24.08.2020. В указанном акте отражены выявленные недостатки, а именно: нарушение целостности изоляции, вследствие чего, произошло короткое замыкание цепи, проложенного кабеля между опорами бульварного освещения под покрытием из брусчатки.

Представитель ООО «Центр комплексных решений» присутствовал при составлении акта и был уведомлен о выявленных недостатках и необходимости их устранения.

05.04.2023 Администрация городского поселения «Город Советская Гавань» направила в адрес ООО «Центр комплексных решений» претензию с требованием устранить недостатки.

В ответ на претензию ООО «Центр комплексных решений» направило письмо от 25.04.2023 исх. № 4, в котором сообщило, что работы по устранению недостатков, зафиксированных в акте от 19.11.2021 будут произведены после наступления устойчивых положительных температур атмосферного воздуха и естественного оттаивания грунта, ориентировочные сроки проведения работ третья декада мая – первая декада июня 2023 года.

Однако в указанные сроки выявленные недостатки ответчиком не были устранены.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения Администрации городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Отношения сторон возникли из контракта на выполнение работ для муниципальных нужд и регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также общими положениями гражданского законодательства об исполнении обязательств.

В силу пункта 1 статьи 763 ГК РФ подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1 статьи 740 ГК РФ).

На основании пункта 1 статьи 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

В соответствии с пунктом 1 статьи 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Пунктами 1, 2 статьи 755 ГК РФ установлено, что подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. По общему правилу подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если только не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации.

Данные нормы регулируют обязательства сторон по качеству исполнения подрядных работ и гарантируют заказчику соответствие результата его обоснованным ожиданиям как одну из целей договора подряда.     

Последствия выполнения работ с недостатками установлены в статье 723 ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статьей 310 ГК РФ предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Как установлено из материалов дела, истцом до истечения гарантийного срока на результат работы, выполненной ответчиком по муниципальному контракту № 54 от 24.08.2020, были выявлены недостатки (дефекты) – нарушение целостности изоляции электрического кабеля между опорами (8 штук) бульварного освещения под покрытием брусчатки (тротуарной плитки), о которых было заявлено ответчику-подрядчику.

Факт наличия недостатков подтверждается представленным в материалы дела актом о выявленных недостатках результата выполненных работ от 19.11.2021, а также перепиской сторон. Осмотр производился и акт от 19.11.2021 составлен с участием представителя подрядчика (ООО «Центр комплексных решений»).

Подрядчиком акт о выявленных недостатках от 19.11.2021 подписан без возражений. 

В переписке подрядчик признавал свою обязанность устранить недостатки выполненных работ и обязался произвести работы по устранению недостатков после наступления устойчивых положительных температур атмосферного воздуха и естественного оттаивания грунта (третья декада мая – первая декада июня 2023 года).

Доказательств устранения недостатков (дефектов) либо наличия обстоятельств, исключающих ответственность подрядчика за данные недостатки (дефекты), ответчик в нарушение статьи 65 АПК РФ не представил, возражения на иск не заявил.

На основании изложенного, исковое требование Администрации городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края об обязании ООО «Центр комплексных решений» устранить недостатки выполненных работ по муниципальному контракту № 54 от 24.08.2020, а именно произвести замену кабеля между неработающими опорами (8 штук) бульварного освещения под покрытием брусчатки (тротуарной плитки) подлежит удовлетворению.

Согласно части 1 статьи 174 АПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

Истец в исковом заявлении об обязании ответчика устранить недостатки выполненных работ по муниципальному контракту № 54 от 24.08.2020 срок устранения не указал.

Учитывая специфику подлежащих выполнению работ для устранения недостатков, климатические условия в месте выполнения работ, суд считает необходимым установить для их выполнения срок – до 31 мая 2024 года.

Поскольку истец от уплаты государственной пошлины освобожден, государственная пошлина в сумме 6 000 руб. 00 коп. подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета на основании части 3 статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексных решений» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в срок до 31 мая 2024 года устранить недостатки выполненных работ по муниципальному контракту № 54 от 24.08.2020, а именно произвести замену кабеля между неработающими опорами (8 штук) бульварного освещения под покрытием брусчатки (тротуарной плитки).

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Центр комплексных решений» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6 000 руб. 00 коп.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

 

Судья                                                                                                 Д.Л. Малашкин