Арбитражный суд Республики Тыва

Кочетова ул., д. 91, г. Кызыл, 667000, тел. (39422) 2-11-96 (факс) 

http://www.tyva.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А69-1393/2022

11 октября 2023 года

г. Кызыл

 

 

Резолютивная часть решения объявлена 04 октября 2023 года. 

Полный текст решения изготовлен 11 октября 2023 года.

 

Арбитражный суд Республики Тыва в составе: судьи Чигжита Ш.С., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ВАВИОЛ», направленное на новое рассмотрение постановлением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 06.06.2023,

к обществу с ограниченной ответственностью «Метагрупп»  

о взыскании 3030913 руб. 43 коп.,

при участии в судебном заседании:

ФИО2 - представителя ООО «ВАВИОЛ» по доверенности от 02.10.2023, представлен диплом о ВЮО;

ФИО3 - представителя ООО «Метагрупп»  по доверенности от 26.12.2022 № 36, представлен диплом о ВЮО,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Метагрупп» (ИНН 

<

***>, далее – ООО «Метагрупп») обратилось в арбитражный суд с иском, уточнённым в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью «Вавиол» (ИНН 

<

***>, далее – ООО «Вавиол») о взыскании 1 624 671 рубля задолженности по договору поставки № 161 от 27.11.2020, 2 483 414 рублей 90 копеек пени с последующим начислением по день фактической оплаты долга; 568 568 рублей задолженности по договору поставки № 23 от 16.02.2021, 869 098 рублей 20 копеек пени с последующим начислением по день фактической оплаты долга; 33 966 рублей 20 копеек расходов по уплате государственной пошлины.

ООО «Вавиол» обратилось со встречным иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о взыскании с ООО «Метагрупп» 2 305 131 рублей 20 копеек пени за просрочку исполнения обязательств по договору поставки № 161 от 27.11.2020 за период с 12.05.2021 по 07.02.2022; 725 782 рублей 23 копеек пени за просрочку исполнения обязательств по договору поставки № 23 от 16.02.2021 за период с 09.07.2021 по 07.02.2022; 38 155 рублей расходов по уплате государственной пошлины. 

Решением Арбитражного суда Республики Тыва от 30.11.2022, оставленным без изменения постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 16.02.2023, в удовлетворении первоначального и встречного исков отказано.

Постановлением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 06.06.2023 решение Арбитражного суда Республики Тыва от 30.11.2022 по делу № А69-1393/2022 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 16.02.2023 по тому же делу отменены в части отказа в удовлетворении встречного иска общества с ограниченной ответственностью «Вавиол», дело в отмененной части направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Тыва. В остальной части судебные акты оставлены без изменения.

ООО «Метагрупп» обратилось в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой на решение Арбитражного суда Республики Тыва от 30.11.2022 по делу № А69-1393/2022, постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 16.02.2023 и постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 06.06.2023 по тому же делу.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 22.08.2023 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Определением Арбитражного суда Республики Тыва от 23.06.2023 принято к производству на новое рассмотрение встречное исковое заявление ООО "ВАВИОЛ" к ООО "Метагрупп" о взыскании 3030913 руб. 43 коп., в том числе пени за просрочку исполнения обязательств по договору поставки № 161 от 27.11.2020 за период с 12.05.2021 по 07.02.2022 в сумме 2305131 руб. 20 коп., по договору поставки № 23 от 16.02.2021 за период с 09.07.2021 по 07.02.2022 в размере 725782 руб. 23 коп.; судебных расходов по уплате государственной пошлины в размере 38155 руб., предварительное судебное заседание назначено на 25.07.2023.

13.07.2023 от ООО «МЕТАГРУПП» посредством системы «Мой арбитр» поступил уточнённый отзыв на встречный иск ООО "ВАВИОЛ" с приложением актов о приемке товара от 27.09.2021 № 3 и № 4.

В судебном заседании 25.07.2023 представитель ООО «Вавиол» представила письменные пояснения к встречному иску.

Определением от 25.07.2023 дело назначено к судебному разбирательству на 12.09.2023.

Определением от 12.09.2023 судебное разбирательство отложено до 04.10.2023.

02.10.2023 от ООО "ВАВИОЛ" поступили письменные пояснения по иску с приложением письма ООО «Вавиол» от 11.02.2022.

В судебном заседании представитель ООО «Вавиол» поддержала встречные исковые требования.

В судебном заседании представитель ООО «МЕТАГРУПП»  со встречным исковым не согласился.

При новом рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства. 

Как следует из материалов дела и установлено судами, между сторонами (ООО «Метагрупп» - поставщик, ООО «Вавиол» - покупатель) заключены договоры поставки № 161 от 27.11.2020 и № 23 от 16.02.2021 в редакции дополнительных соглашений, по которым поставщик обязался поставить и передать покупателю, а покупатель – принять и оплатить оборудование, наименование, количество, комплектность и ассортимент которого установлены в спецификации (приложении № 1).

Общая стоимость оборудования по договору № 161 от 27.11.2020 составляет 24834149 рублей, в которую включена стоимость выполнения шеф-монтажных работ в размере 1624671 рубля. 

Общая стоимость оборудования по договору № 23 от 16.02.2021 составляет 8960982 рубля, в которую включена стоимость выполнения шеф-монтажных работ в размере 568568 рублей. 

Порядок расчетов согласован в разделе 3 договоров и предусматривает авансовый платеж в размере 80% от суммы договора в течение трех рабочих дней после вступления в силу договора (пункт 3.1.1 договоров); окончательный платеж в размере 20% от суммы договора в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления от поставщика о готовности к отгрузке со склада поставщика в г. Новосибирске и подписания сторонами универсального передаточного документа (пункт 3.1.2 договоров).

Сроки и условия поставки оборудования оговорены в разделе 4 договоров. Отгрузка оборудования осуществляется со склада поставщика по адресу: 

<

...> (пункт 4.1 договоров)

Поставщик обязан произвести оборудование и уведомить покупателя о готовности к отгрузке не позднее 90 (Девяносто) рабочих дней с момента получения поставщиком всех согласованных с поставщиком и подписанных покупателем эскизов: ПЭТ бутылок, пробок для ПЭТ бутылок, а также получения всех согласованных с поставщиком оригиналов образцов: ПЭТ бутылок, пробок для ПЭТ бутылок, а также получения поставщиком согласованного с поставщиком и подписанного покупателем приложения №2 и поступления авансового платежа на расчетный счет поставщика согласно п.3.1.1. договора (пункты 4.2 договоров).

Прием - передача оборудования оформляется подписанием универсального передаточного документа перед отгрузкой оборудования со склада Поставщика по адресу: 

<

...> (пункты 4.4 договоров). 

Передача оборудования в транспортную компанию для дальнейшей транспортировки в адрес покупателя осуществляется поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней после выполнения покупателем п. 3.1.2. договора, но не ранее выполнения поставщиком п.4.2. договора. 

В случае нарушения покупателем сроков платежей, определенных пунктом 3.1 (кроме платежа согласно пункту 3.1.1), покупатель несет ответственность в виде уплаты пени в размере 0,05% от стоимости оборудования за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости оборудования (пункт 7.3 договоров). 

В случае нарушения сроков, предусмотренных пунктом 4.2, поставщик несет ответственность в виде уплаты пени в размере 0,05% от стоимости не изготовленного в срок оборудования за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости оборудования (пункт 7.2 договоров).

Авансовые платежи по договорам внесены покупателем платежными поручениями № 5 от 16 декабря 2020 года (по договору № 161), № 2 от 26 февраля 2021 года (по договору № 23). 

Письмами-уведомлениями от 20.09.2021 (по договору № 161), от 20.10.2021 (по договору № 23) и от 31.01.2022 (по договорам № 161 и № 23) поставщик уведомил покупателя о готовности оборудования к поставке. 

Факт поставки оборудования по договору № 161 на общую сумму 23 209 478 рублей подтверждён универсальными передаточными документами № 161 от 26.10.2021, № 23 от 07.02.2022. Платежным поручением № 91 от 07 апреля 2022 года покупатель оплатил стоимость оборудования (с учётом авансового платежа). 

Факт поставки оборудования по договору № 23 на общую сумму 8 122 414 рублей подтверждён универсальными передаточными документами № 162 от 26.10.2021, № 24 от 07.02.2022. Платежным поручением № 92 от 07 апреля 2022 года покупатель оплатил стоимость оборудования (с учётом авансового платежа).

Полагая, что поставщик нарушил сроки исполнения своих обязательств, предусмотренных пунктом 4.2 договоров, ООО «Вавиол» предъявило к ООО «Метагрупп» встречный иск о взыскании 3030913 руб. 43 коп., в том числе пени за просрочку исполнения обязательств по договору поставки № 161 от 27.11.2020 за период с 12.05.2021 по 07.02.2022 в размере 2305131 руб. 20 коп., по договору поставки № 23 от 16.02.2021 за период с 09.07.2021 по 07.02.2022 в размере 725782 руб. 23 коп.

Согласно представленным дополнительным письменным пояснениям ООО «Вавиол» по встречному иску следует следующее:

Согласно п. 1.2 договора требования к выпускаемой на оборудовании продукции (при наличии) указаны приложении №2 к настоящему договору, являющемуся неотъемлемой частью.

В приложении № 2 к договору, именуемом «Требования к выпускаемой продукции», имеются в таблице графы, предусматривающие внесение в них следующих параметров:

- объем тары, л, вес проформы, тип горловины для выдува;

- размеры тары, формы тары (цилиндрическая, прямоугольная, треугольная) особенности;

- диаметр горловины, мм, тип горловины;

- уровень наполнения, мм;

- тип крышки (для укупора);

- тип этикетки (материал, позиция);

- размеры этикетки;

- группа (упаковка бутылок).

Параметры изложенного в приложении № 2 отсутствуют.

Приложение № 2 подписано сторонами договора и скреплено печатями без заполнения таблицы приложения содержанием, то есть без указания каких либо требований к выпускаемой на оборудовании продукции.

Согласно пункту 4.2 договора № 161 поставщик обязан произвести оборудование не позднее 90 рабочих дней с момента получения поставщиком всех согласованных с поставщиком и подписанных с покупателем эскизов: ПЭТ бутылок, пробок для ПЭТ бутылок, этикеток, преформ, а также получения всех согласованных с поставщиком оригиналов образцов: пробок для ПЭТ бутылок, этикеток, преформ, а также получения поставщиком согласованного с поставщиком и подписанного покупателем приложения № 2 и поступления авансового платежа на расчетный счет поставщика согласно п. 3.1.1 договора.

Согласно пункту 4.3 договора № 161 при предоставлении покупателем поставщику образцов в недостаточном для производства и (или) тестирования оборудования количестве и (или) предоставлении образцов не соответствующих согласованным с поставщиком эскизам и приложению № 2, поставщик вправе приостановить производство или тестирование оборудования до момента предоставления покупателем поставщику соответствующих образцов в достаточном количестве.

Как следует из приведённого содержания пунктов 4.2 и 4.3 договора, образцы бутылок, пробок для ПЭТ бутылок, этикеток, преформ должны соответствовать эскизам этих изделий, которые в свою очередь должны соответствовать требованиям, указанным в приложении № 2.

При отсутствии в приложении №2 требований к параметрам бутылок, пробок для 11ЭТ бутылок, этикеток, преформ отсутствуют условия и основания для создания эскизов и образцов этих изделий (размеры, объемы , количество и пр.).

Пунктом 6.1 договора установлено, что требования к выпускаемой на оборудовании продукции (при наличии) указаны в приложении № 2 к настоящему договору.

Таким образом, в пунктах 1.2 и 6.1. договора определено, что в приложении № 2 указываются требования к выпускаемой на оборудовании продукции при их наличии.    х

Как видно из подписанного сторонами и скрепленного печатями покупателя и поставщика приложения № 2, в нем отсутствуют требования к выпускаемой на оборудовании продукции.

Как следует из пунктов 4.2, 1.2, 6.1 договора, условием предоставления эскизов и образцов поставщику является наличие требований к ним, указанных в приложении № 2.

Таким образом, в силу пунктов 1.2 и 6.1 договора условия начала производства оборудования, установленные п. 4.2 - получение поставщиком всех согласованных с поставщиком и подписанных с покупателем эскизов и образцов ПЭТ бутылок, пробок для ПЭТ бутылок, этикеток, преформ, не применяются в связи с отсутствием в приложении № 2 условия о требованиях к выпускаемой на оборудовании продукции.

В этой связи ни поставщиком, ни покупателем не рассматривались вопросы изготовления и согласования эскизов и образцов бутылок, пробок для ПЭТ бутылок, этикеток, преформ и предоставления их поставщику, как и вопросы приостановления производства или тестирования оборудования в связи с их непредставлением.

Отсутствие в приложении № 2 требований к выпускаемой на оборудовании продукции (бутылок, пробок для ПЭТ бутылок, этикеток, преформ) и потребности в эскизах и образцах вызвано тем, что конкретные требования относительно бутылок, пробок для ПЭГ бутылок, этикеток, преформ сторонами согласованы в спецификации - приложении № 1 (пункты 1,7,8,9,13,16) при заключении договора согласно и. 1.1, что определило марку, характеристику изготавливаемого оборудования, его параметры и стоимость:

- автомат выдува ПЭТ бутылок 0,025-2,0 л АОК-400;

- триблок разлива гозированной воды в ПЭТ тару 0,25-2,0 л;

- комплект переналадки на триблок ПЭТ 0,25-2,0 л;

- автомат укупоривания ПЭТ бутылок 0,025-2.0 л колпачками sport-cap FXZ-6;

- автомат нанесения полипропиленовой этикетки на цилиндрическую тару АЭ - 4000 П-ТИ;

- автомат термоупаковки ПЭТ и стеклянных бутылок АТУ -650-ПЛ. Конкретные  марки  оборудования   и заданные  параметры продукции  -

бутылок, пробок для ПЭГ бутылок, этикеток, преформ предусмотрены в спецификации при заключении договора без дополнительных условий, влияющих на начало процесса изготовления оборудования.

В этой связи на протяжении всего периода действия договора со дня его заключения и до отгрузки со склада ООО «Метагрупп» не заявляло о препятствиях для производства или тестирования оборудования и приостановлении изготовления.

Также об этом не заявлялось ООО «Метагрупп» после получения претензии от 20.09.2021, которая была признана и после которой были произведены действия по поставке оборудования.

Преформы и крышки для каждого вида бутылок, этикетки по 8000 штук потребовались только в качестве расходных материалов для проведения шеф-монтажных и пусконаладочных работ оборудования, поставленного 07.02.2022, о чем указано в письме ООО «Метагрупп» от 02.03.2022 № 73. Преформы, крышки для бутылок и этикетки были заказаны ООО «Вавиол» для проведения шеф-монтажных и пуско-наладочных работ оборудования после его поставки. Таким образом, поскольку условие о получении поставщиком эскизов и образцов ПЭТ бутылок, пробок для ПЭТ бутылок, этикеток, преформ не применялось для начала изготовления оборудования в связи с отсутствием условия о требованиях к выпускаемой на оборудовании продукции, постольку предусмотренным п. 4.2 договора условием для начала изготовления оборудования и течения срока для его изготовления является поступление авансового платежа на расчетный счет поставщика согласно п. 3.1.1 договора.

Согласно пункту 3.1.1 договора в течение 3 рабочих дней после вступления в силу настоящего Договора покупатель перечисляет поставщику сумму в размере 80% от суммы настоящего Договора.

Платежным поручением № 5 от 16.12.2020 ООО «Вавиол» перечислена сумма аванса 19 731 864 руб. 80 коп.

На момент поступления аванса сторонами были согласованы в спецификации все параметры ПЭТ бутылок, пробок для ПЭТ бутылок, этикеток, преформ, необходимые и достаточные для производства оборудования.

Установленный пунктом 4.2 договора № 161 срок для производства оборудования 90 рабочих дней истек 11.05.2021 со дня 17.12.2020, следующего после даты поступления на счет поставщика 80% от суммы договора, перечисленных платежным поручением № 5 от 16.12.2020 в размере 19 731 864 руб. 80 коп.

Поставщиком нарушены сроки выполнения обязательств по поставке оборудования, предусмотренные п. 4.2 договора, в связи с чем поставщику направлена претензия от 20.09.2021.

По исполнению претензии поставлено частично 29.10.2021 оборудование на сумму 6629749 руб. по УПД № 161 от 26.10.2021, подписанному ООО «Вавиол» 29.10.2021.

07.02.2022 поставлена оставшаяся часть оборудования на сумму 16 579 729 руб. по УПД № 23 от 07.02.2022, подписанному ООО «Вавиол» 07.02.2021.

Таким образом, оборудование изготавливалось со дня оплаты аванса за пределами 90 рабочих дней, истекших 11.05.2021 до 07.02.2022, то есть с превышением срока на 9 календарных месяцев.

За неисполнение обязательств ООО «Метагрупп» по изготовлению оборудования в срок, установленный договором, подлежат выплате ООО «Вавиол» пени от стоимости не изготовленного в срок оборудования.

Стоимость оборудования определена в приложении № 1 к договору № 161, которая согласно пунктам 1.1, 1.7, 2.1-2.4 договора составляет 23 051 312 руб.  без стоимости шеф-монтажных работ.

Стоимость оборудования в счете на оплату, выставленном ООО «Метагрупп» от 14.02.2022 № 25 на сумму 23 209 478 руб. определена с учетом увеличения цены по дополнительному соглашению №4 от 13.08.2021 без цены шеф-монтажных работ.

Пени по договору № 161 начисляются на сумму стоимости неизготовленного оборудования 23 051 312 руб. за период просрочки с 12.05.2021 - со дня, следующего за днем окончания срока изготовления оборудования 11.05.2021, до дня частичного исполнения обязательств 29.10.2021 и с 30.10.2021 по 07.02.2022 на сумму стоимости  оставшегося к допоставке оборудования 16 421 563 руб.

Расчет пеней по договору № 161: стоимость оборудования 23 051 312 руб., период просрочки с 12.05.2021 по 29.10.2021, количество дней просрочки 171, процент 0,05 - 23051312 х 171 х 0,05= 1 970 887 руб. 18 коп.

Стоимость оборудования после частичной поставки составляет 16 421563 руб. (23051312 руб. - 6629749 руб.). период просрочки с 30.10.2021 по 07.02.2022, количество дней просрочки 101, процент 0,05 - 6 629 749 х 101 х 0,05 = 829 288 руб. 93 коп.

Всего пеней по договору № 161 - 2 800 176 руб. 11 коп. (1 970 887,18 + 829 288, 93).

Согласно п. 7.2. Договора № 161 размер пеней не может быть более 10% от стоимости оборудования. 10 % от стоимости оборудования по договору, равной 23051312 руб., составляет 2305131 руб. 20 коп.

Следовательно, по договору №161 подлежат взысканию пени в размере 2305131 руб. 20 коп.

Как следует из содержания пунктов 4.2 и 4.3 договора, образцы ПЭТ бутылок, пробок для ПЭТ бутылок должны соответствовать эскизам этих изделий, которые в свою очередь должны соответствовать требованиям, указанным в приложении № 2.

При отсутствии в приложении №2 требований к параметрам бутылок, пробок для ПЭТ бутылок - отсутствуют условия и основания для создания эскизов и образцов этих изделий (размеры, объемы и пр.).

Пунктом 6.1 договора установлено, что требования к выпускаемой на оборудовании продукции (при наличии) указаны в приложении № 2 к настоящему договору.

Таким образом, в пунктах 1.2 и 6.1. договора определено, что в приложении № 2 указываются требования к выпускаемой на оборудовании продукции при их наличии.

Как видно из подписанного сторонами и скрепленного печатями покупателя и поставщика приложения № 2, в нем отсутствуют требования к выпускаемой на оборудовании продукции.

Как следует из пунктов 4.2, 1.2, 6.1 договора, условием предоставления эскизов и образцов поставщику является наличие требований к ним, указанных в приложении № 2.

Таким образом, в силу пунктов 1.2 и 6.1 договора условия начала производства оборудования, установленные п. 4.2 - получение поставщиком всех согласованных с поставщиком и подписанных с покупателем эскизов и образцов ПЭТ бутылок, пробок для ПЭТ бутылок, не применяются в связи с отсутствием в приложении № 2 условий о требованиях к выпускаемой на оборудовании продукции.

В этой связи, ни поставщиком, ни покупателем не рассматривались вопросы изготовления и согласования эскизов и образцов бутылок, пробок для ПЭТ бутылок и предоставления их поставщику, как и вопросы приостановления производства или тестирования оборудования в связи с их непредставлением.

Отсутствие в приложении № 2 требований к выпускаемой на оборудовании продукции (бутылок, пробок для ПЭТ бутылок) и потребности в эскизах и образцах определено тем, что конкретные требования относительно бутылок, пробок для ПЭТ бутылок сторонами согласованы в спецификации -приложении № 1 (пункты 5, 10,11,12, 13) при заключении договора согласно п. 1.1, что определяло марку, характеристику изготавливаемого оборудования, его параметры и стоимость:

- диблок розлива в ПЭТ бутылки 0,33-2,0 DGF 18-6, комплект переналадки на DGF 18-6;

- полуавтомат выдува ПЭТ тары 0,33-6,0 л ПВ-800-П (16 ATM);

- пресс-форма одноместная 5, 0 л;

- пресс-форма двухместная 1.0 л;

- полуавтомат розлива - укупоривания спокойных и пенящихся жидкостей в ПЭТ тару 0,5-5,0 л ПРУ-ЮООГ-МГ (4 головы, по уровню переливом, с герметизацией);

Конкретные марки оборудования и заданные параметры продукции - бутылок и пробок для них предусмотрены в спецификации при заключении договора без дополнительных условий, влияющих на начало процесса изготовления оборудования.

В этой связи на протяжении всего периода действия договора со дня его заключения и до отгрузки со склада ООО «Метагрупп» не заявляло о препятствиях для производства или тестирования оборудования и приостановлении изготовления.

Также об этом не заявлялось ООО «Метагрупп» после получения претензии от 20.09.2021, которая была признана и после которой были произведены действия по поставке оборудования.

Таким образом, поскольку условие о получении поставщиком эскизов и образцов ПЭТ бутылок, пробок для ПЭТ бутылок не применялось для начала изготовления оборудования в связи с отсутствием условия о требованиях к выпускаемой на оборудовании продукции, постольку предусмотренным п. 4.2 договора условием для начала изготовления оборудования и течения срока для его изготовления является поступление авансового платежа на расчетный счет поставщика согласно п. 3.1.1 договора.

Согласно п. 3.1.1 договора в течение 3 рабочих дней после вступления в силу настоящего Договора покупатель перечисляет поставщику сумму в размере 80% от суммы настоящего Договора.

Платежным поручением № 2 от 26.02.2021 «Вавиол» перечислена сумма аванса 6952785 руб. 60 коп.

На момент поступления аванса сторонами были согласованы в спецификации все параметры ПЭТ бутылок, пробок для ПЭГ бутылок для укупоривания путем выбора производимого оборудования.

Установленный п. 4.2 договора № 23 срок для производства оборудования 90 рабочих дней истек 08.07.2021 со дня 27.02.2021, следующего после даты поступления на счет поставщика 80% от суммы договора, перечисленных платежным поручением № 2 от 26.02.2021 на сумму 6 952 785 руб. 60 коп.

Поставщиком нарушены сроки выполнения обязательств по поставке оборудования, предусмотренные п. 4.2. Договоров № 23, в связи с чем ООО «Метагрупп» направлена претензия от 20.09.2021.

По исполнению претензии поставлено частично 29.10.2021 оборудование по договору № 23 на сумму 2 837 942 руб. по УПД № 162 от 26.10.2021, подписанному ООО «Вавиол» 29.10.2021.

07.02.2022 поставлена оставшаяся часть оборудования по договору № 23 на сумму 5284472 руб. по УПД № 24 от 07.02.2022, подписанному ООО «Вавиол» 07.02.2021.

За неисполнение обязательств ООО «Метагрупп» по изготовлению оборудования в срок, установленный договором, подлежат выплате ООО «Вавиол» пени от стоимости не изготовленного в срок оборудования.

Стоимость оборудования определена в приложении № 1 к договору № 23, которая согласно пунктам 1.1, 1.7, 2.1-2.4 договора составляет без шеф-монтажных работ 8122414 руб.

Стоимость оборудования определена в счете на оплату, выставленном ООО «Метагрупп», от 14.02.2022 № 26 по договору поставки № 23 на сумму 8122414 руб. без цены шеф-монтажных работ.

Пени по договору № 23 подлежат начислению на сумму стоимости неизготовленного оборудования 8122414 руб. за период просрочки с 09.07.2021 - со дня, следующего за днем окончания срока изготовления оборудования 08.07.2021, до дня частичного исполнения обязательств 29.10.2021 и с 30.10.2021 по 07.02.2022 на сумму стоимости оставшегося к допоставке оборудования 5284472 руб. Расчет пеней по договору № 23: стоимость оборудования 8 122 414 руб., период просрочки с 09.07.2021 по 29.10.2021, количество дней просрочки 113, процент 0,05 - 8 122 414 х 113 х 0,05 = 458916 руб. 39 коп. Стоимость оборудования после частичной поставки 5 284 472 руб. (8 122 414 руб. - 2 837 942 руб.), период просрочки с 30.10.2021 по 07.02.2022, количество дней просрочки 101, процент 0,05 - 5 284 472 х 101 х 0,05 = 266 865. Всего пеней по договору № 23 – 725782 руб.  23 коп. (458 916,39 + 266 865,84). Итого, начислено ко взысканию пеней по договорам № 161 и № 23 в сумме 3030913 руб. 43 коп. (2 305 131 руб. 20 коп. + 725782 руб.  23 коп.).

Возражая против удовлетворения встречного иска, ООО «Метагрупп» представил уточнённый отзыв, в котором выразил следующие возражения:

Истцом по встречному иску допущены такие процессуальные нарушения, как «неопределенность» предмета иска и «несоответствие» предполагаемого по тексту предмета иска заявленному основанию иска.

В силу положений статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата неустойки (пени) по своей правовой природе является мерой компенсационного характера и предполагает взыскание исключительно за нарушение сторонами принятых на себя договорных обязательств.

Из перечисленных положений пунктов 4.2, 4.3. 7.2 договоров и буквального прочтения их содержания очевидным образом следует, что сроки изготовления индивидуально-определенного технологического оборудования зависят от двух факторов: срока внесения первого платежа по каждому договору и срока предоставления Поставщику Покупателем (по согласованию с Поставщиком) трех составляющих заказа: Технического задания – Эскизов, ФИО4, Требований к выпускаемой продукции (ТВП - Приложение №2). Совокупность указанных трех частей заказа образует собой - индивидуальные параметры заказа.

В силу статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого липа, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

В силу данной нормы и прямого содержания пунктов 4.2. 4.3 Договоров, следует, что ООО «Вавиол» обязано было представить в ООО «Метагрупп» такое «юридически значимое сообщение» как индивидуальные параметры заказанного оборудования именно в той форме, объеме и порядке, как его обоюдно согласовали обе стороны договоров.

То есть «форму» эскизов стороны определили как «подписанный уполномоченным лицом», «объем - всего четыре документа - эскизы ПЭТ бутылок, пробок для ПЭТ бутылок, этикеток, преформ», «форму» образцов как «согласованные с Поставщиком оригиналы», «объем» всего четыре вида оригиналов образцов - образцы ПЭТ бутылок, пробок для ПЭТ бутылок, этикеток, преформ». Требования к выпускаемой продукции (ТВП - Приложение № 2) - согласованное с поставщиком и подписанное покупателем», а «порядок представления» - «с даты вступления в силу договора».

Содержание пункта 4.2 Договоров устанавливает: «Поставщик обязан произвести оборудование и уведомить Покупатели о готовности к отгрузке не позднее 90 (Девяносто) рабочих дней с момента...». Именно за нарушение данного обязательства по «изготовлению оборудования и отправке уведомления о готовности к отгрузке» и установлена ответственность, предусмотренная пунктом 7.2 каждого из Договоров.

Следовательно, данное условие Договоров предусматривает ответственность именно за нарушение сроков изготовления оборудования, а исполнение данных обязательств подтверждается таким документом как «Уведомление о готовности к отгрузке».

Однако, ООО «Вавиол» не ссылается на «Уведомление о готовности оборудования к отгрузке», а ссылается на «Универсальный передаточный документ» - являющийся подтверждением факта исполнения иного обязательства Поставщика - обязательства по «поставке» оборудования (к тому же исполненного совершенно в иные временные периоды и в рамках исполнения совершенно иных условий договоров).

В силу пункта 4.1 каждого из Договоров оттрузка оборудования, предусмотренною Договором, осуществляется со склада Поставщика по адресу: 

<

...> - что предполагает действия Покупателя по «согласованию» конкретной даты приезда специалистов Покупателя для осмотра и принятия оборудования, а также подписания соответствующих передаточных документов.

Исчисление срока поставки оборудования предполагает с момента получения поставщиком всей совокупности Индивидуальных параметров заказа (п.4.2 договоров).

Обязательства ООО «Метагрупп» по «поставке оборудования» завершается действиями по отгрузке оборудования на складе поставщика в городе Новосибирске и оформлением приема - передачи оборудования, путем подписания Универсального передаточного документа (пункты 4.1 и 4.4. Договоров).

В силу положений пункта 4.4 Договоров прием - передача оборудования оформляется подписанием Универсального передаточного документа перед отгрузкой оборудования со склада поставщика по адресу: 

<

...>.

Фактическое исполнение данного обязательства подтверждается подписанием сторонами универсальных передаточных документов.

В соответствии с условиями пункта 3.1.2 Договоров, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления от Поставщика о готовности к отгрузке со склада Поставщика в г.Новосибирске и подписания сторонами Универсального передаточного документа Покупатель обязан перечислить Поставщику сумму окончательного платежа в размере 20 (двадцати) % от суммы каждого Договора.

Факт исполнения ООО «Метагрупп» обязательств по «поставке» оборудования и подписания сторонами 22.04.2022 универсальных передаточных документов о передаче оборудования Покупателю является наступившим основанием к осуществлению ООО «Вавиол» обязанности по оплате ООО «Метагрупп» полного размера суммы окончательного платежа стоимости оборудования по каждому договору, установленного п.3.2.1. а также соответствующих пеней за просрочку исполнения данного обязательства, установленных п. 7.3 договоров.

Однако, данное обязательство ООО «ВАВИОЛ» так в полном объеме и не исполнено.

«Обязательство по изготовлению оборудования» и «обязательство по поставке оборудования» - это два разных обязательства, имеющих собственное нормативное закрепление в каждом договоре, основания возникновения, начальные и конечные сроки исполнения.

Однако, ООО «Вавиол», указывая во встречном иске о нарушении сроков поставки оборудования, ссылается на пункт 7.2 договоров, в которых предусмотрена ответственность  только за нарушение сроков изготовления оборудования.

Содержание пункта 4.2. Договоров предусматривают ответственность именно за нарушение сроков изготовления оборудования и исполнение данных обязательств подтверждается таким документом как «Уведомление о готовности оборудования к отгрузке».

Положения пунктов 4.3 - 4.5 договоров предполагают фиксацию факта исполнения поставки в виде такого документа как «Универсальный передаточный документ».

На основании договоров № 161, № 23 ООО «Вавиол» осуществлен заказ в ООО «Метагрупп» оборудования производственно-технического назначения, изготовление которого производится исключительно под конкретные «заготовки» заказчика в виде готовых «тар», «крышек», «этикеток», «преформ», подлежащие размещению в данном оборудовании, а также «материал» в виде конкретного «продукта», имеющего соответствующие показатели вязкости, агрессивности, особенностей пищевого/не пищевого характера и пр., подлежащего размещению в указанных заготовках.

Следовательно, закрепление в Договорах условия об обязательном и своевременном представлении Покупателем Поставщик) надлежащих эскизов и образцов, обязательное согласование и подписание Сторонами Приложения № 2 (ТВП) к указанным договорам, своевременное наличие в ООО «Метагрупп» указанных информации и материалов не является формальным условием, а имеет основополагающее значение для производства заказанного оборудования.

Из условий пункта 4.2. Договоров следует, что обязанность поставщика ООО «Метагрупп» произвести оборудование и уведомить покупателя ООО «Вавиол» о готовности оборудования к поставке зависят oт двух факторов - срока внесения первого платежа по Договорам и срока предоставления Поставщику Покупателем (по согласованию с Поставщиком) трех составляющих заказа: технического задания – Эскизов, ФИО4, ТВП - Приложение №2.

Таким образом, исходя из буквального толкования условий Договоров поставки № 161 и № 23, обязательству Поставщика изготовить и поставить Покупателю оборудование по указанным Договорам предшествует исполнение обязательств со стороны Покупателя не только произвести авансовый платеж по каждому договору, но выполнить иные действия, как-то: предоставить Поставщику эскизы, оригиналы образцов и подписанное приложение № 2 (совокупность условий).

С учётом изложенного, следует вывод о том, что обязанность по изготовлению и поставке товара по договорам № 161 и № 23 возникла у ООО «Метагрупп» только после исполнения покупателем в полном объеме совокупности условий, предусмотренных пунктом 4.2 каждого договора.

Однако ООО «Вавиол» данную обязанность, закрепленную в Договорах, в надлежащем виде не исполнило.

В материалах дела отсутствуют доказательства передачи Покупателем Поставщику эскизов, оригиналов образцов, подписанного Приложения № 2 (ТВП) (каким способом, в какие даты).

С целью выявления именно конкретных дат предоставления ООО «ВАВИОЛ» в ООО «МЕТАГРУПП" индивидуальных параметров заказанного оборудования Третий арбитражный апелляционный суд предложил Сторонам представить в суд доказательства направления параметров заказа в адрес поставщика (аудиопротокол судебного заседания от 18.01.2023, определение об отложении судебного разбирательства от 18.01.2023).

Однако ООО «Вавиол» не исполнено предложение апелляционного суда о предоставлении указанной информации.

В свою очередь, указанные сведения в материалы дела были представлены самим изготовителем оборудования ООО «Метагрупп» - уточненный отзыв от 07.02.2023 с приложением актов о приемке товаров № 3 от 27.09.2021 и № 4 от 27.09.2021 - первичных документов о приемке промышленных образцов, которые оформлены в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ и Письмом Министерства финансов РФ от 01.04.2008 № 03-07-15/44 «О взимании НДС с операций по передаче прав на использование результатов интеллектуальной деятельности».

По Договору № 161:

27.11.2020 сторонами был заключен договор № 161. 

16.12.2020 ООО «ВАВИОЛ» осуществлена оплата первого платежа по Договору в сумме 19 731 864 руб. 80 коп., что подтверждается платежным поручением № 5 от 16.12.2020.

Однако, после заключения сторонами договора и осуществления покупателем авансового платежа по договору, покупатель ООО «ВАВИОЛ» длительное время не мог определиться с индивидуальными параметрами подлежащего изготовлению оборудования, в связи с чем со стороны ООО «ВАВИОЛ» существенно были «затянуты» сроки представления в ООО «МЕТАГРУПП» согласованных в договоре индивидуальных параметров заказанного оборудования.

24.08.2021 сторонам заключено дополнительное соглашение № 4 к Договору № 161, в соответствии с которым сторонами согласованы новый перечень оборудования, подлежащий изготовлению и поставке, а также новая стоимость оборудования. 

06.09.2021 в ООО «МЕТАГРУПП» от ООО «ВАВИОЛ» представлены эскизы: ПЭТ бутылок, пробок для ПЭТ бутылок, этикеток, преформ.

27.09.2021 в ООО «МЕТАГРУПП» от ООО «ВАВИОЛ» поступили образцы: пробок для ПЭТ бутылок, этикеток, преформ, а также подписанное Приложение № 2 (требования к выпускаемой продукции - ТВП) к Договору.

Процесс поступления производственных образцов, как объектов материальных ценностей, ООО «МЕТАГРУПП» задокументирован в соответствии с унифицированной формой ТОРГ-1, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132. на основании которой ООО «МЕТАГРУПП» были оформлены следующие документы первичной бухгалтерской отчетности:

- Акт о приемке товаров № 3 от 27.09.2021, подтверждающий приемку и оприходование на склад материальных ценностей: Крышки для ПЭТ бутылок (винтовые), Крышки для ПЭТ бутылок (sport-cap), Преформа 18 гр для выдува 500 мл., Преформа 28 гр. Для выдува 1000 мл., Преформа 33 гр для выдува 1500 мл., Этикетка полипропиленовая на тару 500 мл., Этикетка полипропиленовая на тару 1000 мл., Этикетка полипропиленовая на тару 1500 мл. с указанием в графе «состояние товара в момент осмотра» сведений, что «образцы соответствуют требованиям для тестирования оборудования».

ООО «ВАВИОЛ» только 27.09.2021 в полном объеме исполнило договорные обязательства по представлению в адрес ООО «МЕТАГРУПП» индивидуальных параметров заказанного оборудования. Соответственно, у ООО «МЕТАГРУПП» только с 27.09.2021 появилась фактическая возможность к исполнению принятых обязательств по изготовлению оборудования.

По результатам представления ООО «ВАВИОЛ» в ООО «МЕТАГРУПП» в полном обьеме индивидуальных параметров заказанного оборудования. ООО «МЕТАГРУПП» надлежащим образом осуществлено изготовление и поставка покупателю заказанного Оборудования.

Следовательно, если осуществлять надлежащий расчет срока изготовления оборудования (90 рабочих дней), то данный расчет подлежит исчислению с 27.09.2021 (дата представления ООО «ВАВИОЛ» в ООО «МЕТАГРУПП» образцов и приложения № 2), а срок изготовления ООО «МЕТАГРУПП» предусмотренного договором оборудования: и уведомления ООО" «ВАВИОЛ» о готовности оборудования к поставке - не позднее 10.02.2022. Приемка - передача оборудования по Договору № 161 от Поставщика Покупателю в полном объеме произведена сторонами на основании Универсального передаточного документа № 23 от 07.02.2022 - т.е. в пределах сроков производства оборудования, установленных Договором № 161.

Данный срок со стороны ООО «МЕТАГРУПП» не нарушен.

По Договору № 23:

16.02.2021 сторонами заключен договор поставки № 23.

26.02.2021 ООО «ВАВИОЛ» осуществлена оплата первого платежа по Договору в сумме 6 952 785 руб. 60 коп., что подтверждается платежным поручением № 2 от 26.02.2021.

Однако, после заключения сторонами договора и осуществления покупателем авансового платежа по договору, Покупатель длительное время не мог определиться с индивидуальными параметрами подлежащего изготовлению оборудования.

06.09.2021 в ООО «МЕТАГРУПП» от ООО «ВАВИОЛ» представлены эскизы: ПЭТ бутылок, пробок для ПЭТ бутылок.

27.09.2021 в ООО «МЕТАГРУПП» от ООО «ВАВИОЛ» поступили образцы: пробок для ПЭТ бутылок, пробок для ПЭТ бутылок, а также подписанное Приложение № 2 (требования к выпускаемой продукции - ТВП) к Договору, что подтверждается следующими документами:

- Акт о приемке товаров № 4 от 27.09.2021: Крышки для ПЭТ бутылок (винтовые), ПЭТ тара 500 мл., ПЭТ тара 1000 мл, ПЭТ тара 1500 мл. с указанием в графе «состояние товара в момент осмотра» сведений, что «образцы соответствии требованиям для тестирования оборудования». Данные образцы технически необходимы для производства предусмотренного в Договоре № 23 оборудования.

Следовательно, если осуществлять надлежащий расчет срока изготовления оборудования по Договору № 23 (90 рабочих дней), то данный расчет подлежит исчислению с 27.09.2021 (дата представления ООО «ВАВИОЛ» в ООО «МЕТАГРУПП» образцов и приложения № 2), а срок изготовления ООО «МЕТАГРУПП» предусмотренного Договором № 23 оборудования: и уведомления ООО «ВАВИОЛ» о готовности оборудования к поставке - не позднее 10.02.2022.

Передача оборудования покупателю в полном объеме произведена сторонами на основании Универсального передаточного документа № 24 от 07.02.2022 - т.е. в пределах сроков производства оборудования, установленных Договором № 23.

Таким обратом, исходя из фактических обстоятельств предоставления ООО «ВАВИОЛ» индивидуальных параметров заказа, сроки изготовления оборудования по договорам № 161 и № 23 ООО «МЕТАГРУПП» не нарушены.

Оценив  имеющиеся в материалах дела доказательства, выслушав пояснения сторон, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении встречного иска по следующим основаниям.

Между спорящимися сторонами сложились правоотношения из двух идентичных по условиям смешанных договоров, включающих элементы договора поставки и элементы договора возмездного оказания услуг.

Статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации, определено понятие договора поставки: по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации, покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. 

В соответствии со статьями 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре. 

Как следует из материалов дела, между ООО «Метагрупп» (поставщик) и ООО «Вавиол» (покупатель) заключены два договора поставки - договор от 27.11.2020 № 161 (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 11.12.2020, № 2 от 15.12.2020, № 3 от 11.06.2021, № 4 от 13.08.2021, № 5 от 20.10.2021 и договор от 16.02.2021 № 23 (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 20.02.2021, № 2 от 11.06.2021, № 3 от 20.10.2021), согласно предмету которых (п.1.1) поставщик обязался поставить и передать покупателю, а покупатель - принять и оплатить оборудование, наименование, количество, комплектность и ассортимент которого установлены в спецификации (приложении № 1 к договору).

Факт поставки оборудования по договору № 161 на общую сумму 23 209 478 рублей подтверждён универсальными передаточными документами № 161 от 26.10.2021, № 23 от 07.02.2022. Платежным поручением № 91 от 07 апреля 2022 года покупатель оплатил стоимость оборудования (с учётом авансового платежа). 

Факт поставки оборудования по договору № 23 на общую сумму 8 122 414 рублей подтверждён универсальными передаточными документами № 162 от 26.10.2021, № 24 от 07.02.2022. Платежным поручением № 92 от 07 апреля 2022 года покупатель оплатил стоимость оборудования (с учётом авансового платежа).

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признаётся определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Как следует из встречного искового заявления и уточнений к нему, покупатель полагает, что поставщиком нарушены сроки производства и уведомления покупателя о готовности к отгрузке оборудования, предусмотренного пунктом 4.2 договоров № 161 и № 23, в связи с чем, покупатель начислил пени на основании пункта 7.2 договоров.

Пунктами 7.2 и 7.3 договоров предусмотрена ответственность сторон. 

Как следует из условий пункта 7.2 договоров, в случае нарушения сроков, предусмотренных пунктом 4.2. договора, поставщик несёт ответственность в виде уплаты пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от стоимости не изготовленного в срок оборудования за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости оборудования. 

В свою очередь, пункт 4.2 договоров содержит условие о том, что поставщик обязан произвести оборудование и уведомить покупателя о готовности к отгрузке не позднее 90 (Девяносто) рабочих дней с момента получения поставщиком всех согласованных с поставщиком и подписанных покупателем эскизов: ПЭТ бутылок, пробок для ПЭТ бутылок, а также получения всех согласованных с поставщиком оригиналов образцов: ПЭТ бутылок, пробок для ПЭТ бутылок, а также получения поставщиком согласованного с поставщиком и подписанного покупателем приложения №2 и поступления авансового платежа на расчетный счет поставщика согласно пункту 3.1.1. договора. 

В соответствии со статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условии договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражении. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. 

В абзаце третьем пункта 43 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 "О некоторых вопросах применения общих положении Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора" (далее - постановление № 49) указано, что условия договора подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне договора извлекать преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ). Толкование договора не должно приводить к такому пониманию условия договора, которое стороны с очевидностью не могли иметь в виду.

Согласно пункту 43 постановления № 49 при толковании условии договора в силу абзаца первого ст. 431 ГК РФ судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражении (буквальное толкование). Такое значение определяется с учетом их общепринятого употребления любым участником гражданского оборота, действующим разумно и добросовестно (п. 5 ст. 10, п. 3 ст. 307 ГК РФ), если иное значение не следует из деловой практики сторон и иных обстоятельств дела. Значение условия договора устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (абзац первый ст. 431 ГК РФ). Условия договора толкуются и рассматриваются судом в их системной связи и с учетом того, что они являются согласованными частями одного договора (системное толкование).

Таким образом, из условий пункта 4.2. договоров буквально следует, что поставщик обязан произвести оборудование и уведомить покупателя о готовности к отгрузке не позднее девяносто рабочих дней именно с момента получения поставщиком всех согласованных с поставщиком и подписанных покупателем эскизов ПЭТ бутылок, пробок для ПЭТ бутылок, а также получения всех согласованных с поставщиком оригиналов образцов: ПЭТ бутылок, пробок для ПЭТ бутылок, а также получения поставщиком согласованного с поставщиком и подписанного покупателем приложения №2.

Согласно доводам ООО «Метагрупп», эскизы ПЭТ бутылок, пробок для ПЭТ бутылок представлены ООО «Вавиол» 06.09.2021, а непосредственно их образцы и подписанное приложение № 2 к договорам поступили в ООО «Метагрупп» 27.09.2021.

Данные обстоятельства ООО «Вавиол» соответствующими доказательствами не опровергнуты. 

Поэтому, суд принимает во внимание возражения ООО «Метагрупп», указанные в уточнённом отзыве на встречный иск.

На основании изложенного, оценив доводы и возражения истца и ответчика, а также представленные сторонами доказательства, принимая во внимание буквальное содержание условий пунктов 4.2 и 7.2 договоров, суд приходит к выводу о том, что при исполнении своих обязательств по договорам поставки № 161 от 27.11.2020 и № 23 от 16.02.2021 ООО «Метагрупп» не нарушил сроки, предусмотренные пунктом 4.2 указанных договоров. 

Девяноста рабочих дней, в течение которого ООО «Метагрупп» обязалось согласно пункту 4.2 договоров произвести оборудование и уведомить ООО «Вавиол» о готовности к отгрузке оборудования, исчисляется с 28.09.2021 по 14.02.2022, при этом следует исключить нерабочие дни с 1 по 5 ноября 2021 г. (Указ Президента РФ от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г."), с 3 по 7 января 2022 г.

В материалы дела ООО «»Метагрупп» представлены:

- уведомление № 220 о готовности к частичной отгрузке оборудования по договору № 161 от 20.09.2021 и уведомление № 89 о готовности к отгрузке оборудования по договору № 161 от 31.01.2022;

- уведомление № 90 о готовности к частичной отгрузке оборудования по договору № 23 от 20.10.2021 и уведомление № 90 о готовности к отгрузке оборудования по договору № 23 от 31.01.2022.

Приемка - передача оборудования по договорам № 161 и № 23 от поставщика покупателю в полном объёме произведена по универсальным передаточным документам 07.02.2022.

Следовательно, не имеется оснований для применения к поставщику ответственности в виде начисления ему пени в соответствии с пунктом 7.2. договоров № 161 и № 23. 

При таких обстоятельствах, встречный иск ООО «Вавиол» к ООО «Метагрупп» о взыскании 3030913 руб. 43 коп., в том числе пени за просрочку исполнения обязательств по договору поставки № 161 от 27.11.2020 за период с 12.05.2021 по 07.02.2022 в сумме 2305131 руб. 20 коп., пени за просрочку исполнения обязательств по договору поставки № 23 от 16.02.2021 за период с 09.07.2021 по 07.02.2022 в размере 725782 руб. 23 коп., удовлетворению не подлежит. 

С учётом результата рассмотрения спора, на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы ООО «Вавиол» по оплате государственной пошлины по встречному иску в размере 38155 рублей относятся на ООО «Вавиол». 

Руководствуясь статьями 110, 166-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Тыва

РЕШИЛ:

В удовлетворении встречного искового заявления общества с ограниченной ответственностью «ВАВИОЛ» к обществу с ограниченной ответственностью «Метагрупп» о взыскании 3030913 руб. 43 коп., в том числе пени за просрочку исполнения обязательств по договору поставки № 161 от 27.11.2020 за период с 12.05.2021 по 07.02.2022 в сумме 2305131 руб. 20 коп., пени за просрочку исполнения обязательств по договору поставки № 23 от 16.02.2021 за период с 09.07.2021 по 07.02.2022 в размере 725782 руб. 23 коп.; судебных расходов по уплате государственной пошлины в размере 38155 руб.; отказать полностью.

Решение может быть обжаловано в Третий арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия путём подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Республики Тыва. 

 

Судья                                                                                                              Ш.С.Чигжит