Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-315269/24-83-1212

г. Москва

04 марта 2025 г.

Резолютивная часть решения объявлена 27 февраля 2025 года

Полный текст решения изготовлен 04 марта 2025 года

Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Сорокина В.П. (шифр судьи 83-1212), при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Елпаевой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ГБУ "Автомобильные Дороги" (ИНН 

<

***>) к ООО "Полет-К" (ИНН 

<

***>) о взыскании штрафа по контракту № 174/2024-АД от 15.04.2024 в размере 4 800 000 руб.,

при участии:

от истца – не явился, извещен.

от ответчика –  не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился с иском о взыскании с ответчика штрафа по контракту № 174/2024-АД от 15.04.2024 в размере 4 800 000 руб.

Представители сторон в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, в связи с чем, спор рассматривается в отсутствие указанных лиц в порядке ст.ст.123,156 АПК РФ. От истца поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

До вынесения судом решения по делу от истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований, с учетом погашения ответчиком штрафа  на сумму 4 800 000 руб., просит взыскать с ответчика сумму госпошлины в размере 169 000 руб. Ходатайство рассмотрено и удовлетворено в порядке ст.49 АПК РФ.

В отзыве, представленном в материалы дела, ответчик возражает против удовлетворения заявленных требований со ссылкой на погашение штрафа в размере 4 800 000 руб. платежными поручениями № 137 от 03.02.2025; № 138 от 03.02.2025, № 139 от 03.02.2025, № 140 от 03.02.2025, № 141 от 03.02.2025, № 142 от 03.02.2025, № 143 от 03.02.2025, № 144 от 03.02.2025, № 145 от 03.02.2025, №146 от 03.02.2025, № 147 от 03.02.2025, № 148 от 03.02.2025, № 149 от 03.02.2025.

Выслушав представителя истца, исследовав письменные доказательства, суд находит иск подлежащим удовлетворению, по следующим основаниям.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации договоры являются основанием для возникновения гражданских прав и обязанностей.

Пункт 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает приобретение и осуществление юридическими лицами своих гражданских прав своей волей и в своем интересе, гарантирует свободу в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Из материалов дела усматривается, что между ГБУ «Автомобильные дороги» (далее - Заказчик) и 000 «Полет-К» (далее - Подрядчик) заключен Контракт от 15.04.2024г. №174/2024-АД на выполнение работ по благоустройству территорий Центрального административного округа города Москвы и расположенных на них объектах (закупка 1) (далее - Контракт).

В соответствии с п. 1.1. Контракта, Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по благоустройству территорий Центрального административного округа города Москвы и расположенных на них объектах (закупка 1) (далее - работы) в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение ) № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью в задание на выполнение работ, в котором указываются предварительные сведения о границах проведения работ и объемах работ по каждому объекту ремонта) (далее -Техническое задание), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Согласно п. 3.1 Контракта, сроки выполнения работ по Контракту установлены в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Контракта: с 15.04.2024 г. по 15.10.2024 г.

В соответствии с п. 5.1.6 Контракта, Заказчик вправе ссылаться на недостатки работ (также выявленные после окончания срока исполнения Контракта), в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования денежных средств бюджета города Москвы.

В ходе проверки выполнения работ на объекте, находящемся по адресу: Чесменская ул., были выявлены нарушения. В связи с этим, Заказчиком был составлен  Акт  выявленных  нарушений  на  объекте  улично-дорожной  сети программы «Комплексное благоустройство улиц» от 21.05.2024 (далее - Акт) направлен   на   электронный   адрес   Подрядчика   31.05.2024г.   с   указанием обнаруженного нарушения, а именно: нарушения технологии установки бортового камня (отсутствие опалубки, отсутствие щебеночного и бетонного основания):

Согласно п. 2.22.3.7 Технического задания бортовой камень устанавливается Подрядчиком на бетонном основании с присыпкой грунтом с наружной стороны и укреплением бетоном. Уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле не допускаются. В соответствии с п. 2.22.3.10 Технического задания после установки бортового камня для его устойчивости с двух сторон вручную в опалубке Подрядчиком устанавливается бетонная обойма высотой 10 см со стороны тротуара или газона и 7 см со стороны проезжей части.

Однако, Подрядчик нарушил технологию установки бортового камня, тем самым нарушил условия Контракта. На основании ч. 8 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

- отсутствие ограждений места производства работ (отсутствует ограждение у открытого ливневого колодца):

В силу п. 3.6 Технического задания Подрядчик обязан произвести ограждение места выполнения работ временными огораживающими устройствами, а также, если работы производятся в темное время, провести установку осветительного оборудования. Однако, Подрядчик не оградил места выполнения работ временными огораживающими устройствами, чем нарушил условия Контракта.

Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Таким образом, общая сумма штрафных санкций составляет 200 000 руб. 00 коп.

В ходе проверки выполнения работ на объекте, находящемся по адресу: 2-я Фрунзенская улица, были выявлены нарушения. В связи с этим, Заказчиком был составлен Акт выявленных нарушений на объекте улично-дорожной сети программы «Комплексное благоустройство улиц» от 22.07.2024г. (далее - Акт) и направлен на электронный адрес Подрядчика 23.07.2024г. с указанием обнаруженных нарушений, а именно: 

- отсутствуют ограждения зоны складирования строительных материалов:

В соответствии с п. 2.2.8 Постановления Правительства Москвы от 19.05.2015№299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установкивременных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» вподготовительный период до начала основных работ необходимо в соответствии спроектом проведения (производства) работ осуществить мероприятия пообустройству места проведения работ, в том числе оборудовать места дляскладирования почв, грунтов, материалов, отходов строительства и сноса, изделий,конструкций и инвентаря, а также места для установки землеройной и грузоподъемной техники          в            соответствии с          проектом проведения (производства) работ. Однако Подрядчик складировал материалы в не оборудованных для складирования местах и без ограждений, чем нарушил условия Контракта и нормы действующего законодательства.

На основании ч. 8 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

-отсутствуют ограждения в зоне производства работ:

В силу п. 3.6 Технического задания Подрядчик обязан произвести ограждение места выполнения работ временными огораживающими устройствами, а также, если работы производятся в темное время, провести установку осветительного оборудования.

Однако, Подрядчик не оградил места выполнения работ временными огораживающими устройствами, чем нарушил условия Контракта. Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн, рублей.

- не обеспечен безопасный проход пешеходов:

В силу п. 2.2.2 Постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 №299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» в подготовительный период до начала основных работ необходимо в соответствии с проектом проведения (производства) работ осуществить мероприятия по обустройству места проведения работ, в том числе оборудовать и обозначить указателями и знаками пути объезда транспорта и прохода пешеходов (в частности, оборудовать пешеходные галереи, настилы, перила, мостки, обустроенные объезды, дорожные знаки). Оборудованные указатели, знаки пути объезда транспорта и прохода пешеходов (настилы, пешеходные галереи, мостки, перила, обустроенные объезды, дорожные знаки) должны обеспечивать безопасность и содержаться в чистоте.

Однако Подрядчик не оборудовал безопасные пути прохода пешеходов, чем нарушил условия Контракта и нормы действующего законодательства. Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Таким образом, общая сумма штрафных санкций составляет 300 000 руб.00 коп.

В ходе проверки выполнения работ на объекте, находящемся по адресу: 3-я Фрунзенская улица, были выявлены нарушения. В связи с этим, Заказчиком был составлен Акт выявленных нарушений на объекте улично-дорожной сети программы «Комплексное благоустройство улиц» от 08.06.2024г. (далее - Акт) и направлен на электронный адрес Подрядчика 19.06.2024г. с указанием обнаруженных нарушений, а именно:

- складирование материалов на объекте в не оборудованных для складирования местах:

В соответствии с п. 2.2.8 Постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 №299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» в подготовительный период до начала основных работ необходимо в соответствии с проектом проведения (производства) работ осуществить мероприятия по обустройству места проведения работ, в том числе оборудовать места для складирования почв, грунтов, материалов, отходов строительства и сноса, изделий, конструкций и инвентаря, а также места для установки землеройной и грузоподъемной техники в соответствии с проектом проведения (производства) работ.

Однако Подрядчик складировал материалы в не оборудованных для складирования местах, чем нарушил условия Контракта и нормы действующего законодательства. Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

- не обеспечен безопасный проход для пешеходов: В силу п. 2.2.2 Постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 №299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» в подготовительный период до начала основных работ необходимо в соответствии с проектом проведения (производства) работ осуществить мероприятия по обустройству места проведения работ, в том числе оборудовать и обозначить указателями и знаками пути объезда транспорта и прохода пешеходов (в частности, оборудовать пешеходные галереи, настилы, перила, мостки, обустроенные объезды, дорожные знаки). Оборудованные указатели, знаки пути объезда транспорта и прохода пешеходов (настилы, пешеходные галереи, мостки, перила, обустроенные объезды, дорожные знаки) должны обеспечивать безопасность и содержаться в чистоте. Однако Подрядчик не оборудовал безопасные пути прохода пешеходов, чем нарушил условия Контракта и нормы действующего законодательства.

Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

-           нет ограждений в зоне производства работ:

В силу п. 3.6 Технического задания Подрядчик обязан произвести ограждение места выполнения работ временными огораживающими устройствами, а также, если работы производятся в темное время, провести установку осветительного оборудования. Однако, Подрядчик не оградил места выполнения работ временными огораживающими устройствами, чем нарушил условия Контракта. 

Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Таким образом, общая сумма штрафных санкций составляет 300 000 руб. 00 коп.

В ходе проверки выполнения работ на объекте, находящемся по адресу: 3-я Фрунзенская улица, были выявлены нарушения. В связи с этим, Заказчиком был составлен Акт выявленных нарушений на объекте улично-дорожной сети программы «Комплексное благоустройство улиц» от 10.06.2024г. (далее - Акт) и направлен на электронный адрес Подрядчика 10.06.2024г. с указанием обнаруженных нарушений, а именно:

- складирование материалов на объекте в не оборудованных для складирования местах:

В соответствии с п. 2.2.8 Постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 №299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» в подготовительный период до начала основных работ необходимо в соответствии с проектом проведения (производства) работ осуществить мероприятия по обустройству места проведения работ, в том числе оборудовать места для складирования почв, грунтов, материалов, отходов строительства и сноса, изделий, конструкций и инвентаря, а также места для установки землеройной и грузоподъемной техники в соответствии с проектом проведения (производства) работ.

Однако Подрядчик складировал материалы в не оборудованных для складирования местах, чем нарушил условия Контракта и нормы действующего законодательства.

Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

- не обеспечена защита зеленых насаждений:

Согласно п. 9.8. Постановления Правительства Москвы от 10.09.2002 №743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы» при производстве строительных и иных видов работ строительные и другие организации обязаны - при мощении и асфальтировании городских проездов, площадей, дворов, тротуаров и других подобных объектов оставлять вокруг дерева свободные пространства (околоствольное пространство) диаметром не менее 2 м с последующей установкой приствольной (металлической, деревянной, чугунной, железобетонной) решетки или другого покрытия, предотвращающего уплотнение почвы вокруг ствола. Допускается уменьшение свободного пространства вокруг дерева с сохранением площади околоствольного пространства не менее 1 кв. м при условии использования специальных технологических решений по уходу (содержанию) за зелеными насаждениями для обеспечения достаточного питания растений и предотвращения переуплотнения корнеобитаемого слоя (орошение (полив), аэрация, подкормка и прочее). 

Однако, Подрядчик не оградил зеленые насаждения, находящиеся в зоне производства работ, чем нарушил условия Контракта и нормы действующего законодательства. 

Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

- не обеспечен безопасный проход для пешеходов:

В силу п. 2.2.2 Постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 №299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» в подготовительный период до начала основных работ необходимо в соответствии с проектом проведения (производства) работ осуществить мероприятия по обустройству места проведения работ, в том числе оборудовать и обозначить указателями и знаками пути объезда транспорта и прохода пешеходов (в частности, оборудовать пешеходные галереи, настилы, перила, мостки, обустроенные объезды, дорожные знаки). Оборудованные указатели, знаки пути объезда транспорта и прохода пешеходов (настилы, пешеходные галереи, мостки, перила, обустроенные объезды, дорожные знаки) должны обеспечивать безопасность и содержаться в чистоте.

Однако Подрядчик не оборудовал безопасные пути прохода пешеходов, чем нарушил условия Контракта и нормы действующего законодательства. Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

- нет ограждений в зоне производства работ: В силу п. 3.6 Технического задания Подрядчик обязан произвести ограждение места выполнения работ временными огораживающими устройствами, а также, если работы производятся в темное время, провести установку осветительного оборудования.

Однако, Подрядчик не оградил места выполнения работ временными огораживающими устройствами, чем нарушил условия Контракта. 

Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Таким образом, общая сумма штрафных санкций составляет 400 000 руб.00 коп.

В ходе проверки выполнения работ на объекте, находящемся по адресу: 3-я Фрунзенская ул., были выявлены нарушения. В связи с этим, Заказчиком был составлен Акт выявленных нарушений на объекте улично-дорожной сети программы «Комплексное благоустройство улиц» от 18.05.2024 (далее - Акт) и передан представителю Подрядчика нарочно, который содержал выявленные нарушения, а именно:

- не подготовлено основание для установки бордюрного камня:

Согласно п. 2.22.3.7 Технического задания бортовой камень устанавливается Подрядчиком на бетонном основании с присыпной грунтом с наружной стороны и укреплением бетоном. Уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле не допускаются. В соответствии с п. 2.22.3.10 Технического задания после установки бортового камня для его устойчивости с двух сторон вручную в опалубке Подрядчиком устанавливается бетонная обойма высотой 10 см со стороны тротуара или газона и 7 см со стороны проезжей части.

Однако, Подрядчик не подготовил основание для установки бордюрного камня, тем самым нарушил условия Контракта. 

На основании ч. 8 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

- складирование строительных материалов на проезжей части:

В соответствии с п. 2.2.8 Постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 Ы299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» в подготовительный период до начала основных работ необходимо в соответствии с проектом проведения (производства) работ осуществить мероприятия по обустройству места проведения работ, в том числе оборудовать места для складирования почв, грунтов, материалов, отходов строительства и сноса, изделий, конструкций и инвентаря, а также места для установки землеройной и грузоподъемной техники в соответствии с проектом проведения (производства) работ.

Однако Подрядчик складировал строительные материалы не в установленном месте (на проезжей части), чем нарушил условия Контракта и нормы действующего законодательства. 

Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

- не обеспечена защита зеленых насаждений:

Согласно п. 9.8. Постановления Правительства Москвы от 10.09.2002 №743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений сообществ города Москвы» при производстве строительных и иных видов работ строительные и другие организации обязаны - при мощении и асфальтировании городских проездов, площадей, дворов, тротуаров и других подобных объектов оставлять вокруг дерева свободные пространства (околоствольное пространство) диаметром не менее 2 м с последующей установкой приствольной (металлической, деревянной, чугунной, железобетонной) решетки или другого покрытия, предотвращающего уплотнение почвы вокруг ствола. Допускается уменьшение свободного пространства вокруг дерева с сохранением площади околоствольного пространства не менее 1 кв. м при условии использования специальных " технологических решений по уходу (содержанию) за зелеными насаждениями для обеспечения достаточного питания растений и предотвращения переуплотнения корнеобитаемого слоя (орошение (полив), аэрация, подкормка и прочее).

Однако, Подрядчик не оградил зеленые насаждения, находящиеся в зоне производства работ, чем нарушил условия Контракта и нормы действующего законодательства. Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

- не обеспечен безопасный проход для пешеходов: 

В силу п. 2.2.2 Постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 №299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временны объектов в городе Москве» в подготовительный период до начала основных работ необходимо в соответствии с проектом проведения (производства) работ осуществить мероприятия по обустройству места проведения работ, в том числе оборудовать и обозначить указателями и знаками пути объезда транспорта и прохода пешеходов (в частности, оборудовать пешеходные галереи, настилы, перила, мостки, обустроенные объезды, дорожные знаки). Оборудованные указатели, знаки пути объезда транспорта и прохода пешеходов (настилы, пешеходные галереи, мостки, перила, обустроенные объезды, дорожные знаки) должны обеспечивать безопасность и содержаться в чистоте.

Однако Подрядчик не оборудовал безопасные пути прохода пешеходов, чем нарушил условия Контракта и нормы действующего законодательства. Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

- отсутствие ограждений в зоне производства работ:

В силу п. 3.6 Технического задания Подрядчик обязан произвести ограждение места выполнения работ временными огораживающими устройствами, а также, если работы производятся в темное время, провести установку осветительного оборудования. Однако, Подрядчик не оградил места выполнения работ временными огораживающими устройствами, чем нарушил условия Контракта. Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Таким образом, общая сумма штрафных санкций составляет 500 000 руб. 00 коп.

В ходе проверки выполнения работ на объекте, находящемся по адресу: улица Фадеева, были выявлены нарушения. В связи с этим, Заказчиком был составлен Акт выявленных нарушений на объекте улично-дорожной сети программы «Комплексное благоустройство улиц» от 27.05.2024г. (далее - Акт) и передан представителю Подрядчика нарочно, который содержал выявленные нарушения, а именно:

- складирование строительных материалов на проезжей части: 

В соответствии с п. 2.2.8 Постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 №299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» в подготовительный период до начала основных работ необходимо в соответствии с проектом проведения (производства) работ осуществить мероприятия по обустройству места проведения работ, в том числе оборудовать места для складирования почв, грунтов, материалов, отходов строительства и сноса, изделий, конструкций и инвентаря, а также места для установки землеройной и грузоподъемной техники в соответствии с проектом проведения (производства) работ. Однако Подрядчик складировал строительные материалы не в установленном месте (на проезжей части), чем нарушил условия Контракта и нормы действующего законодательства. Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

- не обеспечен безопасный проход для пешеходов: 

В силу п. 2.2.2 Постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 №299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» в подготовительный период до начала основных работ необходимо в соответствии с проектом проведения (производства) работ осуществить мероприятия по обустройству места проведения работ, в том числе оборудовать и обозначить указателями и знаками пути объезда транспорта и прохода пешеходов (в частности, оборудовать пешеходные галереи, настилы, перила, мостки, обустроенные объезды, дорожные знаки). Оборудованные указатели, знаки пути объезда транспорта и прохода пешеходов (настилы, пешеходные галереи, мостки, перила, обустроенные объезды, дорожные знаки) должны обеспечивать безопасность и содержаться в чистоте. Однако Подрядчик не оборудовал безопасные пути прохода пешеходов, чем нарушил условия Контракта и нормы действующего законодательства. Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

- отсутствие ограждений в зоне производства работ:

В силу п. 3.6 Технического задания Подрядчик обязан произвести ограждение места выполнения работ временными огораживающими устройствами, а также, если  работы  производятся  в  темное  время,   провести  установку  осветительного оборудования. Однако, Подрядчик не оградил места выполнения работ временными огораживающими устройствами, чем нарушил условия Контракта. Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

- складирование строительного мусора без ограждения:

В соответствии с п. 2.2.9 Постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 №299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» в подготовительный период до начала основных работ необходимо в соответствии с проектом проведения (производства) работ осуществить мероприятия по обустройству места проведения работ, в том числе установить бункер-накопитель для сбора строительного мусора или выгородить для этих целей специальную площадку, исключающую вынос мусора на прилегающие территории. Однако, Подрядчик складировал строительный мусор без ограждения, чем нарушил условия Контракта и нормы действующего законодательства.

- не обеспечена защита зеленых насаждений:

Согласно п. 9.8. Постановления Правительства Москвы от 10.09.2002 №743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы» при производстве строительных и иных видов работ строительные и другие организации обязаны - при мощении и асфальтировании городских проездов, площадей, дворов, тротуаров и других подобных объектов оставлять вокруг дерева свободные пространства (околоствольное пространство) диаметром не менее 2 м с последующей установкой приствольной (металлической, деревянной, чугунной, железобетонной) решетки или другого покрытия, предотвращающего уплотнение почвы вокруг ствола. Допускается уменьшение свободного пространства вокруг дерева с сохранением площади околоствольного пространства не менее 1 кв. м при условии использования специальных технологических решений по уходу (содержанию) за зелеными насаждениями для обеспечения достаточного питания растений и предотвращения переуплотнения корнеобитаемого слоя (орошение (полив), аэрация, подкормка и прочее). Однако, Подрядчик не оградил зеленые насаждения, находящиеся в зоне производства работ, чем нарушил условия Контракта и нормы действующего законодательства. Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Таким образом, общая сумма штрафных санкций составляет 500 000 руб. 00 коп.

В ходе проверки выполнения работ на объекте, находящемся по адресу: 3-я Фрунзенская ул., были выявлены нарушения. В связи с этим, Заказчиком был составлен Акт выявленных нарушений на объекте улично-дорожной сети программы «Комплексное благоустройство улиц» от 27.05.2024 (далее - Акт) и передан представителю Подрядчика нарочно, который содержал выявленные нарушения, а именно:

- нарушение технологии установки бордюрного камня: 

Согласно п. 2.22.3.7 Технического задания бортовой камень устанавливается Подрядчиком на бетонном основании с присыпкой грунтом с наружной стороны и укреплением бетоном. Уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле не допускаются. В соответствии с п. 2.22.3.10 Технического задания после установки бортового камня для его устойчивости с двух сторон вручную в опалубке Подрядчиком устанавливается бетонная обойма высотой 10 см со стороны тротуара или газона и 7 см со стороны проезжей части. Однако, Подрядчик нарушил технологию установки бордюрного камня, тем самым нарушил условия Контракта. Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

- складирование строительных материалов на проезжей части:

В соответствии с п. 2.2.8 Постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 №299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» в подготовительный период до начала основных работ необходимо в соответствии с проектом   проведения   (производства)   работ   осуществить   мероприятия   по обустройству места проведения работ, в том числе оборудовать места для\ складирования почв, грунтов, материалов, отходов строительства и сноса, изделий, конструкций  и  инвентаря,   а  также  места  для  установки  землеройной   и грузоподъемной техники в соответствии с проектом проведения (производства) работ. Однако Подрядчик складировал строительные материалы не в установленном месте (на проезжей части), чем нарушил условия Контракта и нормы действующего N законодательства. Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

- не обеспечен безопасный проход для пешеходов:

В силу п. 2.2.2 Постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 №299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» в подготовительный период до начала основных работ необходимо в соответствии с проектом проведения (производства) работ осуществить мероприятия по обустройству места проведения работ, в том числе оборудовать и обозначить указателями и знаками пути объезда транспорта и прохода пешеходов (в частности, оборудовать пешеходные галереи, настилы, перила, мостхи, обустроенные объезды, дорожные знаки). Оборудованные указатели, знаки пути объезда транспорта и -прохода пешеходов (настилы, пешеходные галереи, мостки, перила, обустроенные объезды, дорожные знаки) должны обеспечивать безопасность и содержаться в чистоте. Однако Подрядчик не оборудовал безопасные пути прохода пешеходов, чем нарушил условия Контракта и нормы действующего законодательства. Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

- отсутствие ограждений в зоне производства работ:

В силу п. 3.6 Технического задания Подрядчик обязан произвести ограждение места выполнения работ временными огораживающими устройствами, а также, если работы производятся в темное время, провести установку осветительного оборудования. Однако, Подрядчик не оградил места выполнения работ временными огораживающими устройствами, чем нарушил условия Контракта. Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Таким образом, общая сумма штрафных санкций составляет 400 000 руб. 00 коп.

В ходе проверки выполнения работ на объекте, находящемся по адресу: 2-я Фрунзенская ул., были выявлены нарушения. В связи с этим, Заказчиком был составлен  Акт  выявленных  нарушений  на  объекте  улично-дорожной  сети.

В силу п. 3.6 Технического задания Подрядчик обязан произвести ограждени места выполнения работ временными огораживающими устройствами, а также, если работы производятся в темное время, провести установку осветительного оборудования. Однако, Подрядчик не оградил места выполнения работ временными огораживающими устройствами, чем нарушил условия Контракта. Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей

- не обеспечен безопасный проход пешеходов:

В силу п. 2.2.2 Постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 №299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» в подготовительный период до начала основных работ необходимо в соответствии с проектом проведения (производства) работ осуществить мероприятия по обустройству места проведения работ, в том числе оборудовать и обозначить указателями и знаками пути объезда транспорта и прохода пешеходов (в частности, оборудовать пешеходные галереи, настилы, перила, мостки, обустроенные объезды, дорожные знаки). Оборудованные указатели, знаки пути объезда транспорта и прохода пешеходов (настилы, пешеходные галереи, мостки, перила, обустроенные объезды, дорожные знаки) должны обеспечивать безопасность и содержаться в чистоте. Однако Подрядчик не оборудовал безопасные пути прохода пешеходов, чем нарушил условия Контракта и нормы действующего законодательства. Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Таким образом, общая сумма штрафных санкций составляет 400 000 руб. 00 коп.

В ходе проверки выполнения работ на объекте, находящемся по адресу: 1-я Фрунзенская ул., были выявлены нарушения. В связи с этим, Заказчиком был составлен Акт выявленных нарушений на объекте улично-дорожной сети программы «Комплексное благоустройство улиц» от 27.05.2024 (далее - Акт) и передан представителю Подрядчика нарочно, который содержал выявленные нарушения, а именно:

- нарушение технологии установки бордюрного камня:

Согласно п. 2.22.3.7 Технического задания бортовой камень устанавливается Подрядчиком на бетонном основании с присыпкой грунтом с наружной стороны и укреплением бетоном. Уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле не допускаются. В соответствии с п. 2.22.3.10 Технического задания после установки бортового камня для его устойчивости с двух сторон вручную в опалубке Подрядчиком устанавливается бетонная обойма высотой 10 см со стороны тротуара или газона и 7 см со стороны проезжей части. Однако, Подрядчик нарушил технологию производства работ по установке бордюрного камня, тем самым Подрядчик нарушил условия Контракта. Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

- не обеспечена защита зеленых насаждений:

Согласно п. 9.8. Постановления Правительства Москвы от 10.09.2002 №743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы» при производстве строительных и иных видов работ строительные и другие организации обязаны - при мощении и асфальтировании городских проездов, площадей, дворов, тротуаров и других подобных объектов оставлять вокруг дерева свободные пространства (околоствольное пространство) диаметром не менее 2 м с последующей установкой приствольной (металлической, деревянной, чугунной, железобетонной) решетки или другого покрытия, предотвращающего уплотнение почвы вокруг ствола. Допускается уменьшение свободного пространства вокруг дерева с сохранением площади околоствольного пространства не менее 1 кв. м при условии использования специальных технологических решений по уходу (содержанию) за зелеными насаждениями для обеспечения достаточного питания растений и предотвращения переуплотнения корнеобитаемого слоя (орошение (полив), аэрация, подкормка и прочее). Однако, Подрядчик не оградил зеленые насаждения, находящиеся в зоне производства работ, чем нарушил условия Контракта и нормы действующего законодательства. Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

- не ограждена зона проведения работ:

В силу п. 3.6 Технического задания Подрядчик обязан произвести ограждение места выполнения работ временными огораживающими устройствами, а также, если работы производятся в темное время, провести установку осветительного оборудования. Однако, Подрядчик не оградил места выполнения работ временными огораживающими устройствами, чем нарушил условия Контракта. Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Таким образом, общая сумма штрафных санкций составляет 300 000 руб. 00 коп.

В ходе проверки выполнения работ на объекте, находящемся по адресу: улица Фадеева, были выявлены нарушения. В связи с этим, Заказчиком был составлен Акт выявленных   нарушений   на   объекте   улично-дорожной    сети   программы «Комплексное благоустройство улиц» от 21.05.2024 (далее - Акт) и передав представителю Подрядчика нарочно, который содержал выявленные нарушения, а именно:

- не обеспечен безопасный проход пешеходов:

В силу п. 2.2.2 Постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 №299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» в подготовительный период до начала основных работ необходимо в соответствии с проектом проведения (производства) работ осуществить мероприятия по обустройству места проведения работ, в том числе оборудовать и обозначить указателями и знаками пути объезда транспорта и прохода пешеходов (в частности, оборудовать пешеходные галереи, настилы, перила, мостки, обустроенные объезды, дорожные знаки). Оборудованные указатели, знаки пути объезда транспорта к прохода пешеходов (настилы, пешеходные галереи, мостки, перила, обустроенные объезды, дорожные знаки) должны обеспечивать безопасность и содержаться в чистоте. Однако, Подрядчик не оборудовал безопасные пути прохода пешеходов, чем нарушил условия Контракта. Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

- отсутствие ограждения в зоне производства работ:

В силу п. 3.6 Технического задания, Подрядчик обязан произвести ограждение места выполнения работ временными огораживающими устройствами, а также, если работы производятся в темное время, провести установку осветительного оборудования. Однако, Подрядчик не оградил места выполнения работ временными огораживающими устройствами, чем нарушил условия Контракта. Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренной Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляв 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн, рублей.

- отсутствие ограждений зеленых насаждений. 

Согласно п. 9.8. Постановления Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП «Об утверждении Правил создания содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы) при производстве строительных и иных видов работ строительные и другие организации обязаны - при мощении и асфальтировании городских проездов площадей, дворов, тротуаров и других подобных объектов оставлять вокруг деревьев свободные пространства (околоствольное пространство) диаметром не менее 2м с последующей установкой приствольной (металлической, деревянной, чугунной железобетонной) решетки или другого покрытия, предотвращающего уплотнение почвы вокруг ствола. Допускается уменьшение свободного пространства вокруг дерева с сохранением площади околоствольного пространства не менее 1 кв.м при условии   использования   специальных   технологических   решений   по   уходу (содержанию) за зелеными насаждениями для обеспечения достаточного питания растений и предотвращения переуплотнения корнеобитаемого слоя (орошение (полив), аэрация, подкормка и прочее). Однако, Подрядчик не оградил зеленые насаждения, находящиеся в зоне производства работ, чем нарушил условия Контракта и нормы действующего законодательства. Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Таким образом, общая сумма штрафных санкций составляет 300 000 руб. 00 коп.

В ходе проверки выполнения работ на объекте, находящемся по адресу: улица Фадеева, были выявлены нарушения. В связи с этим, Заказчиком был составлен Акт выявленных нарушений на объекте улично-дорожной сети программы «Комплексное благоустройство улиц» от 10.06.2024г. (далее - Акт) и направлен на электронный адрес Подрядчика 10.06.2024г. с указанием обнаруженных нарушений, а именно:

- складирование строительных материалов на тротуаре:

В соответствии с п. 2.2.8 Постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 №299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» в подготовительный период до начала основных работ необходимо в соответствии с проектом проведения (производства) работ осуществить мероприятия по обустройству места проведения работ, в том числе оборудовать места для складирования почв, грунтов, материалов, отходов строительства и сноса, изделий, конструкций и инвентаря, а также места для установки землеройной и грузоподъемной техники в соответствии с проектом проведения (производства) работ. Однако Подрядчик складировал строительные материалы не в установленном месте (на тротуаре), чем нарушил условия Контракта и нормы действующего законодательства. Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

- отсутствие защитных ограждений по сохранности зеленых насаждений: 

Согласно п. 9.8. Постановления Правительства Москвы от 10.09.2002 №743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы» при производстве строительных и иных видов работ строительные и другие организации обязаны - при мощении и асфальтировании городских проездов, площадей, дворов, тротуаров и других подобных объектов оставлять вокруг дерева свободные пространства (околоствольное пространство) диаметром не менее 2 м с последующей установкой приствольной (металлической, деревянной, чугунной, железобетонной) решетки или другого покрытия, предотвращающего уплотнение почвы вокруг ствола. Допускается уменьшение свободного пространства вокруг дерева с сохранением площади околоствольного пространства не менее 1 кв. м при условии использования специальных технологических решений по уходу (содержанию) за зелеными насаждениями для обеспечения достаточного питания растений и предотвращения переуплотнения корнеобитаемого слоя (орошение (полив), аэрация, подкормка и прочее). Однако, Подрядчик не оградил зеленые насаждения, находящиеся в зоне производства работ, чем нарушил условия Контракта и нормы действующего законодательства. Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

- отсутствие ограждений в зоне производства работ:

В силу п. 3.6 Технического задания Подрядчик обязан произвести ограждение места выполнения работ временными огораживающими устройствами, а также, если работы производятся в темное время, провести установку осветительного оборудования. Однако, Подрядчик не оградил места выполнения работ временными огораживающими устройствами, чем нарушил условия Контракта. Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

- не обеспечен безопасный проход для пешеходов:

В силу п. 2.2.2 Постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 №299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» в подготовительный период до начала основных работ необходимо в соответствии с проектом проведения (производства) работ осуществить мероприятия по обустройству места проведения работ, в том числе оборудовать и обозначить указателями и знаками пути объезда транспорта и прохода пешеходов (в частности, оборудовать пешеходные галереи, настилы, перила, мостки, обустроенные объезды, дорожные знаки). Оборудованные указатели, знаки пути объезда транспорта и прохода пешеходов (настилы, пешеходные галереи, мостки, перила, обустроенные объезды, дорожные знаки) должны обеспечивать безопасность и содержаться в чистоте. Однако Подрядчик не оборудовал безопасные пути прохода пешеходов, чем нарушил условия Контракта и нормы действующего законодательства. Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

- складирование строительного мусора без ограждения:

В соответствии с п. 2.2.9 Постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 №299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» в подготовительный период до начала основных работ необходимо в соответствии с проектом проведения (производства) работ осуществить мероприятия по обустройству места проведения работ, в том числе установить бункер-накопитель для сбора строительного мусора или выгородить для этих целей специальную площадку, исключающую вынос мусора на прилегающие территории. Однако, Подрядчик складировал строительный мусор без ограждения, чем нарушил условия Контракта и нормы действующего законодательства.

Таким образом, общая сумма штрафных санкций составляет 500 000 руб. 00 коп.

В ходе проверки выполнения работ на объекте, находящемся по адресу: 1-я Фрунзенская ул., были выявлены нарушения. В связи с этим, Заказчиком был составлен Акт выявленных нарушений на объекте улично-дорожной сети программы «Комплексное благоустройство улиц» от 04.06.2024 (далее - Акт) и направлен на электронный адрес Подрядчика 14.06.2024 с указанием обнаруженных нарушений, а именно:

- складирование строительного мусора на газоне: 

В соответствии с абз. 6 п. 2.4 Постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 Ы299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» при проведении земляных, ремонтных, аварийно-восстановительных и иных работ запрещено размещать на проезжей части улиц, магистралей, тротуарах и газонах почву, грунты и отходы строительства и сноса, а также проводить их захоронение или сжигание на строительной площадке во время производства и после окончания работ. Однако Подрядчик складировал строительный мусор на газоне, чем нарушил условия Контракта и нормы действующего законодательства. Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

- отсутствуют ограждения в зоне производства работ.

В силу п. 3.6 Технического задания Подрядчик обязан произвести ограждение места выполнения работ временными огораживающими устройствами, а также, если работы производятся в темное время, провести установку осветительного оборудования. Однако, Подрядчик не оградил места выполнения работ временными огораживающими устройствами, чем нарушил условия Контракта. Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

- не обеспечен безопасный проход для пешеходов:

В силу п. 2.2.2 Постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 №299-«Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временны ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» в подготовительный период до начала основных работ необходимо в соответствии с проектом проведения (производства) работ осуществить мероприятия по обустройству места проведения работ, в том числе оборудовать и обозначить указателями и знаками пути объезда транспорта и прохода пешеходов (в частности, оборудовать пешеходные галереи, настилы, перила, мостки, обустроенные объезды, дорожные знаки). Оборудованные указатели, знаки пути объезда транспорта и прохода пешеходов (настилы, пешеходные галереи, мостки, перила, обустроенные объезды, дорожные знаки) должны обеспечивать безопасность и содержаться в чистоте. Однако Подрядчик не оборудовал безопасные пути прохода пешеходов, чем нарушил условия Контракта и нормы действующего законодательства. Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Таким образом, общая сумма штрафных санкций составляет 300 000 руб. 00 коп.

В ходе проверки выполнения работ на объекте, находящемся по адресу: 2-я Фрунзенская ул., были выявлены нарушения. В связи с этим, Заказчиком был составлен Акт выявленных нарушений на объекте улично-дорожной сети программы «Комплексное благоустройство улиц» от 10.06.2024 (далее - Акт) и направлен на электронный адрес Подрядчика 10.06.2024 с указанием обнаруженных нарушений, а именно:

- нет ограждений зеленых насаждений: 

Согласно п. 9.8. Постановления Правительства Москвы от 10.09.2002 №743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы» при производстве строительных и иных видов работ строительные и другие организации обязаны - при мощении и асфальтировании городских проездов, площадей, дворов, тротуаров и других подобных объектов оставлять вокруг дерева свободные пространства (околоствольное пространство) диаметром не менее 2 м с последующей установкой приствольной (металлической, деревянной, чугунной, железобетонной) решетки или другого покрытия, Допускается уменьшение свободного пространства вокруг дерева с сохранением площади околоствольного пространства не менее 1 кв. м при условии использования специальных технологических решений по уходу (содержанию) за зелеными насаждениями для обеспечения достаточного питания растений и предотвращения переуплотнения корнеобитаемого слоя (орошение (полив), аэрация, подкормка и прочее), предотвращающего уплотнение почвы вокруг ствола. Однако, Подрядчик не оградил зеленые насаждения, находящиеся в зоне производства работ, чем нарушил условия Контракта и нормы действующего законодательства. Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

- складирование строительного мусора без ограждения:

В соответствии с п. 2.2.9 Постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 №299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» в подготовительный период до начала основных работ необходимо в соответствии с проектом проведения (производства) работ осуществить мероприятия по обустройству места проведения работ, в том числе установить бункер-накопитель для сбора строительного мусора или выгородить для этих целей специальную площадку, исключающую вынос мусора на прилегающие территории. Однако, Подрядчик складировал строительный мусор без ограждения, чем нарушил условия Контракта и нормы действующего законодательства. Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

- нет ограждений зоны проведения работ:

В силу п. 3.6 Технического задания Подрядчик обязан произвести ограждение выполнения работ временными огораживающими устройствами, а также, если работы производятся в темное время, провести установку осветительного оборудования, ненадлежащего места. Однако, Подрядчик не оградил места выполнения работ временными огораживающими устройствами, чем нарушил условия Контракта. Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

- не обеспечен безопасный проход пешеходов:

В силу п. 2.2.2 Постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 №299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» в подготовительный период до начала основных работ необходимо в соответствии с проектом проведения (производства) работ осуществить мероприятия по обустройству места проведения работ, в том числе оборудовать и обозначить указателями и знаками пути объезда транспорта и прохода пешеходов (в частности, оборудовать пешеходные галереи, исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настилы, перила, мостки, обустроенные объезды, дорожные знаки). Оборудованные указатели, пути объезда транспорта и прохода пешеходов (настилы, пешеходные галереи, мостки, перила, обустроенные объезды, дорожные знаки) должны обеспечивать безопасность и содержаться в чистоте. Однако Подрядчик не оборудовал безопасные пути прохода пешеходов, чем нарушил условия Контракта и нормы действующего законодательства. Согласно п. 7.6.4 Контракта за каждый факт неисполнения ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Таким образом, общая сумма штрафных санкций составляет 400 000 руб. 00 коп.

Общая сумма штрафа составляет 4 800 000 руб. 00 коп.

К моменту рассмотрения спора сумма штрафа ответчиком погашена в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями № 137 от 03.02.2025; № 138 от 03.02.2025, № 139 от 03.02.2025, № 140 от 03.02.2025, № 141 от 03.02.2025, № 142 от 03.02.2025, № 143 от 03.02.2025, № 144 от 03.02.2025, № 145 от 03.02.2025, №146 от 03.02.2025, № 147 от 03.02.2025, № 148 от 03.02.2025, № 149 от 03.02.2025 и истцом уточнены исковые требования.

В силу положений ст.408 ГК РФ надлежащее исполнение прекращает обязательство.

При этом, расходы по госпошлине подлежат взысканию с ответчика в пользу истца, поскольку погашение долга в добровольном порядке произведено ответчиком после обращения истца в суд с исковым заявлением.  

На основании статей 307-309, 314, 329, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации руководствуясь ст. ст. 49, 65, 71, 110, 167, 170, 176, 247 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Заявление ГБУ "Автомобильные Дороги" об уточнении исковых требований – удовлетворить. 

Взыскать с ООО "Полет-К" (ИНН 

<

***>) в пользу ГБУ "Автомобильные Дороги" (ИНН 

<

***>) расходы по оплате государственной пошлины в размере 169 000 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                                     В.П. Сорокин