Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-61803/2019

24 сентября 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  20 сентября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  24 сентября 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Коросташова А.А.

при ведении протокола судебного заседания: ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "Газпром социнвест" (адрес:  Россия 197022, 

<

...>, Литер А, ОГРН:  

<

***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Стройгазмонтаж" (адрес:  Россия 119415, 

<

...>, ОГРН:  

<

***>);

о взыскании неустойки, 

при участии: 

- от истца: ФИО2 (доверенность от 26.09.2018), 

- от ответчика: ФИО3 (доверенность от 27.06.2019), 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром социнвест" (далее – ООО "Газпром социнвест") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью "Стройгазмонтаж" (далее – ООО "Стройгазмонтаж") 2 415 000 руб. 00 коп. неустойки за период с 01.12.2017 по 28.03.2019 в связи с нарушением сроков исполнения обязательства по устранению недостатков.

В судебном заседании представитель исковые требования поддержала в полном объеме, представитель ответчика возражал против удовлетворения иска в заявленном размере, полагая доказанным факт устранения недостатков 06.03.2019.

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителей сторон, арбитражный суд установил следующее. 

Как следует из материалов дела, 20.05.2015 между ООО "Газпром социнвест" (заказчик) и ООО "Стройгазмонтаж" (генподрядчик) заключен договор генерального подряда № 104-47-ДПд-15, в соответствии с которым ООО "Стройгазмонтаж" обязалось в установленный договором срок выполнить строительные и отделочные работы и работы по инженерно-техническому оснащению объекта «Обустройство офисных помещений для размещения подразделений ОАО «Газпром» и дочерних обществ ОАО «Газпром» в г. Санкт-Петербурге по адресу: пл. Победы, д. 2, лит. А (БЦ «Виктория») 2-я очередь (далее - объект).

По условиям пунктов 16.2-16.3, 16.5 договора гарантии качества распространяются на все материалы, оборудование, конструктивные элементы, работы и все составляющие результата работы, выполненной генподрядчиком, на протяжении всего срока гарантийной эксплуатации объекта, составляющего 24 месяца с даты утверждения в установленном порядке Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14).

После утверждения 30.12.2016 приемочной комиссией Акта по форме КС-14 на объекте выявлены недостатки (на 5-м этаже в пом. №№ 534, 537, 535 (2 очередь) имеется деформация дверных полотен (отклонения от плоскости (прогиб) от 3 до 6 мм), препятствующая их нормальной эксплуатации), зафиксированные в составленном с участием представителя  ООО "Стройгазмонтаж" акте от 10.11.2017 № 01-10/11/2017В. 

Подпунктом «е» пункта 19.2 договора предусмотрено, что за задержку устранения брака, дефектов и/или недоделок в выполненных генподрядчиком работах, выявленных в течение гарантийного срока, генподрядчик уплачивает заказчику неустойку в размере 5 000 руб. 00 коп. за каждый день просрочки.

06.03.2019, в том числе с участием сторон  составлен акт об устранении недостатков  (дефектов) результата выполненных работ, из которого следует, что у      ООО "Газпром социнвест" имелись замечания к выполненным работам, направленным на устранение недостатков, зафиксированных в акте  10.11.2017 № 01-10/11/2017В (как указано в акте от 06.03.2019 – при приемке работ выявлены дополнительные замечания, а именно: необходимо заменить ответные планки замков в дверях №№ 537, 534, 535, поскольку последние расточены на больший размер; на внешней стороне двери в помещении № 535 (со стороны коридора)  необходимо закрепить фасонные элемент (правый дверной наличник); необходимо заменить резиновый уплотнительный профиль на дверях в помещении № 534).

Указанные дополнительные недостатки устранены 29.03.2019, что подтверждается представленным  в материалы дела актом.

Оценив в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, а также приняв во внимание доводы и возражения сторон, арбитражный суд признал, что недостатки в работах, зафиксированные в акте от 10.11.2017 № 01-10/11/2017В, надлежащим образом устранены 29.03.2019.

При указанных обстоятельствах истец правомерно на основании положений ст. ст. 309, 310, 330 Гражданского кодекса РФ, условий договора предъявил иск в заявленном размере.

Доводы ответчика со ссылкой на то, что акт от 29.03.2019 свидетельствует об устранении дополнительных недостатков, обнаруженных за пределами гарантийного срока, критически оценены судом, поскольку характер таких недостатков связан с работами, направленным на устранение недостатков, указанных в акте от 10.11.2017.

С учётом изложенного исковые требования доказаны как по праву, так и по размеру. 

Ввиду отсутствия условий, предусмотренных ст. 51 АПК РФ, суд отклонил ходатайство ответчика о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО «Трансстроймеханизация».

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Газпром социнвест" 2 415 000 руб. 00 коп. неустойки, 35 075 руб. 00 коп. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Коросташов А.А.