Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-17645/2021

г. Хабаровск

23 марта 2022 года

Резолютивная часть судебного акта объявлена 10 марта 2022 г.

Арбитражный суд Хабаровского края

в составе судьи Трещевой В.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в заседании суда дело по иску по иску Общества с ограниченной ответственностью «Балтийская строительная компания - Взрывпром» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес:676290, 

<

...>)

к Обществу с ограниченной ответственностью  «Транснефть-Дальний Восток» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 681000, 

<

...>)

о взыскании 9 582 707  руб. 80 коп.

и по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью  «Транснефть-Дальний Восток» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 681000, 

<

...>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Балтийская строительная компания - Взрывпром» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес:676290, 

<

...>)

о взыскании 52 820 455 руб. 43 коп.,

при участии в судебном заседании:

от Общества с ограниченной ответственностью «Балтийская строительная компания - Взрывпром»  – представитель по доверенности  № 11  от 12.01.2021 ФИО2,  

от Общества с ограниченной ответственностью  «Транснефть-Дальний Восток»   – представитель по доверенности № 1 от 11.01.2021 ФИО3,

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Балтийская строительная компания - Взрывпром»  (далее – подрядчик, ООО «БСК-Взрывпром») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к Обществу с ограниченной ответственностью  «Транснефть-Дальний Восток» (далее – заказчик, ООО «Транснефть-Дальний Восток») о взыскании 9 582 707  руб. 80 коп., составляющих задолженность за выполненные работы по контрактам № 1243-31-19 от 30.09.2019, № 1287-31-20 от 16.09.2020, № 593-31-21 от 09.06.2021.

В судебном заседании представитель ООО «БСК-Взрывпром» в порядке статьи 49 АПК РФ уточнил исковые требования и просил взыскать с ООО «Транснефть-Дальний Восток» основной долг в размере 9 103 572 руб. 41 коп., в том числе по контракту № 1243-31-19 от 30.09.2019 «Разработка карьера К-7, Сельгон» в размере 2 947 717 руб. 53 коп.,  по контракту № 1287-31-20 от 16.09.2020 «Разработка карьера К-8, Разъезд № 21» в размере 4 520 966 руб. 40 коп., по контракту № 593-31-21 от 09.06.2021 «Разработка карьера К-10, сопка ФИО4» в размере 1 634 888 руб. 48 коп. 

Суд принял уточнение иска.

Определением от 16.02.2022 принято встречное исковое заявление ООО «Транснефть-Дальний Восток» к ООО «БСК-Взрывпром» о взыскании неосновательного обогащения в размере 52 820 455 руб. 43 коп.

В судебном заседании представитель ООО «БСК-Взрывпром» настаивал на удовлетворении первоначального иска, в удовлетворении встречного иска просил отказать, ссылаясь на не правомерное требование заказчика изменения стоимости выполненных работ.

Представитель ООО «Транснефть-Дальний Восток» настаивал на удовлетворении встречного иска, в иске о взыскании долга просил отказать по доводам, изложенным в отзыве, согласно которым следует, что первоначальная цена по контрактам была определена с использованием Федеральных единичных расценок, в связи с тем, что в ходе исполнения контрактов подрядчик самовольно изменил способ выполнения работ в виде глубины бурения, стоимость подлежащих оплате работ следует определять так же исходя из Федеральных единичных расценок с учетом фактической глубины буровзрывных работ.

В ходе судебного разбирательства суд, рассмотрев материалы дела, выслушав представителей сторон, установил следующие обстоятельства. 

Из материалов дела следует, что 30.09.2019 между Обществом с ограниченной ответственностью  «Транснефть-Дальний Восток» (заказчик ) и Обществом с ограниченной ответственностью «Балтийская строительная компания - Взрывпром» (подрядчик)  заключен контракт на выполнение работ по добыче общераспространенных полезных ископаемых № 1243-31-19 (далее – контракт № 1243-31-19) согласно пункту 2.1. которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в счет контрактной цены работ и услуг по добыче ОПИ в пределах предоставленного заказчиком объекта, в соответствии с контрактом и  техническим проектом на разработку полезных ископаемых.

Согласно пункту 2.2. контракта подрядчик в установленные контрактом сроки и в пределах контрактной цены выполнит на свой риск. Своими силами согласованных заказчиком субподрядных организаций, все работы и услуги в объеме, определенном в пункте 2.1. контракта.

В соответствии с пунктом 3.1 контракта контрактная цена составляет 70 700 000 руб. 00 коп., в том числе НДС по ставке 20%, установленный действующим законодательством Российской Федерации, в сумме 11 783 333  руб. 33 коп.

Контрактная цена сформирована с учетом объемов и сроков выполнения работ, определенных контрактом (пункт 3.2. контракта)

Согласно пункту 3.3. контракта в контрактную цену включены причитающиеся подрядчику вознаграждение и стоимость всех затрат подрядчика, необходимых для выполнения работ и услуг, указанных в пункте 2.1. контракта и выполнения подрядчиком иных обязательств в соответствии с контрактом.

Пунктом 3.4. контракта предусмотрено, что контрактная цена сформирована с учетом всех налогов и сборов, обязанность по уплате которых возникает у подрядчика при исполнении настоящего контракта. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В силу пункта 3.5. контракта размер контрактной цены может быть изменен в ходе исполнения контракта путем заключения дополнительного соглашения.

Оплата выполненных подрядчиком согласно Приложению № 1 «График выполнения работ» и принятых заказчиком работ осуществляется заказчиком при наличии обеспечения контракта в соответствии со статьей 26 контракта (в случае применения антидемпинговых мер, предусмотренных статьей 27 контракта) в течение 45 календарных дней (пятнадцати) рабочих дней, в случае если подрядчик по настоящему контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации относится к субъектам малого и среднего предпринимательства),  следующих за датой получения заказчиком оригинал счета, оформленного подрядчиком на основании акта выполненных работ и счета-фактуры (в случае обязанности подрядчика по выставлению счета-фактуры согласно действующему законодательству Российской федерации). При этом акт о приемке выполненных работ, составленный по форме Приложения №3 к контракту, должен быть принят (подписан) заказчиком (пункт 4.2. контракта).

Работы, предусмотренные контрактом по добыче ОПИ на объекте, должны быть начаты подрядчиком в сроки согласно Приложению 3 «График выполнения работ» и полностью завершены не позднее 30 ноября 2021 года (пункт 5.1 контракта в редакции дополнительного соглашения № 2 от 28.05.2021.

Согласно пункту 4.9 контракта (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 31.10.2019) заказчик при осуществлении платежей по контракту, взамен предоставления безусловной и безотзывной банковской гарантии выполнения условий контракта удерживает из стоимости оплаты каждого этапа работ сумму, эквивалентную 5% стоимости соответствующего этапа работ, в качестве обеспечения исполнения подрядчиком условий контракта.

Возврат денежных средств в соответствии с настоящим пунктом контракта, осуществляется заказчиком в течение 5 календарных дней с момента истечения 60 календарных дней от даты подписания акта сдачи-приемки работ, услуг по последнему этапу работ.  

В соответствии с пунктом 17.1. контракта сдача-приемка выполненных работ за отчетный период  (календарный месяц) осуществляется по акту о приемке выполненных работ (Приложение 3). Акт о приемке выполненных работ за отчетный период подрядчик предоставляет заказчику с сопроводительным письмом  не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным.

В силу пункта 17.2 контракта в течение пяти рабочих дней, следующих за датой получения от подрядчика акта о приемке выполненных работ, заказчик обязан направить подрядчику подписанный акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных подрядчиком работ. В случае получения подрядчиком отказа от приемки выполненных работ, последний обязан в сроки, определенные заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки работ, и повторно направить акт заказчику.

Распределением контрактной цены и графиком объемов работ, являющимся Приложением № 2 к контракту предусмотрено, что стороны согласовали выполнение буровзрывных работ  «разрыхлению скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа от 2 до 4 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов: 5» на карьере «К-7, Сельгон» в количестве 350 000 куб. м. по цене 168,33 руб. без НДС за куб.м. на общую сумму 70 700 000 руб. с учетом НДС. 

Предоставленными в материалы дела актами о приемке выполненных работ, в том числе № 1/К-7 от 30.11.2019 на сумму 7 468 398 руб. 11 коп., № 2/К-7 от 30.12.2019 на сумму 3 910 036 руб. 57 коп., № 3/К-7 от 31.01.2020 на сумму 1 802 208 руб. 31 коп., № 4/К-7 от 28.02.2020 на сумму 7 479 649 руб. 28 коп., № 5/К-7 от 30.06.2020 на сумму 4 972 192 руб. 14 коп., № 6/К-7 от 31.10.2020 на сумму 3 481 603 руб. 06 коп., № 7/К-7 от 30.12.2020 на сумму 3 653 501 руб. 65 коп., № 8/К-7 от 30.01.2021 на сумму 1 872 300 руб. 92 коп., № 9/К-7 от 28.02.2021 на сумму 2 983 884 руб. 91 коп., № 10/К-7 от 30.03.2021 на сумму 11 879 788 руб. 75 коп., № 11/К-7 от 30.06.2021 на сумму 3 102 860 руб. 56 коп., подтверждается, что в период с  ноября 2019 года по июнь 2020 года подрядчик сдал, а заказчик принял работы по контракту № 1243-31-19 от 30.09.2019 на сумму  52 606 424 руб. 26 коп. 

Платежными поручениями № 217934 от 09.01.2020 на сумму 7 094 978 руб. 20 коп., № 221453 от 04.02.2020 на сумму 3 714 534 руб. 74 коп., № 260049 от 16.02.2021 на сумму 3 307 522 руб. 91 коп., № 260063 от 02.03.2021 на сумму 2 418 240 руб. 49 коп., № 263434 от 18.03.2021 на сумму 2 834 690 руб. 66 коп.,  № 225488 от 17.03.2020 на сумму 1 712 097 руб. 89 коп., № 225489 от 17.03.2020 на сумму 7 105 666 руб. 82 коп., № 266343 от 15.04.2021 на сумму 11 285 799 руб. 31 коп., № 260064 от 02.03.2021 на сумму 1 778 685 руб. 87 коп., № 237144 от 16.07.2020 на сумму 4 723 582 руб. 53 коп., № 260051 от 16.02.2021 на сумму 1 052 586 руб. 08 коп., подтверждается оплата стоимости выполненных работ по контракту на сумму 47 028 385 руб. 50 коп.    

16.09.2020 между Обществом с ограниченной ответственностью  «Транснефть-Дальний Восток» (заказчик ) и Обществом с ограниченной ответственностью «Балтийская строительная компания - Взрывпром» (подрядчик)  заключен контракт на выполнение работ по добыче общераспространенных полезных ископаемых № 1287-31-20 (далее – контракт №1287-31-20) согласно пункту 2.1. которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в счет контрактной цены работ и услуг по добыче ОПИ в пределах предоставленного заказчиком объекта, в соответствии с контрактом и  техническим проектом на разработку полезных ископаемых.

Согласно пункту 2.2. контракта подрядчик в установленные контрактом сроки и в пределах контрактной цены выполнит на свой риск. Своими силами согласованных заказчиком субподрядных организаций, все работы и услуги в объеме, определенном в пункте 2.1. контракта.

В соответствии с пунктом 2.1 контракта цена составляет 40 000 000 руб. 00 коп., кроме того НДС по ставке 20%, установленный действующим законодательством Российской Федерации, в сумме 8 000 000 руб. 00 коп..

Контрактная цена сформирована с учетом объемов и сроков выполнения работ, определенных контрактом (пункт 3.2. контракта)

Согласно пункту 3.3. контракта в контрактную цену включены причитающиеся подрядчику вознаграждение и стоимость всех затрат подрядчика, необходимых для выполнения работ и услуг, указанных в пункте 2.1. контракта и выполнения подрядчиком иных обязательств в соответствии с контрактом.

Пунктом 3.4. контракта предусмотрено, что контрактная цена сформирована с учетом всех налогов и сборов, обязанность по уплате которых возникает у подрядчика при исполнении настоящего контракта. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В силу пункта 3.5. контракта размер контрактной цены может быть изменен в ходе исполнения контракта путем заключения дополнительного соглашения.

Оплата выполненных подрядчиком согласно Приложению № 1 «График выполнения работ» и принятых заказчиком работ осуществляется заказчиком при наличии обеспечения контракта в соответствии со статьей 26 контракта (в случае применения антидемпинговых мер, предусмотренных статьей 27 контракта) в течение 45 календарных дней (пятнадцати) рабочих дней, в случае если подрядчик по настоящему контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации относится к субъектам малого и среднего предпринимательства),  следующих за датой получения заказчиком оригинал счета, оформленного подрядчиком на основании акта выполненных работ и счета-фактуры (в случае обязанности подрядчика по выставлению счета-фактуры согласно действующему законодательству Российской федерации). При этом акт о приемке выполненных работ, составленный по форме Приложения №3 к контракту, должен быть принят (подписан) заказчиком (пункт 4.2. контракта).

Согласно пункту 4.9 контракта (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 30.09.2020) заказчик при осуществлении платежей по контракту, взамен предоставления безусловной и безотзывной банковской гарантии выполнения условий контракта удерживает из стоимости оплаты каждого этапа работ сумму, эквивалентную 5% стоимости соответствующего этапа работ, в качестве обеспечения исполнения подрядчиком условий контракта .

Возврат денежных средств в соответствии с настоящим пунктом контракта, осуществляется заказчиком в течение 5 календарных дней с момента истечения 60 календарных дней от даты подписания акта сдачи-приемки работ, услуг по последнему этапу работ.  

В соответствии с пунктом 17.1. контракта сдача-приемка выполненных работ за отчетный период  (календарный месяц) осуществляется по акту о приемке выполненных работ (Приложение 3). Акт о приемке выполненных работ за отчетный период подрядчик предоставляет заказчику с сопроводительным письмом  не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным.

В силу пункта 17.2 контракта в течение пяти рабочих дней, следующих за датой получения от подрядчика акта о приемке выполненных работ, заказчик обязан направить подрядчику подписанный акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных подрядчиком работ. В случае получения подрядчиком отказа от приемки выполненных работ, последний обязан в сроки, определенные заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки работ, и повторно направить акт заказчику.

Распределением контрактной цены и графиком объемов работ, являющимся Приложением № к контракту предусмотрено, что стороны согласовали выполнение буровзрывных работ  «разрыхлению скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа от 2 до 4 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов: 5» на карьере «К-8, Разъезд № 21» в количестве 250 000 куб. м. по цене 160,00 руб. без НДС за куб.м. на общую сумму 48 000 000 руб. с учетом НДС. 

Предоставленными в материалы дела актами о приемке выполненных работ, в том числе № 1/К-8 от 31.10.2020 на сумму 1 919 616 руб. 00 коп., № 2/К-8 от 30.11.2020 на сумму 1 663 680 руб. 00 коп., № 3/К-8 от 28.02.2021 на сумму 5 041 344 руб. 00 коп., № 4/К-8 от 30.03.2021 на сумму 2 307 456 руб. 00 коп., № 5/К-8 от 30.04.2021 на сумму 8 049 408 руб. 00 коп., № 6/К-8 от 31.05.2021 на сумму 5 801 856 руб. 00 коп., № 7/К-8 от 30.06.2021 на сумму 4 758 912 руб. 00 коп., подтверждается, что в период с октября 2020 года по июнь 2021 года подрядчик сдал, а заказчик принял работы по контракту № 1287-31-20 от 16.09.2020 на сумму 29 542 272 руб. 00 коп. 

Платежными поручениями №260068 от 02.03.2021 на сумму 1 580 496 руб. 00 коп., № 269231 от 20.05.2021 на сумму 7 244 467 руб. 20 коп., № 266347 от 15.04.2021 на сумму 2 192 083 руб. 20 коп., № 253829 от 17.12.2020 на сумму 1 823 635 руб. 20 коп., № 263583 от 23.03.2021 на сумму 4 789 276 руб. 80 коп., № 271886 от 01.07.2021 на сумму 5 221 670 руб. 40 коп., № 277031 от 20.07.2021 на сумму 402 470 руб. 40 коп., № 277032 от 20.07.2021 на сумму 290 092 руб. 80 коп. подтверждается оплата стоимости выполненных работ по спорному контракту на сумму 23 544 192 руб. 00 коп.  

26.05.2021 между Обществом с ограниченной ответственностью  «Транснефть-Дальний Восток» (заказчик ) и Обществом с ограниченной ответственностью «Балтийская строительная компания - Взрывпром» (подрядчик)  заключен контракт на выполнение работ по добыче общераспространенных полезных ископаемых № 593-31-21 (далее – контракт №593-31-21) согласно пункту 2.1. которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в счет контрактной цены работ и услуг по добыче ОПИ в пределах предоставленного заказчиком объекта, в соответствии с контрактом и  техническим проектом на разработку полезных ископаемых.

Согласно пункту 2.2. контракта подрядчик в установленные контрактом сроки и в пределах контрактной цены выполнит на свой риск. Своими силами согласованных заказчиком субподрядных организаций, все работы и услуги в объеме, определенном в пункте 2.1. контракта.

В соответствии с пунктом 3.1 контракта цена составляет 24 459 200 руб. 00 коп., кроме того НДС по ставке 20%, установленный действующим законодательством Российской Федерации, в сумме 4 891 840 руб. 00 коп..

Контрактная цена сформирована с учетом объемов и сроков выполнения работ, определенных контрактом (пункт 3.2. контракта)

Согласно пункту 3.3. контракта в контрактную цену включены причитающиеся подрядчику вознаграждение и стоимость всех затрат подрядчика, необходимых для выполнения работ и услуг, указанных в пункте 2.1. контракта и выполнения подрядчиком иных обязательств в соответствии с контрактом.

Пунктом 3.4. контракта предусмотрено, что контрактная цена сформирована с учетом всех налогов и сборов, обязанность по уплате которых возникает у подрядчика при исполнении настоящего контракта. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В силу пункта 3.5. контракта размер контрактной цены может быть изменен в ходе исполнения контракта путем заключения дополнительного соглашения.

Оплата выполненных подрядчиком согласно Приложению № 1 «График выполнения работ» и принятых заказчиком работ осуществляется заказчиком при наличии обеспечения контракта в соответствии со статьей 26 контракта (в случае применения антидемпинговых мер, предусмотренных статьей 27 контракта) в течение 45 календарных дней (пятнадцати) рабочих дней, в случае если подрядчик по настоящему контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации относится к субъектам малого и среднего предпринимательства),  следующих за датой получения заказчиком оригинал счета, оформленного подрядчиком на основании акта выполненных работ и счета-фактуры (в случае обязанности подрядчика по выставлению счета-фактуры согласно действующему законодательству Российской федерации). При этом акт о приемке выполненных работ, составленный по форме Приложения №3 к контракту, должен быть принят (подписан) заказчиком (пункт 4.2. контракта).

Согласно пункту 4.9 контракта (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 09.06.2021) заказчик при осуществлении платежей по контракту, взамен предоставления безусловной и безотзывной банковской гарантии выполнения условий контракта удерживает из стоимости оплаты каждого этапа работ сумму, эквивалентную 5% стоимости соответствующего этапа работ, в качестве обеспечения исполнения подрядчиком условий контракта .

Возврат денежных средств в соответствии с настоящим пунктом контракта, осуществляется заказчиком в течение 5 календарных дней с момента истечения 60 календарных дней от даты подписания акта сдачи-приемки работ, услуг по последнему этапу работ.  

В соответствии с пунктом 17.1. контракта сдача-приемка выполненных работ за отчетный период  (календарный месяц) осуществляется по акту о приемке выполненных работ (Приложение 3). Акт о приемке выполненных работ за отчетный период подрядчик предоставляет заказчику с сопроводительным письмом  не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным.

В силу пункта 17.2 контракта в течение пяти рабочих дней, следующих за датой получения от подрядчика акта о приемке выполненных работ, заказчик обязан направить подрядчику подписанный акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных подрядчиком работ. В случае получения подрядчиком отказа от приемки выполненных работ, последний обязан в сроки, определенные заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки работ, и повторно направить акт заказчику.

Распределением контрактной цены и графиком объемов работ, являющимся Приложением № 2 к контракту предусмотрено, что стороны согласовали выполнение буровзрывных работ  «разрыхлению скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа от 2 до 4 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов: 5» на карьере «К-10, Сопка ФИО4» в количестве 150 000 куб. м. по цене 163,06 руб. без НДС за куб.м. на общую сумму 29 351 040 руб. с учетом НДС. 

Предоставленным в материалы дела актом о приемке выполненных работ № 1/К-10 от 30.06.2021 подтверждается, что подрядчик сдал, а заказчик принял работы по контракту № 593-31-21 от 26.05.2021 на сумму 1 720 935 руб. 24 коп.

Из материалов дела так же следует, что 06.07.2021 исх. № 920 подрядчик направил в адрес заказчик акты о приемке выполненных работ по контрактам № 7/К-8 от 30.06.2021 на сумму 4 785 912 руб. 00 коп. по контракту № 1287-31-20 от 16.09.2020,  № 11/К-7 от 30.06.2021 на сумму 3 102 860 руб. 56 коп. по контракту № 1243-31-19 от 30.09.2021 и № 1/К10 от 30.06.2021 на сумму1 720 935 руб. 24 коп. по контракту № 593-31-21 от 26.05.2021, просил подписать указанные акты,  скрепить печатью, и второй экземпляр направить в адрес подрядчика.

02.09.2021 исх. № 1213 направил в адрес заказчик письмо, в котором указал, что до настоящего времени заказчик, в силу условий контрактов, не направил подрядчику подписанный акт либо мотивированный отказ от приемки выполненных подрядчиком работ. В связи с чем просил погасить задолженность за выполненные работы в размере 9 582 707 руб. 80 коп.

06.09.2021 исх. № ТДВ/49-17/15743 заказчик сообщил, что в июне 2021 письмом № ТДВ/49-17/10621 ООО «Транснефть-Дальний Восток» были запрошены подтверждающие документы и информация по фактическим затратам ООО «БСК-Взрывпром» по организации и проведению буровзрывных работ на карьерах № «К7, Сельгон» и «К8, Разъезд № 21».

Предоставленные ООО «БСК-Взрывпром»  от 22.06.2021, от 02.07.2021, от 21.07.2021 ни в одном из писем не были предоставлены копии документов, подтверждающие фактически понесенные затраты. 

Экономические расчеты, подписанные инженером ООО «БСК-Взрывпром» такими документами не являются.

В соответствии с пунктом 15.2 контрактов на разработку карьеров заказчик имеет право требовать от подрядчика предоставления дополнительной документации к актам о приемке выполненных работ, а подрядчик обязан предоставить документацию, требуемую заказчиком.

В связи с тем, что ООО «БСК-Взрывпром» так и не предоставлены копии отчетных документов по затратам организации, с июня 2021 года акты о приемке выполненных работ заказчиком не принимаются и оплата за выполненные работы не производится.

Оплата выполненных в июне и августе 2021 года буровзрывных работ будет произведена после предоставления всей необходимой документации и обоснования фактической стоимости выполненных работ.

20.09.2021 исх. № 1299 подрядчик сообщил, что требование о предоставлении документов  и информации по фактическим затратам ООО «БСК-Взрывпром» не соответствует условиям контракта; целью запроса документов, подтверждающих фактические затраты является снижение стоимости буровзрывных работ; в силу пункта 3.5. контрактов размер контрактной цены может быть изменен путем заключения дополнительного соглашения;  снижение стоимости буровзрывных работ для подрядчика не приемлемо, поскольку цена работ были снижена по результатам торгов.

В связи с чем, подрядчик указал, что в силу пункта 17.2. контракта работы считаются принятыми и подлежат оплате.

Поскольку работы, указанные в актах № 7/К-8 от 30.06.2021 на сумму 4 785 912 руб. 00 коп.,  № 11/К-7 от 30.06.2021 на сумму 3 102 860 руб. 56 коп. и № 1/К10 от 30.06.2021 на сумму 1 720 935 руб. 24 коп. не были оплачены в установленном порядке, с учетом 5% гарантийного удержания, подрядчик обратился в суд с настоящим иском (с учетом принятого судом уточнения в порядке статьи 49 АПК РФ).

Заказчик, в свою очередь, ссылаясь на выполнение части буровзрывных работ глубиной от 4 до 15 метров, произвел перерасчет стоимости фактически выполненных работ по контрактам  с применением  федеральных единичных расценок,  обратился с иском к ООО «БСК-Взрывпром» о взыскании неосновательно обогащения в размере 52 820 455 руб. 43 коп., в том числе по контракту № 1243-31-19 от в размере 34 898 828 руб. 73 коп. и по контракту № 1287-31-20 от в размере 17 921 626 руб. 70 коп.

Учитывая представленные доказательства, суд признал первоначальный иск подлежащим удовлетворению, встречный иск не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Правоотношения сторон основаны на обязательствах подряда и регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также общими положениями ГК РФ об обязательствах.

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1 статьи 740 ГК РФ).

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (статьи 711, 746 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в том случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны обоснованными.

Указанная норма означает, что оформленный в таком порядке акт является доказательством исполнения подрядчиком обязательства по договору и при отказе заказчика от оплаты на суд возлагается обязанность рассмотреть доводы заказчика, обосновывающие его отказ от подписания акта приемки результата работ (пункт 14 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», определение Верховного Суда РФ от 17.08.2015 по делу № 308-ЭС15-6751).

В подтверждение факта выполнения спорных работ подрядчик представил в материалы дела акты приемки выполненных работ № 7/К-8 от 30.06.2021 на сумму 4 785 912 руб. 00 коп.,  № 11/К-7 от 30.06.2021 на сумму 3 102 860 руб. 56 коп. и № 1/К10 от 30.06.2021 на сумму 1720 935 руб. 24 коп. Указанные акты подписаны подрядчиком в одностороннем порядке.

Возражая относительно приемки и оплаты, указанных в актах работ, заказчик сослался на следующие обстоятельства.

В процессе выполнения буровзрывных работ на карьерах «К7, Сельгон» и «К8, Разъезд №21» ООО «БСК - Взрывпром» в период с ноября 2019 года по май 2021 года были допущены отклонения от требований технического проекта на разработку карьеров, что является нарушением п.7.2 контрактов на выполнение работ по добыче общераспространённых полезных ископаемых, в соответствии с которым подрядчик обязан обеспечить безусловное исполнение требований Лицензии на пользование недрами и её составных частей, Технического проекта на разработку полезных ископаемых по Объекту, горноотводного акта. Подрядчиком без согласования ООО «Транснефть - Дальний Восток» самостоятельно были изменены параметры проведения буровзрывных работ: 84 % от общего фактического объема взорванной горной массы 423.09 тыс. куб. м. в объеме 355.48 тыс. куб.м. были разрыхлены скважинными зарядами с уменьшенным диаметром скважин, при фактической высоте уступа более 4 метров, что подтверждается соответствующей исполнительной документацией (актами о подтверждении выполненных работ, паспортами взрывных блоков, проектами массового взрыва).

Технические проекты на разработку карьеров были разработаны проектной организацией ООО «Маркспектр» в соответствии с требованиями Министерства природных ресурсов и в установленном порядке согласованы Министерством природных ресурсов Хабаровского края. Неотъемлемой частью технического проекта являются инвесторские локальные и объектные сметные расчеты, которые выполнены на основании действующих федеральных единичных расценок (ФЕР).

На основании проектных сметных расчетов (№02-01-01.3 и №02-01-01.5) ООО «Транснефть - Дальний Восток» был выполнен расчет начальной максимальной цены контракта для проведения закупок на выполнение буровзрывных работ (РБМЦ).

ООО «БСК-Взрывпром» должно было выполнить работы по «разрыхлению скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа от 2 до 4 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов: 5». Стоимость разработки 1 куб. м. при этом составила по контракту №1243-31-19 от 30.09.2019 - 168.33 руб. за 1 куб.м., без НДС, по контракту №1287-31-20 от 16.09.2020 - 160.00 руб. за 1 куб. м. (расчеты контрактной стоимости были выполнены на основании сметных расценок ФЕР 03-02-013-02, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр).

При проведении расчета стоимости фактически выполненных работ с учетом изменения подрядчиком проектных параметров проведения буровзрывных работ (диаметра скважин и глубины бурения) на основании сметных расценок на строительные работы (ФЕР 81-02-03-2001) выявлено, что при «разрыхлении скальных фунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м» (диаметр скважин 150 мм), группа грунтов: 5» (ФЕР 03-02-013-02, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр) стоимость разработки 1 куб.м. должна составлять по контракту №1243-31-19 от 30.09.2019 - 42.41руб. за 1 куб.м., без НДС, по контракту №1287-31-20 от 16.09.2020 - 40.06руб. за 1 куб.м.

Согласно расчету заказчика, сметная стоимость фактически выполненных ООО «БСК «Взрывпром» буровзрывных работ в объеме 260 433 куб.м. при фактической высоте уступа более 4 метров на карьере «К7, Сельгон» (на основании ФЕР)  составляет 17 707 595 руб. 53 коп. вместо 52 606 424 руб. 26 коп., сметная стоимость фактически выполненных ООО «БСК «Взрывпром» буровзрывных работ в объеме  153 866 куб.м. при фактической высоте уступа более 4 метров на карьере «К8, Разъезд №21» (на основании ФЕР) составляет 11 620 645 руб. 30 коп. вместо 29 542 272 руб. 00 коп.

Таким образом, ссылаясь на оплату выполненных работ по завышенной стоимости, а именно, на сумму 52 820 455 руб. 43 коп., заказчик приостановил оплату выполненных работ и обратился с иском о взыскании неосновательного обогащения.

Согласно пункту 1 статьи 424 ГК РФ  исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами местного самоуправления.

 

В силу пункта 2 статьи 424 ГК РФ изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке.

В соответствии с пунктом 1 статьи 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

 Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой (пункт 4 статьи 709 ГК РФ).

Пунктом 6статьи 709 ГК установлено, что подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

Арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, исходя из представленных доказательств; каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статьи 64 (часть 1), 65 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд установил, что стоимость фактически выполненных работ, указанная  актах о приемке выполненных подрядчиком работ,  определена  исходя из согласованных сторонами расценок в Приложениях № 2 к контрактом «Распределение контрактной цены и графика объемов финансирования», а именно, 168, 33 руб. за 1 куб. м. по контракту № 1243-31-19 от 30.09.2019, 160, 00 руб. за 1 куб. м. по контракту № 1287-31-20 от 16.09.2020, 163,06 руб. за 1 куб. м. по контракту № 593-31-21 от 26.05.2021.

Возможности определения стоимости выполненных подрядчиком работ с применением иных расценок, в том числе федеральных единичных расценок, данные приложения, как и условия контракта, не содержат.

Доказательств того, что стороны в установленном законом и контрактом порядке внесли изменения в контракты и Приложение № 2 относительно применения действующих в настоящее время «ФЕР 81-02-03-2001. Федеральные единичные расценки на строительные работы. Сборник 3. Буровзрывные работы», утвержденных Приказом Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр,  заказчик в нарушение статьи 65 АПК РФ в материалы дела не представил.

Таким образом, с учетом установленных обстоятельств, суд пришел к выводу, что заказчик неправомерно отказался от приемки работ по актам № 7/К-8 от 30.06.2021 на сумму 4 785 912 руб. 00 коп.,  № 11/К-7 от 30.06.2021 на сумму 3 102 860 руб. 56 коп. и № 1/К10 от 30.06.2021 на сумму 1 720 935 руб. 24 коп.

В связи с чем требование ООО «БСК-Взрывпром» о взыскании с ООО «Транснфть-Дальний Восток» основного долга за выполненные работы в размере 9 103 572 руб. 41 коп. (с учетом 5% гарантийного удержания) подлежит удовлетворению.

В соответствии со статьей 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ.

Исходя из смысла пункта 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства из неосновательного обогащения возникают при одновременном наличии трех условий: факт приобретения или сбережения имущества, то есть увеличения стоимости собственного имущества приобретателя, присоединение к нему новых ценностей или сохранение того имущества, которое по всем законным основаниям неминуемо должно было выйти из состава его имущества; приобретение или сбережение имущества за счет другого лица, а также отсутствие правовых оснований приобретения или сбережения имущества одним лицом за счет другого.

С учетом установленных обстоятельств, принимая во внимание, что стоимость работ на карьере «К7, Сельгон»  в объеме 260 433 куб.м. по контракту № 1243-31-19 от 30.09.2019 определена в размере 52 606 424 руб. 26 коп. (с НДС) исходя из согласованной расценки 168,33 руб. за 1 куб. м. (без НДС), а на карьере «К8, Разъезд №21» по контракту № 1287-31-20  в объеме 153 866 куб.м. в размере 29 542 272 руб. 00 коп. (с НДС) исходя из согласованной расценки 160,00 руб. за 1 куб.м. (без НДС), неосновательного обогащения на стороне подрядчика не возникло.

Довод заказчика относительно того, что подрядчиком получена сверхприбыль, судом отклоняется, поскольку исходя из буквального содержания спорных контрактов следует, что в них нет условий об обеспечении при выполнении подрядчиком по ним работ прибыли в каком-либо размере. Согласованная сторонами контрактная цена сформирована с учетом объемов и сроков выполнения работ,  указана  в  Приложении № 2 к контрактам, и так же не позволяет определить размер прибыли, а так же размер расходов подрядчика, понесенных при исполнении контрактов. В связи с чем довод заказчика относительно несения расходов подрядчика в меньшем размере, судом так же отклоняется, в виду отсутствия доказательств, подтверждающих данное обстоятельство.

Кроме того, пунктом 1 статьи 720 ГК РФ установлено, что в случаях, когда фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной договором подряда, если заказчик не докажет, что полученная подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ.

Доказательства того, что результат спорных работ по контрактам, а именно, добытые подрядчиком ОПИ, не имеет для заказчика потребительскую ценность, не соответствует требованиям нормативных актов по качеству ввиду экономии подрядчика, заказчик в материалы дела не представил.

В связи с чем ссылка  заказчика на самостоятельное изменение подрядчиком   параметров проведения буровзрывных работ, а именно,  84 % от общего фактического объема взорванной горной массы 423.09 тыс. куб. м. в объеме 355.48 тыс. куб.м., были разрыхлены скважинными зарядами с уменьшенным диаметром скважин, при фактической высоте уступа более 4 метров, что подтверждается соответствующей исполнительной документацией (актами о подтверждении выполненных работ, паспортами взрывных блоков, проектами массового взрыва), судом отклоняется, как не имеющая правового значения для рассмотрения настоящего спора.

Учитывая изложенное, исковые  требования ООО «Транснефть-Дальний Восток» к ООО «БСК-Взрывпром» о взыскании 52 820 455 руб. 43 коп. не подлежат удовлетворению.

Судебные расходы по первоначальному иску по правилам статьи 110 АПК РФ относятся на ответчика по первоначальному иску. Излишне уплаченная госпошлина в сумме 2 396 руб. 00 коп. подлежит возврату истцу из федерального бюджета в силу статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации. Судебные расходы в виде уплаченной истцом госпошлины по встречному иску подлежат отнесению на истца по встречному иску.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Первоначальный иск удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  «Транснефть-Дальний Восток» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Балтийская строительная компания - Взрывпром»  основной долг в размере 9 103 572 руб. 41 коп. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  «Транснефть-Дальний Восток» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Балтийская строительная компания - Взрывпром» судебные расходы в виде уплаченной госпошлины в сумме 68 518 руб. 00 коп.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Балтийская строительная компания - Взрывпром» из федерального бюджета уплаченную госпошлину в сумме 2 396 руб. 00 коп.

В удовлетворении встречного иска отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья                                                                                      В.Н. Трещева