Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-119277/2020

25 мая 2021 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  18 мая 2021 года.

Полный текст решения изготовлен  25 мая 2021 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Виноградовой Л.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гирсовой С.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ООО "ИНЖСПЕЦСТРОЙ"

ответчик: ООО "Геоизол" 

о взыскании 1 097 310,87 руб.

при участии

- от истца: ФИО1 представитель по доверенности от 18.02.2019

- от ответчика: не явился, извещен

установил:

Истец - ООО "ИНЖСПЕЦСТРОЙ" обратился в суд с иском к ответчику - ООО "Геоизол" о взыскании 1 097 310,87 руб. задолженности.

Распоряжением заместителя председателя Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области дело передано в производство судьи Виноградовой Л.В.

В соответствии с п.5 ст. 18 АПК РФ в случае замены судьи, арбитражного заседателя в процессе рассмотрения дела судебное разбирательство должно быть произведено с самого начала. 

В отсутствие возражений сторон и в соответствии со ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса РФ суд завершил слушание в предварительном судебном заседании, и открыл судебное заседание в первой инстанции.

В судебном заседании обозревались оригиналы актов КС-2, КС-3, подписанные истцом и ответчиком.

Ответчик исковые требования не признает по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав пояснения истца, изучив материалы дела, суд установил следующее.

Истец в исковом заявлении указывает, что 21.10.2019 между ООО «Геоизол» (Заказчик) и ООО «ИнжСпецСтрой» (Подрядчик) был заключен Договор подряда №31-19, по которому Подрядчик принял на себя обязательства по выполнению работ по временному выносу тепловой сети из под зоны разработки котлована на территории строящегося Калининградского филиала Нахимовского военно-морского училища по улице Артиллерийской в городе Калининграде, а Заказчик обязательство принять и оплатить выполненные работы

В соответствии с пунктом 4.1 Договора №31-19 цена данного договора составляет 1 108 828,37 руб., из которой стоимость строительно-монтажных работ составляет 1 055 428,37 руб. и денежные средства в размере 53 400,00 руб. составляют платежи МП «Калининградтеплосеть» за слив сетевой воды.

Как установлено пунктом 4.2 Договора №31-19 оплата производится не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента приемки работ. При этом по условиям Договора №31-19 приемка работ осуществляется путем подписания сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

Установленные  Договором  №31-19  работы  были  выполнены  ООО «ИнжСпецСтрой» и приняты ООО «Геоизол», что подтверждается подписанными сторонами Справкой о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 24.04.2020 (форма КС-3) и Актом о приемке выполненных работ №1 от 24.04.2020 (форма КС-2) на сумму 1 043 910,87 руб.

Однако, по настоящее время выполненные ООО «ИнжСпецСтрой» по Договору №31-19 работы ООО «Геоизол» не оплачены.

Задолженность Общества с ограниченной ответственностью «Геоизол» перед ООО «ИнжСпецСтрой» по оплате выполненных по Договору №31-19 работ с учетом платежей МП «Калининградтеплосеть» за слив сетевой воды составляет 1 097 310,87 руб.

ООО «ИнжСпецСтрой» 18.11.2020 обратилось к ООО «Геоизол» с письмом, в котором просило ООО«Геоизол» до 15.12.2020 исполнить обязательство по оплате выполненных по Договору №31-19 работ и погасить вышеуказанную задолженность.

Данное письмо было оставлено ООО «Геоизол» без ответа. Задолженность не была погашена.

Ответчик, возражая против исковых требований указывает, что работы, которые требует оплатить истец, на основании своего искового заявления ответчиком не принимались, ООО «ИнжСпсцСтрой» их ответчику не предъявляло, и соответственно ответчик данные работы не принимал, никакие документы, подтверждающие выполнение и приемку данных работ, не подписывал.

Однако возражения ответчика опровергаются материалами дела, оригиналами актов КС-2, КС-3, представленных истцом на обозрение. Возражения ответчика отклоняются судом.

Истец также просит взыскать с ответчика 80 000,00 руб. в возмещение расходов на оплату юридических услуг.

В соответствии с пунктом 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ, расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

В обоснование заявления представлены договор от 17.11.2020, счет №27ИП от 18.11.2020, платежное поручение.

Расходы произведены, и подлежат возмещению. 

Рассмотрев представленный истцом расчет, принимая во внимание харакетр спора и процессуальное поведения сторон, суд полагает требование о взыскании судебных расходов подлежащим удовлетворению в размере 50 000,00 руб.

Исковые требования подтверждаются материалами дела.

Расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика в полном объеме.

Руководствуясь статьями 110, 112, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с ООО «Геоизол» (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО «ИнжСпецСтрой» (ОГРН 

<

***>) 1 097 310,87 руб. задолженности, 50 000,00 руб. в возмещение расходов на оплату юридических услуг, а также 23 973,00 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Виноградова Л.В.