22/2020-96315(1) 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А51-21358/2019

г. Владивосток

13 июля 2020 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Зайцевой Л.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску администрации  Лесозаводского городского округа (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, дата государственной регистрации: 19.12.1997)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Гиссар Строй» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации:  24.10.2011)  

об устранении недостатков выполненных работ 

 Руководствуясь статьями 110, 167-170, 174, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Гиссар Строй»  безвозмездно, в месячный срок, с момента вступления в законную силу  решения Арбитражного суда Приморского края, устранить недостатки  работ, выполненных по муниципальному контракту от 27.08.2018 № 221,  осуществив следующие работы:  

1) по дворовой территории, расположенной по адресу: г.  

Лесозаводск, ул. Мира, дома 1,2,3: снять асфальтобетонное покрытие  

толщиной слоя 6 см с площади 606,2 м2; снять асфальтобетонное  

покрытие толщиной слоя 4 см с площади 135 м2; устройство  асфальтобетонного покрытия толщиной 6 см на площади 606,2 м2;  устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см на площади 135  м2; ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см на площади 158  м2; замазать стыки между бордюрными камнями, доложить 2 бордюрных  камня; выполнить ремонт стойки карусели (сварочные работы в объеме  сварочный шов 300 мм); выполнить подсыпку территории под детским  игровым комплексом песком в объеме 15 м3; установить одну скамейку  бульварную без спинки; установить уличный тренажер «Лыжник»;  уложить пандус и накладной металлический профиль протяженностью  40 м.;  

2) по дворовой территории, расположенной по адресу:  

<

...>: снять асфальтобетонное покрытие  толщиной слоя 6 см с площади 379,5 м2; устройство асфальтобетонного  покрытия толщиной 6 см на площади 379,5 м2; заменить электрокабель  светильников наружного освещения на (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ  до 1 кВ.;  

3) по дворовой территории, расположенной по адресу: г.  

Лесозаводск, ул. Спортивная, дом 4: снять асфальтобетонное покрытие  

толщиной слоя 4 см с площади 358,2 м2; выполнить вертикальную  

планировку на площади 379,5 м2; устройство асфальтобетонного покрытия  

толщиной 4 см на площади 379,5 м2; демонтировать не соответствующую  

требованиям спортивно-игровую форму «Лиана большая фигурная» 1 шт.;  

установить спортивно-игровую форму «Лиана большая фигурная» 1 шт.;  

установить гимнастический комплекс 1 шт.; уложить пандус пороговый  

резиновый протяженностью 5 м; 

 4) по дворовой территории, расположенной по адресу: г. Лесозаводск,  

ул. Путейская, дом 11: снять асфальтобетонное покрытие толщиной слоя 6  

см с площади 517,2 м2; устройство асфальтобетонного покрытия толщиной  

6 см на площади 517,2 м2; демонтаж бортовых камней протяженностью  232 м; установить бортовой камень протяженностью 232 м.  

Исполнительный лист выдается после вступления решения суда в  законную силу по ходатайству взыскателя.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гиссар  Строй» в доход федерального бюджета 6 000 (шесть тысяч) рублей  государственной пошлины по иску.  

Исполнительный лист на взыскание в федеральный бюджет  государственной пошлины выдать после вступления решения суда в  законную силу.  

 Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд  Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый  арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного  округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения  в законную силу.  

Судья Зайцева Л.В. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 14.06.2019 4:34:13 Кому выдана Зайцева Людмила Васильевна