АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть объявлена 21.11.2018 г.)

Дело № А82-15877/2018

г. Ярославль

20 декабря 2018 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Бессоновой И.Ю. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, помощником судьи Дыбцыной Е.А.

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА КОНСТРАКШН" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

к  Обществу с ограниченной ответственностью "СК  Альпстрой" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

о   взыскании   4054339.94  руб.

при участии:

от истца – ФИО2 – представитель по доверенности от 08.05.2018г.

от ответчика – ФИО3 - представитель по доверенности от 12.02.2018г.

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛЬТА Констракшн" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "СК  Альпстрой" о взыскании 4 054 339 руб. 94 коп., в том числе 1 812 268 руб. 56 коп. пени, предусмотренные п. 7.1 Рамочного соглашения по Договорам № 1,2,3,8,9,4,5,6,19,11,12,13,14,7,15,20,6-Ф, 3-Ф, 4-Ф, 394 071 руб. 38 коп. штраф, установленный п. 7.2 Рамочного соглашения по Договорам № 19, 20, 6-Ф, 1 848 000 руб.штрафы за отсутствие отчетов предусмотренные п. 7.1 Рамочного соглашения по Договорам № 1,2,3,8,9,4,5,10,18,6,19,11,12,13,14,7,15,20,5-Ф, 6-Ф, 3-Ф, 2-Ф, 4-Ф.

Истец в судебном заседании требования поддержал. 

Ответчик представил письменный отзыв на иск, против удовлетворения иска возражал, указал, что просрочка выполнения работ связана с неблагоприятными погодными условиями, считает, что пени следует начислять, исходя из стоимости этапа, сроки по которому нарушены (п. 7.1 рамочного соглашения), считает, что расчет должен производиться из фактической стоимости работ, подлежащих выполнению по каждому договору и выполненных подрядчиком, представил контррасчет пени, согласно которому сумму пени составляет 1?686?376 руб. 65 коп.  С учетом исключения из периода просрочки дней с неблагоприятными погодными условиями сумма неустойки по расчету ответчика составляет 735 223,62 руб. Ответчик оспорил период просрочки по части договоров, указал на неверное определение истцом пенеобразующей суммы. Ответчик возражал против удовлетворения требования о взыскании штрафа, пояснил, что истец в нарушение п. 4.1.4 Рамочного соглашения начислил штрафы за непредставление отчетов, не исходя из количества декад, а исходя из количества объектов, что является ошибочным. По расчету ответчика, максимальная сумма штрафа по Рамочному соглашению составляет 175?000 руб. (из расчета 25 декад), истец не заявлял о необходимости предоставления отчетов, вся необходимая информация предоставлялась истцом оперативно в ходе выполнения работ. Ответчик заявил ходатайство об уменьшении неустойки (штрафа, пени) на основании ст. 333 ГК РФ. Считает, что штраф за расторжение договора применяется за то же нарушение, что и неустойка, имеет место двойная ответственность, просит отказать во взыскании штрафа либо уменьшить сумму штрафа до минимально возможной. Одновременно просит требования о взыскании штрафов оставить без рассмотрения, так как претензия ответчику не направлялась. 

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд установил следующее. 

05.05.2017 г. между обществом с ограниченной ответственностью "Дельта констракшн" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "СК АльпСтрой" /Субподрядчик/ заключено рамочное соглашение к договорам подряда на выполнение работ по капитальному ремонту № ЯрС-2/1-17, согласно п. 1.3 которого Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. Объект, на котором выполняются работы, определяется договором подряда, заключаемым в рамках настоящего соглашения. 

Согласно п. 4.1.4 Соглашения Субподрядчик обязан ежедекадно представлять Подрядчику отчет о выполнении работ на объектах по форме, установленной в Приложении к настоящему Договору, с указанием в разрезе каждого объекта. 

В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, включая срок исполнения его этапа. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается Договором не менее одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа работ, сроки по которому нарушены. Субподрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика (п. 7.1 Рамочного соглашения). 

Согласно п.7.2 Рамочного соглашения в случае расторжения Договора подряда по вине Субподрядчика, по основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением или действующим законодательством Российской Федерации или Ярославской области Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 15% от стоимости соответствующего Договора подряда. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые Субподрядчик обязан будет возместить Подрядчику в качестве причиненных убытков (вреда).

В случае нарушения Субподрядчиком требований пунктов 4.1-4.3 настоящего Соглашения Субподрядчик обязуется уплатить Подрядчику штраф в размере 7?000 руб. за каждое допущенное нарушение (п. 7.4 Рамочного соглашения). 

05.05.2017г. между обществом с ограниченной ответственностью "Дельта Констракшн" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "СК АльпСтрой" /Субподрядчик/ заключен договор подряда №1, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно п. 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями Рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работ (адрес) – 

<

...>. Начало выполнения работ – 05.05.2017, окончание выполнения работ – 05.06.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 2 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 3?258 290 руб. 58 коп., в том числе НДС – 497 027 руб. 38 коп. 

05.05.2017 г. между обществом с ограниченной ответственностью "Дельта Констракшн" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "СК АльпСтрой" /Субподрядчик/ заключен договор подряда №2, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно п. 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями Рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работ (адрес) – 

<

...> Октября д. 10. Начало выполнения работ – 05.05.2017, окончание выполнения работ – 05.06.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 2?321 000 руб. 53 коп., в том числе НДС – 354 050 руб. 93 коп. 

05.05.2017 г. между обществом с ограниченной ответственностью "Дельта Констракшн" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "СК АльпСтрой" /Субподрядчик/ заключен договор подряда №3, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно п. 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями Рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работ (адрес) – 

<

...> Октября д. 16. Начало выполнения работ – 05.05.2017, окончание выполнения работ – 05.06.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 3?569 072 руб. 37 коп., в том числе НДС – 544 434 руб. 77 коп. 

05.05.2017 г. между обществом с ограниченной ответственностью "Дельта Констракшн" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "СК АльпСтрой" /Субподрядчик/ заключен договор подряда №4, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно п. 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями Рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работ (адрес) – 

<

...>. Начало выполнения работ – 05.05.2017, окончание выполнения работ – 05.06.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 2?543 879 руб. 87 коп., в том числе НДС – 388 049 руб. 47 коп. 

05.05.2017 г. между обществом с ограниченной ответственностью "Дельта Констракшн" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "СК АльпСтрой" /Субподрядчик/ заключен договор подряда №5, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно п. 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями Рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работ (адрес) – 

<

...>. Начало выполнения работ – 05.05.2017, окончание выполнения работ – 05.06.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 2?849 525 руб. 36 коп., в том числе НДС – 434 673 руб. 36 коп. 

05.05.2017 г. между обществом с ограниченной ответственностью "Дельта Констракшн" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "СК АльпСтрой" /Субподрядчик/ заключен договор подряда №6, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно п. 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями Рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работ (адрес) – 

<

...>. Начало выполнения работ – 05.05.2017, окончание выполнения работ – 05.06.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 2?148 718 руб. 64 коп., в том числе НДС – 327 770 руб. 64 коп. 

05.05.2017 г. между обществом с ограниченной ответственностью "Дельта Констракшн" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "СК АльпСтрой" /Субподрядчик/ заключен договор подряда №7, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно п. 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями Рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работ (адрес) – 

<

...>. Начало выполнения работ – 05.05.2017, окончание выполнения работ – 05.06.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 2?062 864 руб. 67 коп., в том числе НДС – 314 674 руб. 27 коп. 

26.05.2017 г. между обществом с ограниченной ответственностью "Дельта Констракшн" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "СК АльпСтрой" /Субподрядчик/ заключен договор подряда №8, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно п. 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями Рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работ (адрес) – 

<

...>. Начало выполнения работ – 31.05.2017, окончание выполнения работ – 31.07.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 4?149 960 руб. 88 коп., в том числе НДС – 633 044 руб. 88 коп. 

26.05.2017 г. между обществом с ограниченной ответственностью "Дельта Констракшн" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "СК АльпСтрой" /Субподрядчик/ заключен договор подряда №9, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно п. 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями Рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работ (адрес) – 

<

...>. Начало выполнения работ – 31.05.2017, окончание выполнения работ – 31.07.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 2?149 923 руб. 18 коп., в том числе НДС – 327 954 руб. 38 коп. 

26.05.2017 г. между обществом с ограниченной ответственностью "Дельта Констракшн" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "СК АльпСтрой" /Субподрядчик/ заключен договор подряда №10, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно п. 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями Рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работ (адрес) – 

<

...>. Начало выполнения работ – 31.05.2017, окончание выполнения работ – 31.07.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 4?941 371 руб. 78 коп., в том числе НДС – 753 768 руб. 58 коп. 

26.05.2017 г. между обществом с ограниченной ответственностью "Дельта Констракшн" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "СК АльпСтрой" /Субподрядчик/ заключен договор подряда №11, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно п. 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями Рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работ (адрес) – 

<

...>. Начало выполнения работ – 31.05.2017, окончание выполнения работ – 31.07.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 2?203 337 руб. 54 коп., в том числе НДС – 336 102 руб. 34 коп. 

26.05.2017 г. между обществом с ограниченной ответственностью "Дельта Констракшн" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "СК АльпСтрой" /Субподрядчик/ заключен договор подряда №12, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно п. 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями Рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работ (адрес) – 

<

...>. Начало выполнения работ – 31.05.2017, окончание выполнения работ – 31.07.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 1?856 649 руб. 76 коп., в том числе НДС – 283 217 руб. 76 коп. 

26.05.2017 г. между обществом с ограниченной ответственностью "Дельта Констракшн" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "СК АльпСтрой" /Субподрядчик/ заключен договор подряда №13, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно п. 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями Рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работ (адрес) – 

<

...>. Начало выполнения работ – 31.05.2017, окончание выполнения работ – 31.07.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 850 365 руб. 58 коп., в том числе НДС – 129 716 руб. 78 коп. 

26.05.2017 г. между обществом с ограниченной ответственностью "Дельта Констракшн" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "СК АльпСтрой" /Субподрядчик/ заключен договор подряда №14, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно п. 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями Рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работ (адрес) – 

<

...>. Начало выполнения работ – 31.05.2017, окончание выполнения работ – 31.07.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 3?363 610 руб. 77 коп., в том числе НДС – 513 093 руб. 17 коп. 

26.05.2017 г. между обществом с ограниченной ответственностью "Дельта Констракшн" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "СК АльпСтрой" /Субподрядчик/ заключен договор подряда №15, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно п. 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями Рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работ (адрес) – г. Рыбинск, Сакко и Ванцетти, д. 18. Начало выполнения работ – 31.05.2017, окончание выполнения работ – 31.07.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 1?187 004 руб. 48 коп., в том числе НДС – 181 068 руб. 48 коп. 

15.09.2017 г. между обществом с ограниченной ответственностью "Дельта Констракшн" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "СК АльпСтрой" /Субподрядчик/ заключен договор подряда №18, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно п. 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями Рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работ (адрес) – 

<

...>. Начало выполнения работ – 20.09.2017, окончание выполнения работ – 20.11.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 2?005 843 руб. 20 коп., в том числе НДС – 305 976 руб. 08 коп. 

17.09.2017 г. между обществом с ограниченной ответственностью "Дельта Констракшн" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "СК АльпСтрой" /Субподрядчик/ заключен договор подряда №19, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно п. 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями Рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работ (адрес) – 

<

...>. Начало выполнения работ – 20.11.2017, окончание выполнения работ – 15.12.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 841 848 руб. 82 коп., в том числе НДС – 128 417 руб. 62 коп. 

17.09.2017 г. между обществом с ограниченной ответственностью "Дельта Констракшн" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "СК АльпСтрой" /Субподрядчик/ заключен договор подряда №20, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно п. 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями Рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работ (адрес) – 

<

...>. Начало выполнения работ – 20.11.2017, окончание выполнения работ – 15.12.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 947 552 руб. 27 коп., в том числе НДС – 144 541 руб. 87 коп. 

22.06.2017 г. между обществом с ограниченной ответственностью "Дельта Констракшн" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "СК АльпСтрой" /Субподрядчик/ заключен договор подряда №2-Ф, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно п. 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями Рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работ (адрес) – 

<

...>. Начало выполнения работ – 26.06.2017 г. по 25.09.2016 г. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 25?995 124 руб. 35 коп., в том числе НДС – 3?965 357 руб. 95 коп. 

24.10.2017 г. между обществом с ограниченной ответственностью "Дельта Констракшн" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "СК АльпСтрой" /Субподрядчик/ заключен договор подряда №3-Ф, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно п. 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями Рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работ (адрес) – 

<

...>. Начало выполнения работ – 24.10.2017, окончание выполнения работ – 30.11.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 280 932 руб. 80 коп., в том числе НДС – 42 854 руб. 16 коп. 

01.10.2017 г. между обществом с ограниченной ответственностью "Дельта Констракшн" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "СК АльпСтрой" /Субподрядчик/ заключен договор подряда №5-Ф, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно п. 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями Рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работ (адрес) – 

<

...>. Начало выполнения работ – 01.10.2017, окончание выполнения работ – 01.12.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 809 938 руб. 78 коп., в том числе НДС – 123 549 руб. 98 коп.  

25.10.2017 г. между обществом с ограниченной ответственностью "Дельта Констракшн" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "СК АльпСтрой" /Субподрядчик/ заключен договор подряда №4-Ф, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно п. 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями Рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работ (адрес) – 

<

...>. Начало выполнения работ – 26.10.2017, окончание выполнения работ – 15.12.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 366 780 руб., в том числе НДС – 55 949 руб. 

24.10.2017 г. между обществом с ограниченной ответственностью "Дельта Констракшн" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "СК АльпСтрой" /Субподрядчик/ заключен договор подряда №6-Ф, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно п. 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями Рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работ (адрес) – 

<

...>. Начало выполнения работ – 24.10.2017, окончание выполнения работ – 15.12.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 470 961 руб. 60 коп., в том числе НДС – 71 841 руб. 60 коп. 

Во исполнение условий заключенных договоров субподрядчиком выполнена часть согласованных работ, результат работ сдан истцу, им принят. 

Указывая на просрочку выполнения работ по договорам, на неисполнение части обязательств истец обратился к ответчику с претензиями от 15.12.2017 г. № Н-802, № Н-282 от 17.05.2018г., № Н-424 от 15.06.2018г., просил оплатить неустойку, штрафы, предусмотренные п.п.7.2, 7.4 рамочного соглашения. Претензии направлялись ценными письмами с описью вложения в адрес ответчика, адрес для направления корреспонденции ответчиком не оспорен.

Отсутствие выплаты неустойки послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим исковым заявлением. 

Довод ответчика о необходимости оставления иска без рассмотрения не принимаются судом, так как доказательства направления претензий в материалах дела имеются. Кроме того, суд учитывает, что процедура досудебного урегулирования спора имеется своей целью разрешить имеющиеся противоречия сторон самостоятельно, без обращения в суд, однако при рассмотрении спора стороны не выразили намерение урегулировать спор, ответчик мер к удовлетворению требований истца, заявленных в иске, не предпринял, о намерении их предпринять не заявил. 

Дело подлежит рассмотрению по существу спора.

Изучив материалы дела, суд считает требования истца подлежащими удовлетворению частично по следующим основаниям. 

Статьей 330 Гражданского кодекса РФ предусмотрено право сторон определить в договоре неустойку – денежную сумму, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Согласно п.7.1 Рамочного соглашения в случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, включая срок исполнения его этапа. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается Договором не менее одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа работ, сроки по которому нарушены. 

Из материалов дела следует, что в срок, установленный договорами № 1, 2, 3, 8, 9, 4, 5, 6, 19, 12, 14, 7, 15, 20, 6-Ф, 3-Ф, 4-Ф  работы ответчиком не выполнены, сданы с просрочкой, что ответчиком не оспаривается.  

По договорам № 11, № 13 истец исчисляет неустойку за период с 01.08.2017г. по 18.08.2017г. Ответчик наличие просрочки по данным договорам оспаривает.

Кроме того, ответчиком оспаривается период просрочки, указанный истцом по договору № 7  (с 06.06.2017г. по 18.08.2017г.).

Из искового заявления и пояснений сторон следует, что истец рассчитывает период просрочки с учетом оформления Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а ответчик полагает, что просрочка подлежит исчислению до дат, указанных в актах выполненных работ (КС-2).

В подтверждение доводов ответчиком представлены акты выполненных работ по Договорам № 7, 11,13. Из представленных актов следует, что работы  по Договорам № 13, № 11 выполнены 31.07.2017г., по Договору № 7 – 30.06.2017г. 

Справки о стоимости выполненных работ  и затрат (КС-3) по указанным договорам подписаны сторонами 18.08.2017г.

Учитывая, что по условиям Рамочного соглашения предусмотрена ответственность подрядчика за просрочку исполнения обязательств по договору, а обязательство по выполнению работ, на нарушение которого указывает истец, исполнено ответчиком в момент сдачи результата работ заказчику, просрочка выполнения работ подлежит исчислению до даты подписания сторонами акта выполненных работ на отдельные объемы работ.

В данной части возражения ответчика признаются судом обоснованными. Просрочка выполнения работ по Договорам 11,13 отсутствует, по Договору № 7 составляет 25 дней. 

При наличии установленного факта нарушения договорного обязательства требование о взыскании неустойки является обоснованным, соответствует ст. 330 ГК РФ, п. 7.1 Рамочного соглашения.

По расчету истца сумма неустойки (включая неустойку, начисленную по договорам 11,13,7) составляет 1 812 268,56 руб. 

Ответчик расчет оспорен, представлен контррасчет, согласно которому сумма неустойки составляет 1 683 376 руб. 65 коп.

Оценив расчеты истца и ответчика, суд соглашается с позицией ответчика  об отсутствии  просрочки по договорам № 11, 13, о меньшем периоде просрочки (25 дней) по договору № 7, а также с порядком определения пенеобразующей суммы.

Истец полагает, что неустойка подлежит начислению на сумму указанную в договоре, ответчик считает, что неустойка подлежит начислению только в отношении фактически выполненных с просрочкой работ по договорам.

В данной части суд соглашается с позицией ответчика. Из материалов дела следует, что по указанным истцом объектам объемы и стоимость фактически выполненных работ отличались от стоимости, указанной в договорах. При этом истец не оспаривает, что по данным договорам все работы выполнены в указанные истцом сроки, то есть фактически условия договоров исполнены. Так как субподрядчик несет ответственность за своевременность выполнения именно того объема работ, который является необходимым для исполнения договора, начисление неустойки на сумму договора (включая работы, не требующие выполнения) суд считает необоснованным. Расчет неустойки необходимо производить от стоимости фактически не выполненных в срок работ. 

Проверив расчет истца и ответчика, суд признает верным расчет ответчика, сумма обоснованной неустойки составляет 1 686 376,65 руб.

Ответчик возражает против взыскания неустойки, указывает, что просрочка была связана с неблагоприятными погодными условиями, так как в дождливые дни работы не проводились. В связи с этими обстоятельствами ответчик считает, что количество дней просрочки должно быть уменьшено на количество дней, в которые не проводились работы. 

Доводы ответчика в данной части судом оценены, отклонены. 

Согласно ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. 

Ответчик, ссылаясь на невозможность производства работ в связи с неблагоприятными погодными условиями, не представил в материалы дела доказательств того, что выпадение осадков в определенные даты препятствовало выполнению определенной работы на конкретном объекте. Сведения Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о датах, в которые когда зафиксировано выпадение осадков, свидетельствуют о наличии осадков в момент фиксации 2 раза в сутки (информация от 25.07.2018г.) в городе Ярославле в период с сентября 2017г. по декабрь 2017г., сведениях от 19.09.2017г. содержат информацию о наличии осадков в определенные даты, однако не подтверждают объективную невозможность выполнения подрядчиком работ в полном объеме на конкретных объектах.   

Кроме того, суд учитывает, что данные сведения не свидетельствую о наличии каких-либо чрезвычайных погодных явлений, погодные условия, о которых заявляет ответчик, являются обычными для региона выполнения работ.

Условия освобождения от ответственности указаны в п.7.1 Рамочного соглашения (непреодолимая сила, вина подрядчика). Доказательства наличия данных условий ответчиком не представлено. Доводы в данной части отклонены судом.  

Общая сумма пени, подлежащая взысканию с ответчика, составляет 1?686 376 руб. 65 коп. 

Ответчиком заявлено ходатайство об уменьшении неустойки в связи с ее явной несоразмерностью последствиям нарушения обязательства. 

Согласно п.1 ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. 

По смыслу указанной статьи право на уменьшение неустойки возникает у суда только при наличии явной несоразмерности. 

Каких-либо доказательств чрезмерности неустойки (пени) в обоснованно предъявленной сумме ответчик не представил, процент неустойки, согласованный сторонами в договоре не является завышенным, не превышает обычно применяемый в обороте размер ответственности.

В  сумме 1 686 376,65 руб. пени подлежат взысканию с ответчика.  

Истцом заявлено требование о взыскании штрафа за отсутствие отчетов, предусмотренных п. 7.4 Рамочного соглашения в размере 1 848 000 руб.

Ответчик, возражая против удовлетворения требований, указывает на неверный порядок расчета штрафа, так как истец исчисляет штраф по каждому объекту в отдельности. 

Оценив требования истца и возражения ответчика, суд соглашается с доводами ответчика в части порядка определения штрафа. 

Согласно п. 4.1.4  Рамочного соглашения Субподрядчик обязан представлять Подрядчику Отчет о выполненных работах на объектах (в разрезе каждого объекта) по форме, установленной в Приложении к Договору.

Согласно п.7.4 Рамочного соглашения в случае нарушения субподрядчиком требований пунктов 4.1-4.3 настоящего соглашения субподрядчик обязуется уплатить Подрядчику штраф в размере 7?000 руб. за каждое допущенное нарушение. 

Истец указывает на неисполнение ответчиком договорной обязанности, считает подлежащим уплате штраф в сумме 1 848 000 руб., исчисляя сумму штрафа отдельно по каждому объекту. 

Однако, исходя из пункта 4.1.4 соглашения, обязанностью субподрядчика являлось предоставление ежедекадного отчета по всем объектам, за нарушение данной обязанности предусматривался штраф. 

Согласно условиям договора штрафы подлежат начислению в случае не предоставления одного документа, который предоставляется Субподрядчиком каждую декаду.  

Исходя их максимального количества декад, в период производства работ, ответчик должен был предоставить 22 отчета. 

Так как данная обязанность ответчиком не исполнена, штраф подлежит начислению за каждый случай неисполнения. Обоснованная сумма штрафа составляет 154 000 руб.  

Ответчиком заявлено о несоразмерности штрафа последствиям неисполнения обязательства. 

Оценив размер начисленного штрафа на предмет соразмерности суммы неустойки последствиям нарушения подрядчиком обязательства, учитывая отсутствие у истца неблагоприятных последствий, вызванных нарушением, отсутствие действий истца по истребованию отчетов, проявления иной заинтересованности в их предоставлении, суд считает возможным уменьшить размер неустойки до суммы однократного штрафа в размере 7 000 руб.

В остальной части требования суд отказывает. 

Истец просит взыскать штраф за расторжение договора  по вине субподрядчика, предусмотренный п. 7.2 Рамочного соглашения, по договорам № 20, 6-Ф, 4-Ф, 19.

Ответчик полагает, что данное требование не подлежит удовлетворению, так как указанный штраф является мерой двойной ответственности за одно нарушение.

Из материалов дела следует, что по Договорам № 20, 6-Ф, 4-Ф, 19 работы ответчиком не выполнялись, что ответчиком не оспаривается.

Условиями Рамочного соглашения предусмотрены случаи расторжения договора подряда по вине подрядчика, в том числе  в случае задержки субподрядчиком начала выполнении работ более чем на 5 календарных дней по причинам, независящим от подрядчика или собственников помещений в многоквартирном доме (п. 9.2.2 Рамочного соглашения).

Уведомлением от 15.06.2018г. истец заявил о невыполнении работ субподрядчиком, расторжении договоров в связи с нарушением их условий ответчиком. Основанием для отказа заказчика  от договоров явилось неправомерное поведение субподрядчика.

Условиями рамочного соглашения предусмотрена ответственность за неисполнение условий соглашения (явившегося причиной расторжения договора) в виде взыскания штрафа. 

Доводы ответчика о наличии двойной ответственности за одно нарушение  оценены, отклонены судом. Договорные штраф и пени - это два варианта неустойки как одного вида ответственности. В такой ситуации принцип недопустимости двойной ответственности не нарушается. Фактическое неисполнение обязательства не исключает просрочки в его исполнении.

Учитывая, что штраф предусмотрен в отношении факта расторжения каждого договора, требование истца в данной части является обоснованным.  

По расчету истца сумма штрафа составляет 394 071,38 руб. 

Ответчиком заявлено о несоразмерности указанной неустойки.

Доводы о применении двойной ответственности за одно нарушение, о невозможности взыскания одновременно и пени, и штрафа отклонены судом при рассмотрении вопроса об обоснованности начисления штрафа, однако учитываются при оценке соразмерности суммы неустойки последствиям неисполнения обязательства.

Из исковых требований следует, что по договору № 19 обоснованный размер неустойки (штрафа и пени) составляет 186 841,87 руб., по договору № 5-Ф – 147 417,27 руб. по договору 6-Ф – 73 270,76 руб., по договору 4-Ф – 57 062,48 руб. Общая сумма неустойки  составляет 464 592,38 руб.

Учитывая значительный размер штрафа, а также отсутствие доказательств причинения убытков истцу, в том числе предъявления на дату судебного заседания истцу Заказчиком строительства требований об уплате аналогичной неустойки, суд полагает, что сумма неустойки в заявленном размере является несоразмерной последствиям неисполнения обязательства, считает возможным уменьшить размер неустойки. С учетом общего объема взыскиваемой неустойки, суд читает возможным определить соразмерную неустойку в размере 131 357,13 руб. (1/3 от предъявленной суммы штрафов).

В силу ст. 110 АПК РФ расходы истца по уплате госпошлины по делу относятся на истца и ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  Общества с ограниченной ответственностью «СК  Альпстрой»  (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу  Общества с ограниченной ответственностью «Дельта Констракшн»  (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) 1 686 376 руб. 65 коп. пени, 138 357 руб. 13 коп. штраф, 23848 в возмещение расходов по уплате госпошлины.

В остальной части иска отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

 

Судья

Бессонова И.Ю.